살고싶은 산청 자랑스런 산청인

2014. 01.

= 2014년도 =

주요업무 세부실천계획

건  설  과

Ⅰ. 주요업무 세부실천계획

1. 소규모주민숙원사업	1

2. 도로(군도,농촌도) 확포장사업	2

3. 교량유지 및 기타도로사업	3

4. 위험도로 구조개선사업	4

5. 덕천강 고향의강 조성사업	5

6. 양천생태하천 조성사업	6

7. 하도준설사업(중산지구)	7

8. 소하천 정비사업	8

9. 지방하천 정비사업	9

10. 하천퇴적물 제거사업	10

11. 소하천정비 종합계획수립	11

12. 상정지구 소규모 배수개선사업	12

13. 수리시설 개보수사업	13

14. 재해취약시설 정비사업	14

15. 재해 예․경보시스템구축 및 유지관리	15

16. 산청버스정류소 종합터미널 확장 조성	16

17. 교통안전시설물 교통소통 인프라 구축	17

18. 버스승객대기소 설치 및 정비사업	18

19. 버스승객대기소 태양광 조명등 설치사업	19

Ⅱ. 특수시책

1. 지진 재해 대응 체계 구축	20

1. 소규모주민숙원사업

열악한 농촌마을 환경개선과 주민들의 생활에 지장을 초래하는 시설물에      대하여 소규모주민숙원사업 추진으로 주민의 삶의 질 향상과 생산기반시설     확충으로 주민소득증대를 도모코자 함.

□ 추진방향

◦ 생활환경개선과 생산기반시설 확충으로 소득증대 도모

◦ 생활에 불편을 초래하는 시설물을 개선하여 주민 불편사항 해소

◦ 농업소득 증대와 관련한 사업 추진에 역점

□ 사업개요

구 분	사업량(건)	사업비(백만원)	비고
계	113	4,850
소규모주민숙원(군시행)	19	2,100
소규모주민숙원(읍면시행)	94	2,750

□ 추진계획

◦ 사업대상지 선정(주민협의) : 2013. 12월

◦ 조사측량 및 설계           : 2013. 12월 ～ 2014. 1월

◦ 사업시행 및 준공           : 2014. 2월 ～ 6월

□ 기대효과

◦ 쾌적한 생활환경 조성 및 주민숙원 해소로 삶의 질 향상

◦ 농촌지역개발에 따른 경제 활성화 촉진

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기			4/4 분기
설계 및 사업시행 (20%)	사업마무리 및 준공 (100%)

2. 도로(군도,농촌도)확포장사업

군도 및 농촌도로의 미개량 노선을 확․포장하여 교통소통에 원활을

기하고 지역간 접근성을 향상시켜 주민의 소득증진과 지역 균형 발전에 기여

□ 추진방향

○ 주민 수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 우선 추진 및 우기전 주요공정 마무리로 주민 불편 해소

□ 사업개요

구 분		사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
계		13.58	6,550
군 도 정비사업	군도9호선 법면보강	1.0	1,000
	내수-매곡간도로 확포장	1.8	1,800
	궁소진입도로 확포장	0.85	150
	수월-소둔철간도로 확포장	1.02	1,400
	유평진입도로 정비	0.8	700
농촌도로 정비사업	오휴-왕촌간 도로확포장	1.0	200
	소남진입도로 확포장	0.8	200
	방동진입도로 확포장	1.1	200
	명동진입도로 확포장	0.49	200
	외송-내송간도로 확포장	1.4	100
	갈전-내북간도로 확포장	1.95	200
	수름재진입도로 확포장	0.72	300
	시천301호 삼당도로확포장	0.65	100

□ 그간 추진사항

○ 2014년 1월중 공사시행

□ 추진계획

○ 보상협의 추진 : 2014. 1월~3월

○ 사업착수 : 2014. 2월

○ 사업완료 : 2014. 8월

□ 기대효과

○ 진입도로 확장하여 주민과 차량 통행 불편 해소

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
토지보상협의 및 착공(20%)	노면정지작업및 토공작업(60%)	구조물설치및포장(100%)

3. 교량 유지 및 기타도로사업

관내 노후 교량 정기 유지․관리로 교량 내구성을 유지하고, 군도 및 농촌도로상 시설물 및 비탈면 절개지를 점검․보수하여 안전사고를 미연에 방지코자 함

□  추진방향

○ 노후 교량 보수 및 교량 안전점검 실시로 내구성 유지

○ 도로변 낙석․절개지 등 정비와 도로 유지보수로 안전사고 미연에 방지

○ 어린이보호구역내 교통안전시설물 정비로 교통사고 미연 방지

□  사업개요

사 업 명	사업량	사업비 (백만원)	주요 사업내용	비 고
계	24	1,433
교량관리사업	12	383	교량 정밀점검 및 보수
도로유지관리사업	8	660	도로유지보수,차선도색 등
주민숙원사업	4	390	도로확포장 및 교량재가설

□  그간 추진사항

○ 2014년 1월 : 안전용역 실시 및 실시 설계

□  추진계획

○ 조사측량 및 실시설계 : 2014. 1월

○ 사업착수 : 2014. 2월

○ 사업완료 : 2014. 12월

□  기대효과

○ 교량유지관리로 내구성 유지

○ 위험구간 정비와, 도로유지 관리로 안전사고 사전예방

□  분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
설계 및 착공 (20%)	교량 및도로 유지관리 주민숙원사업 등(60%)	도로유지관리(100%)

4. 위험도로 구조 개선사업

관내 위험 도로를 정비하여 교통 소통에 원활을 기하고 위험요소를 사전 해소하여 주민편익증진 및 안전한 통행로 확보에 기여하고자 함

□ 추진방향

○ 급커브 및 도로 선형불량 등 도로 교통 위험 요인을 해소하여 안전한 통행로 확보

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 일물위험도로 확포장공사

○ 위    치 : 오부면 일물리 일물마을 일원

○ 사 업 량 : 위험도로 개량  L=0.8km

○ 사 업 비 : 250백만원

○ 사업기간 : 2014년 01월 ~ 06월

□ 그간 추진사항

○ 2014년 1월 : 조사측량 및 실시설계

□  추진계획

○ 보상협의 추진 : 2014. 1월~2월

○ 사업착수 : 2014. 3월

○ 사업완료 : 2014. 6월

□ 기대효과

○ 위험도로를 개선하여 교통사고 사전예방 및 주민불편 해소

○ 안전한 통행환경 조성으로 주민편익증진 도모

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
토지보상및착공(30%)	구조물설치 및 포장(100%)

5. 덕천강 고향의강 조성사업

우리군 대표하천인 덕천강을 대상으로 지역의 역사와 문화, 생태기능을 연계하여 어릴적 고향의 정취를 만끽할 수 있는 정감어린 다기능 복합 친수공간으로 조성

□ 추진방향

◦ 2014. 1월~12월 : 토지보상 협의

◦ 2015. 1월 : 사업착수

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 시천면 사리 ~ 삼장면 대포리

◦ 하 천 명 : 덕천강(지방하천)

◦ 사업규모 : L=5.1km

(하도정비,자전거도로,하천환경정비 등)

◦ 사 업 비 : 27,058백만원(국비 16,235 도비 5,412 군비 5,411)

◦ 사업기간 : 2011. 10월 ～ 2017. 12월

□ 추진계획(연차별)                          (단위:백만원)

구분	계	기투자	2013	2014	장래	비고
사업비	27,058	1,027	1,166	3,333	21,532
사업량	L=5.1km	실시설계	실시설계 환경영향검토	보상협의	하도정비 하천환경정비

□ 문제점 및 대책

◦ 하천 주변 지장물 과다로 토지보상협의 애로

◦ 토지소유자와 지속적인 협의 추진

□ 기대효과

◦ 친화적인 하천환경 조성으로 주민여가 생활 증대

◦ 지역명물 대표하천을 조성하여 관광객 유치로 지역소득 증대 기여

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
			편입부지 보상협의

6. 양천생태하천 조성사업

원지소재지 주변에 여가시설과 친수공간을 확보하여 주민생활 만족도 제고 및 레저ㆍ스포츠 시설을 확충하여 주민의 건강과 복지증진에 기여

□ 추진방향

◦ 2014 1월 4차분 시행

◦ 2014. 2월 ~ 12월 하천호안 설치 및 자전거 도로 설치

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 신안면 하정리

◦ 하 천 명 : 양천강(지방하천)

◦ 사업규모 : 고수부지조성 1.5km, 자전거도로 3.0km,

식생매트 715m

◦ 사 업 비 : 6,676백만원(국비 4,006  도비 1,335  군비 1,335)

◦ 사업기간 : 2011. 11월 ～ 2014. 12월

□ 추진계획(연차별)                          (단위:백만원)

구분	계	기투자	2013	2014	장래	비고
사업비	6,676	2,972	2,040	1,676	-
사업량	L=2.7km	교량가설 L=150m	고수부지 1.5km	자전거도로 식생매트

□ 문제점 및 대책

◦ 하천사업 특성상 우기 철 사업 추진 애로 예상

◦ 향후 사업 완료 후 시설물 유지관리 문제 대두

□ 기대효과

◦ 친수공간 제공으로 주민 여가 생활 확충 및 주민복지 증진에 기여

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
공사착공(4차분) 호안정비(30%)			호안정비 식생매트 (60%)			자전거도로(90%)			사업마무리 및 공사준공(100%)

7. 하도준설사업(중산지구)

지방하천의 재해위험 우려가 있는 하천제방 정비와 퇴적물을 준설하여 재해를 사전 예방하고, 쾌적한 하천환경을 조성 하고자 함

□ 사업현황

◦ 사업위치 : 시천면 중산리 시천천 일원

◦ 사업기간 :  2014 .01. ~  2014. 08.

◦ 총사업비 : 2,500백만원(국비 1,500 군비 1,000)

◦ 사업내용 : 하천정비 L=1.0km

◦ 천평지구 L=0.3km, 외공지구 L=0.3km, 내공지구 L=0.2km,

중산지구L=0.2km

□ 추진계획

◦ 현지조사 및 실시설계 완료 : 2014. 1월 ～ 2월

◦ 보상협의 추진 : 2014. 3월

◦ 착공 : 2014. 4월중

◦ 준공 : 2014. 8월중

□ 문제점 및 대책

◦ 하천 미개수 및 하천퇴적으로 인하여 집중호우시 농경지 유실 및 침수피해 발생

◦ 미 개수 지구를 조기에 정비하여 재해예방 및 하천오염 예방

□ 기대효과

◦ 집중호우로 인한 수해피해 예방과 재산 보호

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
실시설계 사업착수(30%)	하천정비(90%)	사업마무리 준공(100%)

8. 소하천 정비사업

미 개수 소하천중 하폭이 협소하고 하천의 오염도가 심한 지구와    토사제방이 낮은 소하천의 재해우려 지구를 정비하여 재해를 사전에 예방하고 쾌적한 생활환경을 제공하고자 함

□ 사업현황

(단위 : 백만원)

소하천현황		2013년 시행			2014년 시행 계획			비 고
개소	연장 (km)	개소	연장 (km)	사업비	개소	연장 (km)	사업비
198	247	1	0.4	1,684	1	0.5	908	신안골천

□ 추진계획

◦ 2차분 시행 : 2014. 01월

◦ 보상협의 추진 : 2014. 1월 ～ 2월

◦ 착공 : 2014. 2월중

◦ 준공 : 2014. 6월중

□ 문제점 및 대책

◦  군도 굴착으로 인한 도로 교통 해소 필요

⇒ 우회도로 개설로 인한 소통 해소후 공사 진행

◦ 편입토지 보상협의 등 다수 민원발생 우려

⇒ 적극적인 대처로 민원해소

□ 기대효과

◦ 농경지 수해피해 사전예방과 재산 보호

◦ 쾌적한 환경정비로 삶의 질 향상

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기			4/4 분기
편입부지보상 공사착공(30%)	사업 마무리 및 준공(100%)

9.지방하천정비사업

관내 지방하천중 무제부 및 기존호안 노후로 인해 수해피해가 자주발생되는 구간에 대하여 지방하천 정비계획에 따라 지방하천을 정비하여 수해피해을 사전 예방하고자 함

□ 사업현황

◦ 사업위치 : 척지천, 상법천 일원

◦ 사업기간 :  2014 .01. ~  2014. 08.

◦ 총사업비 : 400백만원(군비 400)

◦ 사업내용 : 하천정비 L=0.5km

- 척지천 L=0.3km,  상법천L=0.2km

□ 추진계획

◦ 현지조사 및 실시설계 완료 : 2014. 1월 ～ 2월

◦ 보상협의 추진 : 2014. 3월

◦ 착공 : 2014. 3월중

◦ 준공 : 2014. 6월중

□ 문제점 및 대책

◦  자체예산 사업으로 군비확보에 어려움 예상됨

◦ 사업의 필요성 및 시급성을 감안 예산확보 주력

□ 기대효과

◦ 농경지 수해피해 사전예방과 재산 보호

◦ 쾌적한 환경정비로 삶의 질 향상

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
실시설계 사업착수(30%)	사업마무리 준공(100%)

10. 하천퇴적물 제거사업

2013년 집중호우로 인한 하천퇴적물 적치로 하천범람 및 제방 유실

우려가 있어 퇴적물을 제거하여 재해 피해를 예방코자 함.

□ 추진방향

◦ 투자대비 효과를 높이기 위해 장비 임차하여 직영 시행

◦ 수해로 인하여 하상이 숭상된 지역 우선 제거 실시

◦ 퇴적물 제거사업과 병행하여 하도개량(물길 돌리기)사업 실시

□ 사업개요

◦ 사업위치 : 산청군 금서면 화계리

◦ 사업기간 :  2014 .01. 01. ~  2014. 6. 30

◦ 총사업비 : 500백만원

◦ 사업내용 : 하천퇴적물 제거량 100,000㎥(추정)

임천강

□ 추진계획

◦ 재해위험 취약지 조사 후 대상지 선정

◦ 수해복구 공사 성토재 활용 및 저지대 침수지역 성토

□ 문제점 및 대책

◦ 하천퇴적물 제거시 자연석 반출 우려

◦ 지역 주민 감시단을 운영하여 반출 예방

□ 기대효과

◦ 통수 단면 확보로 제방 보호 및 침수 등 수해피해 재발방지

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기			4/4 분기
대상지 조사 및 공사착공(30%)	사업 마무리 및 준공(100%)

11.소하천정비 종합계획수립

산청군관내 소하천 구간에 대하여 소하천의 관리, 이용, 개발・치수경제 및 수질   등 보전에 관련된 사항을 종합적으로 체계 있게 조사 분석하여 당해 소하천에      대한 종합계획을 수립, 향후 소하천정비의 방향이 되는 지침으로 활용함에 있음.

□ 사업현황

(단위 : 백만원)

소하천현황		계	기투자	2014	장래	비 고
개소	연장 (km)	4,900	-	1,500	21,532
198	247	종합계획1식	-	1차분시행	2차분시행 전략환경영향평가

□ 추진계획

◦ 사업수행능력평가 공고 : 2014. 2월 예정

◦ 용역 입찰예정 시기 : 2014. 3월중

◦ 종합계획수립용역  : 2014. 03월. ～ 2017. 2월

◦ 전략환경영향평가 시행 : 2015년분에 반영

◦ 전체용역완료 예정 : 2017. 02월

□ 문제점 및 대책

◦  사업비 부족

⇒ 총괄 발주후 연차 시행

□ 기대효과

◦ 소하천 종합계획 수립으로 인한 체계적인 소하천 관리와 정비

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
사업시행공고	용역착수(70%)		1차분준공(100%)

12. 상정지구 소규모 배수개선사업

상습 침수지역에 대한 배수개선사업으로 침수피해를 예방하여 주민숙원 해소와 적기 안정적 영농조건 확보를 통한 농촌소득증대 도모

□ 추진방향

◦ 농업진흥지역 내 상습침수지역으로 침수예방을 위해 배수장 설치

◦ 재해예방을 위해 폭이 협소한 배수로를 우선 정비하고, 설계용역으로 사업계획을 수립하고 국‧도비를 확보하여 배수장 설치

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 상정 일원

◦ 사 업 량 : 설계용역 1식, 배수로정비 0.4km ※수혜면적 33.0ha

◦ 사 업 비 : 250백만원(총사업비 1,600백만원)

◦ 사업기간 : 2014. 01. ~ 2014. 12.

□ 추진계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자	2014	2015이후	비고
사업비	1,600	-	250	1,350
사업량	배수장 1식	-	설계용역 1식, 배수로 0.4km	배수장 1식

□ 문제점 및 대책

◦ 배수장 설치가 시급한 지역으로 2014년 도비 확보가 불가능하여, 2014년 자체예산으로 설계 후 2015년 국‧도비 지원을 받도록 다각적 노력

□ 기대효과

◦ 침수 등 재해예방과 안정적인 영농기반 조성으로 주민 삶의 질 향상

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계용역 시행 (25%)			사업관련 협의, 배수로정비공사(50%)			사업관련 협의, 국‧도비 지원건의(75%)			예산 확보 노력 (100%)

13. 수리시설 개보수사업

노후 및 손괴로 기능이 저하되어 영농에 지장을 초래하는 용‧배수로나 저수지 등 수리시설을 보수‧보강하여 재해예방 및 적기 영농편의 제공

□ 추진방향

◦ 농로, 하천, 논두렁 등 타 개량사업과 병행하여 사업효율성 제고

◦ 영농에 실익이 되도록 긴급한 시설부터 개‧보수

□ 사업개요

구분	위 치	사업량	사업비(백만원)	사업기간	비고
주상지구	금서면 주상리	용수로개보수 L=0.6km	300	2014. 01. ~ 2014. 06.	국비80%, 도비6%, 군비14%
장위소류지	차황면 장위리	소류지보수 1식	200

□ 추진계획

◦ 2014. 1 ~ 2. : 실시설계 용역

◦ 2014. 2 ~ 3. : 시행계획 수립 및 필요시 보상 협의

◦ 2014. 3 ~ 6. : 개‧보수 공사 시행

□ 문제점 및 대책

◦ 공종이나 현장 여건이 영농기 이전 준공에 애로가 있어, 금년 영농 불편 해소를 위해 설계 및 공사기간 단축을 위한 다각적 노력

□ 기대효과

◦ 재해예방과 안정적인 농업생산기반 구축으로 주민숙원 해소와 소득증대에 기여

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
실시설계, 시행계획수립(50%)			개‧보수공사 시행 (100%)

14. 재해취약시설 정비 사업

재해 발생 우려가 높은 재해위험지구, 급경사지 및 서민 밀집 위험 지역을 정비로 주민의 재산과 생명을 보호하고 안전한 주거 환경 조성

□ 추진방향

◦ 재해 발생 우려가 있는 지역을 정비하여 안전한 환경 조성

◦ 위험 요소 사전 제거를 통한 안전한 주거 생활 기반 마련

□ 사업개요                                (단위 : 백만원)

구 분	지 구	계		2013년		2014년		2014년 이후		비고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계			28,000		2,100		2,600		23,300
재해위험 지구	지리	펌프장 제방	15,000			설계 및 보상	600	펌프장 제방	14,400
급경사지	적벽산	L=850m	10,500	설계 및 보상	600	L=850m	1,000	L=850m	8,900
서민밀집	내리	L=1.0km	2,500	설계 및 보상	1,500	L=1.0km	1,000

□ 추진계획

◦ 재해위험지구(지리지구)

- 2014년 1월 ～ 6월 : 타당성 조사 및 실시설계 용역

- 2014년 6월 ～ 8월 : 편입토지 및 지장물 보상

◦ 급경사지(적벽산지구), 서민밀집(내리지구)

- 2014년 1월 ～ 6월 : 공사 착공 및 우기전 주요 공정 완료

□ 기대효과

◦ 재해 없는 환경 조성으로 주민 정주기반 의식 고취

◦ 사전 위험 요소 제거로 소중한 주민의 재산과 생명 보호

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
설계 및 사업시행 (20%)	사업 진행 (80%)	사업마무리 및 준공 (100%)

15. 재해예․경보시스템구축 및 유지관리

자동기상관측장비 구축 및 재해 예․경보시스템 유지관리 용역으로 산간 계곡 등 재해 취약 지역에 대한 감시와 홍보 강화로 재난 발생 및 기상특보시 신속하게 대응하고 군민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업현황

(단위 : 백만원)

사업명	기투자		2014년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비
계		1,310		112
자동기상관측장비 (AWS) 구매설치	7	210	1	30
음성통보시스템 구매설치	145개소	1,100
재해예경보시스템 유지관리	99개소		․강수량계 및 재해예․ 경보경보시설 : 79개소 ․재난CCTV : 16개소 ․전광판 : 4개소	82

□ 추진계획

《자동기상관측장비 설치》

◦ 2014년 2월 : 진주기상대 기상표준화 현지검증 요청

◦ 2014년 3월 : 설치업체 선정 및 계약 착공

◦ 2014년 6월 : 현지 확인 및 사업 준공

《재해예․경보시스템 유지관리》

◦ 2014년  7월 : 재해예․경보시스템 유지관리용역시행

◦ 2014년 10월 : 재해예․경보시스템 유지관리용역완료

□ 기대효과

◦ 각종 재해 상황 전파 및 정보 제공으로 주민의 생명과 재산 보호

◦ 유관기관 및 마을이장 시스템 사용으로 신속한 재해 대응 및 대처

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
업체 선정 및 계약 사업착수(30%)	자동기상관측장비 설치(60%)	장비 설치 완료 유지보수용역 시행 및 완료(100%)

16. 산청버스정류소 종합터미널 확장 조성사업

❍ 군내‧외 버스 환승 및 택시 등 원활한 교통소통을 위한 종합터미널 건립계획

❍ 시내ㆍ외 버스 및 택시와의 합동터미널로 인한 주정차 교통질서 혼잡 해소를

위한 주차장 확장 조성

□ 사업개요

○ 위    치 :  산청군 산청리 227-1 일원

○ 사 업 량 :  2,899㎡(터미널160, 택시승강장225, 주차장2,514)

○ 사업기간 :  2012 ～ 2014(3년간)

○ 사 업 비

<단위:백만원>

재원별	총사업비		기 투자		2014년계획		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	․ 편입물건 매입 - 16건 ․ 종합터미널 조성: 2,899㎡	4,450	․편입물건 보상 : 5건 ․터미널 건축: 160㎡	2,450	․ 편입물건보상: 11건 ․ 택시승강장: 225㎡ ․ 주차장정비: 2,514㎡	2,000
도비		1,800		1,300		500
군비		2,650		1,150		1,500

□ 그간 추진사항

○ 산청버스정류소 확충방안 계획수립 : 2011. 6월

○ 공유재산관리계획 승인(수정가결) : 2011. 12월

○ 도시계획 변경 및 사업 실시설계 용역 : 2012. 11월

○ 사업착공(건물 3동 510㎡, 주차장 조성 1,737㎡) : 2013. 3월

○ 공유재산관리계획 변경승인(주차장 확장 1,162㎡) : 2013. 5월

○ 터미널 대합실 및 사무실 준공 : 2013. 9월

○ 택시승강장 및 사무실 건립사업 유보조치 : 2013. 10. 29.

□ 추진계획

○ ‘14.  1 ～ 3월 : 2014년 추진사업비 확보

○ ‘14.  3 ～ 5월 : 설계변경 및 보상협의

○ ‘14.  6월    : 공사 착공

○ ‘14. 12월    : 공사 준공

□ 기대효과

○ 현대화된 종합터미널 조성으로 군민 교통편의 제공

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
사업비 확보	설계변경 및 보상협의	사업 착공	사업 준공

17. 교통안전시설물 교통소통 인프라 구축

○ 교통사고 사전예방을 위한 노후화된 교통안전 시설물 정비 및 설치

○ “삼한사랑채”아파트 개발로 인한 교통량 증가 예상지역 교통소통         원활 인프라 구축

□ 사업개요

○ 사 업 명 :  2014 교통안전시설물 설치사업

○ 사 업 량 :  싸이키 경광등 설치사업 외 6개 사업

○ 사 업 비 :  174백만원

□ 추진계획

사 업 명	내 용	수 량	단 가 (천원)	금 액 (백만원)
계	7개 사업			174
싸이키 경광등 설치	교통사고위험지역 태양광LED램프설치	5개소	2,500	13
교통안전표지판 설치 및 교체	군 관내 도로 교통량 증가지역 표시판 설치 및 노후표시판 교체	50개소	200	10
투광기 교체사업	횡단보도 야간통행자 보호 LED 램프설치	30개소	1,300	39
교통안전시설물 유지 보수	교통신호등 10, 경보등 30, 경광등 20, 투광등 20개소	1식	24,000	24
교통신호등 철주교체	교통신호등 철주 교체 공사	2개소	7,500	38
차선도색사업	관내 주요도로 횡단보도ㆍ문자 등 노면표시 전면 재도색	40㎞	610	25
교통약자 교통안전 지원사업	안전모 및 야광지팡이 구입	258명	35	9
교통신호등 무정전 전원장치 설치	교통신호등 무정전 전원장치 설치사업	2개소	8,000	16

□ 기대효과

○ 노약자 등 교통약자의 안전보장을 통한 교통 복지 향상

○ 교통사고 발생우려 증가에 따른 안전한 교통인프라 구축

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
관내 교통시설물 조사 신규․유지 보수	관내 교통시설물 조사 신규․유지 보수(60%)	관내 교통시설물 조사 신규․유지 보수(80%)	관내 교통시설물 조사 신규․유지 보수(100%)

18. 버스승객대기소 설치 및 정비사업

○ 대중교통 이용승객의 편의제공 및 교통사고 예방

○ 주변의 경관과 어울리는 승객대기소 설치와 노후된 시설정비

□ 추진방향

○ 환경정비의 일환으로 통일성 있는 버스 승객대기소 신설 및 정비사업       추진

○ 설치현황

구분	계	산청	차황	오부	생초	금서	삼장	시천	단성	신안	생비량	신등
설 치 동 수	177	21	16	9	9	18	11	17	31	21	11	13

□ 추진계획

○ 기    간 :  2014. 1월 ~ 2014. 12월

○ 추진계획 :  승객대기소 설치 11개소, 보수 23개소

○ 예 산 액 :  125,450천원(신설 99,000, 보수 26,450)

○ 대 상 지 :  읍ㆍ면 조사신청에 의한 우선순위별 선정 시행

□ 기대효과

○ 대중교통 이용객의 편의제공, 교통사고 예방 및 이정표 역할

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
대상지 선정	사업비 교부	사업마무리 및 정리	준공 및 완료(100%)

19. 버스승객대기소 태양광 조명등 설치사업

○ 태양광보안등 조명을 버스승객대기소에 설치 운영함으로써 야간시

간대 통학생 및 이용승객들의 안전 및 범죄예방 효과 거양

□ 추진방향

○ 국도, 지방도, 군도 등 교통통행량이 번번한 지역과 야간시간대 교통사고 발생이 예상되는 지역을 중심으로 설치 추진

○ 설치현황

구분	계	산청	차황	오부	생초	금서	삼장	시천	단성	신안	생비량	신등
설 치 대 상	40	1	-	-	-	5	4	10 (기설치)	12	7 (기설치)	-	1

□ 추진계획

○ 기    간 :  2014. 2월 ~ 2014. 3월

○ 기 설 치 :  17개소(시천 10개소, 신안 7개소)

○ 금회계획 :  23개소(산청읍 외 4개면, 23개소 신설)

○ 예 산 액 :  57,500천원(2,500,000원×23개소)

□ 기대효과

○ 야간시간대 통학생 및 이용승객들의 교통사고 안전 및 야간범죄 예방

○ 야간 승․ 하차 시 승객들의 안전사고 예방

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업 착공 및 준공(100%)

특수시책

1. 지진재해 대응체계 구축

시도 및 중앙과 연계한 지진 통합관리시스템을 구축하여 지진 재해로부터 신속한 피해 추정, 상황 전파 및 긴급 대응 체계를 마련하고 지진 취약 공공시설물 내진보강으로 사전 피해 예방

□ 사업계획                                       (단위 : 백만원)

구 분	계		2014년		2015년		2015년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		4,197		150		292		3,755
지진가속도계측기설치	1식	150	1식	150					기금
시설물 내진보강	58개소	4,047			교량 8개소	292	교량외 50	3,755

□ 추진계획

◦ 2013. 3월 ~ 4월 : 내진보강 공공시설물 조사 및 중기계획 수립

◦ 2014. 3월 ~ 6월 : 지진가속도계측기 설치

◦ 2014년 이후 : 공공시설물 내진 보강 추진

□ 문제점 및 대책

◦ 지진에 대한 위험성 및 인식 부족으로 지진 대응 체계 및 시설물 내진 관리 미흡

◦ 내진보강 대상 시설 과다 및 노후로 내진 보강에 많은 예산 소요

◦ 내진 보강 중기계획에 의거 국도비 예산 확보 및 시설물 관리 부서별 자체 세부 추진계획을 수립하여 내진보강 추진

◦ 지속적인 지진 재해 홍보, 교육으로 주민 및 관리자 인식 제고

□ 기대효과

◦ 지진 재해 대응 체계 구축 및 시설물 내진 성능 강화로 주민의 안전 확보

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기			4/4 분기
업체 선정 및 계약 (30%)	지진가속도계측기 설치(100%)