-2014년도 세부실천 계획-

1. 안심하고 마실 수 있는 물 공급

노후시설 개선과 체계적인 관리를 통하여 보다 나은 상수도 서비스를 제공

함으로써 안심하고 마실 수 있는 맑은 물을 공급하고자 함

□ 사업개요                                    (단위: 백만원)

구 분		사업량	사업비	비 고
계			443
지방상수도	단성정수장 정비	1식	45
	정수장 정밀점검 결과에 따른 시설 정비	4개소	40
	상수도 누수탐사(산청,신안,시천)	3개소	60
	시천정수장 상수원 주변 휀스 설치	1식	50
	상수도 노후 계량기 교체	300개	21
소규모 수도시설	위탁관리	287개소	153
	염소투입기 관리	287개소	59
먹는물 공동시설	약수터 정비	3개소	15

□ 추진계획

◦ 정수장 정밀점검 결과에 따른 시설 정비 : 2014. 01. ～ 06.

◦ 정수장 기술진단 결과에 따른 시설정비  : 2014. 01. ～ 06.

◦ 상수도 누수 탐사(3개소)               : 2014. 03. ～ 06.

◦ 시천정수장 상수원 주변 휀스 설치      : 2014. 03. ～ 06.

◦ 소규모 수도시설 소독약품 및 여과필터 교체 : 매분기

◦ 수질검사 결과 공포 : 매월, 매분기

□ 기대효과

◦ 철저한 수질관리와 시설개선을 통하여 수돗물에 대한 신뢰도 제고

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
10%	10%	10%	15%	15%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	-%
수질검사실시 및 시설정비			수질검사실시, 시설 정비 및 휀스설치			수질검사실시 및 시설정비			수질검사실시

2. 생비량지구 지방상수도 인입공사

우리 군 생비량면 일대의 수질악화 및 원수부족 등의 문제로 수도공급에 애로가 있어 본 사업을 통해 지방상수도를 인입하여 지역주민들에게 깨끗하고 안정적인 지방상수도를 공급하고자 함

□ 추진방향

○ 생비량면 일대 등에 안정적이고 깨끗한 지방상수도를 공급하여 지역주민의 장기적 편익을 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 산청군 생비량면 일대

○ 사 업 량 : 수도정비기본계획(변경) 1식, 수도노선측량 L=42.2㎞ 외

○ 사 업 비 : 8,180백만원(공사비 7,298백만원, 용역비 882백만원)

○ 사업기간 : 2014. 01. 06~환경부 및 경남도 협의 결과에 따른 반영

□ 그간 추진사항

○ 2012. 02 : 이구옥 외 17인 마을대표 지방상수도 조기인입 건의

○ 2013. 10 : 본 사업 기획재정부 승인 및 관련용역 PQ기술심의 완료

○ 2013. 12 : 도급 용역업자 선정 및 착공

□ 추진계획

○ 2014. 01 ~ ‘14. 09 : 환경부 수도정비기본계획(변경)협의

○ 2014. 10 ~ ‘14. 12 : 수도노선측량 및 실시설계 완료 등 준공

○ 2015. 01 ~        :  본 공사 발주 및 착공

□ 기대효과

○ 지역주민의 장기적 편익 제고 및 지방상수도의 효율적 관리

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
착공	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	5%	5%	-%
수도정비기본계획 (변경)과업			환경부 수도정비 기본계획(변경)협의			협의 및 수도노선 측량 시행			용역마무리 및 준 공

3. 산청․생초 지방상수도 통합 및 확장공사

기존 정수장 시설 등의 노후화와 정수처리 시설의 능력저하 및 신규 APT건설 등 KIA유치로 부족한 지방상수도를 본 사업을 통해 확보하여 지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 지방상수도를 공급하고자 함

□ 추진방향

○ 지방상수도 통합 공급으로 수도시설의 효율적 관리와 지역주민의 장기적 편익제고

□ 사업개요

○ 위    치 : 산청군 생초면 신연리 일대

○ 사 업 량 : 취․정수시설 Q=5,500톤/일, 송․배수관로 L=24.7㎞

○ 사 업 비 : 28,350백만원(국비 16,200백만원, 군비 12,150백만원)

○ 사업기간 : 2010. 12. ~ 2015. 12

□ 그간 추진사항

○ 2010. 12 ~‘12. 06 : 1차분 공사 착공 및 준공완료

○ 2012. 05 ~‘13. 07 : 2차분 공사 착공 및 준공완료

○ 2013. 05 ~ 현재   : 3차분 공사 착공 및 추진 중

○ 2014. 02 ~        : 본 사업 총사업비 및 공사기간 변경협의

□ 추진계획

○ 2014. 01 ~ ‘14. 04 : 취수시설 완료 및 진입도로포장 완료

○ 2014. 05 ~ ‘14. 12 : 4차분 공사 발주(정수, 건축시설) 및 완료

○ 2014. 06 ~ ‘14. 12 : 기계분 발주 및 3차분 공사 준공

□ 기대효과

○ 부족한 수원확보 및 지방상수도 시설의 효율적 관리

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
15	15%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	10%	-%
취수시설 완료			진입도로 포장 등 관로부 시공, 기계착공			건축공사 추진 3차분 공사 준공			금회 공사 마무리 및 준공

4. 농어촌 마을하수도 설치사업

농촌지역의 열악한 주거환경 개선을 위한 마을하수도 설치로 쾌적한 주거환경조성 및 생활오수의 적정처리로 양질의 수자원 확보 등 수질환경

개선에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 생비량면 도리 일원

◦ 사 업 량 : 처리장 1식(50㎥/일), 관로 L=6.73㎞, 배수설비 114가구 등

◦ 사 업 비

- 총사업비 : 2,255백만원[국비(70%), 기금(18%), 도비(6%), 군비(6%)]

⇒ 2014년 1,356백만원(국비 949 , 기금 245, 도 81, 군 81)

◦ 사업기간 : 2012. 01. ～ 2014. 12.

□ 그간 추진사항

◦ 실시설계용역 완료 : 2008.04.01 ～ 2011.01.20

◦ 하수도정비 기본계획(변경)수립 : 2010.03.11

◦ 공사착공 : 2013.01.04

□ 추진계획

◦ 공사준공 : 2014. 10.

□ 기대효과

◦ 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보와 수질개선에 기여

◦ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
2차분 발주(10%)			사업시행(60%) 처리장 구축			사업시행 (80%) 하수관거 설치			사업마무리 및 준공 (100%)

5. 산청하수관거 개․보수 정비사업

하수관거 및 배수설비 노후로 인한 불명수 유입과 저농도 하수 유입으로

하수처리장의 처리효율 저하에 따른 하수관거를 개․보수하여 하수처리시설 처리효율 향상 및 깨끗한 수질환경 조성

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 산청읍 산청하수처리구역

◦ 사 업 량 : 하수관거 개․보수 L=4,229m, 배수설비 1,167가구 등

◦ 사 업 비

- 총사업비 : 5,330백만원(국비 36%, 기금 38%, 군비 26%)

⇒ 2014년 856백만원(국비 308, 기금 329, 군비 219)

◦ 사업기간 : 2012. 01. ～ 2015. 12.

□ 그간 추진사항

◦ 산청하수관거 기술진단 실시 : 2011.03.18 ～ 2011.10.23

◦ 실시설계용역 실시 : 2012.04.20 ～ 2013.02.18

◦ 재원협의 및 계약심사 : 2013.03.25 ～ 2013.08.29

◦ 착공 : 2013. 10.

□ 추진계획

◦ 준공 : 2015. 12.

□ 기대효과

◦ 관로개선을 통한 유입부하량 최소화로 효율적인 시설운영에 기여

◦ 정화조 유지관리 비용 등 주민 부담 경감 및 공공수역 수질 보전

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업시행(20%) 하수관거 설치			사업시행(60%) 하수관거 설치			사업시행 (80%) 하수관거 설치			2014년도 분 사업마무리 (100%)

6. 하수관거 정비사업(시천,단계지구)

산청하수관거정비 2단계(2015년) 계획에 의거 시천 하수처리구역을 확대할 계획이었으나 현재까지 사업 미시행으로 하천 수질환경이 악화되고 있어 하수관거사업 시행으로 생활오수를 적정 처리함으로써 양질의 수자원을 보전하여 농촌지역 공중위생 향상 및 주거환경 개선에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 시천면 천평리 및 신등면 단계리 일원

◦ 사 업 량 : 하수관거 설치 L=14.48Km

◦ 사 업 비

- 총사업비 : 7,824백만원(국비 70%, 기금 18%, 군비 12%)

⇒ 2014년 714백만원(국비 500, 기금 128, 군비 86)

◦ 사업기간 : 2014. 01. ～ 2016. 12.

□ 그간 추진사항

◦ 예산신청 : 2013.02.27

□ 추진계획

◦ 실시설계용역 실시 : 2014. 01. ～ 2014. 08.

◦ 재원협의 및 인가계획 : 2014. 09.

◦ 착공 : 2014. 10.

◦ 준공 : 2016. 12.

□ 기대효과

◦ 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보와 수질개선에 기여

◦ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
실시설계 용역(10%)			실시설계 시행(60%)			사업발주 (80%) 하수관거 설치			1차분 마무리(100%) 하수관거 설치