안심하고 마실 수 있는 물 공급

노후시설 개선과 체계적인 관리를 통하여 보다 나은 상수도 서비스를 제공함으로써 안심하고 마실 수 있는 맑은 물을 공급하고자 함

□ 현   황

지방상수도					소규모 수도시설(개소)			비고
시설수 (개소)	시설용량 (톤/일)	급수 인구(명)	관로연장 (km)	계량기수 (전)	소 계	지하,용천수	하천,계곡수
4	9,100	15,107	199	5,339	287	245	42

□ 그간 추진사항

○ 정수장 수질자동 측정기 설치 : 52백만원

○ 약품 투입설비 자동화시설 설치 : 65백만원

○ 소규모수도시설 민간위탁 관리 : 90백만원

□ 추진계획                                   (단위 : 백만원)

구 분		사업량	사업비	비 고
계			431
지방상수도	․정수장 CCTV 설치(산청,생초,단성)	3개소	80
	․정수장 약품투입설비 자동화(단성)	1기	76
	․상수도 누수탐사(산청,생초)	2개소	40
	․중촌가압장 자동화시스템 설치	1식	40
	․상수도 노후 계량기 교체	300개	18
소규모 수도시설	․위탁관리	287개소	94
	․염소투입기 관리	287개소	63
먹는 물 공동시설	․약수터 정비	4개소	20

□ 기대효과

○ 철저한 수질관리와 시설개선을 통하여 수돗물에 대한 신뢰도 제고

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
분기수질검사 수질자동측정기 설치 약품투입설비 자동화 정수장 CCTV설치			분기수질검사 마을상수도 위탁관리 노후계량기 교체 상수도 누수탐사 약수터 정비			분기수질검사 마을상수도 위탁관리			분기수질검사 상수도 시설물 내부청소

산청․생초 지방상수도 통합 및 확장사업

기존 시설의 노후화와 정수처리 능력저하 및 시설용량의 한계 도달, 시설분산에 따른 관리애로, 지역별 상수원보호구역 지정 등으로 지역개발 제한 및 낙후 심화를 개선코자 함

□ 추진방향

○ 본 사업 시행 과정에 있어 견실시공 및 민원최소화 노력

⇒ 공사, 책임감리원 및 지역주민과의 간담회 등 실시

○ 본 사업의 조기완료 될 수 있도록 잔여 재원(국비)확보 노력

□ 사업개요

○ 위    치 : 산청군 생초면 신연리 산14-1번지 일원

○ 사 업 량 : 5,500톤/일 송․배수관로 L=24.7km

○ 사 업 비 : 28,350백만원(국비 16,2000원(57%), 지방비 12,150원(43%)

⇒ 2013년 3,685백만원(시설비 3,226, 감리비 450, 시설부대비 9)

○ 사업기간 : 2009년 ~ 2015년

□ 그간 추진사항

○ 2010. 08 : 총사업비 변경승인(242억→283억)

○ 2010. 12 : 실시설계계획인가 및 수도사업인가 완료

○ 2010. 12 : 산청․생초 지방상수도 통합 및 확장공사 착공

○ 2011. 05 : 본 공사 전면책임감리용역 착수

○ 2012. 06 : 본 공사 1차분 준공완료

□ 추진계획

○ 2013. 04 : 2차분 준공계획

○ 2013. 03 : 3차분 발주계획

○ 2013. 09 : 통합전면책임감리용역 2차분 발주

○ 2015. 이후 : 전체분 준공계획

□ 기대효과

○ 분산된 지방상수도의 시설 통합 및 확장으로 인한 예산 절감 효과

○ 지역주민의 숙원사업 해소 및 효율적인 시설물 유지관리성 제고

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
		30%			60%			80%			100%
2차분공사 준공계획			3차분공사 발주 및 착공			통합책임감리용역 (2차)발주 및 착수			3차분공사 준공계획

지방상수도 및 소규모수도시설 정비사업

소규모 수도시설 대부분이 70년대에 설치된 시설로서 노후화되어 지역주민들의 식수에 애로가 있으며 특히 계곡수를 수원으로 사용하는 경우 수원부족으로 인한 문제점 등을 개선코자 함

□ 추진방향

○ 정비사업 필요 읍․면에 대하여 현지조사 후 지역주민의 실질적인 편익이 제공 될 수 있도록 설계 및 시공

□ 사업개요                                  (단위 : 천원)

구 분	사 업 량	사업비	비 고
계		2,480,000
소규모수도시설개량사업	․산청군 관내 노후시설 10개소	600,000
마을상수도사업	․마을상수도 개보수사업 11개소 ․마을상수도 긴급보수 50개소 ․마을상수도 배수지 및 안전휀스 설치 및 방치 물탱크 철거	1,030,000
지방상수도정비	․지방상수도 노후관 교체공사(내리) ․지방상수도 인입공사(시천원리)	350,000
농촌농업생활용수개발	․농촌농업생활용수개발사업(2개소) -시천(중태), 삼장(평촌)	500,000

□ 추진계획

○ 2012. 01~02. : 본 사업 실시설계 착수 및 완료

○ 2012. 06~12. : 본 사업 착공 및 완료

□ 기대효과

○ 노후화 시설 개선 및 수질개선 효과

○ 지역주민의 숙원사업 해소 및 효율적인 시설물 유지관리성 제고

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
		30%			60%			80%			100%
실시설계 착수 및 완료			사업발주 및 착수			사업진행			사업완료

농어촌 마을하수도 설치사업

농촌지역의 열악한 주거환경 개선을 위해 마을하수도 설치로 쾌적한 환경조성과 생활오수의 적정처리로 양질의 수자원 확보 등 수질개선에 기여코자 함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 생비량면 도리

○ 사 업 량 : 처리장 50㎥/일, 하수관거 L=6.73km

○ 사 업 비

- 총사업비 : 1,818백만원 (국비 70%, 기금 18%, 도비 6%, 군비 6%)

⇒ 2013년 613백만원 (국비 429, 기금 110, 도비 37, 군비 37)

○ 사업기간 : 2013. 01 ~ 2014. 09

□ 그간 추진사항

○ 실시설계용역 완료 : 2008. 04 ~ 2011. 01

○ 하수도정비 기본계획(변경)수립 : 2010. 03. 11

○ 설치인가 : 2012. 11. 15

□ 기대 효과

○ 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원확보와 수질개선에 기여

○ 농촌지역의 열악한 주거환경개선으로 주민생활 편익도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
발주(10%)			사업시행(60%) 처리장 구축			사업시행 (80%) 하수관거 설치			사업마무리 및 준공 (100%)

산청하수관거 개ㆍ보수 정비사업

기존 관거의 불안전한 시공으로 불명수 및 정화조 존치에 따른 저농도 오수 유입 등으로 하수처리장의 처리효율 저하와 하수처리구역내 정화조 청소비용 발생 등 주민 부담이 가중되고 있어 관거 개ㆍ보수 정비를 통하여 이를 해소코자 함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 산청군 산청읍 산청하수처리구역

○ 사 업 량 : 하수관거 개보수 L=1,230m, 배수설비 설치 등

○ 사 업 비

- 총사업비 : 5,330백만원 (국비 36%, 기금 38%, 군비 26%)

⇒ 2013년 756백만원 (국비 272, 기금 287, 군비 197)

○ 사업기간 : 2012. 01 ~ 2014. 12

□ 그간 추진사항

○ 산청하수관거 기술진단 실시 : 2011. 03  ~ 2011. 10

○ 실시설계용역 실시 : 2012. 04 ~ 2013. 02

□ 추진계획

○ 재원협의 및 계약심사 : 2013. 03

□ 기대 효과

○ 불명수의 유입 등 공정상 문제점을 해결하여 하수처리시설의 효율적인 운영

○ 정화조 유지관리 비용 등 주민 부담 경감과 공공수역의 수질 보전 기여

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계 및 발주(20%)			사업시행(60%) 하수관거 정비			사업시행 (80%) 하수관거 정비			사업마무리 및 준공 (100%)

하수관거 정비사업(내리지구)

하수처리구역내에 위치하나 현재까지 하수관거 미설치로 인한 무분별한 오염원 배출로 불편이 가중되고 있어 금회 하수관거 정비사업을 통하여 적정 하수처리로 공공수역 수질 보전과 주거환경 개선에 기여코자함

□ 사업개요

○ 위    치 : 산청군 산청읍, 금서면 지내

○ 사 업 량 : 하수관거 설치 L=11.085km

○ 사 업 비

- 총사업비 : 3,575백만원 (국비 70%, 기금 18%, 군비 12%)

⇒ 2013년 601백만원 (국비 421, 기금 108, 군비 72)

○ 사업기간 : 2013. 01 ~ 2014. 06

□ 그간 추진사항

○ 실시설계완료 : 2012. 08

○ 재원협의 및 계약심사 : 2012. 11

□ 기대 효과

○ 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보와 수질개선에 기여

○ 농촌지역의 열악한 주거환경개선으로 주민생활 편익도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
발주(10%)			사업시행(60%) 하수관거 설치			사업시행 (80%) 하수관거 설치			사업마무리 및 준공 (100%)