안심하고 마실 수 있는 물 공급

노후시설 개선과 체계적인 관리를 통하여 보다 나은 상수도 서비스를 제공함으로써 안심하고 마실수 있는 물을 공급코자함

□ 현   황

지방상수도					소규모 수도시설(개소)			먹는물 공동시설 (개소)	비고
시설수 (개소)	시설용량 (톤/일)	급수 인구(명)	관로연장 (km)	계량기 수(전)	소 계	지하,용천수	하천, 계곡수
4	9,100	13,766	199	5,254	286	243	43	4

□ 그간 추진

○ 단성정수장 수질 통합감시 시스템 설치 : 169백만원

○ 가압장 및 배수지 원격제어 시스템 구축(신등외 2개소) : 65백만원

○ 마을상수도ㆍ소규모급수시설 민간위탁 관리 : 93백만원

□ 추진계획                                   (단위 : 백만원)

구 분		사업량	사업비	비 고
계			349
지방상수도	수질자동 측정기 설치(산청, 생초)	2개소	52
	상수도 노후 계량기 교체	400개	24
	약품 투입설비 자동화(단성)	2기	70
	시설물 내부청소	2회	40
소규모수도시설	위탁관리	286개소	100
	염소투입기 관리	286개소	63

□ 기대효과

○ 시설개선과 체계적 관리를 통하여 급수에 대한 불신해소 기여

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
분기수질검사 수질자동측정기 설치 약품투입설비 자동화			분기수질검사 마을상수도 위탁관리 상수도 시설물 내부청소 노후계량기 교체			분기수질검사 마을상수도 위탁관리			분기수질검사 상수도 시설물 내부청소

산청․생초 통합 지방상수도 설치

기존 시설의 노후화와 정수처리 능력 저하 및 시설용량의 한계 도달, 시설 분산에 따른 관리애로, 지역별 상수원보호구역 지정 등으로 지역개발 제한 및 낙후 심화를 개선코자함

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 시설용량 - 5,500 톤/일, 취‧정수시설 1식

(관로매설 : 송ㆍ배수 L=24.7km)

○ 사업기간 : 2009 ~ 2013

○ 총 소요사업비 : 28,350백만원〔(국비) 16,200 57%, (지방비) 12,150 43%〕

○ 년차별 투자 계획                                       (단위:백만원)

총 계			2011년까지			2012년			2013년 이후
계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비
28,350	16,200	12,150	9,048	5,232	3,816	1,000	700	300	18,302	10,268	8,034

□ 그간 추진사항

○ 총사업비 변경승인(242억→283억) : 2010. 08

○ 실시계획인가 및 수도사업인가 완료 : 2010. 12

○ 산청․생초 지방상수도 통합 및 확장공사 착공 : 2010. 12

□ 기대효과

○ 분산된 지방상수도 시설의 통합 및 확장으로 행정력낭비 해소

○ 지역별 상수원보호구역 설정에 따른 지역발전 저해요소 제거

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
계획수립 및 공사(3차분)시행(10%)			정수장 부지조성, 건축공사 및 진입도로설치(80%)						사업마무리 및 부대공사(100%)

엑스포 행사장 상․하수도시설 정비

엑스포 행사장내 기존 수도시설의 노후화와 수량부족, 엑스포 개최로 오수량의 급격한 증가가 예상됨에 따라 사전 상ㆍ하수도시설물 정비 및 수원확보를 통하여 쾌적한 환경조성과 안정적인 용수공급으로 성공적인 행사 추진에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 산청군 금서면 특리, 매촌리 일원

○ 사 업 량

구분	사업량	사업비(백만원)	비고
계		1,120
상수도시설	- 암반관정(98㎥/일) : 2공 - 물탱크(200톤) : 2개소 - 관로매설(송ㆍ배수관) :10km	970
하수도시설	- 관로 점검ㆍ정비 : L=5.0Km, - 중계펌프장 정비 : 3개소	150

○ 사업기간 : 2012. 01 ~ 2012. 12

□ 그간 추진사항

○ 하수관거 기술진단 : 2011. 10

○ 기 설치된 암반관정 양수시험 완료(확보수량 250톤/일) : 2011. 10

○ 동의보감촌 상수도 노후관 교체공사 실시설계용역 발주 : 2011. 11

○ 동의보감촌 상수도 노후관 교체공사 발주 : 2011. 12

□ 기대 효과

○ 엑스포 행사장 내 안정적인 용수 공급과 적정오수 처리로 성공적인 행사 추진 기여

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계 및 발주(10%)			터파기 및 관로매설(70%)						사업마무리 및 부대공사(100%)

지방상수도 및 소규모수도시설 정비

소규모 수도시설 대부분이 70년대에 설치된 시설로 주민 건강을 해칠 우려가 있으며  특히 겨울철 갈수기시 계곡수(원수)고갈로 인한 주민 식수공급 애로 (비상급수  조치 등 반복)

□ 사업개요

○ 위    치 : 산청군 관내(11개 읍ㆍ면)

○ 사업량 및 사업비                                     (단위 : 백만원)

구 분	사 업 량	사업비	비 고
계		2,684
산청상수도 구역별 유량계 설치	산청읍 지리, 옥산	120
지방상수도 노후관 교체	산청 지리, 옥산, 삼장 덕교	250
마을상수도 개보수 및 긴급보수	산청군 관내 42개소	407
소규모 수도시설 노후물 탱크 교체	산청군 관내 11개소	236
소규모 수도시설 개량 (100명 미만, 20톤미만)	산청군 관내 11개소	600
농촌농업생활용수개발	5개소〔시장,특리,상촌,소남,신안〕	971
생초주민편익사업	양수장 정비 등	100

□ 기대 효과

○ 시설 개ㆍ보수와 소규모 수도시설의 지방상수도 편입으로 안심하게 마실수 있는 수돗물 공급

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계 및 발주(10%)			사업시행(70%)						사업마무리 및 부대공사(100%)

농어촌 마을하수도 정비

농촌지역의 열악한 주거환경 개선을 위해 마을하수도 설치로 쾌적한 환경 조성과 생활오수의 적정처리로 양질의 수자원 확보 등 수질개선에 기여코자함

□ 사업개요

○ 위    치 : 오부면 양촌리, 삼장면 덕교리, 생비량면 도리

○ 사 업 량 : 3개소(오부 85㎥/일, 덕교 80㎥/일, 도리 50㎥/일)

○ 사 업 비

- 총사업비 : 7,540백만원〔국비(70%), 기금(18%), 도비(6%), 군비(6%)〕

⇒ 2012년 3,053백만원(국비 2,137, 기금 549, 도 183 군 184)

○ 사업기간 : 2010. 12 ~ 2013. 12

□ 그간 추진사황

○ 실시설계용역 완료 : 2008. 04  ~ 2011. 01

○ 하수도정비 기본계획(변경)수립 : 2010. 03. 11

□ 기대 효과

○ 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원확보와 수질개선에 기여

○ 농촌지역의 열악한 주거환경개선으로 주민생활 편익도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계 및 발주(10%)			사업시행(70%)						사업마무리 및 부대공사(100%)

산청 하수관거 개ㆍ보수 및 정비

기존 관거의 불안전한 시공으로 불명수 및 정화조 존치에 따른 저농도 오수 유입 등으로 하수처리장의 처리효율 저하와 하수처리구역내 임에도 정화조 청소비용 발생 등 주민 부담이 가중되고 있어 관거 개ㆍ보수 및 정비를 통하여 이를 해소코자함

□ 사업개요

○ 위    치 : 산청군 산청읍 산청하수처리구역

○ 사 업 량 : 하수관거개보수 L=1,230m 배수설비설치등

○ 사 업 비

- 총사업비 : 5,330백만원〔(국비)36%, 기금)38%, 군비)26%〕

⇒ 2012년 279백만원(국비 100, 기금 106, 군비 73)

○ 사업기간 : 2012. 01 ~ 2014. 12

□ 그간 추진사항

○ 산청하수관거 기술진단 실시 : 2011.03  ~ 2011.10

□ 추진계획

○ 실시설계용역 실시 : 2012.01 ~ 06

○ 재원협의 및 계약심사 : 2012. 07

□ 기대 효과

○ 불명수의 유입 등 공정상 문제점을 해결하여 하수처리시설의 효율적인 운영

○ 정화조 유지관리 비용 등 주민 부담 경감과 공공수역의 수질 보전 기여

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계 및 발주(80%)						사업시행(100%)

하수관거 정비(하정, 내리지구)

하수처리구역내에 위치하나 현재까지 하수관거 미설치로 인한 무분별한 오염원 배출로 불편이 가중되고 있어 금회 하수관거 정비사업을 통하여 적정 하수처리로 공공수역 수질 보전과 주거환경 개선에 기여코자함

□ 사업개요

○ 위    치 : 산청군 산청읍, 신안면 지내

○ 사 업 량 : 하수관거 설치 L=13.859Km

○ 사 업 비

- 총사업비 : 5,711백만원(국비 70%, 기금 18%, 도비 6%, 군비 6%)

⇒ 2012년 1,575백만원(국비 1,103, 기금 282, 도비 95, 군비 95)

○ 사업기간 : 2012. 01 ~ 2013. 12

□ 그간 추진사항

○ 신안지구 실시설계완료 : 2011. 04

○ 산청하수관거 기술진단 실시 : 2011.04  ~ 2011.10

□ 추진계획

○ 내리지구 실시설계용역 실시 : 2012.01 ~ 04

○ 재원협의 및 인가계획 : 2012. 04

□ 기대 효과

○ 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원확보와 수질개선에 기여

○ 농촌지역의 열악한 주거환경개선으로 주민생활 편익도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계 및 발주(20%)			사업시행(80%)						사업마무리 및 부대공사(100%)

상수도 유수율 제고 및 관망 전산화

노후관로 교체사업을 시행하였으나 정수장별 여유수량이 크게 확보되지 않고 기존 관망의 미정비로 대민 서비스 수행에 지장을 초래하고 있어 유수율 제고 및 관망 전산화 구축사업을 통하여 안정적인 수량확보와 상수도 긴급복구 등 대민서비스 향상에 기여코자함

□ 사업개요

○ 대    상 : 산청외 3개 지방상수도

○ 사 업 량

- 누수탐사용역 1식,

- 구역별 유량계 설치 11개소

○ 사 업 비 :  390백만원(군비)

○ 사업기간 : 2012. 01　～2013. 12

□ 그간 추진사항

○ 노후관로 교체공사 시행 : 2007 ~ 2011

- 댐상류 하수도시설 확충사업과 연계 통합시공 추진

○ 구역별 유량계 설치사업 시행(14개소 설치) : 2011

□ 추진계획

○ 지방상수도 급수구역내 누수탐사 용역 : 2012. 05

○ 구역별 유량계 추가설치 : 2012. 01 ~ 2012.1 2

○ 상수도 관망 전산화(GIS 구축) : 2013. 01 ~ 2014. 12

□ 기대 효과

○ 유수율 제고 및 관망 전산화 구축사업을 통하여 수량확보와 상수도

대민서비스 향상에 기여

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
구역별 유량계 설치사업 설계용역 및 발주(10%)			누수탐사용역 발주 및 준공 구역별 유량계 설치사업 시행(40%)			구역별 유량계 설치사업 시행 (70%)			구역별 유량계 설치사업 준공 (100)