살고싶은 산청 자랑스런 산청인

2011. 01.

= 2011년도 =

주 요 업 무 계 획

건  설  과

		목 차

1. 소규모지역개발사업	1

2. 건설사업 합동설계반 운영 강화	2

3. 국․공유지 관리 체계 강화	3

4. 도로(군도,농촌도)확포장사업	4

5. 교량유지 및 기타도로사업	5

6. 도로교통안전개선사업	6

7. 하도준설사업	7

8. 친환경 소하천 정비사업	8

9. 하천퇴적물 제거사업	9

10. 양천 생태하천 조성사업	10

11. 재난대응체계 확립 및 예방시스템 운영	11

12. 내실 있는 안전문화운동 전개	12

13. 재난대응 안전한국훈련 실시	13

14. 자동음성통보시스템 설치사업	14

15. 원지 버스정류소 정비	15

16. 각종 건설사업에 편입된 공공용지 지적정리	16

17. 덕천강 고향의 강 정비사업 추진	17

18. 가축질병 발생에 따른 산청군 재난안전대책본부 운영	18

1. 소규모 지역개발사업

◇ 생활주변에서 가장 시급한 주민의 불편 시설에 대하여 소규모      주민숙원사업을 시행하여 주민의 삶의 질 향상과 주민 편익 도모

□ 추진방향

◦ 주민의견 수렴을 통한 사업선정 및 주민숙원사업의 우선 시행

◦ 농업소득 증대와 관련한 사업 추진에 역점

◦ 주민협의체 구성 운영으로 원활한 사업 추진

□ 추진계획

◦ 사업대상지 선정(주민협의) : 2010. 12월

◦ 조사측량 및 설계 : 2010. 12월 ～ 2011. 1월

◦ 사업시행 및 준공 : 2011. 2월 ～ 6월

◦ 사업현황

(단위:건/백만원)

구 분	사업량	사업비	비 고
계	113	5,846
재정건의사업	8	1,680	도의원
소규모주민숙원사업	105	4,166

□ 기대효과

◦ 주민숙원 해소 및 쾌적한 생활환경 조성

◦ 주민 불편사항 해결과 삶의 질 향상

◦ 농촌지역개발에 따른 경제 활성화 촉진

2. 건설사업 합동설계반 운영 강화

◇ 예산편성 단계시부터 자체설계 완료로 재정 조기집행 및 지역경제       활성화에 기여함은 물론 기술직 공무원 상호간 기술교류로 업무능력      향상을 도모코자 함

□ 추진방향

◦ 조기 발주를 위해 예산 편성시부터 자체 설계 실시

◦ 재정 조기집행으로 인한 지역경제 활성화 도모

◦ 기술직 공무원 상호간 기술교류 등 업무연찬으로 효율성 기여

□ 사업개요

◦ 기 간 : 2010. 12. 16 ～ 2011. 01. 14 (30일간)

◦ 장 소 : 산청군청 신관4층 합동작업실

◦ 반 편성 : 4개조 26명(군,읍․면, 사업소,직속기관)

◦ 설계물량 :  166여건  6,143백만원

□ 추진계획

◦ 조사 측량 및 설계서 작성

◦ 설계 심사 : 각 조별 반장

◦ 기술 자문 협조체계 구축

□ 기대효과

◦ 신공법 개발 도입 등 업무 연찬으로 기술력 향상

◦ 자체 설계 추진으로 용역비 절감

3. 국․공유지 관리 체계 강화

◇ 디지털예산관리시스템 운용으로 국유지 분할, 지목변경 등 국유지에      대한 효율적인 관리는 물론 공유(행정)재산의 체계적 관리와 주민      편익을 증대코자 함

□ 추진방향

◦ 디지텔예산관리시스템 운용으로 국유지 체계적 관리

◦ 국․공유지에 대한 용도폐지 기간 단축으로 민원 편익 도모

◦ 공유(행정)재산에 대하여는 사업시행 단계시부터 행정절차 병행

□ 그간 추진실적(2010년 기준)

◦ 국유지 용도폐지 및 사용수익허가 실적

∙ 용도폐지 : 27필지, 3,666㎡

∙ 사용수익허가 : 7필지, 2,023㎡

∙ 변상금 및 사용료 부과 : 58필지, 10,006천원

◦ 공유재산 실태조사 실적

∙ 용도폐지 : 40필지  14,016㎡

∙ 지목변경 : 1,611필지  459,311㎡

□ 문제점 및 대책

◦ 국․공유지 측량 등에 따른 예산 확보 : 40백만원

□ 기대효과

◦ 용도폐지 기간단축 및 잔여지 매각으로 군민의 재산 보호

◦ 국유지 변상금 부과 및 용도폐지 등으로 세외수입 증대

4. 도로(군도, 농촌도) 확포장사업

◇ 군도 및 농촌도로의 미개량 노선을 확․포장하여 교통소통에

원활을 기하고 지역간 접근성을 향상시켜 주민의 소득증진과

지역 균형 발전에 기여

□ 추진방향

◦ 2010년 총액발주 사업은 2011년 마무리 하는 것을 원칙

◦ 농촌도로 노선중 버스 진출입이 불가한 지구에 대하여 정비추진

◦ 신규사업은 주민 수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 우선 추진

□ 추진계획                              (단위:건/백만원)

구 분		사업량	사업량 (km)	사업비	비 고
계		18	22.00	5,412
군도정비사업	소 계	7	11.03	2,740
	완료사업	2	1.80	850
	신규사업	5	9.23	1,890
농촌도로정비사업	소 계	11	10.97	2,672
	완료사업	6	1.65	1,782
	신규사업	4	7.17	790
	버스진출입	1	2.15	100

□ 문제점 및 대책

◦ 2010년 총액발주사업은 2011년 완료 위주로 우선 예산확보

◦ 관내 농촌도로 중 버스 진출입이 불가하고 시급을 요하는 노선부터 우선 하여 년차적으로 추진

□ 기대효과

◦ 도로망 확충사업을 통하여 낙후된 지역경제 활성화에 기여

◦ 농산물 수송체계 개선을 통한 농가 소득증대기여

◦ 산청을 찾는 관광객에게 쾌적한 교통 환경 제공으로 관광이미지 제고를

통한 관광수익 증대

5. 교량유지 및 기타도로사업

◇ 관내 노후 교량 재가설 및 교량 유지관리를 시행하여 안전사고를

사전에 예방하고, 군도 및 농촌도로상 시설물 및 비탈면 절개지를 보수     하여 교통사고 사전예방

□ 추진방향

◦ 노후 교량 재가설 및 교량 유지관리로 안전사고 사전예방

◦ 관내 군도 및 농촌도로상 노후시설 및 안전시설 미설치구간, 낙석 위험

절개지등 교통사고의 위험 요소가 있는 지구에 대해 우선적으로 정비 추진

◦ 2011. 01. 24일부터 도로교통법 개정과 관련하여 어린이보호구역이

확대(300m→500m)됨에 따라 교통안전시설물 정비

□ 추진계획                              (단위:건/백만원)

구 분	사업량	사업비	비 고
계	19	2,845
교량관리사업	4	1,310
도로유지관리사업	7	740
주민숙원사업	7	295
타기관도로	1	500	국지도60호

◦ 사업대상지 선정(주민협의) : 2011. 1월

◦ 조사측량 및 설계 : 2011. 1월 ～ 2월

◦ 사업시행 및 준공 : 2011. 3월 ～ 10월

□ 기대효과

◦ 노후교량 재가설 및 교량유지관리로 안전사고 사전 예방

◦ 기존 도로시설물 유지관리를 통하여 안전한 통행권 확보

◦ 관내 초등학교 어린이들의 안전한 통학로 확보로 교통사고 사전예방

6. 도로교통안전개선사업

◇ 관내 위험 도로에 대하여 안전한 보행환경 조성으로 교통소통에        원활을 기하고 위험요소를 사전 해소하여 주민편익증진 및 안전한

보행로 확보에 기여하고자 함

□ 추진방향

◦ 급커브 및 도로 선형불량으로 인한 지구에 대하여 정비추진

◦ 보행량이 많은 학교주변 및 소재지 통행에 불편을 주고 있는 지구 정비

□ 추진계획                              (단위:건/백만원)

구 분	사업량	사업비	비 고
계	3	1,054
위험도로개선사업	1	378	국비 50% 군비 50%
교통사고잦은곳개선사업	1	236	〃
어린이보호구역개선사업	1	240	〃
시군재정건의사업	1	200	도비 100%

◦ 사업대상지 선정 (주민협의) : 2011. 1월

◦ 조사측량 및 설계 : 2011. 2월 ～ 3월

◦ 사업시행 및 준공 : 2011. 3월 ～ 10월

□ 기대효과

◦ 위험도로를 개선하여 교통사고 사전예방 및 지역균형발전에 기여

◦ 안전한 보행환경 조성으로 어린이 보호 및 지역주민 편익증진 도모

7. 하도준설사업

◇ 지방하천의 재해위험 우려가 있는 하천제방 정비 및 퇴적물준설∙      유수 지장목 등을 제거하여 재해를 사전에 예방하고, 쾌적한 생활      환경을 조성하기 위함

□ 사업현황

(단위 : 백만원)

대 상	계		2010년 시행		2011년 시행 계획		비고
	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비
계	하도준설 L= 6.5km	2,076	하도준설 L=2.5km	1,160	하도준설 L=2.4km	916
갈전천 하도준설사업	하도준설 L= 1.6km	833	하도준설 L= 1.1km	500	하도준설 L= 0.4km	333	신안
단계천 하도준설사업	하도준설 L= 2.9km	993	하도준설 L=1.4km	660	하도준설 L=1.0km	333
중산지구 하도준설사업	하도준설 L=2.0km	250	-	-	하도준설 L=1.0km	250	상지

□ 추진계획

○ 현지조사 및 실시설계 완료 : 2011. 1월 ～ 2011. 2월

○ 보상협의 추진 : 2011. 3월

○ 착공 : 2011. 4월중

○ 준공 : 2011. 8월중

□ 문제점 및 대책

○ 하천 미 개수 및 하천퇴적으로 인하여 집중호우시 농경지 유실 및         빈번한 침수피해 발생

○ 미 개수 지구를 조기에 정비하여 재해예방 및 하천오염 예방

□ 기대효과

○ 농경지 수해피해 예방과 재산 보호

8. 친환경 소하천 정비사업

◇ 미 개수 소하천중 하폭이 협소하고 하천의 오염도가 심한 지구와       토사제방이 낮은 소하천의 재해우려 지구를 정비하여 재해를 사전에

예방하고 쾌적한 생활환경을 제공하고자 함

□ 사업현황

(단위 : 백만원)

소하천현황		2010년 시행			2011년 시행 계획			비 고
개소	연장 (km)	개소	연장 (km)	사업비	개소	연장 (km)	사업비
199	248	11	3.8	3,453	5	1.75	2,997	국비 : 1,299 군비 : 1,698

□ 추진계획

○ 현지조사 및 실시설계 완료 : 2010. 10월 ～ 2010. 12월

○ 보상협의 추진 : 2011. 1월 ～ 2월

○ 계약 및 착공 : 2011. 3월중

○ 준공 : 2011. 8월중

□ 문제점 및 대책

○  소요사업비중 지방비(군비) 부담 가중에 따른 지방비(군비) 확보 애로

⇒ 군비 부담금 (가내시)

○  편입토지 보상협의 등 다수 민원발생 우려

⇒ 적극적인 대처로 민원해소

□ 기대효과

○ 농경지 수해피해 사전예방과 재산 보호

○ 쾌적한 환경정비로 삶의 질 향상

9. 하천퇴적물 제거사업

◇ 태풍 및 집중호우시 제방 범람의 주요 원인이 되는 하천 퇴적물을

제거하여 재해로 인한 인명과 재산을 보호하고

◇ 유수 선형이 변형되어 호안구조물에 기초세굴등의 시설물 피해가

발생되고 있어 하도개량(물길돌리기)사업을 하여 하천관리에 만전

□ 추진방향

○ 투자대비 효과를 높이기 위해 장비 임차하여 직영 시행

○ 하천환경을 보호하기 위한 친환경적인 작업 방안 강구

○ 퇴적물 제거사업과 병행하여 하도개량(물길 돌리기)사업 실시

□ 사업개요

○ 위    치 : 국가하천, 지방하천, 소하천

○ 사업규모 : 퇴적물제거 및 하도개량 L= 4.0km

○ 사 업 비 : 350백만원

○ 사업기간 : 2011. 2월 ～ 2011. 6월

○ 주요사업 대상지 : 산청읍 내리, 단성면 묵곡리, 신안면 신기리,

생비량면 법평리 등

□ 추진계획

○ 재해위험 취약지 조사후 대상지 선정

○ 건설공사 성토재 활용 및 저지대 침수지역 성토

○ 2011년 1월부터 퇴적물제거 협의(허가) 및 시행

□ 문제점 및 대책

◦ 대규모 하도준설사업 추진시 생태환경 파괴에 따른 논란 예상

◦ 사토처리 부지 확보 애로

⇒ 우수기 이전 사업 완료로 사업 효과 극대화

□ 기대효과

◦ 통수 단면 확보로 제방 보호 및 침수 등 수해피해 재발방지

10. 양천생태하천 조성사업

◇ 원지소재지 주변에 여가시설과 친수공간을 확보하여 주민생활

만족도 제고

◇ 레저ㆍ스포츠 시설을 확충하여 주민의 건강과 복지증진에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 산청군 신안면 하정리

○ 하 천 명 : 양천강(지방하천)

○ 사업규모 : 고수부지조성 3.6km. 자전거도로 3.7km,

인도교량 150m

○ 사 업 비 : 5,000백만원

○ 사업기간 : 2010. 4월 ～ 2012. 12월

□ 추진계획

○ 2010. 4. ～ 2011. 2월말 실시설계 용역 완료 계획

○ 2010. 12  주민설명회 개최

○ 2011. 3월 계약심사 및 사전환경성 검토 협의 이행

○ 2011. 4월 공사착공 예정

□ 문제점 및 대책

◦ 하천사업 특성상 우기철 사업 추진 애로 예상

◦ 향후 사업 완료 후 시설물 유지관리 문제

□ 기대효과

◦ 친수공간 제공으로 주민 여가 생활 확충 및 주민복지 증진에 기여

11. 재난대응체계 확립 및 예방시스템운영

◇ 예방중심의 안전관리체계 확립으로 군민의 생명과 재산 보호

◇ 재난대응역량 제고를 위한 재난대응시스템 구축

□ 추진방향

◦ 재해취약시설 점검․정비 실시로 재해피해 최소화

◦ 민․관 공조․협력을 통한 현장중심 대응체계 강화

◦ 주민홍보 및 참여 확대로 자율방재의식 고취

□ 추진계획

◦ 재난상황실 24시간 운영으로 기상특보 등 재난정보 신속 전파

∙ 재해예경보시설 59, 문자전광판 5(대형 1), CCTV 9, 자동음성통보시스템 34

◦ 자연재해저감시설 월1회이상 민․관  합동 점검 및 예찰

∙ 대규모사업장, 소하천, 배수펌프장 등 480개소

◦ 재난예방․대응․복구체계 확립

∙ 재난유형별․시기별 표준행동매뉴얼 제작 배포

∙ 풍수해감시인, 산간마을이장간 협력구축으로 현장중심의 대응 강화

◦ 방재교육 및 행사에 주민참여 확대로 자율방재의식 고취

∙ 방재훈련시 지역주민․학생 등 참여형 훈련 시스템 운영

∙ 재해예방 포스터 공모전, 풍수해보험가입 등 주민참여확대

□ 기대효과

◦ 재난안전관리 체계 확립으로 군민의 생명과 재산 보호

◦ 참여형 방재훈련․교육으로 군민의 안전의식 제고

12. 내실 있는 안전문화운동 전개

◇ 전 군민이 동참하는 생활안전실천 군민 운동으로 확산 발전

◇ 재난발생 위험시설 및 지역에 대한 내실 있는 안전점검 실시

□ 추진방향

◦ 매월 정기적인 안전문화운동 실시로 군민의 안전의식고취

◦ 계절별․시기별 재해취약시설에 대한 유관 기관간 분야별 합동점검

◦ 재난취약계층 안전복지 서비스 사업 실시

□ 추진계획

◦ 『매월 4일 안전점검의 날』읍․면 단위 안전문화 시범행사 실시

∙ 유관기관 및 단체 등과 월별 안전점검 및 캠페인 실시 : 매월

∙ 안전문화 정착을 위한 홍보물 제작․배포 : 연중

∙ 물놀이 취약기간 중 안전사고 취약지역에 대한 점검 강화 : 6월～9월

∙ 명절 대비 다중이용시설에 대한 안전점검 실시 : 연 2회

◦ 재난대응 안전한국 훈련의 내실화 : 5월

∙ 재난관련 부서별 재난대응 역량 강화와 선진형 재난관리시스템구축

◦ 재난취약가구 가스․전기시설 점검 등 안전복지 서비스 사업 추진

∙ 독거노인 등 국민기초생활수급자(전세,월세,임대 30세대)

◦ 재난위험관리대상 시설물 안전점검 실시

∙ 특별관리대상시설물(140개소) : 반기 1회

∙ 시특법관리대상시설물(23개소) : 반기 1회

□ 기대효과

◦ 안전문화 의식 확산으로 군민 모두가 생활속 안전을 실천하는 분위기 조성

◦ 재난취약계층에 대한 관심과 배려로 더불어 잘사는 사회구현

13. 재난대응 안전한국훈련 실시

◇ 범국가 차원의 협력체계 구축과 국가재난안전역량 강화로       안전한 선진 국가 실현

◇ 각급 재난관리책임기관 안전관리계획 및 위기대응매뉴얼 실효성 제고

□ 추진방향

◦ 재난관리책임기관 및 단체, 학생 등의 참여형 훈련 프로그램 운영

◦ 재난상황을 적용한 훈련실시로 지역안전관리계획의 적정․실효성 강구

□ 훈련개요

◦ 기  간 : 2011. 5월 중 (3일간)

◦ 훈련대상 : 도상 및 현장 훈련

◦ 참여기관 : 군 재난관리책임기관(14개기관)․단체 / 300여명

□ 추진계획

◦ 훈련계획 수립 : 2011. 2월중

◦ 중점훈련 : 풍수해 등 현장대응 복구훈련

◦ 훈련일정(2011년 5월중)

- 제 1일차 : 대규모 풍수해 대응훈련

- 제 2일차 : 지진 재난대응 훈련

- 제 3일차 : 문화재 등 기타 재난대응 훈련

□ 기대효과

◦ 지역여건에 부합하는 훈련으로 생활밀착형 안전기반 마련

◦ 체계적 지역안전관리 계획 마련으로 재난발생시 효율적 대응

14. 자동음성통보시스템 설치사업

◇ 지구 온난화로 국지성 호우 빈발 및 피해 심화

◇ 산간 등 재해취약마을에 자동음성통보시스템을 활용한 신속한     재난상황전파

□ 추진방향

◦ 산간 등 재해취약마을에 재난 발생 및 기상특보시 신속한 상황 전파    ◦ 자동음성 통보시스템 활용으로 재난상황 등 각종 정보 제공

◦ 지역특성을 고려한 맞춤형 재난상황관리

□ 사업개요

◦ 대 상 지 : 산청군 전․읍면 25개 마을

◦ 사 업 량 : 자동음성통보시스템 25식

◦ 사 업 비 : 200백만원

◦ 사업기간 : 2011. 2월 ～ 6월

□ 추진계획

◦ 사업대상지 선정 : 2011. 1월중

◦ 설계용역 및 행정절차이행 : 2011. 2월중

◦ 착공 및 준공 : 2011. 2월 ～ 2011. 6월

□ 기대효과

◦ 기상특보 등 신속한 재난상황 전파로 군민의 생명과 재산 보호

◦ 적극적인 방재행정 추진으로 행정 신뢰도 향상

◦ 마을 앰프방송을 통한 직접적이고 신속한 재해예방 및 군정홍보

15. 원지버스정류소 정비

◇ 원지 정류장이 협소하여 이용객의 불편을 초래하고 있어 버스정류소        확충 등 환경개선으로 이용객에 편의를 제공코자 함

□ 추진방향

◦ 산청․원지 버스정류장의 확장 개선으로 이용객 편의 증대

◦ 2013 세계전통의약한방엑스포 축제 대비 산청 이미지 제고

□ 사업개요

◦ 위    치 : 신안면 소재

◦ 사업기간 : 2011년 1월 ～ 2011년. 12월

◦ 사 업 량 : 부지매입 1식, 건축물 신축 및 기반정비

◦ 사업비 : 412 백만원

□ 추진계획

◦ 부지 매입 : 2011. 1월

◦ 실시설계 용역 및 행정절차 이행 : 2011. 1월 ～ 2월

◦ 착공 및 준공 : 2011. 2월 ～ 7월

□ 기대효과

◦ 버스정류소 기반시설 확충으로 승객 편의 제공

◦ 지리산 관문인 원지정류장 환경정비로 관광 산청 이미지 제고

16. 각종건설사업에 편입된 공공용지 지적정리

◇ 각종 건설사업 및 새마을 사업으로 편입된 공공용지에 대하여 건설     사업의 효율적인 추진과 향후 민원에 대비코자 지적을 정리코자 함

□ 현실태

◦ 70년대 새마을 사업으로 시행한 마을진입로, 마을안길, 농로 등은 당시       동의서 징구를 막론하고 현실에 맞는 지적 공부가 정리되지 않고 있으며,

◦ 건설사업 추진과 각종민원으로 인한 문제가 빈번히 발생하고 있어 현실      에 맞는 지목 변경 등 지적 공부 정리가  필요한 실정임.

□ 추진방향

◦ 대형 사업장 우선 정리

◦ 예산 과다 소요로 연차 사업으로 추진

□ 추진계획

◦ 현황 및 분할 측량

- 담당기관 : 지적공사

- 사업비 : 40백만원(200필지×189천원)

◦ 행정사항 이행 : 지목변경⇒ 민원과, 과세자료 정리 ⇒ 재무과

□ 문제점 및 대책

◦ 편입된 당시 소유자와 현재 소유자가 상이할 경우 분할 및 지목변경     기피 사례 우려

□ 기대효과

◦ 토지거래시 편입된 공유지에 대한 분쟁소지 사전 해소

◦ 현실 감정보상에 따른 사전민원 해소로 각종 건설사업의 효율적인 추진

17. 덕천강 고향의 강 정비사업 추진

◇ 편의시설과 친수공간 부족으로 피서객들 불편 초래

◇ 하천환경 정비로 지역명물로 자리매김하여 지역소득 증대 기여

□ 사업개요

◦ 하  천  명 : 덕천강(지방하천)

◦ 위      치 : 경남 산청군 시천면 사리 ～ 삼장면 평촌리

◦ 사  업  량 : L=7.50km (제방축조, 공원조성, 자전거도로 등)

◦ 추정사업비 : 300억원 정도

◦ 재원비율 : 국비 180억(60%), 도비 60억(20%), 군비 60억(20%)

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2013(3개년)

□ 추진계획

◦ 2010.  4. ~ 2011.  4 : 국토해양부 기본계획 수립(사업대상지 확정)

◦ 2011.  5. ~ 2011. 12 : 실시설계(경상남도)

◦ 2012.  1.             : 사업착공(산청군)

◦ 2013. 12.             : 사업준공(  “   )

□ 문제점 및 대책

◦ 소요 사업비중 군비 부담금액(20%) 60억원 확보 애로

⇒ 연차별 군비(60억원) 부담금을 확보하여 사업 시행

◦ 편입 토지 보상 협의 어려움 예상

⇒ 토지편입 소유자와 지속적 협의 추진

□ 기대효과

◦ 신설 국도59호선과 덕천강 사이의 하천구역 환경정비

◦ 친수공간 조성으로 지역주민 및 피서객 휴식공간 제공

◦ 관광객 유치에 따른 지역경제 활성화 기대

18. 가축질병 발생에 따른 산청군 재난안전대책본부운영

◇ 가축질병 구제역 발생 국가위기단계가 “심각”으로 격상됨에 따라

산청군재난안전대책본부 운영으로 상황 발생시 신속 대응코자 함.

□ 관련근거

◦ 국가위기관리 기본지침(대통령 훈령 제229호)

◦ 재난 및 안전관리 기본법 제16조, 산청군재난안전대책본부 운영․조례 3조

□ 현재 상황(2011. 01. 05 현재)

◦ 전국 6개시도, 39개시군 85곳 발생 가축 77만 마리 살 처분

※ 최초발생 : 2010. 11. 29. 경북 안동

◦ 현 국가위기경보 “심각”단계 / 발령일시 2010.12.29 11:00

□ 산청군 재난안전대책본부 구성 및 재난종합상황실 운영

◦구성현황 : 본부장(군수),차장(부군수),총괄조정관(기획감사실장), 통제관           (건설과장),담당관(친환경농축산과장), 실무반(10개반 28명)

◦ 재난종합상황실 운영

- 운영기간 : 2010. 1. 1 ～ 상황 종료시 까지

- 장    소 : 재난종합상황실(소회의실)

- 근무요령

․상황실 반별 1명 이상 24시간 상시근무

․도 재난안전대책본부와 연계 업무 수행

□ 기대효과

◦ 재난안전대책본부 운영을 통한 실무 부서의 체계적 지원

◦ 24시간 상황유지를 통한 가축질병 발생예방 및 신속대응