살고싶은 산청 자랑스런 산청인

2011. 01.

= 2011년도 =

주 요 업 무 계 획

상하수도사업소

		목 차

1. 안심하고 마실 수 있는 식수 공급	1

2. 산청ㆍ생초 통합 지방상수도 설치	2

3. 지방상수도 및 소규모 수도시설 정비	3

4. 상ㆍ하수도 통합시공	4-5

5. 댐상류 하수도시설 확충	6

6. 농어촌 마을하수도 정비	7

7. 총인처리시설(공공하수처리시설) 설치	8

8. 신안 다복골지구 하수관거 설치	9

9. 지방상수도 구역별 유량계 설치	10

1. 안심하고 마실수 있는 식수 공급

지속적인 시설개선과 체계적인 관리를 통하여 보다 나은 상수도 서비스를 제공함으로써 안심하고 마실수 있는 식수를 공급코자 함

□ 현    황

지방상수도					소규모 수도시설(개소)			먹는물 공동시설 (개소)	비고
시설수 (개소)	시설용량 (㎥/일)	급수 인구(명)	관로연장 (km)	계량기 수(전)	소 계	지하수	하천,계곡, 복류,용천수
4	9,100	12,941	215.2	4,699	290	240	50	4

□ 사업개요                                                  (단위:백만원)

구 분		사업량	사업비	비 고
계			551
지방상수도	수도시설 기술진단(수도법제74조)	4개소	110
	상수도 노후 계량기 교체	700개	112
	구역별 유량계 설치	6개소	168
소규모수도시설	위탁관리	290개소	93
	염소투입기 관리	290개소	48
먹는물공동시설	약수터 정비	4개소	20

□ 그간 추진사항

◦ 소규모 수도시설 염소투입기 보급 완료 : 290개소

◦ 소규모 수도시설 민간위탁 관리 : 290개소(93백만원)

◦ 지방상수도 가압장 원격제어 시스템 설치 : 3개소(58백만원)

□ 추진계획

◦ 사업착공 : 2011. 02

◦ 사업완료 예정 : 2011. 12

□ 문제점 및 대책

◦ 먹는 물에 대한 주민의식은 향상되고 있으나 소규모 시설의 산재와 관심부족으로 관리에 어려움이 있음

⇒ 지속적인 시설개선 및 통ㆍ폐합과 위탁관리 등을 통하여 먹는물에 대한 신뢰제고

□ 기대효과

◦ 시설개선과 체계적 관리를 통하여 급수에 대한 불신해소 기여

2. 산청ㆍ생초 통합 지방상수도 설치

기존 시설의 노후화와 정수처리 능력 저하 및 시설용량의 한계 도달, 시설 분산에 따른 관리애로, 지역별 상수원보호구역 지정 등으로 지역개발 제한 및 낙후 심화를 개선코자 함

□ 사업개요

◦ 사 업 량 : 시설용량 - 5,500 ㎥/일, 취‧정수시설 1식

(관로매설 : 송ㆍ배수 L=30.4km)

◦ 사업기간 : 2007. 07. ~ 2015. 12

◦ 총 소요사업비 : 28,350백만원(국비 16,200 57%, 지방비 12,150 43%)

- 기존급수구역(산청읍, 생초면) : 지방비 8,650

- 신규급수구역(면지역) : 국비 16,200, 지방비 3,500

◦ 년차별 투자 계획                                          (단위:백만원)

총 계			2010년까지			2011년			2011년 이후
계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비
28,350	16,200	12,150	5,390	3,090	2,300	3,658	2,142	1,516	19,302	10,968	8,334

□ 그간 추진사항

◦ 중앙 투․융자심사완료 : 2008.05

◦ 수도정비 기본계획 변경승인(경상남도,환경부) : 2008.10

∙ 산청․생초 지방상수도 통합 및 확장사업비 반영

⇒총사업비 24,200백만원[국비 13,800백만원(57%), 지방비 10,400백만원(43%)]

◦ 실시설계용역 완료 : 2010.02

◦ 총사업비 변경협의 완료 : 2010.08

⇒총사업비 28,350백만원[국비 16,200백만원(57%), 지방비 12,150백만원(43%)]

◦ 수도사업인가승인(경상남도 환경지원과) 및 공사착공 : 2010.12

□ 추진계획

◦ 사업착공 : 2010. 12

◦ 사업준공 : 2015. 12

□ 기대효과

◦ 분산된 지방상수도 시설의 통합 및 확장으로 행정력낭비 해소

◦ 지역별 상수원보호구역 설정에 따른 지역발전 저해요소 제거

3. 지방상수도 및 소규모 수도시설 정비

◇ 지방상수도 관로시설 노후화에 따른 누수 및 단수등에 따른 주민불편가중

◇ 소규모 수도시설 대부분이 70년대에 설치된 시설로 주민건강 위협 우려

및 겨울철 갈수기시 계곡수(원수)고갈로 인한 주민식수공급에 애로

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 관내(11개 읍ㆍ면)

◦ 사업량 및 사업비                                          (단위:백만원)

구 분	사 업 량	사업비	비 고
계		3,867
지방상수도 노후관 교체	노후관로 교체 L=6.0km	750
마을상수도 개보수 및 긴급보수	산청군 관내 37개소	625
마을상수도 노후물탱크 교체	산청군 관내 19개소	400
소규모 수도시설 개량 (100명 미만, 20톤미만)	산청군 관내 20개소	1,121
농촌생활용수개발	5개소〔차황(궁소, 만암) 오부(원방,금곡) 신등(모례)〕	971

□ 추진계획

◦ 실시설계 : 2011. 01

◦ 사업발주 : 2011. 02

◦ 사업준공 : 2011. 06

□ 기대효과

◦ 지방상수도 노후관 교체에 따른 안정적인 수돗물 공급

◦ 소규모 수도시설 개․보수 및 암반관정 개발 등으로 열악한 농촌지역에 안정적이고 양질의 수돗물 공급은 물론 주민보건증진 향상

4. 상‧하수도 통합 시공

현재 시행중인 남강댐 상류 하수도시설 확충사업과 연계하여 노후 관로 교체사업 시행으로 도로의 이중굴착 방지와 예산을 절감하고 유수율 증대로 안정적인 맑은물 공급에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 하정마을외 24개소

◦ 사 업 량 : 25개소,  L= 149km

◦ 사 업 비 : 6,122백만원                                    (단위: 백만원)

총 계	2009년이전	2010년	2011년 계획	비 고
6,122 (25개소)	4,822 (20개소)	600 (2개소)	700 (3개소)

□ 그간 추진사항

◦ 사업착공 : 2007. 07

※ 추진현황 : 80%(총 25개소중 완료 18개소, 추진중 7개소)

□ 추진계획

◦ 사업준공 : 2011. 12

- 남강댐상류 하수도사업 추진 진도에 맞춰 년차적 예산확보로 상수도(노후관)

사업 병행 추진

□ 문제점 및 대책

◦ 지하 매설물로 인한 터파기 작업 애로 및 하수처리장 설치 지연에 따른 가정관로(통합상수도) 매설지연으로 진도 부진

⇒ 소규모 마을별 시공팀 확장 및 분산시공으로 부진공종 만회

□ 기대효과

◦ 통합시공으로 이중굴착방지와 민원최소화로 행정의 효율성을 제고하고 예산절감에 기여

상‧하수도 통합시공 추진사항

시행 년도	구 분	위 치		사업량 (km)	사업비 (백만원)	비고 (진도%)
		면	리
총계	25개소			149	5,922	80
소계	12개소			45.1	1,374	99
2007년 실적	외정마을	산청	정곡	3.2	78	100
	관정마을	단성	관정	2.7	73	100
	풍현마을	산청	내리	2.3	47	100
	문대.진태마을	신안	문대	4.8	124	100
	구기마을	생초	상촌	3.0	94	100
	시장마을	차황	장위	5.6	149	100
	한빈마을	신안	장죽	3.7	74	100
	향양마을	금서	향양	4.7	107	100
	단계마을	신등	단계	1.6	69	100
	외송마을	신안	외송	3.5	46	100
	어서마을	생초	어서	6.5	313	95
	두곡.가림	신등	가술	3.5	200	100
소계	3개소			47.0	1,114	100
2008년 실적	사리마을	시천	사리	17.0	300	100
	신안.단성	신안,단성	하정,성내	25.0	725	100
	주상마을	금서	주상	5.0	89	100
소계	5개소			34.9	2,334	95
2009년 실적	배양마을	단성	사월	7.0	670	95
	묵곡마을	단성	묵곡	22.0	1,274	80
	입석마을	단성	입석	1.5	90	100
	갈전마을	생초	갈전	1.6	100	100
	동신마을	시천	원리	2.8	200	100
소계	2개소			10.0	600	55
2010년 추진	보전마을	생초	하촌	5.5	350	100
	음촌마을	오부	음촌	4.5	250	10
소계	3개소			12.0	500	5
2011년 계획	중산마을	시천	중산	5.5	200	5
	대포마을	삼장	대포	4.0	200	5
	안마근담마을	시천	사리	2.5	100	5

5. 댐상류 하수도시설 확충

정부의 물관리 종합대책 일환으로 추진중인 댐상류 하수도시설 확충사업과 연계하여 환경기초시설의 체계적인 설치와 처리시설 통합관리를 통하여 남강수계 하천의 수질보전과 쾌적한 생활환경을 조성코자 함.

□ 사업개요

◦ 사 업 량

- 하수처리장 : 2개소(시천 600㎥/일, 신안․단성 1,800㎥/일)

- 마을하수도 : 신설 17개소, 개보수 4개소

◦ 사업비 및 공사기간

- 총사업비 : 77,743백만원(국비 80%, 수계기금 16%, 도비 2%, 군비 2%)

⇒ 2011년 19,249백만원(국비 15,164 수계기금 3,043 도비 518 군비 524)

- 사업기간 : 2006. 09 ~ 2011. 09

◦ 시 공 사 : (주)쌍용건설외 4개사 (감독대행 : 환경관리공단)

□ 추진사항

◦ 남강댐상류 하수도시설 확충사업 협약 체결 : 2005. 06. 22

◦ 실시설계 완료 : 2006. 09. 17

◦ 공사계약 및 착공 : 2006. 09. 27

※ 현 추진공정 : 75%

◦ 준공예정일 : 2011. 09.

□ 문제점 및 대책

◦ 예산배정 지연으로 사업의 장기화에 따른 개별시설 미가동으로 민원발생

⇒ 2011년 9월 준공을 목표로 2010년 10월부터 공사지연 시설(중산, 마근담, 대포 등 3개마을) 착공

□ 기대효과

◦ 하수처리시설의 체계적인 설치로 통합관리 기반 마련

◦ 남강수계 하천의 수질보전 및 쾌적한 생활환경 조성

6. 농어촌 마을하수도 정비

농촌지역의 열악한 주거환경개선을 위한 마을하수도 설치로 농촌마을의 쾌적한 환경조성 및 생활오수의 적정처리로 양질의 수자원 확보 등 수질개선에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 오부면 양촌리, 삼장면 덕교리

◦ 사 업 량 : 2개소(오부 85㎥/일, 덕교 80㎥/일)

◦ 사 업 비

- 총사업비 : 6,382백만원(국비 70%, 수계기금 18%, 도비 6%, 군비 6%)

⇒ 2011년 1,215백만원(국비 848 수계기금 193 도비 87 군비 87)

◦ 사업기간 : 2010. 10 ~ 2012. 12

□ 그간 추진사항

◦ 실시설계용역 착수 : 2008. 04. 01

◦ 하수도정비 기본계획(변경)수립 : 2010. 03. 11

◦ 공공하수처리시설 설치인가  : 2010. 07. 01

◦ 공사계약 및 착공 : 2010. 11

□ 추진계획

◦ 준공예정일 : 2012. 12

□ 문제점 및 대책

◦ 설치인가시 승인된 오부처리장 부지가 향후 국도 램프시설에 편입계획으로 있어 변경이 불가피해 대체부지 확보애로

⇒ 주민설명회 및 인근 대체부지 토지소유자와 지속적인 협의로 사업 조기추진

□ 기대효과

◦ 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원확보와 수질개선에 기여

◦ 농촌지역의 열악한 주거환경개선으로 주민생활 편익도모

4대강유역 하수처리시설의 총인(T-P)항목에 대한 수질기준이 강화됨에 따라 총인처리시설을 설치하므로써 양질의 수자원 확보와 하류수계 수질향상에 기여코자 함

7. 총인처리시설(공공하수처리시설) 설치

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 66일원외 2개소

◦ 사 업 량 : 총인처리시설 설치 3개소(산청, 신안ㆍ단성, 시천)

◦ 사 업 비

- 총사업비 : 1,760백만원(국비 70%, 수계기금 18%, 도비 6%, 군비 6%)

⇒ 2011년 528백만원(국비 370 수계기금 95 도비 32 군비 31)

◦ 사업기간 : 2010. 12 ~ 2011. 06

□ 그간 추진사항

◦ 실시설계용역 착수 : 2010. 04.

◦ 총인처리시설 공법선정  : 2010. 09

◦ 설치인가 및 총사업비 변경신청 : 2010. 10

□ 추진계획

◦ 공사계약 및 착공 : 2010. 12

◦ 준공예정일 : 2011. 06

□ 문제점 및 대책

◦ 총사업비 부족으로 인하여 사업추진에 어려움이 있음

⇒ 환경부 및 예산관련 부서와 지속적인 협의를 통하여 국비 조기확보 추진

□ 기대효과

◦ 안정적이고 체계적인 하수 고도처리로 공공수역 수질향상에 기여

댐상류 하수도시설 확충사업에 제외된 신안 일부지구에 대하여 댐상류 사업과 연계하여 하수관거를 설치하므로써 생활하수를 적정처리 주거환경 개선과 공공수역 수질 향상에 기여코자 함

8. 신안 다복골지구 하수관거 설치

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 지내

◦ 사 업 량 : 하수관거 설치 1.2km

◦ 사 업 비 : 750백만원(군비)                                 (단위: 백만원)

총 계	2010년(기확보)	2011년 계획	비 고
750	450	300

◦ 사업기간 : 2010. 10　～2011. 12

□ 그간 추진사항

◦ 실시설계용역 완료 : 2010. 09

□ 추진계획

◦ 공사계약 및 착공 : 2011. 03

◦ 준공예정일 : 2011. 12

□ 문제점 및 대책

◦ 기 확보된 예산으로 추진에 어려움이 있어 사업이 지연됨

⇒ 2011년도 부족사업비(300백만원) 확보함

□ 기대효과

◦ 하수처리 미편입 지역에 대한 하수처리로 주거환경 개선과 공공수역 수질 향상 기여

10. 지방상수도 구역별 유량계 설치

○ 상수도 노후관로에 대하여 년차적으로 교체사업을 시행하고 있으나 급

수구역 확장 등으로 수량관리에 어려움이 있어 구역별 유량계를 설치

안정적인 수돗물 공급과 유수율 향상에 기여코자 함

□ 사업개요

◦ 위    치 : 지방상수도 급수구역내

◦ 사 업 량 : 구역별 유량계 설치(15개소)

상수도		급수구역	수도전수 (전)	급수인구 (인)	설치 계획수 (개소)	비고
시설명	시설용량 (㎥/일)
계	9,100		4,699	12,941	15
산청	2,600	산청읍(5리) 오부면(1리), 금서면(1리)	1,611	5,105	3
생초	900	생초면(2리)	441	952	-
시천	1,500	시천면(2리)	419	1,242	2
단성	4,100	단성면(4리), 신안면(7리), 신등면(2리)	2,228	5,642	10

◦ 사 업 비 : 450백만원

◦ 사업기간 : 2011. 02　～2012. 12

□ 추진계획

◦ 년차별 투자 계획                                      (단위:백만원, 개소)

총 계		2010년까지	2011년	2011년 이후
사업비	450	0	168	282
사업량	15	0	6	9

◦ 실시설계용역 : 2011. 02.

◦ 공사계약 및 착공 : 2011. 03

◦ 준공예정일 : 2012. 12

□ 문제점 및 대책

◦ 상수도 노후관로에 대하여 년차적으로 교체사업을 시행하고 있으나 급수구역 확장 등으로 안정적인 수돗물 공급애로

⇒ 급수구역이 넓은 단성급수구역중 일부구간에 대하여 시범적으로 설치후 년차적으로 확대시행

□ 기대효과

◦ 구역별 유량계 설치사업을 통하여 수량을 관리함으로서 안정적인 수돗물 공급과 유수율 향상에 기여