재무과 소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2014년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(재 무 과)

□ 총    평

❍ CCTV를 구축함으로써 각종 재난, 방범 등 긴급상황 발생 시 신속한 대응체계 구축(교통, 환경, 방재, 어린이안전, 범죄 예방 등)

❍ 향후 현재의 군청별관 및 항노화산업과 건물을 철거 후 군청본관 왼편에 사무실을 증축, 사무공간을 확보하여 효율적인 청사 관리 및 직원복리 후생에 만전을 기하고자 함.

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	1		1
군 수 공 약 사 업	1		1
주요시책사업

□ 주요성과

❍ ‘13.3~5월 : 관련기관(경찰서,소방서,교육청)  업무회의

❍ ‘14.4~5월 : 안행부 사업계획서 제출 및 평가보고회

❍ ‘14.10월~11월

- CCTV 통합관제센터 구축 계획수립

- 군정조정위원회 개최(원안가결), 공유재산 관리계획(안)제출

- 공유재산관리계획안 본회의 의결(원안가결)

❍ ‘15. 1월   : 통합관제센터 사업추진 전담 T/F팀 구성

□ 주요성과

❍ CCTV 통합관제센터 구축은 국도비 사업으로 조속히 설치하여야 하나       사무 공간 미확보로 추진이 다소 늦었음

□ 향후 추진계획

❍ 설계용역추진 사전재해영향성검토 용역 : '15.1~3월

❍ 사업비 1회 추경 확보 : '15.3~4월

❍ 설계 및 문화재 영향 평가 : '15.3~6월

❍ 항노화산업과 건물 철거 및 건물 신축 :  '15.7월~

구 분	공약사업
담당부서	재무과(재산관리담당)
추진진도(%)	10%

9

CCTV 통합관제센터 구축 및 사무실 증축 증축

❍ 각 기관별(부서별)로 관리되고 있는 CCTV의 효율적인 운영과 각종 재난․재해, 방범 등 긴급 상황 발생 시 신속한 대응체계 구축 및 현재의 군청 별관 및 항노화산업과 건물을 철거 후 군청 본관 왼편에 사무실을 증축, 협소한 사무공간을 확보하여 청사를 효율적으로 활용

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 산엔청로 1

❍ 사 업 비 : 3,698백만원

❍ 사 업 량 : 증축 1동 : 지하1층,지상4층, 증축면적 1,867㎡(564평)

□ 추진사항

❍ ‘14. 10.24 : CCTV 통합관제센터 구축 및 사무실 증축 계획수립

❍ ‘14. 10.30 : 군정조정위원회 개최(원안가결)

❍ ‘14. 10.31 : 공유재산 관리계획(안)제출

❍ ‘14. 11.25 : CCTV통합관제센터 구축 및 사무실 증축을 위한

공유재산관리계획안 본회의 의결(원안가결)

□ 문제점 및 대책

❍ 현재 항노화산업과 및 앞 주차장 부지를 활용하여 4층 증축 시 후면       거주자(2세대)의 조망권 침해 등 민원이 예상

□ 향후 추진계획

❍ 설계용역추진 사전재해영향성검토 용역 : ‘15. 1 ~ 3월

❍ 사업비 1회 추경 확보 : ‘15. 3 ~ 4월

❍ 설계 및 문화재영향평가 : ‘15. 3 ~ 6월

❍ 한방산업과 건물 철거 및 건물 신축 : ‘15. 7월 ~