문화관광과 소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2014년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(문화관광과)

□ 총    평

❍ 2014년 산청한방약초축제 성공개최를 위해 각종 문화예술행사를       통한 성공개최 분위기 조성과 관광객이 머물 수 있는 문화관광 및         공공체육기반시설 조성

❍ 해마다 늘어나고 있는 관광수요에 대응하기 위해 전통한방휴양관광지ㆍ        중산관광지 산악관광센터ㆍ한국선비문화연구원ㆍ남사전통한옥체험마을 등       사업 마무리 및 효율적 관리

❍ SNS를 통한 홍보 및 각종 관광홍보물ㆍ팸투어ㆍ박람회 참가ㆍ       인센티브제ㆍ산청투어 운영 등 다양한 매체를 통해 관광산청 적극 홍보

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	11		11
군 수 공 약 사 업	7		7
주요시책사업	4		4

□ 주요성과

❍ 품격 있는 문화향유 기회 확대 및 군민화합도모(문화예술담당)

- 제8회 기산국악제전 및 전국국악경연대회 개최(2014. 10. 04)

: 제4회 박헌봉 국악상 시상 및 축하공연

- 제41회 지리산평화제 개최(2014. 10. 09 ～ 10. 11)

: 평화상 시상, 지리산 산신제, 서도연합회 회원전 등

- 제38회 남명선비문화축제 개최(2014. 10. 11 ～ 10. 12)

: 남명제례, 가장행렬, 의병출정식 및 전국시조경창대회 등

- 제6회 불교문화제전 개최(2014. 10. 08)

: 불교음악회, 위령제 등

- 경남도민예술단 및 우수예술단체 시군 순회공연

- 문화예술회관 무료 영화상영 : 24회 7,200명

- 산청선비대학 운영 : 주1회 50여명

❍ 체계적인 전통문화유산 계승과 문화재 보존(문화재 담당)

- 국가지정문화재 보수사업 : 율곡사 대웅전 주변정비외 9개사업 / 1,355백만원

- 도지정문화재 보수사업 : 인곡서당 보수사업외 5개사업 / 545백만원

- 전통문화 계승사업 : 2개 사업 / 44백만원

❍ 엘리트 및 생활체육 활성화를 통한 군민의 건강한 삶 유지와

활력 있는 지역분위기 조성(체육담당)

- 체육대회 유치 : 전국오픈탁구대회, 경상남도 종별 태권도선수권 대회

- 전지훈련팀 유치 : 진주고봉우FC외 17개팀

- 공설운동장, 산청체육센터 등 체육시설 이용 : 650회, 6,524명

- 남부궁도장(산청정)건립사업 완료 : 260백만원

- 산청복합체육시설건립사업 완료 : 406백만원

- 시천생활체육시설조성사업 : 975백만원(진도 70%)

- 생초축구문화센터건립사업 : 211백만원(진도 90%)

❍ 차별화된 홍보마케팅 추진으로 산청의 브랜드 가치 제고(관광진흥담당)

- 스마트폰 모바일 웹 활용 : □산청여행□애플리케이션, QR코드

- 관광산청이미지 집중 홍보 : LED전광판(2개소), 대도시 터미널       광고판(3개소), 공항 내 광고(2개소), 대도시 지하철 내부 광고(6개소),         랩핑광고(시외버스 20대, 관내 관광버스 12대)

- 관광마케팅 활성화 : 팸투어(9회, 118명), 단체여행객 유치 인센티브

(12회, 641명), 산청투어(4회, 105명), 주요 박람회 참석(4회,

경기국제관광박람회 외)

- 관광안내 홍보물 제작 활용 : 관광기념품(쿨토시4,000개, 머그컵5,000개),       쇼핑백(2종, 6,000부), 산청달력(2,000부), 포켓용다국어지도

(40,000부), 지리산둘레길팜플렛(30,000부)

- 문화관광해설사 활동 : 11명, 2,400회 12,000명

❍ 관광기반시설 조성사업등(관광개발 담당)

• 산청선비문화연구원 건립 마무리 사업 추진(총 공정율90%)

- 부대시설 건립공사 추진(80%)

- 조경시설 설치공사 추진(75%)

• 중산산악관광센터 마무리 사업 추진(총 공정율90%)

- 전시시설 설치공사 추진(60%)

• 남사전통한옥체험마을조성 계속사업 추진(총 공정율 65%)

- 전력지중화사업 추진(공정율 85%)

- 마을안길정비공사 준공, 종합관광안내소 건립 준공

- 이벤트장조성사업 추진(공정율10%)

• 황매산 공원권 관광기반 조성 공약사업 국,도비 확보

- 총사업비 1,200백만원(국비600 / 도비180 / 군비420)

- 15년 설계용역비 200백만원 확보(국비100 / 도비30 / 군비70)

□ 반    성

❍ 남사 전통한옥체험마을 조성사업 문화재현상변경허가 지연에 따른 사업진도 미흡

❍ 추후 조속한 사전 인·허가 절차 이행으로 원활한 사업추진 대책 마련

□ 향후 추진계획

❍ ‘15.01 : 남사전통한옥체험마을조성 노후한옥정비사업 시행

❍ ‘15.02 : 산청선비문화연구원 건립 준공

❍ ‘15.02 : 중산산악관광센터 전시시설 사업 준공

❍ ‘15.04 : 남사전통한옥체험마을조성 전력지중화사업 준공

❍ ‘15.05 : 남사전통한옥체험마을조성 이벤트장 조성사업 준공

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(문화예술담당)
추진진도(%)	10%

11

산청문화원 운영 활성화

❍지역주민의 다양한 문화예술, 여가활동 및 소통 공간으로 활동되고

있는 문화원 시설을 확충하고 분과활동 내실화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 지리 일원

❍ 사 업 비 : 3.5억원

❍ 사 업 량 : 산청문화의 집 리모델링 1식

문화원분과위원회 문화학교 운영 활성화

산청문화거리 정기 문화예술활동지원

□ 추진사항

❍ ‘14. 7월 ~ 12월 : 산청문화원분과(27개분과) 및 문화학교(10개반) 운영

❍ ‘14. 10. 29.  : 제8회 문화학교 발표회 개최

❍ ‘14. 11. 16.  : 문화의 거리 1주년 기념어울한마당행사

□ 문제점 및 대책

❍ 2015년 본예산 산청문화의 집 리모델링 및 산청문화거리

정기 문화예술 활동지원 예산 삭감에 따른 사업 수정 검토

□ 향후 추진계획

❍ 2015년 추가경정 예산 시 산청문화의 집 신축 예산 확보 추진 노력

❍ 2015년 추가경정 예산 시 산청문화거리 정기문화예술활동지원 예산 확보 추진

❍ 문화원 분과 운영 및 문화학교 운영 강사료 현실화 추진

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	5%

12

황매산 공원권 관광기반 조성사업

❍ 등산객 및 관광객이 황매산을 방문 시 휴식을 취할 수 있는 공간 부족으로 생태형공원을 조성하여 캠핑 및 등산 후 힐링을 할 수 있는 장소 제공

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 황매산 공원권 관광기반 조성사업

❍ 위    치 : 차황면 법평리 일원

❍ 사 업 비 : 1,200백만원(국비600 / 도비180 / 군비420)

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	‘15년	‘16년	‘17년	비고
계	1,200	-	200	1,000	-
국 비	600	-	100	500	-
도 비	180	-	30	150	-
군 비	420	-	70	350	-

❍ 사 업 량 : 주차장(캠핑장 겸용) A=9.740㎡, 쉼터조성 A=18,740㎡

□ 추진사항

❍ ‘14. 07 : 국,도비 확보를 위한 1차 방문협의(경남도)

❍ ‘14. 09 : 국,도비 확보를 위한 2차 방문협의(경남도)

❍ ‘14. 10 : 15년 신규사업 국,도비 확정 통보(경남도⇒산청군)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ ‘15. 01 : 기본 및 실시설계용역 발주

❍ ‘16. 01 : 사업발주 및 착공

❍ ‘16. 12 : 사업준공

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	10%

13

호암지구 게이트볼장 건립

❍ 단성면 입석리 호암지구 내 게이트볼장이 현재 사유지에 위치하여 토지소유자의 건축계획으로 존폐위기에 처해 있어 인근 군유지를 활용한 게이트볼장건립으로 노인들의 여가선용 및 건강증진 기여

□ 사업개요

❍ 사업명 : 호암전천후 게이트볼장 건립사업

❍ 위 치 : 단성면 입석리 840-1번지

❍ 사업비 : 420백만원 (시설비 : 400, 설계비 : 20)

❍ 사업량 : 호암전천후 게이트볼장 건립 A=600㎡

□ 추진사항

❍ 2014.08월 : 지방체육시설 확충 도비 예산 신청

❍ 2014.11월 : 공유재산 관리이관 협의 요청

❍ 2014.10월 : 공유재산 군정조정위원회 가결

❍ 2014.11월 : 야외 게이트볼장 조성 시행

❍ 2014.12월 : 2015년 게이트볼장 건립 군비 예산 확보

❍ 2015.01월 : 공유재산관리계회 변경 심의 계획

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점 : 2015년 지방체육시설 확충 도비 예산 미확보

❍ 대책 : 지속적인 국도비 확보 주력 후 사업 추진

□ 기대효과

❍ 군민의 여가선용 기회제공 및 노인 건강증진 기여

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	60%

14

서부지구 친환경 캠핑장 조성

❍ 자연경관이 우수한 창촌리 일원의 폐천부지 활용을 친환경 캠핑장으로 조성하여 생태적,경관적 잠재성을 도출하여 지역주민소득창출 및 관광객의 여가선용 기회 제공

□ 사업개요

❍ 사업명 : 산청따라 하동길 조성사업

❍ 위 치 : 단성면 창촌리 834-25번지 일원

❍ 사업비 : 2,270백만원 (국 1,917, 군 299)

❍ 사업량 : 다목적 캠핑장 조성 A=70,000㎡

❍ 사업기간 : 2013.04 ~ 2015.12

□ 세부추진계획

❍ 2014.06월 : 1구역 부지기반조성 및 경관조성사업 완료

❍ 2014.12월 : 2구역 캠핑장부 시설공사 착수

❍ 2015.06월 : 2015년 홍보 마케팅 추진 계획

□ 문제점 및 대책

❍ 해당지역이 수변구역, 농림지역으로 편의시설(화장실, 샤워실등)     확충에 행위제한 등 어려움이 있으나 2015년 군관리계획 재정비시     농업진흥구역 해제 추진으로 부족한 시설 확충 도모

□ 기대효과

❍ 폐천부지의 다목적캠핑장으로 재창출함으로 지역소득증대 기여

❍ 경관적 잠재성을 도출하여 탐방객 및 지역민의 여가선용 공간 마련

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	10%

15

생활체육시설 확충(수영장]

❍ 다양한 생활체육시설 확충으로 군민의 건전한 여과생활과 건강증진을 도모하고 지역의 균형적인 체육인프라 구축에 기여

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 신안소재지권 수영장 확충

❍ 사 업 비 : 50억원정도

❍ 사업내역 : 시설 건립 1식(25m, 4레인)

❍ 사업기간 : 착수일로부터 2년간

□ 추진사항

❍ 2014.11월 : 국비 사업 건의 방문

❍ 2014.11월 : 2015년 기본계획 용역 사업비 예산 신청(군비)

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점 : 2015년 기본계획 용역 사업비 미확보(군비)

❍ 대  책 : 2015년 1회 추경 예산 확보 주력 및 2016년 광특사업              예산 신청

□ 기대효과

❍ 다양한 체육 인프라 구축으로 군민들의 생활체육활성화 및 건강    증진에 도모

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	10%

16

그라운드골프장 관리실 신축

❍ 산청읍 옥산리 718번지 내 그라운드 골프장 경기장내 관리실(편의 시설) 신축 및 시설재정비로 노인체육 활성화 및 건강증진 기여

□ 사업개요

❍ 사업명 : 산청 그라운드골프장 관리실 신축

❍ 위 치 : 산청읍 옥산리 718번지

❍ 사업비 : 200백만원

❍ 사업량 : 관리실 신축 A=150㎡

□ 추진사항

❍ 2014.08월 : 지방체육시설 확충 도비 예산 신청

❍ 2014.12월 : 2015년 센터 건립 군비 예산 확보

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점 : 2015년 지방체육시설 확충 도비 예산 미확보

❍ 대책 : 지속적인 국도비 확보 주력 후 사업 추진

□ 기대효과

❍ 체육시설 이용객의 편의시설 확충을 통한 경기력 향상

❍ 군민들의 생활체육활성화 및 건강증진에 도모

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	50%

17

스포츠마케팅 활동 강화

❍ 인프라가 구축된 체육시설에 스포츠마케팅을 통해 전국 및 도 단위 대회와 전지훈련팀을 유치하여 체육저변 확대 및 지역  경제 활성화 기여

□ 유치 개요

❍ 유치기간 : 2014.12 ~ 2015.02

❍ 유치팀수 및 종목 : 50팀 내외(축구,테니스,야구,씨름,탁구등)

❍ 전지훈련비 지원 : 35,000천원

❍ 장 소 : 공설운동장 및 생초축구장 등

□ 추진사항

❍ 2014.10월 : 전지훈련 유치 위원회 발족

❍ 2014.12월 : 전지훈련 유치 및 지원 계획 수립

❍ 2014.12월 : 5개종목 43개팀 870여명 유치

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점 : 전지훈련 유치 조례 미제정으로 유치활동비 지원 제약

❍ 대  책 : 2015년 전지훈련유치지원 조례 제정

□ 기대효과

❍ 스포츠마케팅을 통한 관내 체육시설 적극 활용

❍ 체육활성화 및 지역경제 활성화 기여

❍ 우수선수 지역내 훈련에 따른 스포츠 동호인 경기력 향상

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	90%

18

한국선비문화연구원 건립 마무리

❍ 청소년들에게 선비 정신과 선비 문화를 전수하여 미래 사회를 이끌어갈 정신적 좌표마련 및 전통 문화체험 장소로 활용

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 900-27번지 일원

❍ 사 업 비 : 18,224백만원(국비 9,112 / 지방비 9,112)

❍ 사 업 량 : 연구연수동 1동, 연수숙박동 1동, 회랑 3동, 전시시설 1식,

전통체험시설 3동, 부대시설(바깥채 1동, 사모정 1동, 사주문 1동)

□ 추진사항

❍ ‘07. 10 : 선비문화연구원 건립사업 기본계획 용역완료

❍ ‘10. 02 : 선비문화연구원 건립 실시설계용역 완료

❍ ‘10. 11 : 군관리계획(연구연수시설) 결정(변경)

❍ ‘12. 06 : 선비문화연구원(연구연수동) 준공

❍ ‘13. 01 : 선비문화연구원 건립사업 부지 보상협의 완료

❍ ‘13. 08 : 선비문화연구원(연수숙박동) 준공

❍ ‘14. 05 : 한국선비문화연구원(회랑) 준공

❍ ‘14. 06 : 한국선비문화연구원(전통체험시설 및 부대시설등) 건립사업 착공

❍ ‘14. 08 : 한국선비문화연구원(전시시설) 준공

❍ ‘14. 08 : 한국선비문화연구원 건립사업 조경공사 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ ‘15. 01 : 한국선비문화연구원(전통체험시설 및 부대시설등) 건립사업 준공

한국선비문화연구원 건립사업 조경공사 준공

❍ ‘15. 06 : 미비사항 보완 및 주변정비 완료

한국선비문화연구원 운영

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	65%

19

남사 전통한옥체험마을 조성

❍ 전통한옥마을로서 가치를 지니고 있고 지역주민의 관광개발 의지가 높은 남사마을을 복합형 전통 한옥문화촌으로 정비하여 역사와 전통, 문화가 조화된 테마형 농촌체험공간을 조성하기 위함

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 남사전통한옥체험마을조성

❍ 위    치 : 단성면 지리산대로 2897번길(남사예담촌)

❍ 사 업 비 : 9,704백만원(국비 4,794 / 도비 1,438 / 군비 3,472)

❍ 사 업 량

- 물레방앗간 산죽지붕잇기(196㎡)

- 향토음식체험관 건립(지상1층 목조건물 A=158㎡)

- 야외이벤트장 A=856㎡(옛담장 L=50m, 상설무대 및 휴게시설)

- 마을안길포장(A=4,084㎡),  노후한옥정비(6,930㎡)

- 전력간선 지중화사업 1식(1.5㎞)

- 종합관광안내소(1동/99㎡), 산책로 조성(1.5km)

□ 추진사항

❍ ‘06.12 : 지리산권 광역관광개발계획 특화사업 확정

❍ ‘07.10 : 지방재정투융자사업 심사 승인

❍ ‘08.12 : 중기지방재정계획 반영

❍ ‘11.09 : 향토음식체험관 건립공사 준공

❍ ‘14.03 : 전력간선지중화사업 시행

❍ ‘14.03 : 사업계획 변경 승인(문화체육관광부)

❍ ‘14.05 : 종합관광안내소 준공

❍ ‘14.10 : 마을안길정비공사 준공

❍ ‘14.10 : 이벤트장 조성사업 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ ‘15. 01 : 노후한옥정비사업 착공

❍ ‘15. 05 : 이벤트장 조성사업 준공

❍ ‘16. 01 : 산책로 조성사업 착공

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	90%

20

중산관광지 산악관광센터화 사업

❍ 산악 전문조직 등을 통한 지리산 등반 거점 확보와 등산관련 교육·정보제공 및 체험시설로 활용하기 위함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 중산리 501-1(중산광지내)

❍ 사 업 비 : 4,728백만원(국비 2,138 / 도비 641 / 군비 1,949)

❍ 사 업 량 : 지하1/지상3층(건축면적 1,003.25㎡/연면적 2,288.19㎡)

(식당, 관리실, 산악전시관, 교육관, 휴게실, 체험관(숙박)9실)

□ 추진사항

❍ ‘06. 12 : 지리산권 광역관광개발계획 특화사업 확정

❍ ‘07. 10 : 지방재정 투융자심사 승인

❍ ‘08. 12 : 중기지방재정계획 반영

❍ ‘09. 12 : 실시설계 용역완료

❍ ‘10. 12 : 산악관광센터 착공

❍ ‘12. 12 : 산악관광센터 준공

❍ ‘13. 03 : 중산관광지 산악관광센터화사업 변경승인(문체부⇒군)

당초 : 등산교육관, 등산역사관, MTB코스, 오리엔티어링장

변경 : 등산교육관 및 역사관 1동, 주변정비 및 조경시설 1식

❍ ‘13. 12 : 산악관광센터화사업 전시시설비 확보(‘14년도 군비 4억원)

❍ ‘14. 07 : 산악관광센터화사업(전시부문) 실시계획 완료

❍ ‘14. 10 : 산악관광센터 전시시설 설치공사 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ ‘15. 02 : 산악관광센터 전시시설 설치공사 준공

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	50%

21

시천생활체육시설 조성사업

❍ 선비문화연구원 조성 부지 내 테니스장, 게이트볼장 대체

❍ 생활체육 저변확대 및 균형적인 체육시설 조성을 통한 생활체육       발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치  : 산청군 시천면 천평리 567-1번지 일원

❍ 사업기간  : 2014. 1월 ~ 2015년 12월

❍ 사 업 량  : 생활체육시설조성 23,857㎡

❍ 총사업비  : 5,000백만원(국비1,300  도비585  군비3,115)

❍ 사업내용  : 인조잔디축구장, 테니스장, 다목적구장, 게이트볼장

□ 세부추진계획

❍ ‘09. 10 : 지방중기재정계획 반영

❍ ‘10. 10 : 타당성 조사 및 기본계획수립

❍ ‘10. 11 : 지방재정투융자심사완료

❍ ‘10. 11 : 공유재산관리계획 승인

❍ ‘13. 12 : 군관리계획(체육시설) 변경 결정 완료

❍ ‘13. 12 : 실시설계 용역 시행

❍ ‘11. 01월 ~ ’14. 12월 : 토지보상(85% 완료)

❍ ‘14. 06월 ~ ’15. 12월 : 사업착수 및 준공(현 공정 50%)

□ 문제점 및 대책

❍  2015년 공사분 토지보상 협의 일부 지연

⇨ 지속적인 협의 및 ‘수용재결’절차 진행

□ 기대효과

❍생활체육시설조성 및 각종 체육시설확충으로 군민들의 건강증진 도모

❍각종 대회 개최 및 전지훈련(동계, 하계) 유치로 지역경제 활성화 도모