산림녹지과 소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2014년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(산림녹지과)

□ 총    평

❍ 산림을 활용한 군민 복지증진 기여

❍ 산림작물 생산·가공·유통지원으로 농가소득향상 도모

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	4		3		1
군 수 공 약 사 업	2		1		1
주요시책사업	2		2

□ 주요성과

❍ 공약사항(2건)

세부사업명	위치	사업량	추진내용	비 고
황매산 임도 아스콘 포장사업	차황면 신촌마을	임도2.49km	- 기본계획 수립
산림자원 구조변경 (리모델링)사업	전 읍면	250ha	-‘15년 조림대상지 조사 - 추기조림 외61.4ha 추진

❍ 시책사업(2건)

세부사업명	위치	사업량	추진내용	비 고
숲가꾸기사업	전 읍면	1,500ha	- 실시설계 및 감리용역 - 숲가꾸기 사업 95%완료
산청곶감 명품화사업	시천면외	-	- 곶감유통센터 시설보강 - 선도농가 시설지원 - 청정건조시설 보급 등

□ 반    성

❍ 민간보조사업 조기 추진이 미흡

❍ 중점사업 예산 미확보로 사업추진 지연

□ 향후 추진계획

❍ 예산 미 확보사업 2015년 추경 시 확보추진

❍ 대상자 확정 및 조기발주로 사업의 적기 완료추진

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(산지관리담당)
추진진도(%)	5%

22

황매산 임도 아스콘 포장사업

❍ 황매산 임도 정비를 통하여 지역 주민의 통행과 황매산을 찾는 관광객에게 편의를 제공함으로써 관광 산청 기반조성

□ 사업개요

❍ 내 용

- 아스콘 포장 2,490m, 선형개량 3개소, 배수로 및 안전시설 1식

- 소요사업비 : 500백만원

❍ 구 간

- 신촌마을～제3주차장 : 2.49㎞

□ 세부추진계획

❍ 사업비 확보 : ‘15. 3 추가경정예산 반영(자체)

❍ 사업설계 : ‘15.5~6월

❍ 사업발주 : ‘15.7~11월

□ 문제점 및 대책

❍ 아스콘 포장에 따른 민원(토지보상) ⇒ 사전 주민설명회 개최

❍ 임도 확장은 보상 문제 수반 ⇒ 아스콘포장만 실시

❍ 現 도로상황

- 관광객 증가로 임도기능보다 관광 도로로 활용되고 있는 실정임

- 산림기반시설의 목적에 의해 개설한 임도로서 급커브 및 경사도가 커 일반차량 통행 시 위험 상존

⇒ 관광기반시설 조성차원에서 일반도로로 전환하여 전면적인 개량 추진이 효율적일 것으로 판단

□ 기대효과

❍ 관광객 및 거주 주민의 이용 편익 증진

❍ 쾌적하고 안전한 관광 산청의 인프라 구축

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(공원녹지담당)
추진진도(%)	10%

23

산림자원 구조변경(리모델링)사업

❍ 경제적 가치가 낮은 임지의 수종 갱신을 통한 산림 자원 구조 변경으로 산림 소득을 창출 임가 소득증대에 기여하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 관내 노령․불량 임지 250ha

❍ 소요예산 : 1,000백만원

❍ 사업내용 : 불량임지120ha, 밤나무노령임지100ha, 불량소나무30ha

❍ 사업기간 : 2015∼2017년

□ 추진사항

❍‘14.06~09 : 전 읍면 조림대상지 조사

❍‘14.09~10 : 추기 산림재해방지조림사업(8ha)실시-편백, 상수리

❍‘14.09~10 : 추기 바이오순환조림사업(9ha)실시-산벚, 상수리

❍‘14.10~11 : 추기조림사업(22.4ha)실시-상수리, 편백, 호두, 대추, 감, 옻나무

❍‘14.10~12 : 밤나무노령임지수종갱신사업(22ha) 실시-음나무, 가중나무, 호두 등

❍‘14.12~、15.2 : 2015년 원활한 조림사업을 위한 조림예정지 정리사업(44ha) 발주함.

□ 문제점 및 대책

❍ 불량임지 리모델링에 대한 산주들의 인식 부족으로 사업 기피

❍ 수종갱신사업에 따른 소득창출 안내로 산주설득 및 홍보 실시

□ 향후 추진계획

❍ 전 읍.면을 통한 조림사업 홍보 및 대상지 조사 실시

❍ 조림묘목 자체수급분에 대하여는 주민들이 원하는 유실수종을

우선하여 조림사업 실시

❍ 불량임지 구조변경에 따른 산지 자원화 및 주민소득창출에 기여

구 분	시책사업
담당부서	산림녹지과(산지관리담당)
추진진도(%)	95%

24

숲 가꾸기 사업

❍ 지속 가능한 숲 가꾸기를 통하여 산림의 생태․환경적인 건전성을 유지, 산림의 다양한 기능이 발휘되도록 관리

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 숲 가꾸기 사업

❍ 사 업 량 : 1,500ha

❍ 사 업 비 : 2,374백만원

❍ 대 상 지 : 전 읍․면

❍ 사업기간 : 2014년

□ 추진사항

❍ 2014. 1월   : ‘14년 대상지 확정(공고 및 산주동의)

❍ 2014. 2월~ : 사업별 실시설계 및 감리 시행

❍ 2014. 2월~ : 숲 가꾸기 사업, 대리경영사업 추진

□ 문제점 및 대책

❍ 타 지역에 거주하는 산주의 경우 사업 이해도가 낮아 동의서 징구 애로

❍ 산림사업 의 지속적 홍보로 주민 산주 인식 제고

□ 향후 추진방향

❍ 전 읍.면을 통한 숲 가꾸기 사업 홍보 및 대상지 조사

❍ 주요 관광지, 도로변 등에 목재생산림, 생활환경 보전림 조성으로 볼거리 제공

❍ 생태적 안정을 기반으로 하여 국민경제 활동에 필요한 양질의 목재를 지속적․효율적으로 생산 공급

구 분	시책사업
담당부서	산림녹지과(산촌소득담당)
추진진도(%)	40%

25

지리산 산청곶감 명품화 사업

□ 사업개요

❍ 위     치 : 산청군 시천면 송하중태로 6 산청곶감 유통센터 일원

❍ 사업기간 : 2014∼2015년

❍ 사 업 량 : 8종(41동/4건/6종)

❍ 사 업 비 : 3,400백만원(국 1,700, 도 204, 군 476, 기타 1,020)

□ 주요 추진 사업

❍ 곶감유통센터 시설보강 3동(냉동창고 2, 공선회 선별장 1)

❍ 선도농가 시설지원 2종(선별포장시설 2개소, 저온저장고 2)

❍ 청정건조시설 보급(38동)

❍ 곶감재배생산 기술교육 1건

❍ 곶감연구개발 용역 2건

❍ 명품브랜드화 개발 2종

❍ 홍보 및 시장개척 1건

❍ 특허 상표등록 출원 2종

□ 문제점 및 대책

❍ 산청군농업협동조합에서 추진 중인 유통센터 시설보강사업은 부지매입 및 농지전용허가 완료되었으나 하우스 시설 미 철거로 사업지연

→ 조속한 사업추진 독려

❍ 청정건조시설 보급사업은 개별시설로 사업제외 대상으로 분류되어   사업 미 추진

→ 2015년도 개별사업 가능토록 규정 개정 중에 있음

□ 향후 추진계획

❍ 원활한 사업추진을 위해 잔여사업 추진 독려