= 2010년도 =

주요업무계획

상하수도사업소

1. 안심하고 마실 수 있는 급수 공급

2. 산청ㆍ생초 통합 지방상수도 설치사업

3. 지방상수도 급수구역확장 및 마을상수도 정비

4. 상ㆍ하수도 통합시공

5. 댐상류 하수도시설 확충사업

6. 농어촌 마을하수도 정비사업

7. 공공하수처리시설 증설공사

안심하고 마실수 있는 급수 공급

지속적인 시설개선과 체계적인 관리를 통하여 보다 나은 서비스를 제공함으로써 안심하고 마실 수 있는 식수를 공급코자함

□ 현    황

지방상수도					마을상수도(개소)			먹는물 공동시설 (개소)	비고
시설수 (개소)	시설용량 (톤/일)	급수 인구(명)	관로 연장(m)	계량기 수(전)	소 계	지하수	하천,계곡, 복류,용천수
5	9,400	11,640	156,243	4,080	292	236	56	4

□ 사업개요                                   (단위:백만원)

구 분		사업량	사업비	비 고
계			1,116
지방상수도	수질자동측정기 설치(단성)	1개소	170
	상수도 노후관 및 계량기 교체	2km,200개	430
	가압장 자동제어 시스템 설치	2개소	50
	전자식 원격검침 계량기 설치	500개	175
마을상수도 및 소규모급수시설	위탁관리	170개소	100
	염소투입기 설치 및 관리	292개소	91
먹는물공동시설	금강도 약수터 정비	1개소	100

□ 그간 추진사항

◦ 마을상수도ㆍ소규모급수시설 염소투입기 보급(설치) : 233개소

◦ 마을상수도ㆍ소규모급수시설 민간위탁 관리 : 165개소(93백만원)

◦ 신등상수도 가압장 설치  : 가압장 1개소(349백만원)

□ 추진계획

◦ 사업착공 : 2010. 2

◦ 사업완료 예정 : 2010. 12

□ 문제점 및 대책

◦ 먹는 물에 대한 주민의식은 향상되고 있으나 소규모 시설의 산재와 관심부족으로 관리에 어려움이 있음

⇒ 지속적인 시설개선 및 통ㆍ폐합과 위탁관리 등을 통하여 먹는 물에 대한 신뢰제고

□ 기대효과

◦ 시설개선과 체계적 관리를 통하여 급수에 대한 불신해소 기여

산청ㆍ생초 통합 지방상수도 설치사업

◇ 기존 시설의 노후로 정수처리 능력 저하 및 시설용량의 한계 도달

◇ 시설 분산에 따른 관리애로와 지역별 상수원보호구역 지정으로 지

역개발 제한 및 낙후 심화

□ 사업개요

◦ 사 업 량 : 시설용량 - 5,500 톤/일, 취‧정수시설 1식

(관로매설 : 송수 L=25.2km, 배수 L=34.3km)

◦ 사업기간 : 2007. 7. 5 ~ 2013. 12

◦ 총 소요사업비 : 24,200백만원(국비 13,800 57%,지방비 10,400 43%)

- 기존급수구역(산청읍, 생초면) : 지방비 6,600

- 신규급수구역(면지역) : 국비 13,800, 지방비 3,800

◦ 년차별 투자 계획                                       (단위:백만원)

총 계			2009년까지			2010년			2010년 이후
계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비
24,200	13,800	10,400	2,500	1,200	1,300	4,390	1,890	2,500	17,310	10,710	6,600

□ 그간 추진사항

◦ 수도정비 기본계획 변경승인(경남도, 환경부) : 2007. 10

◦ 통합 지방상수도 사업 투융자 심사 (중앙 재심사)완료 : 2008. 05

◦ 산청․생초 지방상수도 통합 및 확장사업 실시설계용역시행 : 2008. 12

◦ 군관리계획 건설기술심의 및 문화재지표조사완료(경남도) : 2009. 06

◦ 사전환경성검토협의 완료(낙동강유역환경청) : 2009. 08

□ 추진계획

◦ 총사업비 변경신청(환경부) : 2009. 10

◦ 산청․생초 지방상수도 통합 및 확장사업 발주 : 2010. 01

□ 문제점 및 대책

◦ 정수장 이전계획에 따른 주민 공감대 조성 애로

⇒ 주민설명회와 이장회의 등을 통한 충분한 여론 수렴 후 추진

□ 기대효과

◦ 분산된 지방상수도 시설의 통합 및 확장으로 행정력낭비 해소

◦ 지역별 상수원보호구역 설정에 따른 지역발전 저해요소 제거

지방상수도 급수구역 확장 및 마을상수도 정비

마을상수도 대부분이 1970년대에 설치된 시설로 주민 건강을 해칠 우려가 있으며  특히 겨울철 갈수기시 계곡수(원수)고갈로 인한 주민 식수공급 애로 (비상급수  조치 등 반복)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 관내

◦ 사업량 및 사업비                                     (단위 : 백만원)

구 분	사 업 량	사업비	비 고
계		6,550
지방상수도확장	신안면 내고마을 외3개소 (내고, 음촌, 구평, 묵곡)	2,600
마을상수도 개보수 및 긴급보수	산청군 관내 37개소	1,996
소규모수도시설개량 (100명미만, 20톤미만)	산청군 관내 12개소	1,104
농촌생활용수개발	5개소(내수,상법,신기,추내,사평)	850

□ 추진계획

◦ 사업대상지 조사 : 2009. 10 ~ 12

◦ 사업착공 : 2010. 1

◦ 사업완료 예정 : 2010. 12

□ 문제점 및 대책

◦ 환경부와 경남도 보조사업 대비 군비 부담율 과다 책정(국비 50%, 군비 50%)

⇒ 연차적으로 보조사업비의 국비 부담률 상향 조정 건의 및 가뭄과

노후관 교체에 따른 군비지원 확대 요구

□ 기대효과

◦ 시설 개ㆍ보수와 마을상수도의 지방상수도 편입으로 안심하게 마실

수 있는 수돗물 공급

상‧하수도 통합 시공

현재 시행중인 남강댐 상류 하수도시설 확충사업과 연계하여 노후 관로 교체사업 시행으로 도로의 이중굴착 방지와 예산을 절감하고 유수률 증대로 안정적인 맑은물 공급에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 하정마을외 23개소

◦ 사 업 량 : 24개소,  L= 123.2km

◦ 사 업 비 : 4,385백만원                                 (단위: 백만원)

총 계	2008년이전	2009년	2010년 계획	비 고
4,385 (24개소)	2,185 (16개소)	700 (5개소)	1,500 (3개소)

□ 그간 추진사항

◦ 사업착공 : 2007. 7

※ 추진현황 : 총 24개소(완료 9, 추진중 12, 2010년 시행 3)

◦ 사업준공 : 2010. 12

□ 추진계획

◦ 남강댐상류 하수도사업 추진 진도에 맞춰 년차적 예산확보 상수도(노후관)

사업 병행 추진

□ 문제점 및 대책

◦ 지하 매설물로 인한 터파기 작업 애로로 진도 부진

⇒ 소규모 마을별 조를 편성하여 확대 시행으로 부진공종 만회

□ 기대효과

◦ 통합시공으로 이중굴착방지와 민원최소화로 행정의 효율성을 제고하고예산절감에 기여

댐상류 하수도시설 확충사업

정부의 물관리 종합대책 및 댐상류 하수도시설 확충사업과 관련하여 환경기초시설의 계획적인 설치와 처리시설을 통합관리 함으로써 남강수계 하천의 수질보전 및 쾌적한 생활환경을 조성코자 함.

□ 사업개요

◦ 사 업 량

- 하수처리장 : 2개소(시천 600㎥/일, 신안․단성 2,100㎥/일)

- 마을하수도 : 신설 19개소, 개보수 4개소

◦ 사업비 및 공사기간

- 총사업비 : 68,462백만원(국비 80%, 수계기금 16%, 도비 2%, 군비 2%)

⇒ 2010년 10,127백만원(국비 7,789 수계기금 1,870 도비 234 군비 234)

- 사업기간 : 2006. 9 ~ 2011. 9

◦ 시 공 사 : (주)쌍용건설외 4개사 (감독대행 : 환경관리공단)

□ 추진사항

◦ 남강댐상류 하수도시설 확충사업 협약 체결 : 2005. 6. 22

◦ 실시설계 완료 : 2006. 9. 17

◦ 공사계약 및 착공 : 2006. 9. 27

※ 현 추진공정 : 75%

◦ 준공예정일 : 2011. 9.

□ 문제점 및 대책

◦ 댐상류 하수도시설 인근지역중 누락지구에 대하여 주민불만 가중

⇒ 누락지구에 대해 2010년 농어촌마을하수도 정비대상으로 신청하였으나,

예산부족으로 미반영됨 (2011년 재신청 계획임)

□ 기대효과

◦ 환경기초시설의 계획적인 설치로 하수처리시설의 통합 관리

◦ 남강수계 하천의 수질보전 및 쾌적한 생활환경조성

농어촌마을하수도 정비사업

농촌지역의 열악한 주거환경개선을 위한 마을하수도 설치로 농어촌마을의 쾌적한 환경조성 및 생활오수의 적정처리로 양질의 수자원 확보 등 수질개선에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 오부면 양촌리

◦ 사 업 량 : 1개소(오부 85㎥/일)

◦ 사 업 비

- 총사업비 : 3,882백만원(국비 70%, 수계기금 18%, 도비 6%, 군비 6%)

⇒ 2010년 807백만원(국비 565 수계기금 145 도비 48.5 군비 48.5)

◦ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12

□ 그간 추진사항

◦ 실시설계용역 착수 : 2008. 4. 1

◦ 공공하수처리시설 설치인가  : 2009. 11 ~ 12

□ 추진계획

◦ 공사계약 및 착공 : 2010. 2

◦ 준공예정일 : 2011. 12

□ 문제점 및 대책

◦ 댐상류 하수도시설 확충사업에 예산이 집중되어 국비확보 애로

- 환경부 및 예산관련 부서와 적극적인 협의를 통해 국비 확보 추진

□ 기대효과

◦ 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원확보 및 수질개선

◦ 농촌지역의 열악한 주거환경개선으로 주민생활 편익도모

산청처리구역의 확장으로 증가되는 생활하수를 처리하기 위해 산청공공하수처리시설의 용량을 증설하여 하수처리의 전반적인 문제점을 해결하고 주변하천 및 농업용수의 수질을 보호코자 함

공공하수처리시설 증설공사

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 66일원

◦ 사 업 량 : 용량증설 공사 1식(2,800㎥/일->4,200㎥/일)

◦ 사 업 비

- 총사업비 : 4,500백만원(국비 67%, 수계기금 20%, 도비 6.5%, 군비 6.5%)

⇒ 2010년 900백만원(국비 600 수계기금 180 도비 60 군비 60)

◦ 사업기간 : 2010. 1　～2011. 12

□ 그간 추진사항

◦ 실시설계용역 착수 : 2009. 3. 16

◦ 공공하수처리시설 변경인가  : 2009. 10 ~ 12

□ 추진계획

◦ 공사계약 및 착공 : 2010. 2

◦ 준공예정일 : 2011. 12

□ 문제점 및 대책

◦ 국비확보에 어려움이 있으나 환경부 및 예산관련 부서와 적극적인 협의를 통해 국비 확보 추진

□ 기대효과

◦ 공공하수처리시설의 안정적이고 체계적인 수처리 관리로 양질의 수질제공

◦ 하수처리구역 확장과 생활하수 증가에 따른 효율적 처리