군민을 위한 행정 살기 좋은 산청

2015. 11.

2016년도

주 요 업 무 계 획

산 청 군

( 건  설  과 )

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	10

Ⅳ. 2016년 주요업무계획	12

Ⅴ. 주요 현안사업	23

Ⅵ. 신규(특수)시책	34

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
23	-	1	7	8	4	3	-

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
건설행정담당 (5명)	◦소규모 주민숙원사업 및 지역개발사업 ◦각종 건설사업장 편입물건 보상 및 등기 ◦전문건설업 및 골재채취업 등록․관리 ◦국토교통부 소관 국유재산관리
도로담당 (4명)	◦군도,농어촌 도로사업 시행 및 관리 ◦교량 및 도로 유지보수관리 ◦노상적치물 및 과적차량 단속
하천담당 (3명)	◦하천관련사업 시행 및 관리 ◦국가하천, 지방하천, 소하천 유지관리 ◦하천점용 및 폐천부지 관리
농업기반담당 (3명)	◦농촌용수개발사업 및 배수개선사업 ◦경지정리 및 밭기반정비사업 ◦수리시설 개보수 및 유지관리
방재담당 (3명)	◦자연재난종합상황실 운영 및 관리 ◦재해위험지구 및 재해취약시설 점검 관리 ◦자연재난 조사 및 복구계획 수립등 상황 종합관리
교통행정담당 (4명)	◦교통안전시설물 설치 및 관리 ◦자동차, 여객 및 화물자동차 관리 ◦농어촌버스 재정지원 및 관리

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제

1. 주요성과

도로(군도,농어촌도) 확포장사업

❍ 사업현황                             (단위:건, km,백만원)

구 분	총 사업계획			2014년 까지		2015년 시행		향후 소요액
	지구	연장	사업비	지구	사업비	지구	사업비
계	25	31.8	44,401	11	9,940	7	5,852	28,609
농어촌 도로	14	16.3	20,085	7	3,140	5	2,052	14,893
군도	11	15.5	24,316	4	6,800	2	3,800	13,716

※ 총 사업계획은 계속사업으로 추진중이거나 공약 및 현안사업 등 향후 시행이 계획된 사업의 전체 현황임

❍ 기대효과

- 도로망 확충사업을 통하여 낙후된 지역경제 활성화에 기여

- 산청을 찾는 관광객에게 쾌적한 교통 환경 제공으로 관광이미지 제고를

통한 관광수익 증대

덕천강 고향의 강 조성사업

❍ 위  치 : 시천면 사리 ~ 삼장면 대포

❍ 사업량 : 하천정비 L=5.1km(자전거도로, 하천환경정비 등)

❍ 사업비 : 27,058백만원(국비 16,235, 도비 3,247, 군비 7,576)

❍ 사업기간 : 2011. 10. ~ 2019. 12.

❍ 추진현황

- 공 정 : 토지보상 80%이상

- 현재추진상황 : 공사 발주 중(실적공사비 시장단가로 변경중)

- 향후계획 : 2016년 사업 본격 추진

오성지구 및 방곡지구 다목적 농촌용수 개발사업 추진

❍ 사업개요

구분	위치	수혜면적	총사업비 (2016년도)	사업량	비고
방곡지구	금서면 방곡리	345ha	42,875백만원 (5,000)	저수지 신설 1개소 양수장 2개소 용수로 5조 L=9.8km
오성지구	오부면 방곡리	93.7ha	15,452백만원 (3,000)	저수지 신설 1개소 양수장 2개소 용수로 7조 L=7.9km

❍ 추진사항

- 방곡지구 : 공사 착공 및 보상 협의 중

- 오성지구 : 신규 착수지구 선정 (2015. 5.), 실시설계 보완 중

지리 자연재해위험개선지구 정비사업 추진

❍ 위    치  : 산청군 산청읍 지리 지내

❍ 사 업 비 : 16,298백만원 ( 국비  8,149, 도비  2,445, 군비  5,703 )

❍ 사업내용 : 교량1개소, 고지배수로 363m, 배수펌프장 1개소 등

❍ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2017. 12.

❍ 그간 추진사항

- 2015.  6. : 건설공사 시행

- 2015. 10. : 건설사업 관리 용역 시행

대원사 급경사 붕괴위험지구 정비사업

❍ 사업개요

- 위    치  : 산청군 삼장면 평촌리 지내

- 사 업 비 : 5,000백만원 (국비  2,500 , 도비  750 , 군비  1,750)

- 사업내용 : 낙석방지망 5,017㎡, 계단식옹벽 83m, 개비온옹벽 341m등

- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2017. 12.

❍ 그간추진 사항

- 2015.  2. : 실시설계용역 시행

- 2015.  6. : 지반조사용역 완료

- 2015. 9. : 국민안전처 사전설계검토(1차) : 재검토 (토지지반조사 안전률 산정 시 과다하게 적용)

적벽산 급경사 붕괴위험지구 정비사업

❍ 사업개요

- 위    치  : 산청군 신안면 하정리 지내

- 사 업 비 : 29,184백만원 ( 국비 14,592 , 도비 4,378 , 군비  10,214 )

- 사업내용 : 우회도로개설 L=1.0km, 국도3호선 램프설치 1개소 등

- 사업기간 : 2013. 1. ~ 2017. 12.

❍ 그간 추진사항

- 2015.  5. : 피암터널 관련 예산과다 및 공법 재검토 등의 사유로 보류(경남도)

- 2015.  8. : 우회도로개설에 따른 국민안전처, 진주국도관리사무소, 부산지방국토관리청 방문 협의

- 2015. 10. : 우회도로 관련 실시설계용역 시행

신아서민밀집위험지역 정비사업

❍ 사업개요

- 위    치  : 산청군 금서면  신아리 지내

- 사 업 비 : 1,000백만원 (국비 500 , 도비 150 , 군비 350 )

- 사업내용 : 하천정비 L=400.0m, 소교량 1개소

- 사업기간 : ’15. 1. ~ ’15. 12.

❍ 그간 추진사항

- 2015. 3. : 실시설계용역 완료

- 2015. 4. : 사업시행 및 보상

- 2015. 5. :  가축관련 민원으로 사업중단(10월 가축이동조치후 사업시행)

내리서민밀집위험지역 정비사업

❍ 사업개요

- 위    치  : 산청군 산청읍 내리 지내

- 사 업 비 : 2,624백만원 (국비 1,250 , 도비 450 , 군비 924 )

- 사업내용 : 도로신설 L=994.0m 등

- 사업기간 : 2013. 1. ~ 2015. 6.

❍ 그간 추진사항

- 2015.  6.  공사 준공

농어촌버스 미운행지역 한방택시 운행 지원사업

❍ 사업개요

(단위:백만원)

사업명	사업년도	거리기준 (승강장-마을회관)	대상마을수	사업비	비고
농어촌버스 미운행지역 한방택시 운행지원사업	2015	1.5km	25개	100

❍ 추진사항

- 농어촌버스 미운행 지역으로서 승강장으로부터 1.5km 떨어진 25개마을을 대상으로 원활히 사업추진중

- 내년 1.0km 떨어진 마을까지 확대 시행 검토중 (9개마을 대상)

산청버스종합터미널 조성공사 준공

❍ 사업개요

(단위 : 백만원)

사업명	위치	시설	총사업비	사업량	비고
산청버스 종합터미널 조성공사	산청읍 산청리 227-1	터미널 1식 택시승강장 1식 부속 주차장	4,450 (도비 1,300 군비 3,150)	터미널 A= 160㎡ 택시승강장 A= 225㎡ 주차장 A= 2,514㎡

❍ 추진사항

- 산청버스정류소 확충방안 계획수립 : 2011. 6월

- 공유재산관리계획 승인(수정가결) : 2011. 12월

- 지장물 및 편입토지 보상(5건, 682㎡) : 2012. 5월

- 터미널 및 부대공사 사업비 지원건의(도비10억원) : 2012. 5월

- 추가사업 투ㆍ융자심사 승인 : 2012. 6월

- 도시계획 변경 및 사업 실시설계 용역 : 2012. 11월

- 재정지원사업 추가지원 건의(도비 3억원) : 2012. 12월

- 도비지원 확정(13억원) : 2012. 12월

- 사업 착공(건물 3동 510㎡, 주차장 조성 1,737㎡) : 2013. 3월

- 공유재산관리계획 변경승인(주차장 확장 1,162㎡) : 2013. 5월

- 군계획시설(자동차정류장, 도로) 결정(변경) : 2013. 7월

- 터미널 대합실 및 사무실 준공 : 2013. 9월

- 택시승강장 및 사무실 건립사업 유보조치 : 2013. 10. 29.

- 2014년 확장사업비 확보(도비 5억원, 군비15억원) : 2014. 3월

- 추가부지 보상완료(1,844백만원) : 2014. 7월

- 산청버스종합터미널 조성공사 준공완료 : 2015. 6. 8.

- 현재 공영버스터미널 인가 추진중

2. 과 제

도로(군도,농어촌도) 확포장사업

❍ 국·도비 지원이 없고 자체사업비로만 추진함에 따른 사업기간 장기화 ⇒ 계속사업에 집중 투자하여 시행사업 조기 마무리 추진

❍ 농촌도로 신규지구는 버스 진출입이 불가한 지구를 우선 선정

❍ 신규사업은 주민 수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 우선 추진 하되 사업 첫해에 보상 시행하여 보상 실적이 높은 지구부터 추진

❍ 2016년 이후 사업내용

(단위 : km, 백만원)

지구수	연장	사업비	비고
22개소	29.9	18,102

교량보수 및 기타도로사업

❍ 관내 보수가 필요한 교량에 보수공사를 시행하여 교량의 기능 복원이 필요함

- 교량보수대상  :  대포교 등 11개소, 596백만원

❍ 관내 군도 및 농촌도로상 노후시설 및 안전시설 미설치구간, 배수로 미 정비구간 정비 및 교통사고의 위험 요소가 있는 지구에 대해 우선적으로 정비 추진

- 유지관리 대상 도로 : 217개노선, 939.5km ( 국 도 1개 노선 45.2km ,

지방도 9개노선 130.3km, 군도 20개노선 225.2km, 농촌도로 187개노선 338.2km )

황매산도로 선형개량공사

❍ 전체구간(5.0km)에 대한 조사 측량 후 버스통행이 불가한 지점 도출      및 개량 우선순위 부여(조건이 나쁜 지점 우선)

❍ 사업계획 수립시 철쭉제 행사에 지장이 없도록 시행계획 수립

- 사업개요 : L=5.0km, B=5.0~8.0m, 추정사업비 1,800백만원

덕천강 고향의 강 조성사업

❍ 토지보상 미협의 분 추가협의

❍ 토지보상수용을 위한 절차 진행

❍ 하도정비를 위한 사토지 조사

❍ 하천환경정비 및 하도정비 시행

❍ 사업비 추가 확보를 위하여 부산지방국토관리청 총사업비 조정 협의

❍ 보상금증액 및 행정자치부 예규 변경으로 인한 실적공사비를 시장

단가로의 변경으로 인한 사업비 추가 조정

❍ 2016년 사업계획

(백만원)

구분	계	기투자	2015	2016	2017 이후	비고
사업비	27,058	5,526	6,500	2,987	12,045
사업량	L=5.1km	실시설계	실시설계 보상협의	하도준설 친수공간조성	하도정비 하천환경정비

※ 사 업 기 간 : 2011. 10 ~ 2019. 12

농업생산기반시설 유지관리비 확보

❍ 매년 수리시설 증가 및 시설 노후에 따른 유지관리의 필요성이 증가되고 있으나, 유지관리 수요 대비 예산 부족으로 사업 발굴 및 국도비 예산 확보가 요구됨

❍ 2016년 사업계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	환경정비	유지보수	퇴적물제거	저수지준설	비고
사업량	216개소	187개소	11개소	11개소	7개소
사업비	978.5	93.5	580	110	195

덕산버스정류장 정비사업 이전·확충 대상지 확보

❍ 노후화된 덕산버스정류장을 정비코자 2015년 정류장 이전·확충방안 예비타당성 용역을 수행하여 사업을 시행하고자 하였으나 부지 선정에 어려움을 겪고 있음.

❍ 2016년 사업계획

( 단위 : 백만원 )

사업명	위치	면 적	총사업비	사업량	비고
덕산버스 정류장 정비	시천면 사리 일원	2,500㎡	2,000	주차장 부지 = 2,500㎡ (정류장시설 = 1,000㎡ 부 대 시 설 = 1,500㎡)

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
편리하고 안전한 사회기반 시설 확충 및 정비

⇑

	7대 역점시책
소규모 주민숙원사업 도로정비사업 하천관리 농업기반 정비사업 일반농촌 개발사업 재해취약시설 정비사업 교통환경 개선사업

⇑

	역점시책별 이행과제
소규모 주민숙원사업 ◦군시행 주민숙원사업 ◦읍면시행 주민숙원사업 도로정비사업 ◦군도 확·포장공사 ◦농어촌도로 확·포장공사 ◦교량보수 및 기타도로사업

하천관리

◦하천유지관리

◦하천유지관리사업

◦퇴적물 제거사업

농업기반 정비사업

◦밭기반 정비사업

◦수리시설 국비보조사업

◦수리시설 도비보조사업

◦수리시설유지관리사업(자체사업)

◦수리시설유지관리사업(한국농어촌공사)

◦농업기반 주민숙원사업

일반농촌 개발사업

◦소규모 용수개발사업

◦기계화경작로 확포장사업

◦소규모 배수개선사업

재해취약시설 정비사업

◦적벽산 급경사 붕괴위험지구 정비사업

◦대원사 급경사 붕괴위험지구 정비사업

◦지리 자연재해위험 개선지구 정비사업

◦강누 우수저류시설 정비사업

교통환경 개선사업

◦덕산버스정류장 정비사업

◦특별교통수단 운영지원사업

◦교통시설물 정비

◦운수업계 재정지원사업

◦진주-산청 심야버스운행 손실지원

◦농어촌버스업체 재정지원

◦농어촌버스 교통카드 수수료지원

Ⅳ. 2016년도 주요업무계획

주민생활 편익 증대를 위한 기반시설 조성

소규모 주민숙원사업

도로정비사업

하천관리

농업기반 정비사업

일반농촌 개발사업

□ 재해취약시설 정비사업

□ 교통환경 개선사업

역점 시책

1. 소규모 주민숙원사업

역점

시책

군시행 주민숙원사업

❍ 농촌주거환경 개선과 주민 불편시설에 대한 정비사업 시행

- 위  치 : 산청읍외 10개면

- 사업량 : 군시행 30건

- 사업비 : 4,170백만원

❍ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 예산확보  : 2015. 10. ~ 2015. 12.

- 조사측량 및 설계             : 2015. 12. ~ 2016.  2.

- 사업시행 및 준공             : 2016.  3. ~ 2016. 10.

읍면시행 주민숙원사업

❍ 주민숙원사업을 마을별 우선순위에 따라 사업 선정 후 시행

- 위  치 : 산청읍외 10개면

- 사업량 : 읍면시행 189건

- 사업비 : 5,657백만원

❍ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 예산확보  : 2015. 10. ~ 2015. 12.

- 조사측량 및 실시설계         : 2015. 12. ~ 2016.  2.

- 사업시행 및 준공             : 2016.  3. ~ 2016.  7.

2. 도로 정비사업

역점

시책

군도 확·포장공사

❍ 위    치 : 명상교 재가설공사외 5건(수월~소둔철간 도로확포장,

내수~매곡간 도로확포장, 제보~관동간 도로확포장,

법평 사면보강, 유평도로 안전시설정비)

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

❍ 사 업 량 : 6건 / 4.36Km

❍ 총사업비 : 3,010백만원 (군비)

❍ 사업내용 : 도로확․포장 및 안전시설 설치 6건/4.36Km

농어촌도로 확·포장공사

❍ 위    치 : 삼당도로 확포장외8건 (외송~내송간 도로확포장, 궁소진입

도로확포장, 중태~유점간도로 확포장, 내원~법하간 도로

확포장, 상정진입도로, 오휴~왕촌간도로 확포장, 진태위험

도로확포장, 내리매골도로 확포장)

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

❍ 사 업 량 : 9건/7.49Km

❍ 총사업비 : 3,615백만원 (군비)

❍ 사업내용 : 도로 확포장 및 안전 시설설치 9건/7.49Km

교량보수 및 기타도로사업

❍ 위    치 : 군 관내 군도 및 농어촌도로

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

❍ 사 업 량 : 주민숙원 6건, 교량보수 7건, 도로유지관리 등

❍ 총사업비 : 3,101백만원 (군비)

❍ 사업내용 : 주민숙원사업 , 교량점검 및 보수,  도로 유지 관리 및 보수 등

❍ 세부 사업내용

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	사 업 내 용
계	3,101
도로 숙원사업	1,335	황매산도로 선형개량, 금포정교 접속도로 개량, 중산도로 배수로정비, 천평도로 정비, 석대순환도로확포장, 겁외사 옆 도로 정비
교량점검 및 보수	534	° 교량정밀점검 6개소 : 생비량교, 소이교, 장란교, 제보교, 토현교, 장재교 ° 교량보수 7개소 : 고읍교, 원리교, 장란교, 토현교, 생비량교, 어천교, 대포교
도로유지관리	1,232	도로유지보수, 차선도색, 도로변풀베기, 도로재해위험지보수, 방호울타리보강, 긴급 장비대, 도로용 CCTV 교체 및 보수, 도로건설관리계획 미불용지 보상 등

3.  하천 관리

역점

시책

하천유지관리

❍ 대    상 : 250개소, 599.89Km (국가하천 1, 지방하천 51, 소하천 198)

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

❍ 사 업 량 : 봄․가을 읍․면별 사업대상지조사 및 선정 후 시행

❍ 총사업비 : 945백만원(국비 250, 도비 100, 군비 595)

❍ 사업내용 : 제방정비 및 제방풀베기 및 노후배수문유지관리 사업

하천정비사업

❍ 위    치

- 지방하천 정비사업 2개소(계남천, 제보천)

- 소하천 정비사업 3개소(제보뒷골, 신안석남, 차황평지들)

- 주민숙원사업 13개소(범학소하천, 신아구아소하천, 사리천, 차탄산내골소하천, 구평소하천, 중촌소하천, 시매소하천, 정주동소하천, 중태소하천, 정곡천, 내대천, 초곡천생태하천, 쌍효화계천)

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

❍ 사 업 량 : 18건 / 5.64Km

❍ 총사업비 : 4,885백만원(국비 605, 군비 4,280)

❍ 사업내용 : 제방정비

퇴적물 및 유수지장목 제거사업

❍ 대    상 : 250개소, 599.89Km (국가하천 1, 지방하천 51, 소하천 198)

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

❍ 사 업 량 : 봄․가을 읍․면별 사업대상지조사 및 선정 후 시행

❍ 총사업비 : 1,200백만원 (군비)

❍ 사업내용 : 하천퇴적물 및 유수지장목 제거사업

4. 농업기반 정비사업

역점

시책

밭기반 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 단성면 관정리 일원

❍ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2017. 12.

❍ 사 업 량 : 밭기반 정비 A=78ha

(용배수로3 km, 집수암거1, 암반관정2, 농로 정비 등)

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	2015년 까지	2016	2017년이후	비고
합계	2,065	1,128	125	812
국비(지특)	1,652	902	100	650
도비	163.5	107.5	7	49
군비	249.5	118.5	18	113

수리시설 국비보조사업

❍ 위    치 : 산청군 차황면 실매리외 2개소 일원

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 6.

❍ 사 업 량 : 저수지 개보수 3개소

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	단지지구	송골지구	큰골지구	비고
합계	487.5	87.5	200	200
국비(지특)	390	70	160	160
도비	29.25	5.25	12	12
군비	68.25	12.25	28	28

수리시설 도비보조사업

❍ 위    치 : 산청군 산청읍외 7개소 일원

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 6.

❍ 사 업 량 : 저수지 및 용배수로 정비 5개소, 준영구 논두렁 설치 L=7.5km

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	지역주민건의	준영구 논두렁	저수지긴급보수	비고
합계	800	350	150	300
도비	240	105	45	90
군비	560	245	105	210

수리시설 유지관리사업(자체사업)

❍ 위    치 : 산청군 산청읍외 10개 읍․면

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

❍ 사 업 량 : 수리시설 환경정비, 유지보수, 준설사업 1식

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	환경정비	유지보수	퇴적물제거	저수지준설	비고
사업량	216개소	187개소	11개소	11개소	7개소
사업비	978.5	93.5	580	110	195

수리시설 유지관리사업(한국농어촌공사)

❍ 위    치 : 산청군 신안면외 2개소 일원

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

❍ 사 업 량 : 용배수로 개보수 L=1.84km

❍ 투자계획

(단위 : km,백만원)

구분	합계	문대지구	금서지구	자양지구	배양지구	비고
사업량	1.84	0.4	0.56	0.38	0.5
사업비	500	80	84	136	200

농업기반 주민숙원사업

❍ 위    치 : 산청군 산청읍외 10개면

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

❍ 사 업 량/사 업 비 : 읍면 주민숙원사업 121건 / 5,342백만원

❍ 기대효과 : 영농 기반 조성으로 오랜 주민숙원 해소

❍ 기    타 : 주민숙원사업은 군 전체 예산 범위 내 시행계획

5. 일반농촌 개발사업

역점

시책

소규모 용수개발사업

❍ 위    치 : 산청군 단성면 창촌리(백곡지구) 일원

❍ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2016. 12.

❍ 사 업 량 : 양수장 1개소, 용수로정비 L=3.7km

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	2015년까지	2016년(마무리)	비고
합계	2,145	1,853	292
국비(지특)	1,500	1,295	205
도비	273	247	26
군비	372	311	61

기계화경작로 확포장사업

❍ 위    치 : 산청군 신안면 소이리 일원

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 6.

❍ 사 업 량 : 경작로 L=24.0km

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	2015년까지	2016년(마무리)	비고
합계	2,403	2,136	267
국비(지특)	1,710	1,523	187
도비	342.5	318.5	24
군비	350.5	294.5	56

소규모 배수개선사업

❍ 위    치 : 산청군 단성면 호리, 신안면 하정리 일원

❍ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2017. 12.

❍ 사 업 량 : 백곡지구 및 상정지구 배수장 1식

❍ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계		2015년까지		2016년		2017년이후		비고
	백곡	상정	백곡	상정	백곡	상정	백곡	상정
합계	2,500	2,100	2,299	916	201	500	-	684
도비	1,009.5	555	949.5	200	60	150	-	205
군비	1,490.5	1,545	1,349.5	716	141	350	-	479

6. 재해취약시설 정비사업

역점

시책

추진방향

❍ 재해 발생 우려가 있는 급경사지, 재해 위험지구 및 우수저류시설 지역을 정비하여 사전재해예방으로 주민의 재산과 생명을 보호하고 안전한 주거환경 조성

사업현황

[단위 : 백만원]

구 분	지구명	사 업 량	사 업 비				비고
			계	기투자	2016년	2017년이후
계			63,387	11,400	9,064	42,923
급경사지	적벽산	L=1.0km	29,184	4,700	-	24,484	국(50%) 도(15%) 군(35%)
급경사지	대원사	L=1.3km	5,000	600	1,000	3,400
급경사지	지리2	사면정비	2,114	-	400	1,714
재해위험지구	지리	펌프장, 교량	16,298	4,000	4,664	7,634
우수저류시설	강누	우수저류시설	9,750	1,500	3,000	5,250	국(50%) 도(10%) 군(40%)
내수재해	관정	배수로정비	1,041	600		441	특교세 (600백만원)

추진계획

❍ 급경사지 (적벽산지구) : 사업시행지구 변경 후 추진계획.

❍ 급경사지 (대원사지구)

- 보상 및 행정절차이행  : 2016. 1. ~ 2016. 2.

- 공사 착공 및 우기 전 주요공정 완료 : 2016. 3. ~ 2017. 12.

❍ 재해위험지구 (지리지구)

- 2차분 사업시행 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

- 1차분 사업완료 : 2016. 3.

❍ 우수저류시설 (강누지구)

- 보상 및 행정절차이행  : 2016. 1. ~ 2016. 2.

- 공사 착공 및 우기 전 주요공정 완료 : 2016. 3. ~ 2017. 12.

기대효과

❍ 재해 없는 환경조성으로 주민 정주기반의식고취

❍ 사전 위험요소 제거로 소중한 주민의 재산과 생명 보호

7. 교통환경 개선사업

역점

시책

덕산버스 정류장 정비

❍ 위    치 : 산청군 시천면 남명로(사리) 일원

❍ 사 업 비 : 2,030백만원(보상비, 건축비 기타 부대경비 등)

❍ 사 업 량 : 부지 2,500㎡내외(정류장 시설 1,000 , 부대시설 1,500)

❍ 추진계획 : 공유재산관리계획 제출, 편입부지 보상, 정류장 건립

❍ 문제점 및 대책

- 문제점 : 정류장 선정부지 주민의견 불일치

- 대 책 : 정류장 입지분석 자료 및 공청회 결과를 토대로 일부 반대                 의견이 있더라도 추진(제2안: 덕산블럭 위치)

특별교통수단 운영

❍ 대    상 : 장애인 및 농어촌버스 미운행 지역 주민

❍ 사 업 비 : 270백만원(장애인콜택시 140 , 한방택시 130)

❍ 사 업 량

- 장애인 콜택시 운영 : 4대(35백만원/대당)

- 한방택시 운영 : 11개읍면 34개마을(2015년 1.5km 25개 마을⟶                                                 2016년 1.0km 34개마을)

❍ 운영방법 : 장애인 콜택시 위탁(신흥교통), 한방택시 사후 정산

❍ 기대효과 : 대중교통수단 이용이 어려운 군민에 대한 이동편의 증진

교통시설물 정비

❍ 정비대상 : 버스승객 대기소, 교통안전표시판 등

❍ 사 업 비 : 750.2백만원

❍ 사 업 량                                                                                                                                              (단위:백만원)

사 업 명	사 업 내 용	수 량	금 액	비고
계			750.2
버스승객 대기소 정비	전읍면	27개소	202.5
버스터미널(정류장) 정비	도색 등 편의시설 구입 및 교체	3개소(산청.생초.신안)	21.7
싸이키경광등 설치	교통사고 다발지역 및 위험지역	25개소	25
교통표시판 정비	교통사고 다발지역 및 위험지역	60개소	12
횡단보도 투광기 설치 및 교체	교통사고 다발지역 및 위험지역	54개소(신설4, 교체50)	76
과속카메리 설치 및 이설	시천면 국동마을 앞	2개소(신설1, 이설1)	90
차선도색 및 정비	관내 주요도로 횡단보도.문자표시 등	30km	60
반사경 설치	교통사고 다발지역 및 위험지역	50개소	20
카메라 설치 및 보수	시천면 외	카메라 제어함 3, CCTV보수 2	40
교통 신호등 유지보수	경보등,경광등,투광등, 반사경 등)	170개소	161
교통약자 교통안전지원 사업	안전모 및 야광지팡이 구입	안전모 및 지팡이 각 1,200개	42

❍ 기대효과 : 대중교통 이용객의 편의제공 및 교통사고 예방

운수업체 재정지원 사업

❍ 사업대상 : 관내 운송업체

❍ 사 업 비 : 4,822백만원

❍ 사 업 량

사 업 명	사 업 대 상	사 업 내 용	사 업 비	비고
계			4,822
에너지세제개편에 따른 유류보조금지원	관내 운송업체 (버스,화물,택시)	버스 11대, 화물661대, 택시 117대	3,900 (군)
벽지노선 운행 손실보상금 지원	산청교통(주),부산교통(주) 영화여객(주)	벽지노선 45개노선	648 (도214,군434)
농어촌버스업체 재정지원금 지원	산청교통(주)	농어촌버스 11대 (인건비,유류비,유지보수비)	269 (도134,군135)
농어촌버스 교통카드 요금할인금 및 수수료 지원	산청교통(주)	교통카드 수수료 3.8 교통카드 요금할인 12	5 (도2.5, 군2.5)

(단위 : 백만원)

Ⅴ. 주요 현안사업

국도20호선 확·포장사업 조기완성

주상 ~ 자혜간 도로숭상 및 확·포장공사

밤머리재 터널 조기개설

고향의 강 조성사업

남강변 하천 뚝방길 조성사업

□ 소하천정비 종합계획수립

□ 오성 및 방곡지구 용수개발사업

□ 재해위험 저수지 정비사업

지리자연재해위험개선지구 정비사업

한방택시운행 지원사업 확대 시행

1. 국도20호 확·포장사업 조기완성

국도 20호선 『단성~시천간』,『신안~생비량간』의 급격한 커브와

굴곡 심화로 교통사고 위험이 많으며, 특히 단성 호국원 개원에 따른

교통량 증가로 잦은 차량 정체가 예상되므로 조기 도로 확 ․ 포장이

시급함

추진방향

❍ 조기착수 및 완공을 위한 지속 건의

❍ 타기관 사업으로서 원활한 사업이 추진되도록 협력

사업개요

(단위:백만원)

지 구 명	위 치	사 업 량	사업비	비 고
계			248,900
신안~생비량간	단성면 강누리 ~ 생비량면 도리	L=9.20km B=19.5m	127,800
단성~ 시천간	단성면 사월리 ~ 시천면 사리	L=9.91km B=19.5m	121,100

추진사항 및 향후계획

❍ 「신안 ~ 생비량간」

- 2014. 7월 실시설계 완료

- 2015년 5.5억원 확보, 편입토지 분할완료, 기재부 총사업비 협의중

- 2015. 11월말 총사업비 협의완료 전망

- 2015. 12월말 사업발주 전망

❍ 「단성 ~ 시천간」

- 2011. 6월 기본설계 완료

- 2015년 실시설계비 5억원 확보, 설계용역 발주 준비 중

- 2015. 11월중 설계발주 예정

- 2017년 실시설계 완료 전망

2. 주상~자혜간 도로숭상 및 확ㆍ포장공사

지방 하천(임천)과 연접한 도로(군도 15호)로서 폭이 협소(B=4.0m)

하고 집중 호우 시 하천 범람으로 도로가 침수되어 차량 통행이 불가

하며, 수시로 낙석이 발생하여 재해 위험이 많은 도로임

추진방향

❍ 임천지구 수해상습지 개선사업에 포함하여 사업추진

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 금서면 주상리~자혜리(군도15호)

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.0km, B=8.0m

❍ 사 업 비 : 8,000 백만원 (도로부분)

- 산청군 부담 15 ~ 20억원 소요 예상

❍ 사업내용 : 도로확포장 및 도로침수예방

그간 추진사항

❍ 임천지구 수해상습지 개선사업에 포함하여 실시설계 완료 : 2014. 5.

❍ 경상남도와 국토교통부 총사업비 협의 시 도로부분 제외 : 2014. 7.

❍ 고충민원 조정회의(하천구역내 사업은 하천사업과 병행추진) : 2015. 7.

- 경상남도 실시설계 보완 결과에 따라 도로사업 추진

추진계획

❍ 총사업비 협의 및 확정시 도로부분 사업비 확보후 도로사업 추진

기대효과

❍ 지역주민 생활불편 해소 및 농산물 수송원활로 경제활동 활성화

❍ 차량통행 안전사고 사전예방

3. 밤머리재 터널 조기개설

기존 국도 59호선(산청군 삼장면 상촌리~금서면 평촌리) 해발 600m

산악 도로로서 급경사와 심한 굴곡으로 대형 교통사고 발생위험과

겨울철 상습 결빙 구간으로 도로기능 상실에 따른 터널 개설 및 선형

개량이 시급한 실정임.

추진방향

❍ 국가사업으로서 국도개량사업 중기계획에 의거 추진

❍ 조기에 사업이 완료될 수 있도록 예산확보, 민원해결등 시행청과 협조체제 구축

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 삼장면 홍계리~금서면 평촌리(국도59호)

❍ 사 업 량 : L=6.02km (터널 1개소 L=3.01 , 접속도로 L=3.01)

❍ 사 업 비 : 106,300백만원

❍ 사업내용 : L=6.02km(터널 1개소 L=3.01 , 접속도로 L=3.01)

그간 추진사항

❍ 타당성 재조사 결과  BC=0.78, AHP=0.51로 통과 : 2011. 3.

❍ 삼장~산청국도 건설공사(밤머리재 터널구간) 실시설계 용역 : 2011. 9.

※ 용역기간 : 2011. 12. ~ 2013. 8. (용역완료)

❍ 2015. 사업비 60.4억원 확보

❍ 기술제안 입찰 마감 : 2015. 9.

추진계획

❍ 낙찰자(시공업체) 선정 : 2015. 10. 30

❍ 설계보완(낙찰자 제안사항 설계반영) : 2015. 11. ~ 2016. 1.

❍ 보상 시행 및 착공 : 2016. 1.

기대효과

❍ 지리산 관광 접근성 개선, 지역간 연결성 개선으로 교류촉진

4. 고향의 강 조성사업

우리군 대표 하천인 덕천강을 대상으로 지역의 역사와 문화, 생태

기능을 연계하여 어릴 적 고향의 정취를 만끽할 수 있는 정감 어린

다기능 복합 친수공간으로 조성

추진방향

❍ 고향의 정취를 만끽할 수 있는 정감 어린 다기능 복합 친수공간 조성

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 시천면 사리 ~ 삼장면 대포리

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=5.1km

❍ 사 업 비 : 27,058백만원 (국비 16,235, 도비 3,247, 군비 7,576)

❍ 사업내용 : 하도정비, 공원조성, 하천환경정비

❍ 사업기간 : 2011. ~ 2019.(9년)

그간 추진사항

❍ 실시설계용역 시행 : 2011. ~ 2013.

❍ 토지보상 실시(총126필지 7,954백만원) : 2012. ~ 2014.

(협의 81필지 7,105백만원, 미협의45필지, 849백만원)

❍ 총사업비 협의 (부산지방국토관리청, 경상남도) : 2013. 8.

❍ 사업발주 : 2015. 10.

추진계획                                      (백만원)

구분	계	기투자	2015	2016	2017 이후	비고
사업비	27,058	5,526	6,500	2,987	12,045
사업량	L=5.1km	실시설계	실시설계 보상협의	하도준설 친수공간조성	하도정비 하천환경정비

기대효과

❍ 친화적인 하천환경 조성으로 주민여가 생활 증대

❍ 지역명물 대표하천을 조성하여 관광객 유치로 지역소득 증대 기여

5. 남강변 하천 뚝방길 조성사업

하천 제방의 뚝방길 조성과 주민의 산책로 및 여가 공간을 위한

친수 공간 확보와 주민편익 증진으로 하천 이용률 증대와 조경수 식재

등으로 아름다운 하천변 조성으로 찾아오는 관광산청에 기여

추진방향

❍ 주민의 여가 공간, 친수공간 확보와 조경수 식재로 아름다운 하천변 조성

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 관내 남강변

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=15km

❍ 사 업 비 : 1,500백만원

❍ 사업내용 : 하천변 주민 쉼터(정자 등) 조성 및 소공원 조성

그간 추진사항

❍ 고수부지 유채꽃 식재 : 2014. 10.

❍ 실시설계 용역 시행 : 2015. 3 ~ 4.

❍ 단성 강누변 하천 뚝방길 조성 : 2015. 10.

추진계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2015	2016	2017 이후	비고
사업비	1,500	250	500	750
사업량	L=15km	하천뚝방길조성 (단성, 신안)	하천뚝방길조성(산청, 단성)	하천뚝방길조성 (생초면 등)

❍ 사업추진 : 2016. 1 ~ 12.

기대효과

❍ 친화적인 하천환경 조성으로 주민여가 생활 증대

6.  소하천정비 종합계획수립

관내 198개소의 소하천에 소하천기본계획을 수립하여 관리에 만전을

기하고자 함 (소하천정비법 제6조의 규정에 따라 10년 단위의 소하천

정비종합계획을 수립하여야 함)

추진방향

❍ 하천유역의 변동상황을 고려하여 소하천별 기본계획 수립

❍ 유역의 특성 등 일반현황과 강우빈도, 기상 등 자연조건을 반영

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 소하천

❍ 사 업 량 : 소하천 198개소 L=247.06km

❍ 사 업 비 : 1,980백만원

❍ 사업내용 : 소하천 종합계획수립 및 지형도면 고시

그간 추진사항

❍ 실시설계 용역 시행 : 2015. 1 ~ 2.

❍ 사업추진 : 2015. 3  ~ 12.

추진계획                                 (단위 : 백만원)

구분	계	2015년까지	2016	비고
계	4,389	2,500	1,889
종합계획수립	3,781	2,200	1,581
전략환경영향	608	300	308
사업량	198개소	종합계획 기본 및 조사측량	종합계획 수립 지형도면 작성

❍ 잔여부 사업 발주 :  2016. 1.

❍ 소하천정비 종합계획수립 완료 :  2016. 12.

기대효과

❍ 소하천정비 종합계획 수립에 따라 체계적인 소하천 관리 이행

7. 오성 및 방곡지구 용수개발사업

농업용수 부족으로 매년 한발을 겪고 있는 상습 한해지역에

대하여 농업 용수원을 개발하여 안정적인 용수공급

추진방향

❍ 한국농어촌공사 시행 전액 국비사업으로 산청 북부권역 한해 해소를 위한 용수 개발

❍ 한국농어촌공사 진주·산청지사 시행

사업개요

(단위 : 백만원)

구분	위치	수혜면적	총사업비	사업량	비고
방곡지구	금서면 방곡리	345ha	42,875 - 기 투자 5,422 - 2016년 5,000	저수지 신설 1개소 양수장 2개소 용수로 5조 L=9.8km	국비100%
오성지구	오부면 방곡리	93.7ha	15,452 - 기 투자 500 - 2016년 3,000	저수지 신설 1개소 양수장 2개소 용수로 7조 L=7.9km	국비100%

그간 추진사항

❍ 방곡지구

- 시행계획 승인 : 2015. 6.(경상남도→한국농어촌공사)

- 보상계획 공고 및 통지 : 2015. 6 ~ 9.

- 공사 계약체결 : 2015. 8. 31(진지건설(주)외 2개사)

- 공사 착공 : 2015. 9. 4

❍ 오성지구

- 기본 및 실시설계 : 1998. 3.

- 다목적농촌용수개발사업 신규 착수지구 선정 : 2015. 5.

추진계획

❍ 방곡지구

- 공사 착공 및 보상협의 : 2015. 9. ~ 2019. 12.

❍ 오성지구

- 실시설계 보완 : 2015. 6. ~ 2016. 12.

- 공사 착공 및 보상협의 : 2017. 1. ~ 2021. 12.

기대효과

❍ 안정적인 용수 공급으로 주민 우심 해소 및 농가 소득 증대

8. 재해위험저수지 정비사업

농업용 저수지 노후화로 붕괴 사고 등 저수지 안전 관리에 대한

중요성이 대두됨에 따라, 재해 발생위험이 높은 관내 위험 저수지에

대하여 정비사업 시행으로 재해 예방

추진방향

❍「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」에 의거 위험저수지(D등급 30개소)중 주민 피해 발생이 높은 4개소에 대하여 재해위험저수지로 지정 및 중점 관리

❍ 재해위험저수지로 지정된 저수지 4개소에 대하여 국민안전처 재해위험저수지 5개년 정비계획에 의거 정비사업 추진

사업개요

❍ 대  상 : 하양, 강정, 월곡, 큰골저수지

(단위 : 백만원)

저수지명	합계		2015년까지		2016년		2017년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계	4건	3,800	-	100	1건	800	3건	2,900	국 1,450 도 435 군 1,015
하양	제당 54m	1,000	설계1식	100	제당 54m	800	부대공	100
강정	제당 53m	500					제당 53m	500
월곡	제당 130m	1,800					제당 130m	1,800
큰골	제당 85m	500					제당 85m	500

추진계획

❍ 하양 재해위험저수지 실시설계 : 2015. 9 ~ 11.

❍ 하양 재해위험저수지 정비사업 시행 : 2016. 1. ~ 2017. 6.

기대효과

❍ 위험저수지 집중 관리와 정비사업 추진으로 안전한 영농환경 조성과 안정적인 용수 공급으로 농가 소득 증대 및 재해 예방

9. 지리자연재해위험개선지구 정비사업

재해 발생 우려가 높은 자연재해 위험 개선지구에 조속한 정비사업

추진으로 사전 재해 예방으로 주민의 재산과 생명을 보호하고 안전한

주거 환경 조성

추진방향

❍ 자연재해위험개선지구로 지정된 재해취약시설에 대한 조속한 정비사업 시행으로 재해예방

❍ 재해로 인한 피해 최소화로 주민의 생명과 재산 보호

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 산청읍 지리 지내

❍ 사 업 비 : 16,298백만원(국비 8,149 , 도비 2,444.7, 군비 5,704.3)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2016년	2017년이후
계	16,298	4,000	4,664	7,634
국 비	8,149	2,000	2,332	3817
도 비	2,444.7	600	699.6	1145.1
군 비	5,704.3	1,400	1632.4	2671.9

❍ 사업내용 : 교량1개소, 고지배수로 363m, 배수펌프장 1개소 등

❍ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2017. 12.

그간 추진사항

❍ 총괄 1차분 사업시행 : 2015. 6.

❍ 건설관리 용역 시행 : 2015. 10.

추진계획

❍ 2차분 사업시행 : 2016. 1 ~ 12.

❍ 1차분 사업완료 : 2016. 3.

기대효과

❍ 잦은 침수로 인해 자연재해위험지구로 지정된 지역으로 사업을 통해 침수해소 등 군민의 인명 및 재산 보호

10. 한방택시 운행 지원사업 확대시행

❖ 농어촌버스 미 운행 지역에 한방택시를 운행하여 지역 주민의

이동권 확보와 교통 복지 증진 도모

□ 운행대상 마을(25개마을 -> 34개마을) 확대 시행

추진방향

❍ 한방택시 이용대상 확대시행 대상마을 사전 조사

❍ 한방택시 이용 탑승료 예산 확보

사업개요

❍ 위    치  : 농어촌버스 미운행 지역 34개 마을

❍ 사 업 량 : 농어촌버스 미운행 지역 34개 마을

❍ 사 업 비 : 130백만원

❍ 사업내용 : 버스승강장과 1.5km이상 떨어진 25개 마을에서 1.0km 떨어진 9개 마을을 추가하여 확대시행

그간 추진사항

❍ 한방택시 운행대상마을 조사  : 2014. 7 ∼ 11.

❍ 농어촌버스 미운행 마을 한방택시 운행지원조례 제정 : 2014. 12.

❍ 농어촌버스 미운행 마을 한방택시 운행지사업 시행 : 2015. 1∼

추진계획

❍ 한방택시 운행 대상마을 조사 및 확대시행 검토 : 2015. 11 ~ 12.

❍ 한방택시 운행 지원 사업 확대시행 : 2016. 1 ~ 12.

기대효과

❍ 한방택시 운행으로 지역 주민의 이동권 확보와 교통 복지 증진 도모

❍ 교통편익 증진으로 복지산청 구현

Ⅵ. 신규(특수)시책

마을진입로정비(풀베기) 지원사업

산엔청 문양거푸집 제작

산청군 수자원 확보 사업 추진

디지털 무선 마을방송 시스템 설치

1. 마을진입로정비 지원사업

농촌 고령화 현상으로 마을로 진입하는 도로변 풀베기 등 도로

정비를 자체적으로 해결하기가 어려움에 따라 지원사업을 통해 쾌적한

농촌주변 환경을 조성하여 주민들의 삶의 질 향상을 도모하고자 함

추진방향

❍ 관내 마을로의 진입도로변 풀베기 등 정비가 적기에 이뤄지지 않아 안전사고의 우려가 있어 마을도로 주변을 정비하고자 함

❍ 면별·마을별로 예산을 확보하여 도로정비사업 시행

사업개요

❍ 위    치  : 관내 전마을

❍ 사 업 량 : 마을내 진입로구간

❍ 사 업 비 : 150백만원(227개마을 × 661천원) 도시지역내 마을 제외

❍ 사업내용 : 마을 진입도로변 풀베기사업

추진계획

❍ 예산 확보                    : 2015. 10 ~ 11.

❍ 사업 시행 및 완료            : 2016.  1 ~ 12.

기대효과

❍ 하절기 도로변을 침범하는 잡풀 등으로 도로가 협소해지고 시야가 가려지는 등 안전사고 발생우려를 해소.

❍ 쾌적한 마을 주변 환경 조성 및 주민들의 삶의 질 향상

2. 산엔청 문양거푸집 제작

산엔청 워드마크 문양 거푸집을 사전 제작하여 옹벽 등 콘크리트

구조물 공사 시 필요량 지급 및 시공하여 산청 이미지 강조

추진방향

❍ 산엔청 워드마크 문양거푸집 제작 및 보유하고 관내옹벽 등 구조물 공사현장 필요량 지급

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 전역

❍ 사 업 량 : 문양거푸집 1,000장 제작구입

❍ 사 업 비 : 30백만원

❍ 사업내용 : 문양거푸집 1,000장 제작구입

추진계획

❍ 문양거푸집 디자인 선정      : 2016. 1 ~ 2.

❍ 문양거푸집 제작구입         : 2016. 2 ~ 3.

기대효과

❍ 관광산청 이미지 제고

3. 산청군 수자원 확보 사업 추진

천혜의 관광 자원이며 생활 및 농업 용수원으로 이용되는 경호강이

갈수기시 수원 고갈로 지역민이 어려움을 겪고 있어 수자원을 확보하여

쾌적한 수변 공간 및 관광 자원을 확보하고 안정된 영농 기반을 조성

하고자 함

추진방향

❍ 수자원 확보 사업 성격에 따라 관련부처 사업 건의 추진

- 다목적용수(국토교통부), 생활용수(환경부), 농촌용수(농축식품부)

❍ 사업대상지의 여건과 주민의 호응도에 따라 1~2지구 우선 추진

사업개요

❍ 위  치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업량 : 16개소(증설 2개소, 신규 14개소), 소수력 발전시설 16개소

❍ 사업비 : 835,900백만원 정도 (조성비 803,900 소수력 발전 32,000)

※ 2016년 타당성조사 용역비 100백만원(군비)

추진계획

❍ 우리군 농촌수자원 확보 예비계획(안) 수립 : 2015. 8.

❍ 경상남도 건의 및 군의회 행정 간담회 : 2015. 9.

❍ 국토교통부 및 관련부처 건의 : 2015. 9 ~

❍ 수자원 확보 기초조사 및 주민공감대 형성 : 2016. 1 ~ 12

❍ 국토교통부 및 관련부처 1~2개소 사업 공모 신청 : 2016. 12

기대효과

❍ 가뭄, 집중호우 등 이상기후 대비 재해예방 및 생태계 보전

❍ 사전재해와 산불예방 및 갈수기 수자원확보로 쾌적한 정주기반조성

❍ 소수력 발전시설 설치로 신재생 에너지 공급(연간 27억원 정도)

❍ 저수지와 연계 수변개발로 전원주택지 정주여건 개선

❍ 수변공원 등 관광자원을 확충하여 주민소득증대 기여

4. 디지털 무선 마을방송 시스템 설치

주거가 분산되어 있는 재난 취약지역의 신속한 재난 상황전파를 위한

마을방송 시스템(가정별 스피커 설치)을 시범적으로 설치하고자 함

추진방향

❍ 재난상황 전파 및 홍보를 위한 무선 마을 방송 시스템 구축

❍ 마을회관 방송 송출 시스템 및 세대별 무선방송수신기(소형 스피커) 설치

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 가현마을 (약 25가구)

❍ 사 업 량 : 1식

❍ 사 업 비 : 25,000천원 (군비)

❍ 사업내용 : 디지털 무선 마을방송 시스템 설치

추진계획

❍ 현장실사 및 설계 : 2016. 3.

❍ 시스템 설치 : 2016. 4 ~ 6.

기대효과

❍ 주거가 분산되어 있는 마을 특성상 기존의 자동음성통보시스템(마을방송)으로는 재난상황 전파 및 홍보가 원활하지 못했으나 세대별로 스피커를 설치하여 신속하고 효율적인 재난상황 전파 및 홍보가 가능할 것으로 예상됨