군민을 위한 행정 살기 좋은 산청

2015. 11.

2016년도

주요업무계획

산 청 군

(상하수도사업소)

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	4

Ⅳ. 2016년 주요업무계획	5

Ⅴ. 주요 현안사업	9

Ⅵ. 신규(특수)시책	15

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
20	-	1	5	3	3	-	8

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
관리담당 (13명)	◦ 상수원 보호구역 관리 ◦ 지방상수도 원･정수 수질관리 ◦ 상수도 취･정수장 및 가압장, 배수지 관리 ◦ 상수도 대행업체 및 소규모 수도시설 위탁 관리 ◦ 소규모 수도시설, 먹는샘물, 약수터 시설 및 수질 관리 ◦ 저수조(물탱크) 관리 ◦ 상하수도 요금부과･징수 및 체납사용료 징수 ◦ 상수도특별회계 예산
수도시설 담 당 (3명)	◦ 수도정비 기본계획 및 중･장기계획 수립 ◦ 상수도시설 확장 및 통ㆍ폐합사업 추진 ◦ 상수도 급수구역 확장공사 추진 ◦ 지방상수도 설치사업 추진 ◦ 노후관 교체(누수율 제고사업 포함) ◦ 소규모 수도시설 설치
하 수 도 담 당 (4명)	◦ 하수도 정비 기본계획 및 공공하수처리시설 운영･관리 ◦ 공공하수도 시설관리 ◦ 원인자부담금 부과･징수 ◦ 지하수 계측기 관리 및 하수도 요금관리 ◦ 수질개선특별회계 운영

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제

1. 주요성과

소규모수도시설 관리 및 개보수 : 291개소 3,683백만원

❍ 배수지 청소 : 2회/년 100백만원

❍ 염소 소독필터기 교체 : 4회/년 64백만원

❍ 수질검사사실시 : 분기, 반기/년 178백만원

❍ 마을상수도 및 소규모급수시설 유지 및 개보수 : 3,341백만원

지방상수도시설 확장 및 정비 : 5개소 9,468백만원

❍ 산청∙생초 지방상수도 통합 및 확장공사 정상추진

❍ 지방상수도노후관로 교체 : 신등면 단계리, 생초면 대포리

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사 : 수도정비기본계획 실시설계 완료

및 본 공사 입찰(‘15. 12월 예정)

❍ 상수도관망 기술진단 및 블록시스템 구축용역 실시

하수관로 개보수 및 하수처리시설 증설 : 10,711백만원

❍ 소이지구 농촌마을하수도 정비사업 : 45㎥/일, L=7.94km

❍ 오전지구 농촌마을하수도 정비사업 : 130㎥/일, L=10.09km

❍ 시천·단계지구 하수관로 정비사업 : L=14.48km

❍ 산청공공하수처리시설 증설사업 : 2,800㎥/일 ⇒3,800㎥/일

❍ 공공하수처리시설 유지관리 : 47개소 1,389백만원

2. 과 제

중장기 발전계획 등 미래수요 적극 반영

❍ 지역발전을 저해하는 각종 규제의 선제적 대응

⇒ 수도 및 하수도 정비기본 계획 변경

⇒ 상수원보호구역 해제 및 용도지역 변경

❍ 안정적인 물 공급을 위한 청정한 상수원 확보

급수지역 확대 및 공기 단축으로 주민불편 해소

❍ 산청·생초, 생비량지구 지방상수도 인입 조기 완공

❍ 인·허가 등 관련 기관 협조체계 구축

❍ 누수 진단 및 긴급 복구체계 정비

지방상수도 유수율 제고 및 생산원가 절감 노력

❍ 정수장 · 상수도 관망 기술진단 및 블록시스템 구축

❍ 정수장 및 노후관로 정비로 유수율 제고

원수고갈 ⦁재해 대비 비상급수대책 마련

❍ 계곡수 이용주민 불편해소를 위한 암반관정 개발 확대

❍ 소규모급수시설의 긴급 복구로 주민불편 최소화

❍ 깨끗한 수돗물 공급을 위한 관리 철저

⇒ 수질검사, 염소필터 교체, 배수지 청소 및 주변정비 등

하수도 시설확충 및 방류수질 강화

❍ 소이·오전지구 농촌마을 하수도 정비 조속 추진

❍ 시천·단계지구 노후관로 정비로 주민불편 해소

❍ 공공하수처리시설 처리용량의 증설

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
맑은 물 공급과 깨끗한 수환경 조성으로 녹색산청 실현

⇑

	3대 역점시책
수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰도 제고 깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 삶의 질 향상 완벽한 하수처리로 수질보전 및 쾌적한 환경조성

⇑

	역점시책별 이행과제
수도시설 관리철저로 수도행정 신뢰도 제고 ◦ 지방상수도 및 소규모수도시설 관리 ◦ 소규모수도시설 안전시설물 설치 ◦ 정수장 기술진단 및 블록시스템 구축 깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 삶의 질 향상 ◦ 지방상수도 급수구역 확대 ◦ 지방상수도 정비사업 추진 ◦ 소규모수도시설 개량사업 추진 ◦ 마을상수도 개보수 및 유지관리사업 추진 완벽한 하수처리로 수질보전 및 쾌적한 환경조성 ◦ 농촌마을 하수도정비 ◦ 공공하수처리시설 증설 및 유지 관리

Ⅳ. 2016년도 주요업무계획

맑은 물 공급과 깨끗한 수환경 조성으로 녹색산청 실현

수도시설 관리철저로 수도행정 신뢰 제고

깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 삶의 질 향상

완벽한 하수처리로 수질보전 및 쾌적한 환경조성

역점 시책

1. 수도시설 관리철저로 수도행정 신뢰도 제고

제고

gi

역점

시책

지방상수도 및 소규모수도시설 관리

❍ 사 업 량 : 295개소(지방상수도4, 소규모수도시설291)

❍ 사 업 비 : 1,068백만원

❍ 사업내용 : 시설물 보수, 누수탐사, 노후관 및 노후계량기 교체 등

❍ 사업기간 : 2016. 1. ∼ 2016. 12.

소규모수도시설 안전시설물 설치

❍ 사 업 량 : 291개소

❍ 사 업 비 : 100백만원

❍ 사업내용 : 배수지 안내간판, 안전 휀스, 시건 장치 등 설치

정수장 일반기술진단 실시

❍ 사 업 량 : 2개소(시천·단성정수장)

※ 산청·생초정수장은 2016년 폐쇄 예정으로 제외

❍ 사 업 비 : 80백만원

❍ 사업내용

- 시설 및 운영관리인 현황조사

- 공정별·시설별 기능진단 및 기능저하 요인분석 등

❍ 사업기간 : 2016. 4. ∼ 2016. 8.

2.. 깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 삶의 질 향상

gis상

역점

시책

지방상수도 급수구역 확대

❍ 소규모수도시설에 의존하고 있는 지역에 지방상수도 공급확대

- 산청·생초 지방상수도 통합 및 확장공사 완공

- 생비량지구 지방상수도 인입공사

- 삼장지구 지방상수도 인입공사

❍ 갈수기 원수 부족 및 수질악화 지역 군민의 생활불편 해소

지방상수도 정비사업 추진

❍ 사 업 량 : 4개소

❍ 사 업 비 : 2,111백만원

❍ 사업내용 : 상수도관망 기술진단 및 블록시스템구축 용역, 노후관로                   교체 및 매설, 정수장 기술진단 등

❍ 사업기간 : 2016. 1. ∼ 2016. 12.

소규모수도시설 개량사업 추진

❍ 사 업 량 : 4개소

❍ 사 업 비 : 715백만원(국비 500, 군비 215)

❍ 사업내용 : 암반관정개발 및 노후관로 교체 등

❍ 사업기간 : 2016. 1.∼ 2016. 12.

마을상수도 개보수 및 유지관리사업 추진

❍ 사 업 량 : 26개소

❍ 사 업 비 : 3,110백만원

❍ 사업내용 : 마을상수도 개보수 및 유지관리 등

❍ 사업기간 : 2016. 1. ∼ 2016. 12.

3. 완벽한 하수처리로 수질보전 및 쾌적한 환경조성 실현

역점

시책

공공하수처리시설 확충 및 유지관리

❍ 처리구역 확대 및 아파트 증가, 산업단지 조성 등으로 계획 하수량이 시설용량(2,800㎥/일)을 초과할 것으로 예상되고 또한 기존 하수처리구역 내 배수설비 정비로 유입수질 농도 및 하수량이 증가하여 기존 하수처리시설의 용량 부족으로 산청공공하수처리시설을 증설하고, 기존 하수처리시설 유지관리에 만전을 기하여 공공수역 수질보전에 기여하고자 함

- 산청공공하수처리시설 증설사업 (2,800㎥/일 ⇒3,800㎥/일)

- 공공하수처리시설 유지관리(48개소)

농촌마을하수도 정비

❍ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선을 위한 마을하수도 설치로  농촌마을의 쾌적한 주거환경조성 및 생활오수의 적정처리로 양질의 수자원 확보 등 수질환경 개선에 기여

- 소이지구 농촌마을하수도 정비사업 : 하수처리장 45㎥/일

- 오전지구 농촌마을하수도 정비사업 : 하수처리장 130㎥/일

하수관로정비

❍ 산청군 시천면 및 신등면 중심소재지 하수처리구역으로서 하수관  관로 미설치로 인한 하천 수질환경이 악화되고 있어 하수관로 설치를 통한 생활오수를 적정 처리함으로써 양질의 수자원을 보전하고 농촌지역 공중위생 향상 및 주거환경 개선에 기여   - 시천·단계지구 하수관로 정비사업 : 하수관로 설치 L=14.48Km

Ⅴ. 주요 현안사업

상수원보호구역 해제 및 용도지역 변경

산청·생초 지방상수도 통합 및 확장공사

생비량지구 지방상수도 인입공사

오전지구 농촌마을하수도 정비사업

산청군하수도정비 기본계획(변경) 용역

1. 상수원보호구역 해제 및 용도지역 변경

『수도법』상 상수원 보호구역 지정으로 사권 제한을 받던 지역의

취· 정수장 폐쇄에 따라 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』상

용도지역을  변경하는 군 관리계획을 추진하고자 함

추진방향

❍ 2016년 산청·생초지방상수도 통합 및 확장 공사의 완공 예정으로

산청상수원보호구역 지정 및 사용 제한을 받던 지역의 해제

❍ 2010년 기 해제된 신등상수원보호구역의 용도지역 변경

사업개요

❍ 위    치 : 산청읍, 오부면, 금서면, 신등면 일원

❍ 사 업 량 : 659,000㎡(국·공유지 391,069, 사유지 267,931)

❍ 사 업 비 : 500백만원

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2017. 3.

추진계획

❍ 용역착공 : 2016. 1.

❍ 용역준공 : 2016. 10.

❍ 상수원보호구역 해제 : 2016. 12.

❍ 군관리계획(용도지역) 변경 : 2016. 12. ～2017. 3.

기대효과

❍ 상수원보호구역 해제 및 용도지역 변경으로 군민을 위한 행정실현

❍ 토지이용 규제에 따른 사유재산 제한 해소 및 토지이용의 효율성

제고

2. 산청·생초 지방상수도 통합 및 확장공사

기존 정수장의 노후화 및 처리 용량 부족으로 분산된 시설을

통합·증설하여 지역 주민들에게 안정적이고 깨끗한 상수도를

공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 통합 운영 및 공급으로 수도시설의 효율적 관리와 지역

주민의 편익 도모 및 복지 증진

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 생초면 신연리 일원

❍ 사 업 량 : 취·정수시설 증설 Q=5,500톤/일, 관로매설 L=24.7km 외

❍ 사 업 비 : 29,717백만원(국비 16,824, 도비 1,000, 군비 11,893)

❍ 사업내용 : 정수장 통합 증설 및 지방상수도 관로 매설 등

❍ 사업기간 : 2010. 12. ~ 2016. 12.

그간 추진사항

❍ 본공사  1∼3차분 준공 : 2010. 12. ∼ 2015. 6.

❍ 감리용역 1∼2차분 준공 : 2011. 4. ∼ 2015. 3.

❍ 본공사  4∼5차분 추진 : 2014. 6. ∼ 현재

❍ 감리용역  3차분 추진 : 2015. 3. ∼ 현재

추진계획

❍ 본공사 6차분(조경 등) 착공 및 준공   : 2016. 1. ~ 10.

❍ 본공사 5차분 및 감리용역 3차분 준공 : 2016. 5.

❍ 감리용역 4차분 착공 및 준공         : 2016. 5. ~ 2017. 1.

❍ 정수장 시험가동 및 문제점 보완      : 2016. 7. ~ 12.

❍ 산청·생초 지방상수도 최종 준공      : 2016. 12.

기대효과

❍ 수도시설의 통합으로 안정적 수원확보 및 효율적 관리 운영 도모

3. 생비량지구 지방상수도 인입공사

생비량면 일원은 소규모 수도시설에 의존하고 있으나 수질 불량

및 원수 부족 등의 문제로 어려움이 있어 지방 상수도를 인입하여

안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함.

추진방향

❍ 급수가능 지역 최대한 확보 및 공급시기 단축으로 수돗물의 안정적공급

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 량 : 배수지 300톤, 가압장 4개소, 관로매설 L=77.1km 외

❍ 사 업 비 : 15,304백만원(국비 10,713, 군비 4,591)

❍ 사업내용 : 지방상수도 인입에 따른 배수지, 관로 등 시공

❍ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2018. 12.

그간 추진사항

❍ 수도정비기본계획 및 실시설계용역 준공  : 2015. 6.

❍ 산청군 관리계획 심의(자문건) 완료       : 2015. 8.

❍ 지방건설기술심의 및 수도사업인가 완료  : 2015. 9. ~ 10.

❍ 사업발주 및 착공                       : 2015. 11. ~ 12.

추진계획

❍ 배수지 설치 및 관로공사                : 2016. 1. ~ 12.

❍ 총사업비 변경 협의                     : 2016. 4. ~ 6.

- 당초 8,180백만원 → 변경 15,304백만원(증 7,124백만원)

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

4. 오전지구 농촌마을하수도 정비사업

농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정 처리하여

지역 사회의 건전한 발전과 공중위생에 기여하고 공공 수역의

수질보전에 기여

추진방향

❍ 농촌지역 열악한 하수도 시설 정비로 쾌적한 주거환경 개선

❍ 생활오수 적정처리로 양질의 수자원 확보 및 수질개선 기여

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 오부면 오전리 일원

❍ 사 업 량 : 하수처리장 130㎥/일, 하수관로 L=10.09km

❍ 사 업 비 : 8,993백만원(국비 6,295, 기금 1,619, 도비 539, 군비 540)

⇒ 2016년도 : 429백만원(국비 300, 기금 77, 도비 26, 군비 26)

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.

그간 추진사항

❍ 산청군 하수도 기본계획 부분변경 : 2015. 4.

❍ 공법선정완료 : 2015. 9.

❍ 실시설계용역 : 2014. 12. ~ 2015. 10.

추진계획

❍ 재원협의 및 설치인가 : 2015. 11～12.

❍ 공사착공 : 2016. 1.

❍ 공사준공 : 2017. 12.

기대효과

❍ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

5. 산청군하수도정비 기본계획(변경) 용역

하수도법 제6조에 의거 하수도정비 기본계획은 20년을 단위로

계획을 수립하고, 5년마다 기본 계획의 타당성 여부를 검토하여 변경

계획을 수립토록 함

추진방향

❍ 산업단지 조성과 인구유입 등 하수처리 신규수요를 신속히 반영하여 지역개발 촉진 및 쾌적한 환경조성

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 일원

❍ 사 업 량 : 하수도정비기본계획(변경) 용역 1식

❍ 사 업 비 : 1,500백만원

❍ 사업내용 : 하수도처리구역 확대 등 신규수요 반영

※ 필요시 부분변경 시행 계획

추진계획

❍ 용역설계 : 2015. 12.

❍ 용역PQ심사 및 업체선정 : 2016. 1 ~ 2.

❍ 입찰공고 및 계약체결 : 2016. 3.

❍ 용역 착수 : 2016. 4.

❍ 용역 준공 : 2016. 12.

기대효과

❍ 하수처리의 신규소요 반영 등으로 지역발전 촉진

❍ 공공수역의 수질보전

Ⅵ. 신규(특수)시책

삼장지구 지방상수도 인입공사

우리집 수돗물 안심 확인제 시행

상하수도시설 청정녹색 체험학습 운영

1. 삼장지구 지방상수도 인입공사

삼장면 일원은 소규모 수도시설에 의존하고 있으나 최근 기후

변화 등으로 인하여 수질 불량 및 원수 부족 등의 문제로 상수도

이용에 어려움이 있어 지방 상수도로 인입하여 지역주민들에게

안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 밤머리재 터널 개통 등 향후 개발여건을 최대한 반영하여 지역발전 기반조성 및 주민편익 증진

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 삼장면 일원

❍ 사 업 량 : 삼장배수지 200톤, 가압장 1개소, 관로매설 L=10.0km

❍ 사 업 비 : 1,163백만원(국비 814, 군비 349)

❍ 사업내용 : 지방상수도 인입에 따른 배수지, 관로 등 시공

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.

그간 추진사항

❍ 농어촌생활용수개발사업 신규사업 신청  : 2015. 4.

- 2016년 지특예산 신청액 : 428백만원(국비 300, 군비 128)

추진계획

❍ 실시설계용역 착공 및 준공             : 2016. 1. ~ 5.

❍ 인허가(도로점용,농지전용 등) 협의 완료 : 2016. 5. ~ 6.

❍ 사업발주 및 착공                      : 2016. 7.

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

2. 우리집 수돗물 안심확인제 시행

지방상수도 이용 주민들의 수돗물에 대한 막연한 불안감 해소 및

상수도 사업에 대한 인식 개선

추진방향

❍ 수돗물 수질이 궁금한 군민이 전화로 수질검사를 신청하면 담당

공무원이 가정을 방문하여 무료로 수도꼭지 수질검사를 실시     하여 결과를 유선이나 방문하여 알려 줌

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원(지방상수도 급수구역)

❍ 사 업 량 : 200전

❍ 사 업 비 : 46백만원

❍ 사업내용 : 5개 항목 자체검사 및 11개 항목 검사 의뢰

❍ 시    행 : 2016. 3. ~

추진계획

❍ 검사 기자재 확보 : 2016. 2.

❍ 주민홍보 :  2016. 2. ~ 3.

❍ 시    행 : 2016. 3.

- 1차 검사 : 자체검사 실시

▪ 탁도 등 5개 항목(탁도, PH, 잔류염소, 철, 구리)

- 2차 검사 : 1차 검사초과 수질검사기관 의뢰

▪ 일반세균 등 11개 항목(1차 항목 포함, 일반세균, 총대장균군, 아연,         망간, 염소이온, 암모니아성 질소)

기대효과

❍ 안심하고 마실 수 있는 수돗물에 대한 신뢰도 제고

3. 상하수도시설 청정녹색 체험학습 운영

최근 환경 오염 등으로 깨끗한 환경과 더불어 안전하게 먹을 수

있는 물에 대한 관심이 높아지고 있어, 상하수의 처리 과정을 직접

보여주는 녹색체험 학습 프로그램을 운영하고자 함.

추진방향

❍ 환경문제와 물 절약 실천에 대한 인식전환의 계기 마련

❍ 특히 학생들을  대상으로 체험교육을 운영하여 어릴 때부터

친환경적인 인식과 생활습관 정착

사업개요

❍ 체험시설 : 산청정수장, 산청하수처리장 등 환경기초시설

❍ 방문대상 : 어린이, 청소년, 일반인 등

❍ 소요예산 : 10백만원(기념품 1,000개 홍보물 1,000부)

❍ 홍 보 관 : 1개소, 50석(산청 공공하수처리장)

추진계획

❍ 산청 공공하수처리시설 홍보관 활용 녹색체험 프로그램 운영

❍ 학습진행 프로그램 개발과 운영은 관리대행업체 위임

❍ 견학코스 운영시책 중점홍보

기대효과

❍ 민ㆍ관 협력을 통해 군민주도형 군정실현 기반 조성

❍ 현장체험 학습을 통한 소비활동 자제 및 물 절약 정신 고취