안 전 건 설 과

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	9

Ⅳ. 2021년도 주요업무계획	11

Ⅴ. 주요 현안사업	22

Ⅵ. 신규(특수) 시책	51

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

(단위 : 명)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
24		1	7	7	7		2

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
건설행정담당 (6명)	◦소규모 주민숙원사업 및 지역개발사업 ◦각종 건설사업장 편입물건 보상 및 등기 ◦전문건설업 및 골재 채취업 등록․관리 ◦국토교통부 소관 국유재산관리 ◦건설기계대여사업장 관리 및 조종사면허증, 검사과태료
안전관리담당 (3명)	◦안전 및 인적·사회적 재난관리 ◦안전관리기본계획수립 및 안전한국훈련 실시 ◦국가안전대진단 추진 ◦여름철 물놀이 안전관리
도로담당 (4명)	◦도로중장기 계획 및 노선선정계획 ◦군도·농어촌도로 관리 및 정비 ◦교량 및 도로시설물 유지관리, 지역교통환경개선사업 추진 ◦도로점용 및 접도구역 관리, 도로사업보상 추진
하천담당 (3명)	◦하천(국가하천, 지방하천, 소하천) 관리 및 지도점검 ◦각종하천사업 설계, 지도감독 및 준공 ◦하천기본계획수립 및 하천사업 보상 ◦하천점사용 허가 및 공유재산 관리 등
농업기반담당 (3명)	◦농업기반정비사업 계획 수립 및 추진 ◦재해(한해) 대책 수립 및 복구 ◦수리시설(양·배수장, 저수지, 관정 등) 유지관리 ◦국유재산(농림부) 관리 및 사용허가
자연재난담당 (4명)	◦자연재난종합상황실 운영 및 관리 ◦재해위험지구 및 재해취약시설 점검 관리 ◦자연재난 조사 및 복구계획 수립 등 상황 종합관리

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제

1. 주요성과

소규모 주민숙원사업 추진으로 주민편익 증대

❍ 사업실적                                      (단위 : 백만원)

구 분	총 사업계획		군 시행		읍․면 시행		비고
	건	사업비	건	사업비	건	사업비
합 계	207	13,189	39	6,725	168	6,464
마을진입도로 정비	97	6,393	19	3,069	78	3,324
농로 정비	66	2,973	7	904	59	2,069
세천 정비	16	733	1	157	15	576
다목적광장 조성	9	911	7	857	2	54
소교량 및 기타	19	2,179	5	1,738	14	441

공익사업의 효율적인 수행을 위한 토지 등 협의

❍ 손실보상 협의(2019. 12. 31. 현재)

- 부동산(토지, 건물) 보상 : 617필지 199,454㎡, 6,809백만원

- 지장물 등 영농손실 보상 : 379건 2,129백만원

국가안전대진단 및 시설물 안전점검 실시로 재해와 재난예방

❍ 국가안전대진단 실시 : 22개 분야 243개소(공공 155, 민간 88)

❍ 다중이용시설, 재난취약시설, 어린이 놀이시설 등 안전점검 : 21회

❍ 공연․축제장 사전 합동안전점검 2회, 물놀이 관리지역 관리 20개소

코로나19 대응 산청군재난안전대책본부 설치·운영

❍ 운영목적 : 코로나19 경계단계“심각”격상에 따른 상황관리

❍ 운영기간 : 2020. 2. 1. ~

❍ 주요구성

- 총괄조정관(안전건설과장), 통제관(보건증진과장), 담당관(예방의약담당)

❍ 주요내용

- 코로나19 대응 종합상황실 운영 : 24시간 상황 유지

- 방역대책본부 운영 : 선별진료소, 생활방역추진단 구성 등

- 분야별 코로나19 방역 대응 : 9개 실과(협업반)

- 코로나19 국내접촉 및 해외입국자 자가격리 관리

도로(군도․농어촌도로) 확포장사업으로 군민의 공공복리 향상

❍ 정비현황

- 군도 정비사업 : 6개소(7.13km/4,400백만원)

- 농어촌도로 정비사업 : 18개소(15.83km/9,500백만원)

❍ 사업내용 : 군도 및 농어촌도로 확포장

하천정비 및 유지관리사업으로 재해예방 및 하천환경개선

❍ 사업실적                                     (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	하천 시설정비		하천유지관리		비 고
		건	사 업 비	건	사 업 비
국가하천 (남강)	240백만원	1건	60백만원	6개소	50백만원	성능평가 및 안전점검용역
				4개소	130백만원	유수지장목제거 및 제방풀베기
지방하천 (경호강 백리길 조성사업 외)	4,850백만원	16건	3,450백만원	11건	1,000백만원	하천퇴적물제거사업
				11건	400백만원	유수지장목제거사업
소 하 천 (자양 소하천 외)	4,789백만원	20건	4,289백만원	5건	500백만원	소하천 호안정비사업 기성제 풀베기사업 등
봉두지구 자연재해정비사업	1,500백만원	1건	1,500백만원	-	-	자연재해 위험지구 정비사업

덕천강 고향의 강 조성사업 추진으로 테마 하천 환경조성

❍ 위    치 : 시천면 사리 ~ 삼장면 대포

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=5.1km(자전거도로, 하천환경정비 등)

❍ 사 업 비 : 28,325백만원(국비 16,995, 도비 3,399, 군비 7,931)

❍ 사업기간 : 2011. 10. ~ 2021. 6.

❍ 추진현황

- 공 정 율 : 95%

- 현재추진상황 : 삼장면 대하리 286번지 외 3필지 토지수용재결 중

경호강 백리길(자전거도로)조성사업으로 품격높은 문화환경 조성

❍ 구    간 : 단성면 소남리 ~ 단성면 묵곡리

❍ 사 업 량 : 자전거도로조성 등 L=5.1km

❍ 사 업 비 : 1,600백만원(도비 390, 군비 1,210)

❍ 사업기간 : 2020. 2. ~ 2022. 12.

❍ 추진현황 : 자전도로(어천~범학지구) 실시설계 중

❍ 향후계획 : 2021. 2월 자전거도로(어천~범학지구) 발주 및 착수

농업생산기반시설 정비를 통한 안전 영농기반 구축

❍ 사업실적                                     (단위 : 백만원)

사 업 명	정 비 현 황		사업내용	비고
	사 업 량	사업비
합 계	7건	14,186
재해위험저수지정비사업	재해위험저수지 정비 6개소	1,536	재해위험저수지 큰골, 배평전, 월곡, 왕촌, 아미랑, 대현갈 저수지 정비
시군수리시설개보수사업	노후저수지 개보수 5개소 노후배수장 증설 1개소	1,700	D등급 저수지 5개소 개보수 문대배수장 증설
소규모배수개선사업	배수장 3개소 신설	1,972	신연지구, 묵곡지구, 용흥지구 소규모 배수개선사업
소규모용수개발사업	저수지(신촌) 신설 1개소 용수로 L=2.0km	1,000	차황면 법평리 신촌지구 가뭄 우려지구 농업용수 확보
지표수보강개발사업	저수지(일물) 신설 1개소 용수로 L=2.0km	1,000	오부면 일물리 일물지구 지표수 부족지역 농업용수 확보
경작로확포장사업	경작로확포장 L=5.3km	535	산청, 삼장, 단성, 시천, 신안, 신등면 경작로 확포장
농업기반주민숙원사업	용배수로, 농로등 기반시설 정비 1식	6,443	산청읍 외 10개면 주민숙원사업

재해의 근원적 예방대책 사업 추진으로 군민의 생명과 재산보호

❍ 사업실적                                        (단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	정 비 현 황		비고
		사 업 량	사업비
합 계		10개소	119,262
적벽산 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	신안면 하정리 일원	- 위험도로사면 정비 L=930m - 피암터널설치 L=700m 등	29,184
어서지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	생초면 어서리 일원	- 위험도로사면 정비 L=400m - 낙석방지망 A=4,400㎡ 등	4,400
법평 자연재해위험 개선지구 정비사업	생비량면 가계리 일원	- 교량재가설 2개소, 진입도로 270m (법평교 120m, 송계교 160m) 등	13,693
입덕문 자연재해위험 개선지구 정비사업	단성면 백운리 일원	- 하도개선 L=870m - 홍수방어벽 L=845m 등	8,700	사업확정
신아 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	금서면 신아리 일원	위험도로사면 정비 L=200m 토사 1식, 기타부대공 1식 등	5,000	사업확정
동당지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	시천면 중산리 일원	위험도로사면 정비 L=249m 낙석방지망 A=6,797㎡ 등	5,832	사업확정
생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업	생초면 어서리 일원	지방하천축제, 홍수방어벽, 교량 보 낙차공 개선, 우오수관로 배수펌프장 2개소, 도로숭상 등	42,000	공모 확정
백운마을 위험소교량 재가설공사	단성면 백운리 일원	- 교량재가설 L=27m - 도로개설 L=445m 등	1,050
손항교 재가설공사	신등면 장천리 일원	- 교량재가설 L=38m - 도로개설 L=228m 등	1,403
병정교 재가설공사	산청읍 병정리 일원	교량재가설 L=30m 도로개설 L=100m 등	800
동의보감촌 급경사지 붕괴위험지구정비사업	금서면 특리일월	급경사지정비 L=150m	4,800	한방항노화과 시행
수해복구사업 추진지원	산청군 일원	수해복구 81개소	2,400

2. 과 제

신속한 사업추진을 위한 손실보상 협의 적극 추진

❍ 공익사업의 원활한 추진과 조기 발주를 위해 적극적 협의 추진

❍ 매수 협의 불가한 토지 등에 대하여 토지수용 재결 추진

지역경제 활성화 및 군민 편의증진을 위한 도로건설 사업 시행

❍ 자체사업비로 추진함에 따라 사업기간 장기화 우려

- 장기 계속추진사업에 우선 투자하여 조기에 마무리함으로써 주민불편 최소화

- 신규사업은 주민수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 추진

- 주민건의사업 등 숙원해결 및 지역교통환경개선을 위한 사업 추진

❍ 2020년 사업현황

- 군도 정비사업 : 6개노선(L=6.79km/2,860백만원)

- 농어촌도로 정비사업 : 20개노선(L=21.04km/8,840백만원)

- 도로주민숙원사업 : 21개소(L=13.84km/3,620백만원)

교량보수 및 기타 도로사업 추진

❍ 교량정밀점검 및 안전점검을 통하여 보수가 필요한 교량 정비

- 정밀점검대상 교량 : 6개소

- 안전점검대상 교량 : 168개소(2종 13개소, 3종 88개소, 기타 67개소)

- 교량관리사업 : 안전점검 168개소 및 유지보수 6개소(420백만원)

❍ 관내도로의 안전시설, 배수로 등 미설치구간 정비 및 교통사고

위험요소가 있는 지구에 대해 우선적으로 정비

- 유지관리대상 도로 : 217개 노선, 738.9km(국도 1개 노선 45.2km, 지방도

9개 노선 130.3km, 군도 20개 노선 225.2km, 농어촌도로 187개 노선 338.2km)

- 도로유지관리사업 : 소파보수, 차선도색, 풀베기 등 6건(500백만원)

농업시설 노후 및 봄 가뭄 확산에 따른 대책 마련

❍ 수리시설 노후 및 기능 저하에 따른 유지관리 수요 증가와 이상기후로 인해 지속적인 봄 가뭄이 우려되고 있는 실정으로, 영농기 이전 수리시설 점검 및 보수를 위한 유지관리예산 확대 편성과 가뭄취약지역 저수지, 양수장, 관정 등 수원공 개발의 항구 대책 필요

❍ 2021년 사업계획                                (단위 : 백만원)

구분	합계	유지관리 (군)	유지관리 (농촌공사)	저수지 정 비	수원공 개 발	안전점검	비고
사업량	27개소	5개소	6개소	10개소	2개소	4개소
사업비	4,639	559	600	1,900	1,500	80

생초지구 풍수해 생활권 정비사업 추진

❍ 사 업 비 : 42,000백만원 ( 국비 21,000, 도비 6,300, 군비 14,700 )

❍ 사 업 량 : 지방하천 축제, 파라펫, 교량, 보 낙차공 개선, 우수관로

배수펌프장 설치 2개소, 도로숭상, 예경보시스템 설치 등

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

❍ 그간 추진사항

- 부산지방국토관리청 남강 수위저하 방법 등 사전 협의 : ’20. 2월

- 2021년 재해예방사업 신청(생초지구)       : ’20. 3월

- 2021년 풍수해 생활권 종합정비 공모 사업 PPT 발표(안전건설과장) 및 심사위원 현장 실사(담당사무관 등 5명)     : ’20. 5월

❍ “생초지구” 공모사업 최종 확정(6. 15.)   : ’20. 6월

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
편리하고 안전한 사회기반시설 확충 및 정비

⇑

	7대 역점시책
소규모 주민숙원사업 추진 유기적인 재난대응체계 구축을 통한 재난대응 역량 강화 군민을 위한 생활안전문화 정착 및 안전교육 강화 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비 재해예방 및 관광자원 활용 하천관리 안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진

⇑

	역점시책별 이행과제
소규모 주민숙원 사업 추진 ◦ 소규모 주민숙원사업 군 시행 ◦ 읍·면 주민숙원사업 유기적인 재난대응체계 구축을 통한 재난대응 역량 강화 ◦ 24시간 재난대응상황 체계 유지 및 유관기관 협조체제 구축 ◦ 재난대응 역량 강화를 위한 점검 및 훈련 실시

	역점시책별 이행과제
□ 군민을 위한 생활안전문화 정착 및 안전교육 강화 ◦ 안전문화 운동 추진으로 군민 안전의식 고취 ◦ 생활 접점형 군민 안전교육을 통해 재난발생시 대처능력 향상 □ 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비 ◦ 군도 확·포장 사업 추진 ◦ 농어촌도로 확·포장사업 추진 ◦ 교량보수 및 기타 도로사업 □ 재해예방 및 관광자원 활용 하천관리 ◦ 안전한 하천유지관리사업 추진 ◦ 효율적 하천관리 및 관광자원 활용의 명품 하천 조성 ◦ 퇴적물제거 및 유수지장목 제거 □ 안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비 ◦ 시군수리시설 개보수 사업 ◦ 소규모 배수개선사업 ◦ 소규모 용수개발 사업 ◦ 기계화 경작로 확포장사업 ◦ 지표수 보강개발사업 ◦ 재해위험저수지 정비사업 ◦ 농업기반 주민숙원 사업 □ 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진 ◦ 적벽산 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 ◦ 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 ◦ 입덕문 자연재해위험개선지구 정비사업 ◦ 생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업

Ⅳ. 2021년도 주요업무계획

편리하고 안전한 사회기반시설 확충 및 정비

소규모 주민숙원사업

유기적인 재난대응체계 구축을 통한 재난대응 역량 강화

군민을 위한 생활안전문화 정착 및 안전교육 강화

교통편익 증민 및 생활환경 개선 도로정비

재해예방 및 관광자원 활용 하천관리

안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비

자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진

역점시책

1. 소규모 주민숙원사업

역점

시책

소규모 주민숙원사업(군시행)

❍ 농촌주거환경 개선과 주민불편시설에 대한 정비사업 시행

- 위    치 : 산청읍 외 10개면

- 사 업 량 : 군 시행 27건

- 사 업 비 : 4,412백만원

❍ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 예산확보  : ‘20. 10월 ~ ‘20. 12월

- 조사측량 및 설계             : ‘20. 12월 ~ ‘21.  2월

- 사업시행 및 준공             : ‘21.  3월 ~ ‘21. 12월

※ 소규모 주민숙원(군시행)사업은 사업비 1억원이상, 보상협의가

수반되는 사업을 읍면별 선정 후 군에서 사업시행

읍·면 주민숙원사업

❍ 농촌주거환경 개선 및 주민불편시설 중 소규모 읍면 자체 정비사업 시행

- 위    치 : 산청읍 외 10개면

- 사 업 량 : 읍면시행 153건

- 사 업 비 : 5,977백만원

❍ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 예산확보  : ‘20. 10월 ~ ‘20. 12월

- 조사측량 및 자체설계         : ‘20. 12월 ~ ‘21.  2월

- 사업시행 및 준공             : ‘20.  3월 ~ ‘20. 06월

※ 읍면 주민숙원사업은 합동 설계를 통한 자체설계로 예산절감 및

사업조기 발주

2. 유기적인 재난대응체계 구축을 통한 재난대응 역량 강화

역점

시책

24시간 재난대응상황 체계 유지 및 유관기관 협조체제 구축

❍ 재난상황실 24시간 상황체계 유지 : 주간 3명, 야간 2명

❍ 재난 종류·상황별 유관기관 협조체제 구축

- 핫라인 구축 : 안전건설과 ↔ 산청경찰서 ↔ 산청소방서

▪ 재난발생 즉시 연락

- 재난관리책임기관 실무담당자 및 현장책임자 비상연락망 정비

- 재난관리책임기관별 임무 및 역할 조정 간담회 실시

재난대응 역량 강화를 위한 점검 및 훈련실시

❍ 재난위기관리 점검 합동훈련 실시

- 재난대응 안전한국훈련, 긴급구조통제단 기동훈련 등

❍ 재난안전관련 표준행동매뉴얼 작성(정비)

-  안전관리계획 수립(유관기관 재난안전관리대책 포함): 연 1회

-  사회·자연재난 현장조치 행동 매뉴얼 현행화 : 수시

❍ 부서별 재난안전 관리자·실무자 안전교육 실시 : 수시

3. 군민을 위한 생활안전문화 정착 및 안전교육 강화

역점

시책

생활안전문화 운동 추진으로 군민 안전의식 고취

❍「시설물의 안전 및 유지 관리에 관한 특별법」관련 1․2․3종 시설물       위험요인 정기점검 실시 : 2회(상․하반기)

- 대상 : 140개소(교량, 전통시장, 다중이용시설, 판매시설 등)

❍ 계절별 안전점검 실시: 5회(설날, 해빙기, 우기전, 추석, 동절기)

❍ 축제 행사장 안전관리계획 심의 및 안전점검 실시: 6회

❍ 국가안전대진단 실시

- 대상 : 22개 분야 243개소(공공 155, 민간 88)

- 내용 : 재난취약시설물 등 생활주변 주요 시설물 안전진단 실시

❍ 매월 안전점검의 날 행사 추진

- 안전의식 고취를 위한 민․관 합동 캠페인 전개 및 안전수칙 홍보

- 지역별 안전보안관을 중심으로 지역사회에 안전문화운동 실시

❍ 안전신문고 앱 설치 및 안전신고 방법 홍보 : 수시

- 생활주변 위험요소 사전 제거로 안전한 사회 만들기 문화 정착

- 코로나19 신고, 5대 불법주정차 신고기능을 통한 안전한 산청 구현

생활 접점형 군민 안전교육을 통해 재난발생시 대처능력 향상

❍ 생애주기별 맞춤 안전교육 실시

- 5개분야, 11개 영역, 20개 세부영역으로 구성된 맞춤형 안전교육으로 군민 안전의식 향상

❍ 다중이용시설(대중교통, 체육시설, 숙박시설, 학원 등), 사회복지시설(장애인·노인·아동복지시설)의 운영종사자 및 시설관리자에 대한

안전교육 지원

4. 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비

역점

시책

군도 확·포장사업 추진

❍ 사업기간 : 2021. 1 ~ 2021. 12.

❍ 사 업 량 : 5개소 L=4.43km

❍ 사 업 비 : 4,400백만원(국비 550, 군비 3,850)

❍ 사업내용 : 군도15호 금서수철도로 확포장공사 외 4건

농어촌도로 확·포장사업 추진

❍ 사업기간 : 2021. 1 ~ 2021. 12.

❍ 사 업 량 : 11개소 L=11.08km

❍ 사 업 비 : 5,150백만원(군비)

❍ 사업내용 : 고치절골농로 확포장공사 외 17건

교량보수 및 기타도로사업

❍ 사업기간 : 2021. 1 ~ 2021. 12.

❍ 사 업 량

- 도로주민숙원사업 : 4개소 1,200백만원

- 도로유지 및 보수 : 7건 610백만원

- 교량점검 및 보수 : 3건(168개소) 500백만원

❍ 사 업 비 : 2,310백만원(군비)

❍ 사업내용 : 주민편의를 위한 숙원사업, 교량점검 및 관내도로 유지                 관리사업

5. 재해예방 및 관광자원 활용 하천관리

역점

시책

지방하천 유지관리(운영)사업

❍ 2021. 상․하반기 풀베기사업 시행

- 산청군(11개 읍․면) 지방하천 대상

❍ 노후배수문 유지관리 : 5개면(8개소 대상)

❍ 지방하천 하도준설사업 및 표지판 준비사업

❍ 하천시설물(전기시설물, 데크, 구조물)관리 사업

효율적 하천관리 및 관광자원 활용의 명품하천 조성

❍ 경호강 백리길(자전거도로) 조성사업 외 17개소 : 2,650백만원

❍ 소하천유지관리사업

- 장박 소하천(장박지구) 정비공사 외 9건 : 1,280백만원

❍ 임천(신아지구) 일반하천 정비공사 : 400백만원

국가하천 정비 및 남강댐 주변지역 지원사업 시행

❍ 국가하천(남강) 생초면~단성면 구간 L=51.1㎞정비 : 218백만원

- 하천풀베기 및 하상 유수지장목제거 등

❍ 남강댐 주변지역 지원사업 시행 : 198백만원

- 신안면 및 단성면 영농조건불리지역 농로포장 등 사업 시행

봉두지구 자연재해 위험지구 개선사업 마무리 시행

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 도리 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

❍ 사 업 량 : 하천 및 도로개설 L=880m 및 소하천 정비 L=580m

❍ 사 업 비 : 4,983백만원(국비 2,617, 도비 710, 군비 1,657)

퇴적물제거 및 유수지장목 제거

❍ 산청군 관내 지방하천 양천 외 6개소 하천퇴적물 및 유수지장목 제거

❍ 산청군 소하천 12개소 하천퇴적물 및 유수지장목 제거

❍ 효율적인 관리를 위한 단계적 유수지장목 제거사업 추진

6. 안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비

역점

시책

시군수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 신안면 문대리 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

❍ 사 업 량 : 문대배수장 증설 1개소(Q=2.04㎥/S → 4.44㎥/S)

❍ 사 업 비 : 1,760백만원(균특 1,408, 도비 106, 군비 246)

(단위 : 백만원)

구분	합계		2020년		2021년		2022년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
문대 배수장	배수장증설 1개소	1,760	시행계획 보상1식	500	증설 1개소	850	제진기	410	균특 80%, 도비 6% 군비 14%

소규모 배수개선사업

❍ 위    치 : 생초면 신연리, 단성면 묵곡리, 신안면 장죽리

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 량 : 배수장 3개소 신설

❍ 사 업 비 : 9,526백만원(균특 7,621, 도비 572, 군비 1,333)

(단위 : 백만원)

구분	합계		2020년까지		2021년		2022년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
신연지구	배수장 1개소	4,526	시행계획 보상1식	1,472	배수장 1개소	1,050	배수로 1.5km	2,004	균특 80%, 도비 6% 군비 14%
묵곡지구	배수장 1개소	3,000	시행계획 보상1식	500	배수장 1개소	1,050	배수로 2.4km	1,450	“
용흥지구	배수장 1개소	2,000	시행계획 보상1식	500	배수장 1개소	700	배수로 1.0km	800	“

신촌지구 소규모 용수개발사업(계속)

❍ 위    치 : 산청군 차황면 법평리 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 2024. 12.

❍ 사 업 량 : 저수지 1개소, 용수로 L=2.0km

❍ 사 업 비 : 9,000백만원(균특 6,300, 도비 810, 군비 1,890)

(단위 : 백만원)

구분	합계		2020년		2021년		2022년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
신촌 지구	저수지 1개소	9,000	기본계획 실시설계	1,000	보상1식	1,000	저수지 1개소	7,000	균특 70%, 도비 9% 군비 21%

기계화경작로 확포장사업

❍ 위    치 : 산청군 생초면 신연리, 단성면 창촌리 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12.

❍ 사 업 량 : 기계화경작로 3.2km

❍ 사 업 비 : 500백만원(균특 350, 도비 45, 군비 105)

일물지구 지표수 보강개발사업(계속)

❍ 위    치 : 산청군 오부면 일물리 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 2024. 12.

❍ 사 업 량 : 저수지 1개소, 용수로 L=2.0km

❍ 사 업 비 : 5,000백만원(균특 3,500, 군비 1,500)

(단위 : 백만원)

구분	합계		2020년		2021년		2022년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
일물지구	저수지 1개소	5,000	기본계획 실시설계	1,000	보상1식	500	저수지 1개소	3,500	균특 70%, 군비 30%

재해위험저수지 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 모고리 외 8개소 일원

❍ 사업기간 : 2015. 8. ~ 2022. 12.

❍ 사 업 량 : 재해위험저수지 정비 9개소

❍ 사 업 비 : 10,500백만원(국비 5,250, 도비 1,575, 군비 3,675)

(단위 : 백만원)

저수지명	합계		2020년까지		2021년		2022년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계	9건	10,500	8건	6,290	5건	1,310	4건	2,900	국비 50% 도비 15% 군비 35%
하양	제당 54m	1,000	제당 54m	1,000
강정	제당 53m	500	제당 53m	500
월곡	제당 134m	1,800	제당 134m	1,800
큰골	제당 115m	700	제당 115m	700
배평전	제당 159m	1,900	제당 159m	1,470	제당 159m	430
왕촌	제당 97m	1,900	제당 97m	684	제당 97m	280	제당 97m	936
아미랑	제당 129m	900	설계1식	68	제당 129m	280	제당 129m	552
대현갈	제당 103m	1,100	설계1식	68	제당 103m	280	제당 103m	752
점골	제당 58m	700			설계1식	40	제당 58m	660

농업기반 주민숙원사업

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 외 10개면

❍ 사업기간 : 2021. 1 ~ 12.

❍ 사업량/사업비 : 읍면 주민숙원사업 109건 / 4,469백만원

❍ 기대효과 : 영농 기반 조성으로 오랜 주민숙원 해소

❍ 기    타 : 주민숙원사업은 군 전체 예산 범위내 시행계획

7. 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진

역점

시책

적벽산 급경사지 붕괴위험지구 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 일원

❍ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2021. 6.

❍ 사 업 량 : 위험도로 사면정비 L=900m(피암터널 L=700m) 등

❍ 사 업 비 : 29,184백만원(국 14,592, 도 4,377, 군 10,215)

어서 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 10.

❍ 사 업 량 : 위험도로 사면정비 L=400m, 낙석방지망 A=4,400㎡ 등

❍ 사 업 비 : 4,400백만원(국 2,200, 도 660, 군 1,540)

법평 자연재해위험개선지구 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 가계리 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

❍ 사 업 량 : 교량재가설 2개소(법평교 L=120m, 송계교 L=160m)

접속도로 L=275m, 기타부대공 1식 등

❍ 사 업 비 : 13,693백만원(국 6,846.5, 도 2,054, 군 4,792.5)

입덕문 자연재해위험개선지구 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 단성면 백운리 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

❍ 사 업 량 : 하도개선 L=870m, 홍수방어벽 L=845m, 기타부대공 1식

보상 1식(상가시설, 주유소 등) 등

❍ 사 업 비 : 8,700백만원(국 4,350, 도 1,305, 군 3,045)

신아 급경사지 붕괴위험지구 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 금서면 신아리 일원

❍ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2022. 12.

❍ 사 업 량 : 위험사면 정비 L=200m, 토공 1식, 기타부대공 1식 등

❍ 사 업 비 : 5,000백만원(국 2,500, 도 750, 군 1,750)

생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 일원

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

❍ 사 업 량 : 지방하천 축제, 파라펫, 교량, 보 낙차공 개선, 우수관로

배수펌프장 설치 2개소, 도로숭상, 예경보시스템 설치 등

❍ 사 업 비 : 42,000백만원(국 21,000, 도 6,300, 군 14,700)

동당지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 시천면 중산리 일원

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 량 : 위험사면 정비 L=249m, 낙석방지망 A=6,797㎡ 등

❍ 사 업 비 : 5,832백만원(국 2,916, 도 874.8, 군 2,041.2 )

Ⅴ. 주요 현안사업

군도 확포장공사

농어촌도로 확포장공사

교량보수 및 기타 도로사업

국도·지방도 건설사업 추진

지방하천 유지관리사업

국가하천 유지보수사업

지방하천 시설정비사업

봉두지구 자연재해 위험지구 개선사업

경호강 백리길(자전거도로) 조성사업

남강댐 주변지역 지원사업

소하천 유지관리사업

하천 퇴적물 제거사업

국가하천 및 지방하천사업 추진현황

특리지구 다목적용수개발사업

오성 및 방곡지구 다목적용수개발사업

신연지구 소규모 배수개선사업

신촌, 일물 저수지 신설

적벽산 급경사지 붕괴위험지구 정비사업

법평 자연재해위험개선지구 정비사업

입덕문 자연재해위험개선지구 정비사업

생초지구 풍수해생활권 종합정비사업

1. 군도 확포장공사

❖ 관내 군도의 미개량 노선을 확포장하여 교통소통에 원활을 기하고

지역 간 접근성을 향상시켜 주민의 소득증진과 지역 균형 발전에

기여코자 함

추진방향

❍ 군도 정비계획에 의거 연차적으로 예산 확보 후 추진

❍ 계속사업은 집중투자로 조기 마무리토록 하고 신규사업은 주민

수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 우선 추진

사업개요

사업명	사업량	사업비(백만원)				비고
		총사업비	‘20까지	‘21년	‘22이후
계(5건)	L=4.43km	10,650	5,595	4,400	1,205
군도15호 금서수철도로 확포장공사	L=1.28km	4,500	3,400	1,100		계속
소둔철~갈전간도로 확포장공사	L=2.65km	5,000	1,795	2,000	1,205	계속
군도8호선 차황신기지구 도로정비공사	L=0.20km	200		200		계속
군도13호(내원지구)위험도로 선형개량	L=0.15km	550	200	700		계속
군도9호(병정지구)위험도로 선형개량	L=0.15km	400	200	400		계속

추진계획

❍ 신규사업 조사측량 및 실시설계 용역 : ’21. 1 ~ 2월

❍ 신규 및 계속사업 착수 및 준공      : ’21. 3 ~ 12월

기대효과

❍ 지역 간 교통망 확충으로 관광객 유치 극대화 및 지역개발 활성화

2. 농어촌도로 확포장공사

❖ 관내 도로 폭이 협소하거나 차량통행이 어려운 농어촌도로를 확

포장하여 차량통행에 따른 주민 불편사항을 해소하고 안전사고를

사전에 예방코자 함

추진방향

❍ 농어촌도로 정비계획에 의거 연차적으로 예산 확보 후 추진

❍ 차량통행에 따른 안전사고의 위험이 큰 지구부터 우선 추진

사업개요

❍ 사업명 : 고치절골농로 확포장공사외 10개소

❍ 사업량 : 도로확포장 L=11.08km

❍ 사업비 : 5,150백만원

추진계획

❍ 신규사업 조사측량 및 실시설계 용역 : ’21. 1 ~ 2월

❍ 신규 및 계속사업 착수 및 준공      : ’20. 3 ~ 12월

기대효과

❍ 농어촌도로 개량으로 주민불편 해소 및 낙후된 지역경제 활성화 기여

사업세부내역

사 업 명	사업량	사업비(백만원)				비고
		총사업비	‘20까지	‘21년	‘22이후
계(11건)	L=11.08km	22,780	3,674	5,150	14,906
고치절골농로 확포장공사	L=1.1km	2,100	450	500	1,150	계속
교동~석대간도로 확포장공사	L=1.5km	4,100	600	600	2,900	계속
원리~동신간도로 확포장공사	L=0.87km	2,400	300	1,100	800	계속
특리마을 우회도로 개설공사	L=0.89km	1,900	350	200	1,350	계속
단성소리당도로 확포장공사	L=0.5km	1,850	22	400	1,378	계속
만안도로 확포장공사	L=0.4km	590	140	450		계속
오부소룡산 진입도로 확포장공사	L=0.34km	640	22	200	418	계속
삼장서당지구 도로확포장공사	L=0.68km	400	50	350		계속
군도.농어촌도로 기본 및 정비계획 용역	용역1식	300		300		신규
중산~내대간도로 확포장공사	L=3.0km	8,500	1,740	1,000	5,760	계속
둔철~갈전간도로 확포장공사	L=1.8km			50	1,150	신규

3. 교량보수 및 기타도로사업

❖ 관내 교량에 대한 정밀점검 및 안전점검결과에 따라 유지보수를

시행하여 안전사고를 사전에 예방하고 군도 및 농어촌도로 시설물

등을 정비하여 도로유지 관리에 만전을 기하고자 함

추진방향

❍ 교량 정밀점검 및 안전점검 결과에 따라 교량 보수․보강 추진

❍ 군도 및 농어촌도로 상 사고위험 요소가 있는 지구부터 우선 추진

사업개요

❍ 사업명 : 구아마을 진입도로 확포장공사외

❍ 사업량

- 주민숙원사업 4건/1,200백만원

- 도로유지관리사업 7건/610백만원

- 교량관리사업 3건/500백만원

추진계획

❍ 조사측량 및 실시설계 용역  : ’21. 1 ~ 2월

❍ 사업착수 및 준공           : ’21. 3 ~ 12월

기대효과

❍ 도로시설물 유지관리로 안전사고 예방 및 주민불편사항 해소

❍ 주민숙원사업 시행으로 편의 증진 및 지역경제 활성화 기여

사업세부내역

구분	사 업 명	사업량	사업비 (백만원)	비 고
계	14건		2,310
교량관리사업	교량정밀점검	6개소	60
	교량안전점검	155개소	60
	교량유지보수	6개소	380	점검결과에 따라 보수
도로유지 관리사업	군도,농촌도 차선도색사업	L=90km	100
	군도,농촌도 소파보수사업	10개노선	100
	상반기 도로변 풀베기사업	L=200km	100
	도로재해위험지 보수	10개소	100
	도로시설 긴급장비대	1식	50
	도로관리용 CCTV보수	1식	10
	미불용지 보상금지급	25필지	150
주민숙원사업	구아마을 진입도로 확포장공사	L=0.6km	800	계속
	내리지성마을 도로확포장공사	L=0.8km	300	계속
	생비량 면도101호선 정비공사	L=0.5Km	50	신규
	군도23호 외송지구 안전시설 설치공사	L=0.2Km	50	신규

4. 국도․지방도 건설사업 추진

❖ 국도․지방도 건설사업 추진현황

삼장~산청 국도건설공사(밤머리재터널) 추진현황

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 홍계리~금서면 평촌리(국도59호선)

❍ 사 업 량 : L=6.0km(터널1개소 L=3.0km, 접속도로 L=3.0km)

❍ 사 업 비 : 105,200백만원(공사비 94,200백만원, 보상비 등 11,000백만원)

‘19년까지 : 513억, ’20년 : 139억, ‘21년이후 : 400억

❍ 사업기간 : 2016. 4. ~ 2023. 3.

❍ 추진사항

- 실시설계 용역 시행 및 완료      : ’11. 12 ~ ’13. 8월

- 보상협의 추진                   : ’16. 11월

- 공사 착수                       : ’17. 2월

- 터널 굴착작업 착수              : ’17. 8월

- 터널굴착 완료(L=3.0km)          : ’18. 8월

- 터널 및 도로추진 중(공정율 65%) : ’20. 9월

- 준공예정                        : ’23. 3월

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청

❍ 시 공 사 : 금호산업(주), 롯데건설(주), ㈜한라

국도20호선『단성~시천간2』국도건설공사

❍ 위    치 : 산청군 단성면 사월리 ~ 길리

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=3.0km, B=19.5m

❍ 사 업 비 : 41,400백만원

❍ 사업기간 : 2019. 11. ~ 2024. 11.

❍ 추진사항

- 제4차 국도건설5개년계획 반영        : ’16. 7월

- 실시설계용역 완료                   : ’18. 9월

- 행정절차이행                        : ’19. 12월

- 보상협의 및 공사추진                : ’20. ~ ’24.

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청

❍ 시 공 사 : 한주토건(주)

국도20호선『신안~생비량간』국도건설공사

❍ 위    치 : 산청군 단성면 강누리 ~ 생비량면 도리

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=9.2km, B=19.5m

❍ 사 업 비 : 179,300백만원

❍ 사업기간 : 2020. 8. ~ 2027. 8.

❍ 추진사항

- 실시설계용역 완료                   : ’14. 7월

- 예비타당성 면제 확정                : ’19. 2월

- 사업적격성 심사 및 행정절차 이행    : ’19. 12월

- 보상협의 및 공사추진                : ’20. ~ ’27.

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청

❍ 시 공 사 : 금호산업(주), 대저토건(주)

국지도60호선 선형개량공사

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 ~ 금서면 화계리

❍ 사 업 량 : L=8.88km, B=12.0m(기추진 5.68km, 향후계획 L=3.2km)

❍ 사 업 비 : 33,400백만원(기투자 15,100백만원, 향후 18,300백만원)

※ 용역비 : 945백만원

❍ 사업기간 : 2020. 10 ~ 2023. 12

❍ 추진사항

- 금서면 매촌리~동의보감촌 구간 L=5.68km 시공완료   : ’10. 2 ~ ’13. 8월

- 잔여구간(L=3.2km) 제4차 국지도건설 5개년계획 반영요청 : ’13. 9월

- 도지사 순방 시 사업건의                           : ’15. 1월

- 국토부 제4차 국지도5개년 반영                     : ’16. 9월

- 실시설계용역 완료                                 : ’19. 12월

- 감정평가 실시                                     : ’20. 8월

- 조사측량 및 실시설계 착수                         : ’17. 5월

- 공사착수 및 완료                             : ’20. ~ ’23.

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청 설계, 경상남도 시행

국도59호(창주~구생기간) 우회도로 개설공사

❍ 위    치 : 산청군 금서면 특리 ~ 산청읍 지리

❍ 사 업 량 : 우회도로개설 L=0.9km(도로 L=0.6km, 교량 L=0.3km)

❍ 사 업 비 : 156,000백만원(19년 : 600백만원, 20년이후 : 150,000백만원)

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년

❍ 추진사항 :

- 제6차 국도병목지점 개량사업 반영        : ’18. 1월

- 실시설계용역비 3억 확보                 : ’18. 12월

- 실시설계용역 완료                       : ’ 21. 3월

- 총사업비 협의(기획재정부)               : ’21. 12월

- 공사발주                                : ’22. 1월

- 행정절차 이행 및 보상협의 추진, 사업착수 : ’22. 2 ~ 12월

- 공사완료                                 : ’24. 12월

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청

원지교차로 개선공사

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리

❍ 사 업 량 : 교량확장 L=120m, 도로 L=150m

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(19년 : 50백만원, 20년이후 : 2,950백만원)

❍ 사업기간 : 2019. 12 ~ 2022. 12

❍ 추진사항 :

- 제6차 국도병목지점 개량사업 반영   : ’17. 10월

- 실시설계용역비 착수                : ’19. 4월

- 공사발주(2020. 2. 실착공)            : ’19. 11월

- 공사완료                           : ’22. 10월

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청 진주지소

❍ 시 공 자 : ㈜토왕건설

국도3호선 산성교차로 개선공사

❍ 위    치 : 산청군 신안면 중촌리

❍ 사 업 량 : 교차로개선 L=300m

❍ 사 업 비 : 2,000백만원

❍ 사업기간 : 2021. 2. ~ 2023. 2.

❍ 추진사항 :

- 제6차 국도병목지점 개량사업 반영 : ’17. 10월

- 실시설계용역 착수                : ’20. 3월

- 보상협의 및 공사착공             : ’21. 2월

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청 진주지소

❍ 설 계 자 : ㈜경화엔지니어링

5. 지방하천 유지관리사업

❖ 관내 지방하천에 대해 미 정비된 기성제와 하상에 퇴적된 퇴적물제거

□ 노후화된 표지판 정비를 통해 효율적인 시설물 유지관리 시행

추진방향

❍ 하상에 퇴적된 퇴적물 제거 및 유수지장목 제거 실시

❍ 노후화된 표지판 정비 및 기성제방 풀베기 등 시행

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 양천 외 8개소 지방하천

❍ 사 업 량 : 퇴적물제거 및 유수지장목 제거 등 1식

노후화된 표지판 교체 및 정비작업 1식

❍ 사 업 비 : 300백만원(도비 150, 군비 150)

추진계획

❍ 하상 퇴적물 및 지장목 제거 대상지 조사 : ’20. 10. 20 ~ 12. 15.

❍ 산청읍ㆍ면 사업비 재교부 시행        : ’21. 1월

❍ 자체사업 및 재교부 사업 착수 및 준공 : ’21. 2. ~ 10월

기대효과

❍ 하천퇴적물제거 작업 및 유수지장목 제거로 인한 인근 농경지 및 재해 방지

❍ 표지판 정비를 통한 효율적 하천시설물 관리

6. 국가하천 유지보수사업

❖ 우리 군 관내 국가하천(남강)에 대하여 하천퇴적물 제거 및 유수지장목 제거와 풀베기 정비작업을 통해 효율적 국가하천유지를 관리하고자함

추진방향

❍ 국가하천 제방의 정비(풀베기작업)작업우선 제거 실시

❍ 퇴적물 제거사업 및 하천시설물 유지보수사업 병행 시행

❍ 시특법 상 필요한 정밀점검용역 시행(제방 및 통관박스 시설물)

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 남강 국가하천

❍ 사 업 량 : 퇴적물 제거, 유수지장목 제거 1식 및 하천시설물 정비

제방 및 통관박스 시설물 정밀점검용역 1식

❍ 사 업 비 : 218백만원(국비)

추진계획

❍ 퇴적물 및 지장목 제거대상지 조사 : ’20. 11 ~ 12월

❍ 정밀점검용역 및 사업시행         : ’21. 3월

❍ 사업준공                         : ’21. 10월

기대효과

❍ 하천퇴적물제거 작업으로 인한 인근 농경지 및 재해 방지

❍ 국가하천의 효율적 시설물 관리 및 유지 관리성 제고

7. 지방하천 시설정비사업

❖ 산청군 관내 미 정비된 지방하천에 대하여 본 사업을 통해 시설을 정비하여 자연재해 예방과 효율적인 지방하천 관리에 기여하고자 함

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 평촌리 외 7개소

❍ 사 업 량 : 하천제방 보강 및 시설물 정비 1식

❍ 사 업 비 : 2,090백만원(군비)

추진계획

❍ 실시설계용역 시행  : ’21.  1월

❍ 사업추진 및 착수   : ’21.  3월

❍ 사업준공           : ’21.  9월

기대효과

❍ 하천정비를 통한 시설물의 효율적 관리

❍ 자연재해 예방 및 사유재산 보호

사업세부내역

구 분	사업량(km)	사업비(백만원)	비고
계	4.4	2,090
상법천(손항지구) 지방하천 정비사업	0.5	600
평촌천(홍계지구) 지방하천 정비사업	1.2	400
덕천강(평촌지구) 지방하천 정비사업	0.8	150
덕천강 고향의 강 친수공간 전기공사	13개소	250
반천(반천지구) 지방하천 정비공사	0.6	300
강누천(강누지구) 지방하천 정비공사	0.7	300
송경천(모고지구) 지방하천 정비공사	0.5	60
덕천강(송정지구) 지방하천 정비공사	0.1	30

8. 봉두지구 자연위험개선지구 정비사업

❖ 집중호우 발생 시 양천 및 봉두천의 수위상승에 따른 주거지 및

농경지 침수방지와 자연재해위험을 사전에 방지하고자함

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 생비량면 도리 일원

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=0.83km

❍ 사 업 비 : 4,983백만원(국비 2,617, 도비 710, 군비 1,657)

❍ 사업내용 : 하천정비 L=0.83Km , 소하천 정비 L=540m 외

그간 추진사항

❍ 중앙 사전설계심의 및 비관리청 하천공사 협의 : ’19. 10월

❍ 사전설계심의 완료 및 공사 발주 등 착수      : ’20. 3월

❍ 1차분 공사 준공 및 2차분 추진               : ’20. 12월

추진계획                                   (단위:백만원)

구분	계	2019	2020	2021	비고
사업비	4,983	200	1,500	3,283
사업량	L=0.83km	실시설계 용역	도로개설 L=0.83㎞	하천정비 L=0.83㎞

기대효과

❍ 통수 단면 확보로 제방 보호 및 침수 등 수해피해 재발방지

❍ 자연재난 방지 및 지역주민의 사유 재산권 보호

9. 경호강 백리길(자전거도로) 조성사업

❖ 경호강을 매개체로 산청군과 진주시를 자전거도로를 연결하여 관광, 상호교류 등 상생발전의 발판을 마련하는데 목적이 있음

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 관정리 ~ 금서면 주상리 일원

총연장	개설완료	미개설	기존도로정비	비 고
45.0	20.44	7.86	16.7

❍ 사 업 량 : 자전거도로 개설 L=45.0㎞

❍ 사 업 비 : 154억원(기투자:109억, 투자 중:16억, 장래분:29억)

❍ 사업기간 : 2018. 3 ~ 2022. 12.

그간 추진사항

❍ 수산~어천간 자전거 도로 개설 완료              : ’19. 10월

❍ 단성 소남  ~ 단성 묵곡 구간 L=5.1㎞ 시공 완료  : ’20. 3 ~ 11월

추진계획

❍ 단성 어천지구 ~ 산청읍 범학지구 공사 계약심사 발주 : ’21. 2월

❍ 단성 송강지구 ~ 산청읍 범학지구  L=2.㎞ 8공사 준공   : ’21. 3 ~ 11월

기대효과

❍ 자전거 도로를 통한 외부 탐방객 유치로 지역경제 활성화 기대

❍ 깨끗하고 아름다운 관광산청 이미지 제고

10. 남강댐 주변지역 지원사업

❖ 우리 군 수변구역인 단성면 및 신안면에 지역주민의 건의사항에

대하여 본 사업을 시행하여 장기적인 편익을 제공하고자함

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 단성면 및 신안면

❍ 사 업 량 : 지역개발사업 1식

❍ 사 업 비 : 198백만원(국비 198)

❍ 사업내용 : 콘크리트포장, 마을회관 정비 및 물품 구입

추진계획

❍ 남강지사로부터 사업승인         : ’21. 1월

❍ 단성면 및 신안면 사업비 재교부  : ’21. 2월

❍ 사업준공                        : ’21. 6월

기대효과

❍ 수변지역 정비를 통한 친화적인 깨끗한 환경 조성

❍ 지역주민의 오랜 숙원사업 해소

11. 소하천 유지관리사업

❖ 우리 관내 소하천정비기본계획에 따라 미 정비된 소하천에 대하여 본 사업을 통해 정비하여 군민의 재산보호 및 수해피해 예방

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 장박리 외 8개소

❍ 사 업 량 : 9개소 / 소하천정비 1식

❍ 사 업 비 : 1,280백만원(군비)

추진계획

❍ 실시설계용역 시행   : ’21. 1월

❍ 사업추진 및 착수    : ’21. 3월

❍ 사업준공            : ’21. 9월

기대효과

❍ 농경지 수해피해 사전예방과 재산 보호

❍ 소하천정비를 통한 하천의 효율적인 관리

사업세부내역

구 분		사업량(km)	사업비(백만원)	비고
총 계		1식	1,280
군시행 (자체사업)	신기동 소하천(신기지구) 정비공사	1식	100	신규
	수리미골 소하천(방곡지구) 정비공사	1식	150	신규
	곡소 소하천(소이지구) 정비공사	1식	400	신규
읍면시행 (자체사업)	운곡 소하천(운곡지구) 정비공사	1식	60	신규
	장박 소하천(장박지구) 정비공사	1식	200	신규
	오전 소하천(오전지구) 정비공사	1식	100	신규
	석상 소하천(석장지구) 정비공사	1식	50	신규
	점동 소하천(점동지구) 정비공사	1식	60	신규
	물산 소하천(평지지구) 정비공사	1식	160	신규

12. 퇴적물 제거사업

❖ 하천구역 내 퇴적된 퇴적물 및 유수지장목을 제거하여 우기 시

하천재해의 위험요인을 제거하여 자연재난 피해를 예방하여 지역주민의 재산권을 보호하고자함

추진방향

❍ 수해로 인하여 하상이 숭상된 지역 우선 제거 실시

❍ 퇴적물 제거사업과 병행하여 하도개량(물길 돌리기)사업 실시

❍ 하천 내 퇴적을 유발하는 유수 지장목 동시 제거 추진

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 하천

❍ 사 업 량 : 퇴적물 제거 A=9,000㎡, 유수지장목 제거 1식

❍ 사 업 비 : 420백만원(군비 420)

❍ 사업내용 : 퇴적물 제거 및 유수지장목 제거

추진계획

❍ 퇴적물 및 지장목 제거대상지 조사 : ’20. 11 ~ 12월

❍ 군 및 읍ㆍ면 재교부 사업시행     : ’21. 2월

❍ 사업준공                         : ’21. 6월

기대효과

❍ 통수 단면 확보로 제방 보호 및 침수 등 수해피해 재발방지

❍ 하천의 효율적 유지관리 및 이용성 제고

13. 국가 및 지방하천 재해예방 사업 추진현황

❖ 국가 및 지방하천 재해예방사업 추진현황

남강(방목지구)하천환경 정비사업

❍ 사업구분 : 남강(국가하천)

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 범학리 ~ 신안면 하정리

❍ 사업기간 : 2019. 3. ~ 2023. 6.

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=2.37km

(하천환경정비 7개소 125,620㎡, 하천정비 2개소 7,210㎡)

❍ 사 업 비 : 250억원(공사비 162억, 보상비 88억)

❍ 투자계획

(단위 : 억원)

합 계		기투자		2021년 시행		장래분		비고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=2.37㎞	250.0	사업착공 보상비1식 L=1.3㎞	50	보상협의하천정비 L=1.2㎞	50	초지조성 L=1.07㎡	150

금서지구 하천재해예방사업

❍ 사업구분 : 금서천(지방하천)

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 ~ 향양리

❍ 사업기간 : 2020. 6. 20 ~ 2023. 6. 19

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=3.3km

(교량재가설  6개소, 축제 및 보축 12개 지구)

❍ 사 업 비 : 155억원(설계비 5억, 도급 96억, 관급 44억, 보상비 10억)

❍ 투자계획

(단위 : 억원)

합 계		기투자		2021 시행		장래분		비고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=3.90㎞	155.0	실시설계 보상협의	64.0	보상협의하천정비 L=1.2㎞	31.0	하천정비 L=2.7㎞	60.0

14. 특리지구 다목적용수개발사업

❖ 산청군 금서면 특리, 향양리, 평촌리, 수철리 일원은 229ha의

집단화된 농경지가 조성되어있는 지역으로 매년 한발로 인해

농업소득 감소와 영농불편을 겪고 있으며, 생활용수 또한 안정적으로      공급받지 못하고 있어 다목적 농촌용수개발사업 시행이 절실히      필요한 지역임

추진방향

❍ 한국농어촌공사 시행 전액 국비사업으로 금서면 지역 한해 해소를

위한 용수 개발

❍ 한국농어촌공사 진주·산청지사 시행

사업개요

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.(5년간)

❍ 위    치 : 산청군 금서면 특리 외 3개리 일원

❍ 사 업 량 : 저수지 1개소(유효저수량 55.9만㎥, 생활용수 3,500㎥/day), 양수장 2개소 수혜면적 229ha(신규 186ha, 보강 36ha)

❍ 사 업 비 : 33,300백만원(국비100%)

그간 추진사항

❍ 경남도, 중앙부처, 국회 수차례 방문 사업 건의   : ’17. ~ ’19.

❍ 2018~2020 3년간 기본조사 대상지구 경남도 1순위 신청 : ’17.  ~ ’19.

❍ 2020년 기본조사 대상지구 선정                 : ’20. 9월

추진계획

❍ 기본조사  : ’21. 9 ~ ’21. 12월

❍ 사업시행  : ’22. 1 ~ ’26. 12월

기대효과

❍ 안정적인 용수 공급으로 주민 우심 해소 및 농가 소득 증대

15. 오성 및 방곡지구 다목적용수개발사업

❖ 농업용수 부족으로 매년 한발을 겪고 있는 상습 한해지역에 대하여

농업 용수원을 개발하여 안정적인 용수공급

추진방향

❍ 한국농어촌공사 시행 전액 국비사업으로 산청 북부권역 한해 해소를

위한 용수 개발

❍ 한국농어촌공사 진주·산청지사 시행

사업개요

구분	위치	수혜면적	총사업비 (2020년도)	사업량	비고
오성지구	오부면 방곡리	77.5ha	19,214백만원 (2,490백만원)	저수지 신설 1개소 양수장 1개소 용수로 7조 L=7.1km
방곡지구	금서면 방곡리	345ha	44,916백만원 (5,500백만원)	저수지 신설 1개소 양수장 2개소 용수로 5조 L=9.9km

그간 추진사항

❍ 오성지구

- 시행계획 승인 : ’18. 6월

- 공사 착공     : ’17. 9월(현 진도율 : 70%)

❍ 방곡지구

- 시행계획 승인 : ’15. 6월

- 공사 착공     : ’15. 9월(현 진도율 : 80%)

추진계획

❍ 오성지구 : 공사 시행 및 보상협의(’17. 9 ~ ’23. 12월)

❍ 방곡지구 : 공사 시행 및 보상협의(’15. 9. ~ ’22. 12월)

기대효과

❍ 안정적인 용수 공급으로 주민 우심 해소 및 농가 소득 증대

16. 신연지구 소규모 배수개선사업

❖ 생초면 신연지구는 배수 본천인 남강 및 생초천 만수위시 내수

배제 불량으로 매년 침수 피해가 발생하는 지구로 배수개선사업을

통한 재해예방

추진방향

❍ 생초면 신연지구 상습 침수위험 해소를 위한 배수개선사업 추진

❍ 주민 불편 최소화를 조기 예산 확보 및 사업 준공

사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 1.~ 2023. 12.(5년간)

❍ 위    치 : 산청군 생초면 신연리 일원

❍ 사 업 량 : 배수장 1개소, 배수로 L=1,456m

❍ 사 업 비 : 4,526백만원(균특 3,621, 도비 181, 군비 724)

❍ 사업내용 : 배수장 신설 1식(수혜면적 35ha, 유역면적 273ha)

※ 신연구역 Q=2.3㎥/S(∅700mm×2대, ∅500mm×1대)

그간 추진사항

❍ 예정지 조사 및 기본계획                  : ’18. 3월

❍ 소규모 배수개선사업 신규지구 반영(농림부) : ’18. 5월

❍ 시행계획 수립 및 실시설계 용역           : ’19. 1 ~ ’20. 8월

❍ 공사 착공                                : ’20. 9월

추진계획

❍ 공사 준공            : ’23. 12월

기대효과

❍ 상습 침수지역 배수개선을 통해 주민생활 안정 및 안전 영농실현으로 지역경제 활성화 도모

17. 신촌, 일물 저수지 신설

❖ 최근 강수량 감소 및 지표수 부족에 따른 농업용수 부족으로 가뭄

피해가 발생하는 지역에 대하여 저수지를 신설하여 안정적인 농업

용수 확보

추진방향

❍ 농업용수 부족으로 가뭄 피해가 우려되는 지역에 농업용 저수지 신설

❍ 사업 반영 및 조속 추진을 위한 관련부처(농림축산식품부)사업 탄력적 추진

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)

❍ 위    치 : 차황면 법평리 신촌, 오부면 일물리 일물마을 일원

❍ 사 업 량 : 저수지 2개, 용수로 L=4.0km

❍ 사 업 비 : 14,000백만원(국비 9,800, 도비 1,260, 군비 2,940)

❍ 사업내용 : 신촌지구(11만톤, 9,000백만원), 일물지구(8만톤, 5,000백만원)

❍ 관련사업 : 신촌지구(일반농촌개발사업 소규모농촌용수개발사업추진)

일물지구(일반농촌개발사업 지표수보강개발사업추진)

그간 추진사항

❍ 신촌 및 일물지구 상습가뭄재해지구 대상지 제출 : ’18. 4월

❍ 대상지 현장 확인(행안부)                : ’18. 5월

❍ 신촌 및 일물지구 기본 조사 용역 완료   : ’18.10 ~ ’19. 3월

❍ 경상남도 농업정책과 방문 사업 건의     : ’19. 1월

❍ 신촌지구, 일물지구 일반농촌개발사업 신규지구 신청 : ’19. 2월

❍ 실시설계용역, 시행계획 수립 및 공고    : ’20. 1 ~ ’21. 6월

추진계획

❍ 공사 착공 및 준공                      : ’21. 7 ~ ’24. 12월

기대효과

❍ 저수지 신설을 통한 안전 영농기반 구축으로 가뭄 해소 및 농가 소득 증대

18. 적벽산 급경사지 붕괴위험지구 정비사업

❖ 재해 발생 우려가 높은 급경사지 붕괴위험지구에 조속한 정비사업

추진으로 군민의 생명을 보호하고 안전한 주거환경 조성

사업개요

❍ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2021. 6.

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 일원

❍ 사업내용 : 위험사면 정비 L=934m(피암터널 L=700m)

낙석방지망 4,950㎡, 교차로 및 부대공 1식 등

❍ 사 업 비 : 29,184백만원(국비 14,592, 도비 4,378 군비 10,214)

그간 추진사항

❍ 사전설계검토 심의             : ’14. 11월

❍ 실시설계용역 준공             : ’15. 10월

❍ 경상남도 건설기술심의         : ’18. 1월

❍ 공사 및 건설사업관리용역 착수 : ’18. 6월

추진계획

❍ 피암터널 및 포장 완료(임시개통 예정)          : ’21. 1월

❍ 조경(터널 상부 성토) 및 부대공, 전체 준공 예정 : ’21. 6월

기대효과

❍ 낙석발생에 따른 위험요소 해소 및 군민의 생명과 재산보호

19. 법평 자연재해위험개선지구 정비사업

❖ 법평 잠수교는 교량높이가 계획 홍수위보다 낮아 집중호우 시 유수 흐름 지장 및 유송잡물 걸림 등으로 하천수위를 상승시켜 교량을 가설하여 인명 및 재산피해를 해소코자 함.

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 가계리  일원

❍ 사업내용 : 교량재가설 2개소(법평교 L=120m, 송계교 L=160m)

접속도로 L=275m, 기타부대공 1식 등

❍ 사 업 비 : 13,693백만원(국비 6,846.5, 도비 2,054, 군비 4,792.5)

그간 추진사항

❍ 타당성조사 용역 착수     : ’19. 1월

❍ 자연재해위험지구 지정   : ’19. 12월

❍ 실시설계용역 착공        : ’20. 3월

추진계획

❍ 교량 공법 선정             : ’20. 10월

❍ 설계 경제성 검토           : ’20. 11월

❍ 사전설계 심의              : ’20. 12월

❍ 경남도 건설기술 심의       : ’21. 1월

❍ 사업 착공                  : ’21. 2월

기대효과

❍ 유실위험에 따른 교량 재가설로 인명 및 재산피해 방지

20. 입덕문 자연재해위험개선지구 정비사업

❖ 우기 시 지방하천 덕천강 수위 상승 및 제방여유고 부족으로 인한 하천월류로 반복적인 도로 및 상가시설 침수에 따라 하도개선 및 홍수방어벽 설치로 인명 및 재산피해를 해소코자 함.

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.

❍ 위    치 : 산청군 단성면 백운리 일원

❍ 사업내용 : 하도개선 L=870m, 홍수방어벽 L=845m(H=0.2~1.0m)

보상 1식(상가시설, 주유소 등), 기타부대공 1식 등

❍ 사 업 비 : 8,500백만원(국비 4,250, 도비 1,275, 군비 2,975)

그간 추진사항

❍ 2019.  1. : 타당성조사 용역 착수 : ’19. 1월

❍ 2019. 12. : 자연재해위험지구 지정 : ’19. 12월

❍ 2020.  4. : 실시설계용역 착공   : ’20. 4월

❍ 2020.  8. : 소규모환경영향평가 착공  : ’20. 8월

추진계획

❍ 소규모환경영향평가 협의  : ’20. 10월

❍ 소규모환경영향평가 준공  : ’20. 11월

❍ 사전설계 심의            : ’21. 1월

❍ 사업 착공                : ’21. 3월

기대효과

❍ 침수발생에 따른 위험요소 해소로 군민의 생명과 재산 보호

21. 생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업

❖ 남강 본류 배수위 영향으로 인한 침수피해 발생이 빈번한 주거지 및 농경지에 대하여 조속한 정비사업 추진으로 군민의 생명을 보호하고 안전한 주거환경을 조성하고자 함

사업개요

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 일원

❍ 사 업 량 : 지방하천 축제, 파라펫, 교량, 보 낙차공 개선, 우수관로

배수펌프장 설치 2개소, 도로숭상, 예경보시스템 설치 등

❍ 사 업 비 : 42,000백만원(국 21,000 도 6,300 군 14,700)

그간 추진사항

❍ 부산지방국토관리청 남강 수위저하 방법 등 사전 협의 : ’20. 2월

❍ 2021년 재해예방사업 신청(생초지구)               : ’20. 3월

❍ 2021년 풍수해 생활권 종합정비 공모 사업 신청    : ’20. 5월

❍ 공모사업 PPT 발표(안전건설과장)                 :  ’20. 5월

❍ 심사위원 현장 실사(담당사무관 등 5명)            : ’20. 5월

❍ “생초지구” 공모사업 최종 확정(6. 15.)           : ’20. 6월

추진계획

❍ 실시설계용역 사업수행능력평가(PQ) 공고 : ’20. 10월

❍ 사업수행능력평가(PQ) 평가              : ’20. 11월

❍ 실시설계용역 업체 선정 및 착공         : ’20. 12월

기대효과

❍ 주거지 침수해소에 따른 재산 및 인명 보호

Ⅵ. 신규(특수) 시책

범죄예방환경 도시조성 사업

버스진출입 불가마을 진입로 정비공사

국가하천(남강) 스마트 홍수예방 시스템

구축사업

1. 범죄예방환경 도시조성 사업

❖ 범죄 사각지대 및 범죄발생 우려지역(공중화장실[여성])에 대한

군민의 불안감을 해소하고 범죄 예방환경을 조성하여 범죄를

사전에 예방하고자 함

추진방향

❍ 범죄 사각지대“지능형 CCTV”설치 및 범죄발생 우려지역“공중화장실

비상벨”설치로 범죄예방환경 구현

사업개요

❍ 사업위치 : 산청군 관내

❍ 사업기간 : 2019.  ~  2022. (※도지사 공약사업과 연계하여 연차별 추진)

❍ 사 업 비 : 2021년 52백만원(도 15.6(30%), 군 36.4(70%))

❍ 사업내용

- 범죄 사각지대“지능형 CCTV”설치

· 방 법 : 지능형 CCTV가 물체의 움직임 등 위험상황을 감지하여  관제센터로 송신, 관제센터에서 경찰에 대응조치

· 2021년 사업량 : 지능형 CCTV 2대

· 사 업 비 : 40백만원

- 범죄발생 우려지역“공중화장실 비상벨”설치

· 방 법 : 폭력 등 위급 상황 시 화장실에 설치된 비상벨을 누르면 건물 외벽의 경광등 점멸 및 음성 경고방송으로 위급상황 전파, 건물입구 상시 녹화(7일분 정도 보존)

· 2021년 사업량 : 비상벨 설치 4개소

· 사 업 비 : 12백만원

추진계획

❍ 사업대상지 선정   : ’21. 1 ~ 3월

❍ 사업추진 및 완료  : ’21. 4 ~ 12월

기대효과

❍ 여성, 어린이 등 치안약자 보호와 범죄발생 우려지역에 대한 안전 확보

2. 버스진출입 불가마을 진입로 정비공사

❖ 마을진입로 협소로 버스 등 대형차량 통행이 불가하여 주민생활

불편이 큰 마을의 진입도로를 정비하여 주민불편사항을 해소하고

지역간 균형발전을 도모코자 함

추진방향

❍ 사업대상지에 대하여 연차별 예산확보 후 추진

❍ 군도, 농어촌도로 정비사업 등에 우선적으로 반영하여 추진

❍ 편입부지 동의 등 마을주민들의 협조 및 보상협의 의지가 높은

지구 우선 시행

사업개요

❍ 대 상 지 : 차황면 우사지구 외 14개소

❍ 사업기간 : 2018. ~ 2024.

❍ 사 업 비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
1,185	2,080	1,500	2,000	1,500	1,500	1,600

❍ 사업내용 : 진입도로 확포장 15개소 L=8,750.0m, B=6.0m

(단위 : km)

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
1.03	2.28	1.20	1.00	0.96	1.18	1.10

기대효과

❍ 주민불편사항 해소 및 지역 간 균형발전 도모

세부추진계획

시행 년도	읍면	마을	가구 /인구	시점	종점	연장 (m)	현폭 (m)	노선명	사업비 (백만원)	선정 사유
계				15개소		8,750			11,200
‘18년	소계			3개소		1.030			1,185
	차황	우사	29/54	우사리 산9	77-11	310	3.5	리도209	200	폭협소 굴곡도로
	오부	중매	40/87	내곡리 371-2	282-1	500	3.5	리도204	300	폭협소 굴곡도로
	삼장	신촌	16/31	대하리 553	545-1	220	3.5	농도301	685	폭협소 굴곡도로
‘19년	소계			5개소		2,280			2,080
	차황	우사	29/54	우사리 산9	77-11	310	3.5	리도209	500	폭협소 굴곡도로
	오부	중매	40/87	내곡리 371-2	282-1	500	3.5	리도204	700	폭협소 굴곡도로
	삼장	신촌	16/31	대하리 553	545-1	220	3.5	농도301	380	폭협소 굴곡도로
	신등	수청	20/40	양전리9	206	400	3.5	진입로	200	교행불가
	신안	구담	24/40	외고리 1109	산69	850	3.5	리도205	300	교행불가
‘20년	신안	곡소	27/48	소이리 589-39	526-1	1,200	3.5	리도204	1,500	교행불가
‘21년	시천	남대	92/166	내대리 1116	251-20	1,000	3.0	리도206	2,000	가구수 증 가
‘22년	신안	갈전 숲속	35/90	갈전리 179	152-31	960	4.0	군도29	1,500	가구수 증 가
‘23년	소계			2개소		1,180			1,500
	삼장	서당	38/68	덕교리 1041-2	626-1	330	3.5	농도304	500	가구수 증 가
	신안	태계	26/37	소이리 445-1	470-5	850	4.0	리214	1,000	기타
‘24년	소계			2개소		1,100			1,435
	차황	고황촌	20/35	상중리 633	211-1	500	3.5	진입로	700	기타
	신등	원계	30/45	양전리 622-2	810	600	3.0	군도29	735	기타

3. 국가하천(남강) 스마트 홍수예방 시스템 구축사업

❖ 국가하천(남강)에 설치된 수문을 원격으로 자동 제어하여 홍수 시 내수침수를 방지하고자 함

□ 국가하천 시설물(배수문 및 통문)의 효율적 관리

추진방향

❍ 재해예방 및 국가하천 인근 농경지 등을 자연재난으로부터 보호

❍ 원격제어 시스템을 재난상황실과 연계하여 제어 가능목적

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 국가하천(남강) 일대

❍ 사 업 량 : 배수문 14개소(배수통문 10개소, 배수암거 4개소)

❍ 사 업 비 : 1,251백만원(국비 1,251)

❍ 사업내용 : 재난상황실 연계 수문 자동제어 스마트 인프라 구축 1식

추진계획

❍ 실시설계용역 시행 및 완료   : ’20. 9 ~ 12월

❍ 사업발주 및 착수            : ’21. 2월

❍ 사업준공                    : ’21. 10월

< 재난종합상황실 >	< 수문 자동제어 시스템 >	<수문 전동화 시설>

기대효과

❍ 배수문 원격제어 자동화 시스템 구축을 통한 재해예방

❍ 국가하천 시설물의 효율적 유지관리 효과