2017년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(상하수도사업소)

□ 총    평

❍ 노후된 소규모수도시설개량 및 지방상수도 확장을 통하여 지역간 불

균형을 줄이고 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급으로 주민복지 증진

기여

❍ 공공하수처리시설 확대 및 생활오수의 적정 처리로 수질개선에 기여

□ 추진상황

구 분	추 진 실 적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	8	3	5
군수공약사업	5	3	2
주요시책사업	3		3

□ 주요성과

❍ 노후된 소규모수도시설개량, 지방상수도 인입 및 급수관로 누수탐사

등을 통해 지방 및 마을 상수도의 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급으로

수돗물에 대한 신뢰도 제고

❍ 도리지구 공공하수처리시설 확대 및 생활오수의 적정 처리로 수질개

선에 기여

□ 반    성

❍ 상·하수도는 사업특성상 도로굴착을 수반하여 추진함에 따라 굴착전

사전홍보 및 굴착시 신호수 등을 배치하여 교통불편 등 민원이 최소화

될 수 있도록 사업관리에 만전을 기하겠음

□ 향후 추진계획

❍ 미확보 또는 부족분 재원 확보를 위해 도 또는 중앙부처와 지속적인

협의로 예산이 확보될 수 있도록 최선의 노력을 기하겠음

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(하수도담당)
추진진도(%)	40%

61

오전지구 공공하수처리시설 설치사업

농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정 처리하여 지역사회의 건전한 발전과 공중위생 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보전하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면 오전리 일원

❍ 사 업 비 : 7,464백만원(국비70%, 기금18%, 도비6%, 군비6%)

❍ 사 업 량 : 하수처리장130㎥/일, 하수관로L=12.0km, 배수설비 312가구

❍ 사업기간 : 2016. 7. 13 ~ 2018. 7. 12

□ 추진사항

❍‘15. 12.  : 실시설계용역 완료

❍‘16.  6.  : 설치인가 및 재원협의, 계약심사 완료

❍‘16.  7. : 1차분 착공

❍‘17.  3. : 2차분 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍‘17.  9. : 1차공사 준공

❍‘18.  7. : 2차공사 준공

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(상수도담당)
추진진도(%)	38%

62

생비량지구 지방상수도 인입공사

생비량면의 수질악화 및 원수부족 등의 근본적인 문제를 해결하기 위해 지방상수도를 인입하여 지역주민들에게 안정적인 지방상수도 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사업기간 : 2015. 12. ~ 2019.  2.

❍ 사 업 비 : 13,951백만원(국비 9,766, 군비 4,185)

❍ 사 업 량 : 배수지 300톤, 관로 77.1km, 가압장 4개소, 전기,제어 등

❍ 시공업체 : 영일개발㈜

❍ 감리업체 : ㈜선진엔지니어링 / (주)우진

□ 추진사항

❍‘15. 12 ∼‘16. 12: 본공사 1차분 ~ 2차분 준공

❍‘16.  3 ∼‘16. 12 : 폐기물처리용역 1차분 ~ 2차분 준공

❍‘16.  8 ∼‘17.  3 : 건설사업관리용역 1차분 준공 및 2차분 착공

❍‘17.  1 ∼  현   재  : 공사 3차분 및 폐기물처리용역 3차분 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 국도20호선 신안교 관매달기 협의중(진주국토관리사무소)

❍ 중촌배수지(200톤, 280톤) 2지 연동 또는 증설 대책 검토 중

□ 향후 추진계획

❍‘17. 12. : 본공사 3차분 준공 및 폐기물처리용역 3차분 준공예정

구 분	시책사업
담당부서	상하수도사업소(상수도담당)
추진진도(%)	5%

63

단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

산청군 수도정비기본계획(변경)에 의거 지방상수도가 공급되지 않은 마을에 지방상수도를 공급하고 단성정수장 증설사업을 병행 추진하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면, 신안면, 신등면 일원

❍ 사업기간 : 2017.  1. ~ 2020. 12.

❍ 사 업 비 : 19,360백만원(국비 13,552, 군비 5,808)

❍ 사 업 량 : 정수장 증설 Q=1,600톤/일(4,100톤/일→5,700톤/일)

관로매설 L=42km, 가압장 1식 등

□ 추진사항

❍‘17.  5. : 실시설계용역 착공(산청급수구역과 통합 시행)

․ 용역비 : 871백만원(산청 240백만원, 단성 631백만원)

- 1차분 : 556백만원

- 용역기간 : 2017. 5. 29 ~2018. 5. 28(1차분:17. 5. 29 ~18. 1. 23)

- 도급업체 : ㈜한국종합기술/(주)신우엔지니어링/(주)동명기술공단

❍‘17.  6. : 조사측량용역 착공(산청급수구역과 통합 시행)

․ 용역비 : 320백만원

- 용역기간 : 2017. 6. 29~2018. 6. 28

- 도급업체 : ㈜천진엔지니어링

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍‘17. 12. : 조사측량 및 실시설계용역 준공

❍‘18.  3. ~ 5. : 관련법에 따른 인허가 협의

❍‘18.  6. : 사업발주 및 착공

구 분	시책사업
담당부서	상하수도사업소(상수도담당)
추진진도(%)	10%

64

노후 상수관망 정비사업

노후상수관망 정비로 녹물 발생․이물질 유입 예방 등 안전한 수돗물을 공급하고 누수 저감을 통한 유수율제고 향상 및 상수도 운영․관리의 선순환 구조를 구축하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원(지방상수도 급수구역)

❍ 사업기간 : 2017.  1. ~ 2021. 12.

❍ 사 업 비 : 21,147백만원(국비 10,573 군비 10,574)

❍ 사 업 량 : 관망정비 L=32.2km, 누수탐사․정비 L=168km

블록시스템 및 유지관리시스템 구축 등

❍ 위탁기관 : 한국환경공단

□ 추진사항

❍‘16.  4. : 노후관망 정비사업 계획서 제출(환경부)

❍‘16.  8. : 지방상수도 현대화 선도사업 선정(환경부)

❍‘16. 10. : 한국환경공단 위․수탁 협약 체결

❍‘16. 12. : 기본계획 추진방식 등 협의

❍‘17.  3. : 기본계획(기본설계포함) 추진중

❍‘17.  6. : 기본계획 경제성검토 수행중

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ ‘17.  7. : 기본계획(기본설계) 자문 및 용역 준공

❍ ‘17.  9. : 실시설계 및 누수탐사 용역 발주 및 계약

❍ ‘17. 10. : 긴급 누수복구공사 시행

구 분	시책사업
담당부서	상하수도사업소(상수도담당)
추진진도(%)	5%

65

삼장지구 지방상수도 인입공사

삼장면 일원은 소규모 수도시설에 의존하고 있으나 수질 불량 및 원수 부족 등의 문제로 어려움이 있어 지방 상수도를 인입하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 일원

❍ 사업기간 : 2016년 01월 ~ 2019년 12월

❍ 사 업 비 : 1,164백만원(국비 814, 군비 350)

❍ 사 업 량 : 배수지 400톤, 가압장 1개소, 관로매설 29.7km 등

□ 추진사항

❍‘16. 12 : 실시설계용역 완료

❍‘17.  5 : 총사업비 변경 협의 등

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ ‘17.  6월 : 사업착공(공사비 974백만원)

․ 사업착공 후 삼장면 전구간 총사업비 협의 등 추진 예정