2017년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(문화관광과)

□ 총    평

❍ 지역축제의 성공적 개최를 위해 대내외 관광객을 위한 차별있고 특색있는       음악회 개최 및 다양한 문화예술 행사를 제공하였고, 각종 동호회 및 단체에       문화예술 활동 지원과 문화 취약계층을 위한 찾아가는 예술 활동 추진으로       예술로 소통하는 문화행정을 추진하였음

❍ 각종대회 개최 및 전지훈련 팀 유치를 통해 산청군 브랜드 가치향상과       지역경제 활성화에 기여하고 신규 체육인프라 구축으로 지역민 건강증진 및

삶의 질 향상에 이바지하였음

❍ 웰니스 관광 등 산청만의 차별화된 관광콘텐츠 개발과 관광트렌드에 맞는

전략적 홍보 마케팅을 통해 국내외 관광객 유치 및 관광산청 이미지 제고

❍ 자연과 함께 여가를 즐기고 몸과 마음을 치유하기 위해 방문한 탐방객에게

‘머무를 수 있는 공간’ 과 ‘수려한 자연경관 및 볼거리’를 제공하기 위해 자양보        유원지 관광명소화사업, 대원사계곡 관광자원 생태탐방로 조성사업 등 힐링 공간

조성사업 추진에 만전을 기하였음

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	13	7	6
군수공약사업	8	6	2
주요시책사업	5	1	4

□ 주요성과

❍ 품격 있는 문화향유 기회 확대 및 군민화합도모 (문화예술담당)

ㆍ 문화예술 시설물 운영 활성화 추진

- 산청문화원 신축 준공(8월) : 970.27㎡(지상 3층), 19억원

- 작은영화관 실시설계 용역 추진(12월) : 700㎡(지상 2층), 14억원

- 한국선비문화연구원 교육환경 개선 : 145회, 13,989명(공무원, 학생, 일반인 등)

ㆍ 동의보감촌 상설 마당극 공연장 운영(7~10월) : 20회, 6,200여명

ㆍ 2017 산청 경호강 물 페스티벌 개최(7.21~22) : 3,000여명

- 축하공연, 농악경연대회, 래프팅체험(대회), 낚시축제

ㆍ 지역특화 문화예술행사 개최 : 4회

- 제11회 기산국악제전(9.16),  제9회 불교문화제전(9.17),

제44회 지리산평화제(10.11), 제41회 남명선비문화축제(10.20~21)

ㆍ 군민 참여형 문화예술행사 개최 : 4회

- 한여름밤의 힐링음악회, 산청문화원 문화학교 발표회, 성탄트리 점등 및 음악회,

산청매구보존회 창단 21주년 정기공연,

ㆍ 중앙 및 도 지원 등 다양한 문화예술 공연 개최 : 20회

- 문예회관연합회 방방곡곡사업(2), 도민예술단(1), 우수예술단체 찾아가는 공연(4),

찾아가는 영화상영회(4), 무료영화상영(6), 기타 지원 공연(3)

ㆍ 산청군민 무(舞) 보급화 연중 추진 : 읍ㆍ면 체육대회, 축제 등

ㆍ 산청선비대학 운영 : 주1회 70여명(연 33주)

ㆍ 어린이 선비문화 체험교실 운영 : 10회(학생 및 학부모 600여명)

❍ 체계적인 전통문화유산 계승과 문화재 보존 (문화재담당)

- 단속사지 발굴조사 사업(공정율 60%)

· 총사업비 : 2,132백만원

· 보상실적 : 1,259백만원(토지28필지, 주택 7동 보상완료)

- 국가지정문화재 보수사업 : 산청 내원사 삼층석탑 석축정비사업 외 5개 사업(345백만원)

- 도지정문화재 보수사업 : 산청 우계당 보수공사 외 9개 사업(730백만원)

- 전통사찰 방재시스템 구축사업 : 심적정사 외 1개소(344백만원)

- 전통문화 보존 및 전승사업 : 5개 사업(59백만원)

❍ 엘리트 및 생활체육 활성화를 통한 군민의 건강한 삶 유지와 활력 있는       지역분위기 조성 (체육담당)

- 호암지구 게이트볼장 건립 추진(공정율 100%)

: 총사업비 420백만원, 공사준공

- 서부지구 친환경 캠핑장 조성 추진(공정율 95%)

: 총사업비 2,270백만원, 공사준공

: 군관리계획(재정비) 경상남도 심의 승인에 따른 공원조성계획 용역 중

- 생활체육시설 확충(수영장) 추진(공정율 30%)

: 총사업비 5,200백만원

- 그라운드골프장 관리실 신축 추진(공정율 100%)

: 총사업비 300백만원, 공사준공

❍ 전략적 마케팅 전개로 관광 경쟁력 강화 및 관광객 유치 도모 (관광진흥담당)

- 2017 관광 홍보 슬로건 설정 및 관광트렌드 변화에 맞춘 스마트 여행 정보 제공         : ‘물․공기․토양 좋아요 산청’, 축제(경호강물페스티벌, 산청한방약초축제) 등 온․오프라인 집중 홍보

-「전통문화 체험관광 프로그램」선정 및 추진(문체부 공모사업) : 국비 50백만원 지원

- 해외 관광객 유치 마케팅 강화  : 동남아 3개국 관광홍보설명회 참가, 해외 여행업

관계자 등 팸투어 추진(10회/일본, 우즈베키스탄, 베트남, 태국, 인도네시아 등)

- 대도시 산청관광 이미지 홍보 : 다중이용시설 13개소, 버스 52대 등

- 관광박람회 참가 : 2회(부산국제관광전, 대한민국 국제관광박람회)

- 다양한 관광홍보물 제작 : 관광안내지도 개편(국, 중) 및 관광홍보(산청9경) 웹툰

- 관광안내표지판 및 관광홍보물 정비 : 12개소(종합안내표지판, 산청9경안내판 등)

- 방송 프로그램 활용 홍보 : 일본「라라TV」,「생방송 아침이 좋다」,「뉴스인사이드」 등

❍ 관광기반시설 조성사업 추진 (관광개발담당)

- 황매산 미리내파크 조성사업(황매산 항노화 힐링캠핑장 조성)(공정율 10%)

: 총사업비 2,500백만원, 실시설계 용역

- 자양보유원지 관광명소화사업(공정율 20%) : 총사업비 1,800백만원, 착공

- 대원사계곡 관광자원 생태탐방로 조성사업(공정율 15%) : 총사업비 5,000백만원

- 경호강변 관광활성화 연구 용역(공정율 100%)

: 총사업비 50백만원, 기본계획 및 타당성 연구 용역

□ 반    성

❍ 단속사지 발굴사업 보상책정가에 대한 불만 및 이주단지 조성 요구로 보상 협의 지연

❍ 서부지구 친환경캠핑장 조성을 위한 군관리계획(재정비) 결정 후 공원 조성       계획 수립 용역기간(1년간) 소요로 캠핑장 등록 어려움과 야영장 운영 지연됨.

❍ 생활체육시설 확충(수영장)사업 추진 중 민원사항 협의지연으로 사업추진에       어려움이 있었으나 현재 민원사항 해소로 관련사업의 원활 추진

□ 향후 추진계획

❍ (단속사지)조속한 이주단지 조성으로 보상협의 완료 및 발굴조사 시행

❍ ‘18.02 : 공원조성계획 및 실시계획인가 용역 완료

❍ ‘18.05 : 생활체육시설 확충(수영장) 실시설계 용역 완료

❍ ‘18.02 : 자양보유원지 관광명소화사업 준공

❍ ‘18.06 : 대원사계곡 관광자원 생태탐방로 조성사업 준공

❍ ‘18.01~05 : 황매산 미리내파크 조성사업 실시설계용역 시행

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	95%

20

서부지구 친환경 캠핑장 조성

자연경관이 우수한 창촌리 일원의 폐천부지 활용을 친환경 캠핑장으로 조성하여 생태적,경관적 잠재성을 도출하여 지역주민소득창출 및 관광객의 여가선용 기회 제공

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 산청따라하동길 조성사업

❍ 위    치 : 단성면 창촌리 834-25번지 일원

❍ 사 업 비 : 2,270백만원 (국 1,917, 군 299)

❍ 사 업 량 : 다목적 캠핑장 조성 A=70,000㎡

❍ 사업기간 : 2013. 4 ~ 2016. 12

□ 세부추진계획

❍ 2014. 6월 : 1구역 부지기반조성 및 경관조성사업 완료

❍ 2014. 12월 : 2구역 캠핑장부 시설공사 착수

❍ 2015. 11월 : 캠핑장부 기반시설 완료

❍ 2016. 10월 : 군관리계획(재정비) 결정(변경) 경남도 심의 승인

❍ 2017. 3월 : 용역 발주(공원 조성계획 수립, 실시계획 인가, 환경평가 등)

❍ 2018. 2월 : 용역완료, 시설공사(공원 내 추가시설) 시행

□ 문제점 및 대책

❍ 농업진흥지역 해제를 위한 사전절차인 공원조성계획 용역 진행 중으로

2017년 용역 완료 후 야영장 운영 가능

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 3월~6월 : 샤워실, 화장실 증설

❍ 2018. 6월 ~ : 우리군 전국단위 축제와 연계 프로그램 개발

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	30%

21

생활체육시설 확충(수영장)

다양한 생활체육시설 확충으로 군민의 건전한 여과생활과 건강증진을 도모하고 지역한 균형적인 체육인프라 구축에 기여

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 신안소재지권 수영장 확충

❍ 사 업 비 : 52억원정도

❍ 사업내역 : 시설 건립 1식(25m, 4레인)

❍ 사업기간 : 착수일로부터 2년간

□ 추진사항

❍ 2014. 11월 : 국비 사업 건의 방문

❍ 2016. 3월 : 지방재정(2차) 투자심사 신청(경상남도)

❍ 2016. 5월 : 투자심사 조건부 승인(경상남도)

❍ 2017. 3월 : 국도비 확보

❍ 2017. 5월 : 조달청 설계공모

❍ 2017. 9월 : 실시설계 용역 시행

❍ 2017. 5월~10월 : 주민 간담회 실시(3회)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 5월 : 설계 완료

❍ 2018. 6월 : 공사 착공

❍ 2019. 12월 : 공사 준공

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	10%

24

황매산 미리내파크 조성

(황매산 항노화 힐링캠핑장 조성사업)

자연속에서 여가를 즐기고 싶어하는 현대인의 욕구를 반영하여 황매산 자락에 자연과 함께 힐링을 할 수 있는 미리내파크(힐링캠핑장)를 조성하여 관광객의 발길을 끄는 관광명소로 발돋움하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 법평리 1-10번지 일원

❍ 사 업 비 : 2,500백만원(국비 50%, 지방비 50%)

❍ 사 업 량 : 미리내파크(힐링캠핑장)조성 1식

❍ 사업내용 : 미리내파크(힐링캠핑장), 구름다리, 다목적힐링장 등

□ 추진사항

❍ 2016.  1월 : 기본계획 및 타당성 연구용역 시행

❍ 2016.  2월 : 지방재정 투자심사 의뢰 및 승인

❍ 2016. 12월 : 기본계획 및 타당성연구 용역 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 산청 황매산 철쭉제와 기 완료된 황매산 개발사업(천년사랑 테마형 관광기반

조성사업 등)과 연계한 힐링공간의 절대부족

- 황매산 미리내파크 조성으로 자연속에서 여가를 즐기고 싶어하는 현대인의

욕구를 충족시키는 관광명소로 조성

❍ 보조금(국.도비)의 미확보로 사업추진에 애로

- 관련부서와 지속적인 협의로 보조금 확보 후 조속 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 1월 ~ 5월 : 실시설계 용역 착수 및 사업 착공

❍ 2019. 12월 : 사업준공

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	20%

25

자양보유원지 관광명소화 사업

자양보유원지는 해마다 많은 관광객이 찾아오고 있는 지역으로 강변유원지의 자연과 조화로운 공간을 조성하여 보다 더 많은 관광객이 유입될 수 있는 ‘머무르는 공간’ 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 경남 산청군 시천면 사리 일원

❍ 사 업 비 : 1,800백만원(국비 50%, 지방비 50%)

❍ 사 업 량 :  캠핑장 및 녹지공간 조성

❍ 사업내용 : 캠핑장, 진출입도로, 녹지공간 등

□ 추진사항

❍ 2015. 8월 : 기본계획 및 타당성조사 용역 완료

❍ 2017. 6월 : 실시설계용역 준공

❍ 2017. 12월 : 1차분 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2018.  1월 : 2차분 착공

❍ 2018. 12월 : 사업 준공

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	15%

26

대원사계곡 관광자원 생태탐방로 조성

「남한 제일의 탁족처(濯足處)」라 불리는 대원사 계곡을 따라 걷는     명품길을 조성하여 대원사 계곡을 찾는 탐방객에게 수려한 자연경관과   볼거리를 제공하고 국내 최고의 생태체험 및 힐링 공간으로 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 경남 산청군 삼장면 평촌리~유평리 일원

❍ 사 업 비 : 5,000백만원(국비 50%, 지방비 50%)

❍ 사 업 량 : 생태탐방로 조성

❍ 사업내용 : 생태탐방로 조성 L=3.3km

□ 추진사항

❍ 2015. 2월 : 기본계획 및 타당성 연구용역 시행

❍ 2015. 5월 : 지방재정 투자심사 승인(경남도)

❍ 2016. 8월(환경부고시제2016-170호) : 지리산국립공원계획 변경 결정 고시(환경부)

❍ 2016. 11월 : 공원사업 위탁시행 관련 업무협약 체결

❍ 2016. 12월 : 실시설계 용역 착수

❍ 2017. 8월 : 국가지정문화재(대원사 다층석탑)현상변경 조건부허가(문화재청)

❍ 2017. 9월 : 실시설계용역(지리산국립공원사무소) 준공

❍ 2017. 10월 : 공사 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 6월 : 사업 준공

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(문화재담당)
추진진도(%)	60%

28

단속사지 발굴조사

통일신라시대에 창건, 동·서 석탑(보물 제72,73호)만 현존하고 있는 폐사지인 단속사지를 발굴조사하여 사적지로 지정하고, 유적 주변 환경을 개선하여 문화관광자원을 개발·활용하기 위함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 단성면 운리 302번지 일원

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

❍ 사업규모 : 42필지 16,845㎡(군 소유:6필지 2,480㎡, 사유지:36필지 14,365㎡)

❍ 사 업 비 : 2,132백만원(국비 70%, 도비 10.5%, 군비 19.5%)

- 토지 및 지장물 보상비 등 : 1,801백만원

- 발굴조사비 및 정당매각·비석이전 설치비 : 331백만원

❍ 사업내용 : 단속사지 발굴조사 구역 내 사유토지 및 지장물 매입, 발굴조사 등

□ 추진사항

❍ 2014. 12. 12. 단속사지 종합정비를 위한 기본계획 용역 완료

❍ 2014. 12. 26. 단속사지 동·서 삼층석탑 문화재보호구역 조정

❍ 2015. 6. 22. 주민설명회 개최

❍ 2015. 8. 7. 보상계획 공고

❍ 2016. 8. 17. 이주단지 조성 검토 타당성 용역 시행

❍ 2017. 5. 31. 이주단지 조성 부지 매입

❍ 2017. 6. 4. 보상편입 물건 보상금 재산정 통보

❍ 2017. 12. 4. 단속사지 이주단지 조성사업 실시설계 용역 등 발주

❍ 2017. 12. 31. 현재 토지 28필지, 주택 7동 보상완료

□ 문제점 및 대책

❍ 보상책정가에 대한 불만 및 이주단지 조성 요구로 보상협의가 지연되었으나, 보상금 재산정 및 이주단지 조성으로 보상 재협의

□ 향후 추진계획

❍ 조속한 이주단지 조성으로 보상협의 완료 및 발굴조사 시행