2017년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(안전건설과)

□ 총    평

❍ 대상사업 총 32개 사업 중 공약 27건, 시책 5건 중 17개 사업에

대해 조기완료 추진하여, 안전하고 쾌적한 건설기반시설 확충으로

군민생활 불편 해소는 물론 영농환경 개선에 기여함

❍ 정상추진 12개 사업에 대해서는 2018년 상반기 내  완료할 계획이며

부진 등 4개 사업에 대해서는 지속적인 예산확보 등 다각적인 노력을

기울여 군민생활 불편을 해소할 수 있도록 노력하고 있음

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	32	17	12	1	2
군 수 공 약 사 업	27	17	8	1	1
주요시책사업	5		4		1

□ 주요 성과

❍ 물산,수청마을 주리불골세천정비 및 점남마을다목적광장조성사업 완료추진         으로 농촌주거환경개선 및 주민편익 불편시설 해소

❍ 명상교 재가설공사, 주상~자혜간 도로 숭상 및 확포장공사,        내수~매곡간 도로 확포장공사를 완료함으로서 기반시설 확충으로        살기 좋은 정주여건 조성

❍ 덕천강 고향의강 조성사업의 원활한 추진 및 남강변 하천 뚝방길        조성, 소하천 정비사업으로 하천을 자연친화적으로 정비 보전하여       유수로 인한 피해 예방에 기여

❍ 다양한 재해위험에 대비한 각종 재해위험사업 실시와 정비로 재해로

부터 군민의 생명과 재산권 보호에 노력

□ 반    성

❍ 국도20호 확·포장사업 중 신안 ~ 생비량 구간은 경제성 부족으로 조기 사업         추진이 불가하므로 제5차 국도건설 5개년 계획(2020~2025)에 반영하여       시행될 수 있도록 노력이 필요함.

❍ 국도3호선(골프장옆)램프박스 확장사업은 국토교통부 국도 병목지점

개량 5개년(2018~2022) 계획에 반영이 확정되었으나, 조기 시행 될 수       있도록 노력이 필요함.

□ 향후 추진계획

❍ 정상 추진 11개 사업은 사업별 추진 일정에 차질 없도록  적극적인 노력

❍ 장기추진 및 부진한 4개 사업에 대하여 원활한 사업추진을 위해        관련 부처 등을  방문하여 사업의 타당성 등 예산확보 노력 추진

구 분	공약사업
담당부서	안전건설과(건설행정담당)
추진진도(%)	40%

40

내리 마당재 진입로 확포장공사

귀농 인구의 증가로 새롭게 조성되고 있는 마을들이 늘고 있지만 진입도로 등이 협소하여 통행에 불편을 초래하고 있어 귀농인들의 편의를 도모하고 마을환경을 개선코자 함

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015 ~ 2018

❍ 사업내용 :기존 폭 5m 도로로 인하여 차량 교행이 어려운 부분을

도로폭확장을 통해 차량이 자유롭게 교행할 수 있도록 사업추진

❍ 사업비 : 500백만원(2015년:200, 2018년:300)

□ 추진사항

❍ 2015년 01월 ~ 02월 : 고속도로 육교 가각부 실시설계용역

❍ 2015년 02월 ~ 11월 : 고속도로 육교 가각부 사업착공 및 완공

❍ 2016년  ~   2017년 : 도로 안전시설물설치 및 편입부지 협의 추진

□ 문제점 및 대책

❍ 도로폭 협소로 버스진출입 및 차량교행이 어려워 일부구간(고속도로

교각부)에 대한 도로 확포장으로 차량 통행난을 일부해소 하였으며,

❍ 진입도로확장은 기존 주택으로 인해 하천측으로 확장이 불가피함에

따라 하천 통수단면을 확보하면서 도로를 확장해야 하는 어려움이

있으며 사업비가 과다하게 소요될 수 있음으로 최적으로 방안을 강구

토록 하겠음

❍ 기존 도로 및 하천확장구간 대부분이 사유지이며 해당 토지 소유자와

편입부지 협의가 지연되고 있음에 따라 지속적 협의가 필요함

□ 향후 추진계획

❍ 2017년 ~ 2018년 : ‘18년 본예산(3억원)확보 및 편입부지 협의 추진

구 분	공약사업
담당부서	안전건설과(하천담당)
추진진도(%)	55%

42

덕천강 고향의 강 조성사업

우리군 대표 하천인 덕천강을 대상으로 지역의 역사와 문화, 생태기능을 연계하여 어릴적 고향의 정취를 만끽할 수 있는 정감어린 다기능 복합 친수공간으로 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 ~ 삼장면 대포리 일원

❍ 사 업 비 : 275억원(국비 60%, 도비 12%, 군비 28%)

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=5.1km

□ 추진사항

❍ 2011. 11월 : 실시설계 용역 착수(동부엔지니어링, 케이에스엠기술)

❍ 2013. 08월 : 총사업비 조정 협의(1차)

❍ 2013. 10월 : 건설기술심의(경상남도)

❍ 2013. 12월 : 보상금 지급 통보 및 공고

❍ 2015. 12월 : 공사 착공(토지종합건설,영무건영)

❍ 2017. 06월 : 총사업비 2차 조정(270억원→275억원)

❍ 2017. 12월 : 고향의강 조성사업 3차분 준공(집행액 181억원)

❍ 2018. 01월 : 고향의강 조성사업 4차분 시행

□ 문제점 및 대책

❍ 31필지 690백만원 보상 미협의, 18년 3월 토지수용 재결신청 예정

❍ 계속사업으로 차기년도 사업비 확보 대책 강구

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 12월 준공계획

구 분	공약사업
담당부서	안전건설과(도로담당)
추진진도(%)	10%

48

국도20호 확․포장사업 조기 완성

국도20호선 『단성~시천간』,『신안~생비량간』의 급격한 커브와 굴곡심화로 교통사고 위험이 많으며, 특히 단성 호국원 개원에 따른 교통량 증가로 잦은 차량 정체가 예상되므로 조기 도로 확·포장이 필요함.

□ 사업개요

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비(억원)	비 고
단성~시천간	단성면 사월리~ 단성면 길리	L=2.8km B=19.5m	385	국비
신안~생비량간	단성면 강누리~ 생비량면 도리	L=9.15km B=19.5m	1,513	국비

□ 추진사항

❍ 「단성~시천간」

- 2016. 07월 : 제4차 국도건설 5개년계획 반영

- 2016. 12월 ~ 2018. 05월 : 실시설계용역 시행

❍ 「신안~생비량간」

- 2014. 07월 : 실시설계용역 완료

- 2016. 03월 ~ 17. 04월 : 타당성 재조사 시행(기재부,KDI)

- 2017. 12월 : 제5차 국도,국지도건설 5개년계획 대상지 제출

□ 문제점 및 대책

❍ 신안~생비량간은 KDI 타당성 재조사 결과 타당성 부족으로 시행곤란

⇒ 제5차 국도건설 5개년 계획 수립 대상지 반영 요구

□ 향후 추진계획

❍ 「단성~시천간」: 2018. 5월 실시설계 완료예정

❍ 「신안~생비량간」: 제5차 국도건설 5개년 계획 반영 노력 및

원지소재지 통과구간 L=3.0km 우선 시행토록 지속 건의 계획임

구 분	공약사업
담당부서	안전건설과(도로담당)
추진진도(%)	0%

49

국도3호선(골프장옆) 램프박스 확장

지리산 관문인 국도3호선(진주→원지)통로암거(4.5×4.5)로서 램프 구간

굴곡이 심하고 곡선 종점부에 통로암거가 위치하여 대형차량  진입시 통로암거와 잦은 충돌이 발생하고 있으며, 또한 보행자의 안전사고 위험이

상존하고 있어 통로암거 확장이 필요함

□ 사업개요

❍ 위  치 : 산청군 신안면 하정리 하정램프(국도3호선~원지)

❍ 사업량 : 통로암거: 8.0×4.5, 가도개설 : L=300m,B=9.5m

❍ 사업비 : 50억원(전액 국비)

□ 추진사항

❍ 진주국토관리사무소에 국도병목지점 개량사업 기본계획 반영 건의

❍ 2015. 4월 국무총리 산청호국원 준공식 참여시에 사업건의

❍ 2016. 7월 국도병목지점 개량사업 5개년(18~22)계획 건의

❍ 2016. 9월 국도병목지점 개량사업 5개년(18~22)계획 용역 발주

❍ 2018. 1월 : 국도병목지점 개량 5개년 계획에 반영(11억)

□ 문제점 및 대책

❍ 없음

□ 향후 추진계획

❍ 국토교통부 국도병목지점 개량사업 5개년계획에 반영된 원지교차로

개선사업 조속 추진 건의

구 분	공약사업
담당부서	안전건설과(도로담당)
추진진도(%)	10%

53

국지도60호(화계~동의보감촌) 선형개량공사

국지도60호선 산청~함양 구간중 도로가 굴곡이 심하고 급경사로 위험구간이 많아 교통사고 위험이 상존하고 있으며, 겨울철 상습결빙으로 통행에 불편을 느끼고 있어 선형개량이 시급한 실정임

□ 사업개요

❍ 공사명 : 국가지원지방도60호선 굴곡도로 선형개량사업

❍ 위  치 : 산청군 금서면 신아리~화계리

❍ 사업량 : 도로선형개량 L=3.2km, B=9.0m

❍ 사업비 : 183억원(전액국비)

□ 추진사항

❍ 경상남도에 중장기적으로 제4차 국지도5개년(‘16~’20) 사업 반영 건의

❍ 2015. 01월 도지사 우리군 방문 시 사업건의

❍ 2016. 09월 제4차 국지도 5개년계획 반영

❍ 2017. 05월 기본 및 실시설계용역 착수(용역비 945백만원)

□ 문제점 및 대책

❍ 정상추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 5월 : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2020. : 공사 착수

구 분	공약사업
담당부서	안전건설과(도로담당)
추진진도(%)	40%

58

제보지구 도로 확포장사업 조기 완공

생비량면 제보리 관동마을 진입도로로서 지방하천 제보천의 제방 겸용 도로이며, 집중호우 시 잦은 도로 유실이 발생하고 있으며 도로  폭이 협소하고 지반 침하로 차량통행 불편과 교행에 어려움이 많아 도로 확,포장이 필요함

□ 사업개요

❍ 공사명 : 제보지구 도로확포장사업

❍ 도로명 : 군도28호(화현~간공선)

❍ 위  치 : 산청군 생비량면 제보리~관동마을

❍ 사업량 : 도로 L=3.61km, B=8.0m. 교량 2개소(기완료 1.81km)

❍ 사업비 : 50.5억원 추정(군비)

- 17년까지 : 1,600백만원, 18년이후 : 3,400백만원

□ 추진사항

❍ 전체 3.61km중 1.81km 사업 완료

❍ 잔여구간(1.8km)은 군도 건설관리계획 재 수립 시 반영하여

중장기적으로 추진

❍ 2017. 12월 : 제보~관동간 차량대피소 설치 5개소 시행

□ 문제점 및 대책

❍ 기존도로 1.8Km 구간이 하천정비 기본계획상 하천구역내로서 도로

개설시 하천공사와 병행하여 시행되어야 함.

→ 우선 차량 교행 대피소 설치로 통행 불편 해소

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 04월 : 차량대피소 설치(5개소) 사업완료

❍ 잔여구간(L=1.8km)은 향후 하천공사와 병행 시행

구 분	공약사업
담당부서	안전건설과(농업기반담당)
추진진도(%)	40%

61

방곡지구 저수지 용수개발사업

하천용수를 이용하고 있는 산청군 북부권역 농촌용수 공급에 애로가 있어 소규모 하천으로 용수원이 부족하여 매년 한발을 겪는 한해 상습지역임

□ 사업개요

❍ 위   . 치 : 산청군 금서면 방곡리 일원

❍ 수혜면적 : 350ha(신규 : 124ha, 보강 : 226ha)

❍ 사 업 량

- 저수지 1개소(총저수량 158.5만㎥, 유효저수량 149.4만㎥, 만수면적 14.8ha)

- 용수로 5조(L=9.82km(⌀250~1000mm)

❍ 사 업 비 : 435.1억원(‘17년 51억원, 국비 100%)

❍ 사업기간 : 2014. 01 ~ 2020. 12(7년간)

❍ 시행구분 : 한국농어촌공사

□ 추진사항

❍ 1998. 09. 23(개발51322-487호) : 기본계획 수립

❍ 2013. 08 : 세부설계 착수

❍ 2014. 04 : 설계VA 및 문화재지표조사 완료

❍ 2014. 07 : 사전재해영향성검토 협의 완료

❍ 2014. 10 : 총사업비 심의위원회 협의 완료(농식품부 제3회 현장심의)

❍ 2014. 12 : 소규모환경영향평가 협의 완료(낙동강 유역환경청 환경펑가과-6650)

❍ 2015. 06 : 사업 시행계획 승인 완료(경상남도)

❍ 2015. 09 : 보상계획 공고 및 통지

❍ 2015. 08 : 공사 계약체결(진지건설(주)외 2개사)

❍ 2015. 09 : 공사 착공(17년 여방수로 L=109.5m, 용수간선 L=1,146m)

❍ 2015. 09 ~ 2017. 12 : 복통 L=144m, 이설도로 L=820m, 임시펌프장 1식,                           용수간선 L=1,146m, 여방수로(토공) L=109.5m

□ 문제점 및 대책

❍ 사업 정상 추진중이며, 사업 조기 완공을 위해 농림축산식품부에 사업비

지속 지원건의

□ 향후 추진계획

❍ 2015. 09 ~ ‘20. 12 : 공사 계속 추진

구 분	공약사업
담당부서	안전건설과(자연재난담당)
추진진도(%)	90%

63

지리자연재해 위험개선지구 정비사업

상습침수 위험지를 고지배수로, 하천제방, 배수펌프장 설치로

재해로부터 지역주민의 생명과 재산을 보호

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 지리 일원

❍ 사 업 비 : 145.6억원

❍ 사 업 량 : 배수펌프장(180㎥/min), 하천정비(L=240m),

교량신설(L=36m, B=11m), 고지 배수로(L=363m)

□ 추진사항

❍ 2014. 04. 02 : 실시설계 용역 착수

❍ 2014. 05. 29 : 시설물 공법심의 개최

❍ 2014. 08. 12 : 부산지방국토관리청협의(남강,국도)

❍ 2014. 08. 22 : 주민설명회 개최(읍사무소)

❍ 2014. 10. 17 : 사전설계 검토(소방방재청)

❍ 2014. 12. 05 : 사전설계 재검토 요청(국민안전처)

❍ 2015. 01. 09 : 사전설계 검토 승인(조건부)

❍ 2015. 05. 26 : 실시설계 용역 준공

❍ 2015. 06. 29 : 공사착수(1차분) (준공 :‘16.07.11)

❍ 2015. 11. 11 : 건설사업관리용역 착수

❍ 2016. 01. 26 : 공사착수(2차분) (준공 : ‘16.09.21)

❍ 2017. 03. 17 : 공사착수(3차분) (준공 : ‘17.12.29)

❍ 2017. 10. 30 : 공사착수(4차분)

□ 문제점 및 대책

❍ 정상추진중

□ 향후 추진계획

❍  2018. 05. : 전체분 준공

구 분	공약사업
담당부서	안전건설과(하천담당)
추진진도(%)	0%

64

양천·봉두지구 재해위험 하천 확장사업

양천의 미정비 구간인 봉두마을 인근 하천의 하천폭 협소로 인한 병목현상으로 수위가 상승하여 주택 침수와 농경지 피해가 상습적으로 발생하고 있어 하천확장을 통하여 재해예방에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

❍ 공사명 : 양천봉두지구재해위험하천확장사업

❍ 위  치 : 산청군 생비량면 도리 봉두마을

❍ 사업량 : 하천정비 L=1.0km

❍ 사업비 : 47억원(국비 50%, 도비 15%, 군비35%)

□ 추진사항

❍ 2017. 05월 : 자연재해위험개선지구지정에 따른 타당성조사용역 시행    ❍ 2017. 12월 : 재해위험지역 신규지정 중앙전문가 합동조사

□ 문제점 및 대책

❍ 지방하천 종합정비계획(MP) 미반영으로 지방하천정비사업비 확보애로

❍ 자연재해위험개선지구 지정 재해위험지구 정비사업비로 시행

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 01월 : 자연재해위험개선지구 지정 및 중기계획 반영

❍ 2019. 01월 : 실시설계 용역 시행 및 주민설명회 실시

❍ 2020. 01 ~ 2021. 12월 : 사업착공 및 준공

구 분	공약사업
담당부서	안전건설과(건설행정담당)
추진진도(%)	0%

65

중산리~두류동 주차장 조성공사

중산리에서 두류동을 잇는 군도20호 도로 갓길에 지리산을 찾아 오는 탐방

차량이 도로변에 주차를 시켜 도로 혼잡으로 인한 지역 주민들의 불편과 차량 통행 불편으로 민원이 지속적으로 발생하고  있어 도로선형 개량을 통한 주차공간 확보 검토

□ 사업개요

❍ 공사명 : 중산리~두류동 주차장 조성공사

❍ 위  치 : 산청군 시천면 중산리~두류동

❍ 사업량 : 도로선형개량L=137m, B=8.0m

❍ 사업비 : 15억원 추정(도로선형 개량 사업비)

□ 문제점 및 대책

❍ 중산리에서 두류동을 잇는 군도 20호선 갓길에 지리산을 탐방하는 차량들의 주차로 인하여 도로혼잡을 유발하여 지역주민 및 차량통행에 불편을 초래하고 있는 실정임

❍ 주차난 해소를 위하여는 도로선형을 통하여 주차공간을 확보하여야하나 개량시 지름길 도로구배가 약25%(현재도로11%)로 선형 개량(군도기준 16%이내)이 불가능한 실정임

⇒ 기존 두류동 국립공원 운영 주차장과 및 중산 관광지 주차장을 이용토록 유도하고, 순두류동 마을 내 대체할 수 있는 공간이 있을 시 별도의 주차장 조성을 검토

□ 향후 추진계획

❍ 관광객이 많이 찾는 여름철 성수기 도로변 갓길 주차방지를 위한 단속 및 인근 주차장 안내 실시로 주민불편 및 관광객 불편을 해소

구 분	시책사업
담당부서	안전건설과(농업기반담당)
추진진도(%)	0%

67

산청군 수자원 확보사업

천혜의 관광자원이며 생활 및 농업 용수원으로 이용되는 경호강이 갈수기시 수원 고갈로 지역민이 어려움을 겪고 있어 수자원을 확보하여 쾌적한 수변 공간 및 관광자원을 확보하고 안정된 영농기반 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 16개소(증설 2개소, 신규 14개소), 소수력 발전시설 16개소

❍ 사 업 량 : 8,359억원 정도(국 90%, 지방비 10%)

□ 추진사항

❍ 2015. 08. : 수자원 확보 예비계획 수립

❍ 2015. 09. : 관련부처 건의 및 군의회 행정 간담회 개최

❍ 2015. 09.~ 2016. 09. : 대상지 현장조사 실시(수자원공사)

❍ 2016. 10. : 댐 희망지 신청제 시행(국토교통부)

❍ 2016. 12. : 대상지 사전 주민 의견 수렴(1차)

❍ 2017. 02. : 사업계획 수립 및 주민 설명회 실시(2차)

❍ 2017. 03. : 댐 희망지(5개소) 신청(경남도, 국토교통부)

※ 댐 희망지 : 계남댐, 압수댐, 중태댐, 운곡댐, 척지댐

❍ 2017. 04. ~ 12 : 댐 희망지 기술검토(국토교통부)

□ 문제점 및 대책

❍ 댐건설 지양의 정부 정책 변화로 우리군 댐 희망지 신청 대상지 5개소

미반영(전국 6개소, 경남 1개소(김해) 반영되어 기술검토중)

□ 향후 추진계획

❍ 댐건설 정부 정책 변화에 따라 지속 추진

구 분	시책사업
담당부서	안전건설과(농업기반담당)
추진진도(%)	35%

68

재해위험 저수지 정비사업

농업용 저수지 노후화로 붕괴사고 등 저수지 안전관리에 대한 중요성이 대두됨에 따라, 재해 발생 위험이 높은 관내 위험 저수지에 대하여 정비사업 시행으로 재해예방

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2015. 3월 ~ 2019. 12월

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 38억원

❍ 사 업 량 : 재해위험저수지 4개소 정비

(하양, 강정, 월곡, 큰골저수지)

□ 추진사항

❍ 2014. 10 : 재해위험저수지 지정(하양,강정,월곡,큰골)

❍ 2015. 05 : 국민안전처 재해위험저수지 5개년 정비계획 수립 및 반영

❍ 2015. 08 ~ 2017. 06 : 하양 재해위험저수지 정비사업 완료

❍ 2017. 01 ~ 07 : 강정, 월곡 재해위험저수지 정비사업 실시설계

❍ 2017. 08 : 강정 재해위험저수지 정비사업 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 재해예방사업으로 조기완공을 위해 행정안전부, 경남도 사업비 지속

지원 건의

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 01 ~ 2019. 12 : 강정, 월곡, 큰골 재해위험저수지 정비사업 계속

추진

구 분	시책사업
담당부서	안전건설과(자연재난담당)
추진진도(%)	60%

69

급경사지 붕괴위험지역 정비사업

급경사 붕괴위험지역으로 지정된 적벽산, 대원사, 지리2지구의 낙석 및 사면붕괴의 재해로부터 지역주민의 생명과 재산을 보호

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍, 신안면, 삼장면 일원

❍ 사 업 비 : 341억원

- 적벽산지구(292억원), 대원사지구(28억원), 지리2지구(21억원)

❍ 사 업 량 : 적벽산지구(사면정비L=900m), 대원사지구(사면정비 L=1.28km), 지리2지구(사면정비 L=90.0m)

□ 추진사항

【적벽산지구】

❍ 2010. 08. 09 : 재해위험지구 지정 “다”

❍ 2012. 03. 15 : 급경사 붕괴위험지구 지정 “E”

❍ 2013. 04. 12 : 실시설계 용역 착수

❍ 2014. 11. 19 : 사전설계검토 승인(조건부 : 피암터널)

❍ 2015. 05. 14 : 경남도 사업 재검토 요구(예산절감방안)

❍ 2017. 10. 26 : 피암터널 재추진 확정

【대원사지구】

❍ 2015. 02. 24 : 실시설계 용역 착수(준공 :‘16.03.15)

❍ 2015. 12. 29 : 사전설계검토 승인

❍ 2016. 03. 29 : 1차분 착수(준공 : ‘16.12.30)

❍ 2017. 02. 01 : 2차분 착수(준공 : ‘17.09.21)

【지리2지구】

❍ 2016. 02. 19 : 실시설계 용역 착수(준공 :‘17.01.16)

❍ 2016. 04. 05 : 주민설명회 개최(산청읍사무소)

❍ 2017. 04. 10 : 공사착수

□ 문제점 및 대책

❍ [적벽산지구] : 국민안전처 사전설계검토 승인된 피암터널 공법에 대하여 사업비 과다로 인한 타공법 검토 요구로 인해 사업 지연

→ 2017.10월 피암터널 재추진확정으로 사업추진

□ 향후 추진계획

【적벽산지구】

❍ 2018. 01. : 경상남도 건설기술심의

【지리2지구】

❍ 2018. 07. : 전체분 준공예정

구 분	시책사업
담당부서	안전건설과(자연재난담당)
추진진도(%)	90%

70

강누 우수저류시설 설치사업

지방하천 강누천 통수단면 부족 및 본류하천인 국가하천 남강수위 상승에 따른 내수배제 불량으로 우수저류시설을 설치하여 지역주민의 생명과 재산을 보호하고 안전한 주거 환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 강누리, 성내리 일원

❍ 사 업 비 : 90.2억원

❍ 사 업 량 : 우수저류지 설치 V=8,700㎥, 하천축제 L=517.0m,

합성라멘교 설치(L=20.0m, B=6.0) 1개소

□ 추진사항

❍ 2015. 03. 18 : 실시설계용역 착수

❍ 2015. 05. 11 : 주민설명회 개최

❍ 2015. 12. 15 : 사전설계검토 승인

❍ 2016. 02. 18 : 경남도 계약심사 완료

❍ 2016. 04. 01 : 1차분 착수(준공 :‘17.01.20)

❍ 2016. 12. 15 : 2차분 착수(준공 :‘17.12.20)

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비 집행잔액 활용방안 모색

→ 사업구간내 미개수 하천 개수 추진중

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 12 : 집행잔액 부분 사업 준공 예정

구 분	시책사업
담당부서	안전건설과(자연재난담당)
추진진도(%)	50%

71

내리 서민밀집위험지역 도로개설공사

재해 발생 우려가 높은 서민밀집위험지역으로 조속한 정비사업 추진으로 주민의 생명과 재산을 보호코자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 내리 일원

❍ 사 업 비 : 39억원

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=0.8km, 교량 설치 32m 1개소

□ 추진사항

❍ 2016. 05. 02 : 실시설계용역 착수(준공 06.22)

❍ 2016. 07. 22 : 경남도 계약심사 완료

❍ 2016. 08. 25 : 1차분 착수(준공‘17.12.18)

❍ 2017. 07. 26 : 2차분 착수

□ 문제점 및 대책

❍ 남강 산청지구 하천환경정비사업(내리2제) 공사 지연으로 사업지연

→ 구간 조정으로 가능지역 우선 발주

❍ 환경부 토지 보상 협의 지연 → 계속적인 협의 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 08 : 전체분 준공예정