2020년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(문화체육과)

□ 총    평

❍ 지역 특색에 맞는 문화예술행사 공연으로 지역민과 방문객에게 문화 향유 기회를 제공하고, 단체 및 개인에 문화예술 활동지원, 문화 기반 시설 확충을 통해 문화 복지 향상 및 평생 교육 증진하여 품격 높은 문화도시 형성에 이바지 함

❍ 노후되고 훼손된 문화재를 원형대로 보수하고 주변정비로 체계적인 문화재 보존 관리 및 산청 범학리 삼층석탑 복제을 통하여 산청 문화의 우수성과 예술성 홍보에 기여함

❍ 공공체육시설 확충 및 유지보수를 통해 군민에게 쾌적하고 다양한 체육시설을 제공하여 건강증진 및 삶의 질 향상에 이바지하였음.

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	8	3		3	2
군수공약사업	5	3		1	1
주요시책사업	3			2	1

□ 주요성과

❍ 지역문화 활성화를 위한 문화예술행사 추진(문화예술담당)

- 2020 상설문화관광프로그램 운영, 산청불교사암연합회 방생법회, 상주단체 공연 등

❍ 문화기반 시설 유지 보수 및 확충 사업 추진(문화예술담당)

- 한국선비문화연수원 생활관 확충 공사, 산청지리산도서관 건립 공사 등

❍ 체계적인 전통문화유산 계승 및 전승사업 추진(문화재담당)

- 산청·단성향교 제례 및 전통문화계승사업, 서원 제례 지원 등

❍ 체계적인 문화재 보수정비사업 추진(문화재담당)

- 국가지정문화재 보수사업, 도지정문화재 보수정비사업 등

❍ 산청관련 문화재 복제사업(문화재담당)

- 산청 범학리 삼층석탑 복제 및 전시

❍ 생활 체육활성화를 통한 건강 산청 이미지 제고 (체육행정담당)

❍ 전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화 도모 및 엘리트 체육 육성 지원       (체육행정담당)

❍ 체육시설 확충 및 유지관리를 통한 군민의 건강하고 활기찬 생활 원동력 조성(체육시설담당)

- 남부 문화체육센터 신축공사, 산청 공설운동장 정비사업, 산청 근린생활형 국민체육센터 건립공사, 남부 소규모 체육관 건립공사 등

□ 반    성

❍ 신명사도 실천유학 문화체험장 조성에 있어 시·군별 단위사업으로 추진       시 예산 반영의 어려움이 있으므로 연계 가능한 광역개발사업 발굴 필요

❍ 래프팅타운 내 편의시설 설치공사 사업추진에 있어 수상레저사업자 상호간의 사업내용 확정협의 지연으로 애로사항이 있으나 지속적인 협의를 통해 내용 확정 및 사업 시행 예정

□ 향후 추진계획

❍‘20. 8월 : 산청지리산도서관 준공 후 ’20.10월 개관

❍‘20. 8월 : 남부 소규모체육관 건립공사 및 산청 근린생활형 국민체육센터 건립공사, 청호정 궁도장 시설물 정비사업 준공 후 20. 09월 개장

❍‘20. 8월 : 생비량 생활체육공원(파크골프장) 조성공사 실시설계 용역 발주 20. 10.월 준공 후 공사 시행

❍‘20. 9월 : 신명사도 실천유학 문화체험장 조성 사전행정절차 진행

(지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 수립)

❍‘20. 9월 : 래프팅타운 내 편의시설 설치공사 착공 후 20. 11월 준공

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설)
추진진도(%)	10%(정상추진)

48

경호강 관광화 사업(래프팅시설, 체육시설) 시행

◇ 여름철 지역 내 래프팅 활성화와 레저스포츠 시설 확충에 기여

◇ 타운 내 계류장 및 쉼터 조성을 통한 방문객 편의시설 제공으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 옥산리 865-2번지 일원(래프팅타운 내)

❍ 사 업 비 : 800백만원(균특 290, 군비 510)

- 2019년 : 300백만원, 2020년 : 500백만원

❍ 사 업 량 : 편의시설 설치 1식(A=1,260㎡), 쉼터 및 휴게시설 1식

❍ 사업내용 : 가설건축물(임시창고) 1,512㎡(14동)

□ 추진사항

❍ 2018. 10월 : 래프팅타운 내 불법가시설(14개소) 철거

❍ 2019. 10월 : 편의시설 설치사업 예산확보

❍ 2020. 04월 : 실시설계완료

□ 문제점 및 대책

❍ 편의시설 설치관련 수상레저사업자 상호간 동일한 의견 미제시로 사업추진 애로

→ 2020. 06월 : 지속적인 협의시도에 따른 협의완료

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 08월 : 군계획실시인가 추진

❍ 2020. 09월 : 공사 착공

❍ 2020. 12월 : 공사 준공

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	100%(완료)

49

남부 문화체육센터(수영장+작은영화관) 건립

◇ 삶의 질 향상에 따른 복합 문화체육센터 수용 급증에 대한 기대에 부흥하고 문화       여가 기반시설 제공을 통한 군민의 문화복지 증진에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 930-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 8,500백만원(국비 2,260 도비1,710 군비 4,530)

❍ 사 업 량 : 문화체육센터 건립 1식

{지하1층 지상2층 철근콘크리트조(연면적 A=2,598㎡)}

❍ 사업내용 : 수영장(25m×4레인), 작은영화관(50석규모 2개소), 체력단련실, 카페테리아 등

□ 추진사항

❍ 2018. 10월 : 계약심사 등 행정절차 이행 및 사업발주

❍ 2018. 12월 : 공사착공

❍ 2019. 07월 : 지하층 및 1층 구조물 설치

❍ 2020. 01월 : 신안게이트볼장 철거 협의 완료

❍ 2020. 03월 : 신안게이트볼장 철거 완료

❍ 2020. 05월 : 공사 준공

❍ 2020. 06월 : 개장 및 운영

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 완료

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	73%(정상추진)

50

남부지역 공공도서관 건립

◇ 도서관 건립을 통한 독서와 문화 활동 그리고 평생교육의 수요 증가를      통해 삶의 질 증진 및 문화공간의 조성으로 군민의 문화 복지 향상에 기여

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 산청지리산도서관 건립

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 932-4번지

❍ 사 업 비 : 3,850백만원(국비 1,600 군비 2,250)

❍ 사 업 량 : 공공도서관 1동 건립(연면적 1,197.89㎡, 지상2층)

❍ 사업내용 : 자료실(종합/어린이·유아), 북카페, 문화교육공간(열람실,                  강좌실) 등

□ 추진사항

❍ 2016. 3월 : 경남도교육감 산청군 방문시 남부지역 도서관 건립 주민 건의

❍ 2019. 1월 : 산청군청 ↔ 경남도교육청 도서관 건립운영 협약 체결

❍ 2019. 4월 : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2019.12월 : 계약심사 및 공사발주

❍ 2020. 1월 : 계약 및 공사 착수

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 8월 : 공사 준공

❍ 2020.10월 : 도서관 개관

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설)
추진진도(%)	0%(장기추진)

51

생초 체육공원 구역확장

◇ 소규모 체육시설 확충을 통한 생활체육 저변확대로 지역민의 생활체육 육성 및 삶의 질 향상하고, 다양한 체육시설확충으로 전지훈련팀 유치 등 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 생초면 어서리 101-1번지 일원(A=1,982㎡)

❍ 사 업 비 : 500백만원(국비 210, 군비 290)

❍ 사 업 량 : 풋살장 신설 1식(족구장 겸용)

❍ 사업내용 : 소규모 겸용 체육시설(풋살장 겸 족구장) 신설

□ 추진사항

❍ 2018. 09월~ 2019. 12월 : 체육시설 부지보상 협의, 관련부서 사업추진 협의

※ 도시교통과 생초면 농촌중심지 활성화사업 내 사업내용 포함 추진 중

□ 문제점 및 대책

❍ 체육시설 설치 대상부지 토지소유자 보상 협의

☞ 체육시설 부지보상 미협의시 인근 농지(농업진흥구역) 매입 후 사업추진

(농업진흥구역 해제 등 사업이행 장기간 소요예상)

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음(보류)

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(문화재담당)
추진진도(%)	100%(완료)

52

도천서원 정비사업

◇ 경상남도 유형문화재 제237호 산청 도천서원 신안사재의 종합정비 기본계획을 수립하여, 체계적인 관리 및 정비를 통한 소중한 문화유산 보존

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 신안리 177번지 일원

❍ 사 업 비 : 226백만원(도비 125.5 군비 100.5)

❍ 사 업 량 : 도천서원 정비사업 1식

❍ 사업내용 : 종합정비 기본계획수립, 방충제 도포, 건축물보수 정비

□ 추진사항

❍ 2018. 7월 : 산청 도천서원 신안사재 종합정비 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2019. 1월 : 설계용역 발주 및 완료(‘19년 사업 : 방충사업)

❍ 2019. 4월 : 설계승인(경상남도)

❍ 2019. 5월 : 방충사업 완료

❍ 2019. 9월 : 홍살문 보수 완료

❍ 2020. 4월 : 도천서원 및 삼우사 보수공사 착수

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 10월 : 도천서원 및 삼우사 보수공사 완료

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(체육시설)
추진진도(%)	40%(정상추진)

53

생비량 생활체육공원 조성공사

◇ 지역주민들의 생활권 내 체육활동을 즐길 수 있는 인프라 구축으로  건강증진 및 지역주민의 생활체육 활성화와 각종 체육활동을 위한   공간 확충

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 가계리 939-2번지 일원(구 송계초등학교)

❍ 사 업 비 : 1,500백만원(국비 600, 군비 900)

- 2020년 : 600백만원, 2021년 : 900백만원

❍ 사 업 량 : 생활체육공원 조성

❍ 사업내용 : 시설물 철거 1식, 체육공원 조성 1식(부지면적 A=6,320㎡)

□ 추진사항

❍ 2019. 10월 : 본예산신청

❍ 2020. 03월 : 기반시설 조성공사 설계 완료 및 공사 착수

❍ 2020. 06월 : 생비량 체육공원기반시설 조성공사 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 08월 : 파크골프장 신설공사 실시설계용역 시행

❍ 2020. 10월 : 실시설계용역 완료 및 공사 착수

❍ 2021. 03월 : 공사 준공 및 개장

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(체육시설)
추진진도(%)	60%(정상추진)

54

산청 근린생활형 국민체육센터 건립공사

◇ 실내체육관외 소규모 다목적체육관 부재로 지역 생활권을 중심으로  운영되는 각종 생활체육 활동 및 대회개최 어려움 해소와 국민 생활  체육 인구의 지속증가에 따른 신규체육시설 확충

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 1번지 내

❍ 사 업 비 : 1,950백만원(국비 1,000, 도비 200, 군비 750)

❍ 사 업 량 : 소규모 다목적체육관 건립 1식(건축연면적 A=994㎡정도)

❍ 사업내용 : 실내 운동시설 A=988.32㎡(지상1층, 철골구조+철근콘크리트조)

□ 추진사항

❍ 2019. 04월 : 체육진흥기금 사업비 확보

❍ 2019. 07월 : 설계용역 발주

❍ 2019. 12월 : 설계용역 완료

❍ 2020. 02월 : 공사 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 08월 : 공사 준공

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	3%(장기추진)

55

신명사도 실천유학 문화체험장 조성사업

◇ 남명의 실천유교사상을 모티브로 한 체험장 조성으로 한국선비문화      연구원과 남명기념관, 산천재를 연계하여 남명사상의 재조명 및 국가      인성교육의 거점으로 육성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 900-48번지 일원

❍ 사 업 비 : 18,000백만원(국비 9,000 도비 4,500 군비 4,500)

❍ 사 업 량 : 신명사도 실천유학 문화체험장 조성

❍ 사업내용 : 신명사도 모형 체험장, 문화체험시설, 문화 놀이마당 등

□ 추진사항

❍ 2018. 4월 : 경상남도 남명 선비문화 계승발전 종합계획 세부실행

대상사업 선정

❍ 2020. 1월 : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료.

□ 문제점 및 대책

❍ 시·군별 단위사업으로 추진 시 예산반영에 어려움이 있어 타시·군과 연계사업 또는 광역권 개발사업에 반영하여 사업추진

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 9월 : 사전행정절차 진행(지방재정투자심사 및 공유재산 관리                    계획 수립)

❍ 2020.11월 : 실시설계 및 군관리계획(공원조성계획)변경 용역

❍ 2021.11월 : 공사착공

❍ 2024. 4월 : 공사 완료 및 개원