2020년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(농업진흥과)

□ 총    평

❍ 농업 신기술 보급 및 과학 영농 실현을 위한 농업기술센터 행정기반 구축

❍ 산청군 주요 생산 품목에 대한 다양한 지원으로 농가 생산력 및 품질 향상 증대 기여

□ 추진상황

구 분	추진실적(4건)						비 고
	계	완료	이행후계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	4		2	2
군수공약사업	2		2
주요시책사업	2			2

□ 주요성과

❍ 관내 농가에 대한 농업기반 및 자재 등 지원으로 농가 경영비 절감

❍ 농업기술센터 기능강화사업 추진

- 농업교육과학관 설계 완료 등 사업 적기 완료를 위한 노력

□ 반    성

❍ 연차 사업 보조금 등 예산 확보를 위한 적극적 노력 필요

□ 향후 추진계획

❍ 사업 목적 달성을 위한 적기 사업 추진으로 지속적인 농업 발전 도모

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(과수특작담당)
추진진도(%)	55%(이행 후 계속추진)

85

산청 명품사과 특화 지원

◇ 기후변화 대응 산청 명품사과 생산으로 산청 사과산업 경쟁력 강화

◇ 품종 다양화 및 중·소과 생산으로 소비 판로 확장을 통한 농가소득 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 관내 사과 재배농가

❍ 사 업 비 : 600백만원(군비310 자부담290)

❍ 사 업 량 : 84ha

❍ 사업내용

- 과원 안정생산 기반시설, 친환경 농자재 지원, 국내 육성품종 갱신

- 역량강화 교육 및 컨설팅 지원

□ 추진사항

❍ 2019. 1월 ~ 12월 : 사업완료 16개소, 역량강화교육 4개 작목반 각 1회 실시

❍ 2020. 1월 ~  7월 : 사업완료 10개소, 추진 중 3개소, 교육 계획 중

□ 문제점 및 대책

❍ 일부농가 개인사정으로 사업지연 및 포기

❍ 코로나19로 인한 단체교육 추진에 어려움이 있음

❍ 사업추진 중 철저한 점검 및 지도로 사업 완료토록 독려

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 7월 ~ 12월 : 2차 년도 사업완료

❍ 2021. 1월 ~ 12월 : 3차 년도 사업추진 및 완료

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(원예지원담당)
추진진도(%)	60%(이행 후 계속추진)

86

시설하우스 고소득 농업지원 확대

◇ 시설하우스 농업지원 확대를 통해 우리군 주요 소득 작목인 딸기와 토마토, 애플수박 등 시설원예 채소의 경쟁력을 높여 농가소득 증대 및 명품농업 생산기반 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 비 : 25,568백만원(국비3,835 도비2,557, 군비6,392 자부담12,784)

❍ 사 업 량 : 15개 사업 2,800개소

❍ 사업내용

- 에너지이용효율화사업(다겹보온커튼), 시설원예 현대화사업(순환팬,

양액시설 등), 고추비가림시설지원(고추비가림재배하우스)

- 시설원예 자동개폐기, 원예작물 품질향상 농자재지원(방제약제, 수정벌 등)

- 신소득작물(애플수박) 지원, 북부지역 시설하우스(취나물) 지원

- 딸기하우스 시설현대화, 채소생산시설현대화, 전기난방기 지원 등

□ 추진사항

❍ 2019. 12월 : 사업공고 및 신청접수

❍ 2020. 3월 : 사업대상자 선정 및 사업시행 통보

❍ 2020. 3 ~ 6월 : 사업 추진 및 일부사업 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 사업 수요조사 후 예산확보를 위한 관련 부처 방문 등 적극적 대응

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 7월 ~ 11월 : 사업현장 수시확인, 추진상황 점검 및 사업마무리

❍ 2020. 12월 : 사업평가

구 분	시책사업
담당부서	농업진흥과(농업육성담당)
추진진도(%)	30%(정상추진)

87

농업기술센터 기능강화

◇ 첨단 과학영농 시스템화 및 교육·신기술 정보 통합적 서비스 전달체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 물안실로 8 농업기술센터 일원

❍ 사 업 비 : 8,000백만원(국비 4,000, 도비 850, 군비 3,150)

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월(3년간)

❍ 사 업 량 : 농업교육과학관 신축 및 실증시험단지 조성 등

❍ 사업내용 : 친환경농업 연구 및 농업인 교육시설, 시험포장 조성 등

□ 추진사항

❍ 2018. 1월 : 제2단계 지역균형발전계획 반영

❍ 2018. 2월 : 농업기술센터 기능강화사업 추진 계획 수립

❍ 2018. 10월 : 군계획시설 결정 및 군관리계획(용도지역) 변경결정

❍ 2019. 1월 : 기본계획 수립

❍ 2019. 5월 : 소규모 환경영향평가 외 필요 용역 시행

❍ 2019. 4월 ~ 2020. 5월 : 농업교육과학관 설계용역

□ 문제점 및 대책

❍ 2021년 국·도비 확보를 위한 대책 마련 및 이행

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 10월 : 소규모 환경영향평가 등 필요 용역 완료

❍ 2020. 11월 ~  : 농업교육과학관 착공 등 공사 시행

구 분	시책사업
담당부서	농업진흥과(원예지원담당)
추진진도(%)	60%(정상추진)

88

딸기농가 시설개선사업 지원

◇ 딸기농가 시설개선사업 지원을 통해 우리군 주요 소득 작목인 딸기 시설 현대화와 과학적 농법 도입을 통한 고품질 명품딸기 생산으로 농가소득 증대 및 산청딸기 브랜드 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 비 : 10,880백만원(군비 5,440 자부담 5,440)

❍ 사 업 량 : 2개 사업 320개소

❍ 사업내용 : 딸기하이베드 ㆍ 육묘장 시설지원

□ 추진사항

❍ 2019. 12월 : 사업공고 및 신청접수

❍ 2020.  3월 : 사업대상자 선정 및 사업시행 통보

❍ 2020. 3 ~ 6월 : 사업 추진 및 일부사업 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 사업 수요조사 후 예산확보를 위한 관련 부처 방문 등 적극적 대응

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 7월 ~ 11월 : 사업현장 수시확인, 추진상황 점검 및 사업마무리

❍ 2020. 12월 : 사업평가