문 화 체 육 과

2020년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(문화체육과)

□ 총    평

❍ 지역 특색에 맞는 문화예술공연 행사로 지역민과 방문객에게 수준 높은 문화 향유 기회를 제공(코로나19 방역수칙 준수), 단체 및 개인 문화예술 활동 지원, 작은영화관 개관, 지리산 도서관 건립 등 문화 기반시설 확충을 통해 문화예술 도시 구축에 기여함.

❍ 노후·훼손된 문화재를 원형대로 보수, 주변 정비를 통해 체계적인 문화재 보존 관리. 범학리 삼층석탑 복제 및 복원을 통한 산청 문화재의 우수성과 예술성을 알리는데 기여함.

❍ 남부문화체육센터 건립·운영 등 공공체육시설 확충 및 관리·운영으로 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 이바지 함

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	8	5		1	1	1
군수공약사업	5	4				1
주요시책사업	3	1		1	1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 코로나19 방역수칙을 준수한 문화예술행사 추진(문화예술담당)

- 한여름밤 힐링음악회, 기산국악제전, 남사예담촌 전통문화제, 상설문화관광 프로그램운영 등

❍ 문화기반 시설 확충 및 유지 보수(문화예술담당)

- 산청지리산도서관 건립, 기산국악당 대북각 건립, 작은영화관 개관

❍ 체계적인 전통문화유산 계승 및 전승사업 추진(문화재담당)

- 산청·단성향교 제례 및 전통문화계승사업, 서원 제례 지원 등

❍ 우수 문화재 보존을 위한 문화재 보수·정비사업 추진(문화재담당)

- 산청 범학리 삼층석탑 복제 및 복원, 국가지정(도지정)문화재 보수사업 추진 등

❍ 생활 체육활성화를 통한 건강 산청 이미지 제고(체육행정담당)

- 남부문화체육센터 및 산청군 실내수영장 운영 등

❍ 엘리트 체육 육성 지원 등을 통한 우수 체육인 육성(체육행정담당)

- 학교체육육성지원, 산청FC U15 지원 등

❍ 체육시설 확충 및 유지관리를 통한 군민의 건강하고 활기찬 생활 공간 조성(체육시설담당)

- 산청 공설운동장 정비사업(씨름장, 다목적체육관, 게이트볼장, 공설테니스장),          남부 문화체육센터 신축공사, 남부 소규모 체육관 건립공사, 산청 근린생활형         국민체육센터 건립공사 등

□ 반    성

❍ 신명사도 실천유학 문화체험장조성에 있어 시·군 단위사업으로 추진 시 예산 반영의 어려움이 있어 연계 가능한 광역개발사업 발굴하여 추진 예정

❍ 래프팅타운 내 편의시설 설치공사 사업내용 확정협의 지연에 따른 애로사항으로 지속적인 협의하였으나 수상레저사업자 상호간의 의견 불일치 및 자구책 마련 등이 없어 사업이 불가능하여 산청공설운동장 정비사업 내 게이트볼장 건립공사로 예산 변경하여 시행

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 1.: 생비량 생활체육공원 조성사업 실시설계 용역 완료

❍ 2021. 2.: 생비량 생활체육공원 조성사업 공사 착공

❍ 2021. 3.: 산청 공설운동장 게이트볼장 건립공사 공사 준공

❍ 2021. 3.: 산청 공설테니스장 정비사업 준공예정

❍ 2021. 5.: 생비량 생활체육공원 조성사업 공사 준공

❍ 2021. 9.: 신명사도 실천유학 문화체험장 조성사업 기본 및 실시설계 용역

(공원조성계획 변경) 발주

❍ 2022. 3.: 신명사도 실천유학 문화체험장 조성사업계약 및 공사 착공

❍ 2024.12.: 신명사도 실천유학 문화체험장 조성사업 준공 및 개원

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설)
추진진도(%)	0%(기타)

48

경호강 관광화 사업(래프팅시설, 체육시설) 시행

○ 여름철 지역 내 래프팅 활성화와 레저스포츠 시설 확충에 기여

○ 타운 내 계류장 및 쉼터 조성을 통한 방문객 편의시설 제공으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 옥산리 865-2번지 일원(래프팅타운 내)

❍ 사 업 비 : 800백만원(균특 290, 군비 510)

- 2019년 : 300백만원, 2020년 : 500백만원

❍ 사 업 량 : 편의시설 설치 1식(A=1,260㎡), 쉼터 및 휴게시설 1식

❍ 사업내용 : 가설건축물(임시창고) 1,512㎡(14동)

□ 추진사항

❍ 2020. 04월 : 실시설계용역 완료

❍ 2020. 06월 : 지속적인 협의시도에 따른 협의완료

❍ 2020. 09월 : 래프팅타운 편의시설 설치공사 시행 및 계약심사 의뢰

❍ 2020. 10월 : 래프팅타운 편의시설 설치사업 간담회 개최

❍ 2020. 12월 : 래프팅타운 편의시설 설치사업 문체부 변경계획 승인요청

□ 문제점 및 대책

❍ 래프팅타운 편의시설 설치사업 관련 래프팅업체와 수차례에 걸친 의견수렴결과 업체상호간 의견 불일치 및 자구책 마련 등이 없어 사업이 불가능한 실정

→ 사업예산이 부족한 공설게이트볼장 건립공사 예산으로 변경코자 함

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 03월 : 산청 공설운동장 게이트볼장 건립공사 준공

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	100%(완료)

49

남부 문화체육센터(수영장+작은영화관)건립

○ 인구ㆍ소득 증가와 삶의 질 형상에 따른 여가문화 수용 증가 및 문화ㆍ 체육시설 건립 필요성 대두

○ 건전한 여가활동 공간을 제공하여 국민의 복지 증진에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 신안면 하정리 930-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 8,400백만원(국비 2,780, 도비 2,210, 군비 3,410)

❍ 사 업 량 : 문화체육시설 1식(연면적 2,598㎡, 지하 1층, 2지상 2층)

❍ 사업내용 : 실내수영장(25m 4레인), 작은영화관 2관(99석), 체력단련실,                  카페테리아 등 편의시설

□ 추진사항

❍ 2015. 07월 : 남부 문화체육센터 기본계획 수립

❍ 2015. 09월 : 공유재산 관리계획 승인

❍ 2015. 12월 : 기본계획 및 타당성 조사용역

❍ 2016. 05월 : 경상남도 지방재정투자심사(3회-66억)

❍ 2017. 07월 : 설계공모 및 실시설계 업체선정

❍ 2017. 09월 : 남부 문화체육센터 건립사업 실시설계 용역

❍ 2018. 10월 : 계약심사 및 시행

❍ 2018. 12월 : 공사착공

❍ 2020. 05월 : 공사준공

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	100%(완료)

50

산청지리산도서관 건립 사업

○ 도서관 건립을 통한 독서와 문화 활동 그리고 평생교육의 수요 증가를      통해 삶의 질 증진 및 문화공간의 조성으로 군민의 문화 복지 향상에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 932-4번지

❍ 사 업 비 : 3,850백만원(국비 1,600 군비 2,250)

❍ 사 업 량 : 공공도서관 1동 건립(연면적 1,197.89㎡, 지상2층)

❍ 사업내용 : 자료실(종합/어린이·유아), 북카페, 문화교육공간(열람실,                  강좌실) 등

□ 추진사항

❍ 2016. 3월 : 경남도교육감 산청군 방문시 남부지역 도서관 건립 주민 건의

❍ 2019. 1월 : 산청군청 ↔ 경남도교육청 도서관 건립운영 협약 체결

❍ 2019. 4월 : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2019.12월 : 계약심사 및 공사발주

❍ 2020. 2월 : 계약 및 공사 착수

❍ 2020. 9월 : 준공

❍ 2020.11월 : 산청지리산도서관 개관

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설)
추진진도(%)	0%(기타)

51

생초 체육공원 구역확장

○ 소규모 체육시설 확충을 통한 생활체육 저변확대로 지역민의 생활체육 육성 및 삶의 질 향상하고, 다양한 체육시설확충으로 전지훈련팀 유치 등 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 생초면 어서리 101-1번지 일원(A=1,982㎡)

❍ 사 업 비 : 500백만원(국비 210, 군비 290)

❍ 사 업 량 : 풋살장 신설 1식(족구장 겸용)

❍ 사업내용 : 소규모 겸용 체육시설(풋살장 겸 족구장) 신설

□ 추진사항

❍ 2018. 09월~ 2019. 12월 : 체육시설 부지보상 협의, 관련부서 사업추진 협의

※ 도시교통과 생초면 농촌중심지 활성화사업 내 사업내용 포함 추진 중

□ 문제점 및 대책

❍ 체육시설 설치 대상부지 토지소유자 보상 협의

☞ 체육시설 부지보상 미협의시 인근 농지(농업진흥구역) 매입 후 사업추진

(농업진흥구역 해제 등 사업이행 장기간 소요예상)

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음(보류)

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(문화재담당)
추진진도(%)	100%(완료)

52

도천서원 정비사업

○ 경상남도 유형문화재 제237호 산청 도천서원 신안사재의 종합정비 기본계획을 수립하여, 체계적인 관리 및 정비를 통한 소중한 문화유산 보존

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 신안리 177번지 일원

❍ 사 업 비 : 226백만원(도비 125.5, 군비 100.5)

❍ 사 업 량 : 도천서원 정비사업 1식

❍ 사업내용 : 기록화 사업, 종합정비 기본계획수립, 방충제 도포, 홍살문 보수, 도천서원 및 삼우사 보수

□ 추진사항

❍ 2018. 7월 : 산청 도천서원 신안사재 기록화 사업 완료

❍ 2018. 7월 : 산청 도천서원 신안사재 종합정비 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2019. 5월 : 방충사업 완료

❍ 2019. 9월 : 홍살문 보수 완료

❍ 2020. 9월 : 도천서원 및 삼우사 보수 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 문화재 및 주변시설물 훼손 발생시 긴급보수할 계획

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(체육시설)
추진진도(%)	50%(정상추진)

53

생비량 생활체육공원 조성공사

○ 지역주민들의 생활권 내 체육활동을 즐길 수 있는 인프라 구축으로  건강증진 및 지역주민의 생활체육 활성화와 각종 체육활동을 위한   공간 확충

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 가계리 939-2번지 일원(구 송계초등학교)

❍ 사 업 비 : 1,500백만원(국비 600, 군비 900)

- 2020년 : 600백만원, 2021년 : 900백만원

❍ 사 업 량 : 생활체육공원 조성

❍ 사업내용 : 시설물 철거 1식, 체육공원 조성 1식(부지면적 A=6,320㎡)

□ 추진사항

❍ 2019. 10월 : 본예산신청

❍ 2020. 03월 : 기반시설 조성공사 설계 완료 및 공사 착수

❍ 2020. 06월 : 생비량 체육공원기반시설 조성공사 준공

❍ 2020. 11월 : 생비량 생활체육공원 조성사업 실시설계용역 시행

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 01월 : 실시설계 용역 완료

❍ 2021. 02월~05월 : 생비량 생활체육공원 조성사업 착공 및 준공

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(체육시설)
추진진도(%)	100%(완료)

54

산청근린생활형 국민체육센터 건립공사

○ 실내체육관외 소규모 다목적체육관 부재로 지역 생활권을 중심으로 운영되는 각종 생활체육 활동 및 대회 개최 어려움 해소와 국민 생활체육 인구의 지속증가에 따른 군민들의 신규체육시설 보급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 금서면 매촌리 1번지 내

❍ 사 업 비 : 1,950백만원(국비 1,000, 도비 200, 군비 750)

❍ 사업내용 : 다목적체육관 건립 1식(연면적 994㎡)

□ 추진사항

❍ 2019. 04월 : 2019년 체육진흥기금 사업비 확보

❍ 2019. 12월 : 실시설계용역 완료

❍ 2020. 02월 : 공사착공

❍ 2020. 08월 : 공사준공

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	10%(장기추진)

55

신명사도 실천유학 문화체험장 조성사업

○ 남명의 실천유교사상을 모티브로 한 체험장 조성으로 한국선비문화연구원과      남명기념관, 산천재를 연계하여 남명사상의 재조명 및 국가 인성교육의       거점으로 육성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 900-48번지 일원

❍ 사 업 비 : 18,000백만원(국비 9,000 도비 4,500 군비 4,500)

❍ 사 업 량 : 신명사도 실천유학 문화체험장 조성

❍ 사업내용 : 신명사도 모형 체험장, 문화체험시설, 문화 놀이마당 등

□ 추진사항

❍ 2018. 4월 : 경상남도 남명 선비문화 계승발전 종합계획 세부실행

대상사업 선정

❍ 2020. 1월 : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료

❍ 2020. 4월 : 재정투자심사 승인

❍ 2020. 6월 : 공유재산관리계획 승인

□ 문제점 및 대책

❍ 시·군별 단위사업으로 추진 시 예산확보에 어려움이 있어 타시·군과 연계사업 또는 광역권 개발사업에 반영하여 사업추진

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 9월 : 기본 및 실시설계용역(공원조성계획 변경) 발주

❍ 2022. 3월 : 계약 및 공사 착수

❍ 2024.12월 : 준공 및 개원