환 경 위 생 과

2020년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(환경위생과)

□ 총    평

❍ 매립시설의 증설로 관내 발생하는 생활폐기물의 적정처리에 기여

❍ 충분한 예산확보로 야생동물로 인한 농작물 피해가 감소하고 있어 농민들의 생활안정에 기여함

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	2	1	1
군수공약사업	1		1
주요시책사업	1	1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 농촌폐기물종합처리시설 매립시설 증설 완료

- 제방공사(H=5m, L=90.9m)m, 침출수처리시설(50㎥/일)

❍ 야생동물피해예방시설 설치 지원

- 244농가

□ 반    성

❍ 야생동물피해예방시설 지원사업에 대한 자부담률 고정으로 농민부담 발생

□ 향후 추진계획

❍ 2021년 야생동물피해예방시설 지원사업 추진

❍ 매립시설의 효율적 운영

구 분	공약사업
담당부서	환경위생과(환경보전담당)
추진진도(%)	60%(이행후 계속추진)

74

야생동물피해예방시설 설치지원 확대

○ 멧돼지, 고라니 등 야생동물에 의한 농작물의 피해를 사전에 예방하기      위해 피해예방시설을 설치하는 농가에 대하여 설치비용의 일부 지원

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 전역

❍ 사 업 비 : 1,836백만원

❍ 사업내용 : 철선울타리, 전기목책기 등 야생동물피해예방시설 설치지원

□ 추진사항

❍ 2018년 : 134농가 256백만원 지원

❍ 2019년 : 153농가 336백만원 지원

❍ 2020년 : 244농가 511백만원 지원

❍ 2021년 : 240농가 506백만원 지원 예정

□ 문제점 및 대책

❍ 자부담률 40% 명시(환경부 지침)로 농민부담 애로

⇒ 정책협의회를 통한 자부담률 하향 지속적 건의

⇒ 군비 확보를 통한 자체사업 추진 등 농민부담 최소화 추진

□ 향후 추진계획

❍ 매년 야생동물피해예방사업의 추진 성과에 대한 분석ㆍ평가를 실시하고 문제점 개선

❍ 야생동물의 침입을 억제할 수 있는 다양한 피해예방시설 조사

구 분	시책사업
담당부서	환경위생과(자원순환담당)
추진진도(%)	100%(완료)

75

산청군 농촌폐기물 종합처리시설(매립장) 증설공사

○ 농촌폐기물종합처리장 매립시설의 2단계 매립종료에 따른 제방 시설 및 침출수처리시설의 증설사업을 추진하여 생활폐기물의 안정적 처리와 원활한 시설관리에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 생비량면 화현리 429-1 일원

❍ 사 업 비 : 3,092백만원(국비 860, 군비 2232)

❍ 사 업 량 : 제방 설치 및 침출수 처리시설 증설 1식

❍ 사업내용

- 매립장제방공사(H=5m, L=90.9m), 침출수처리시설 증설(30→50㎥/일)

- 유량조정조 증설(800→1,400㎥), 매립사면부차수공사(4,567㎡)

□ 추진사항

❍ 2018. 2월 : 기본 및 실시설계완료

❍ 2019. 2월 : 국비 지원 총사업비 확정(국비 860백만원)

❍ 2019. 6월 : 증설 공사(총괄, 1차분) 계약체결 및 착공

❍ 2020. 4월 : 증설 공사(기계, 2차분) 계약체결 및 착공

❍ 2020. 7월 : 매립제방 차수시설 설치 및 침출수처리시설 기계ㆍ전기공사 추진

❍ 2020. 8월 : 침출수처리시설(R/O설비) 시운전

❍ 2020. 9월 : 침출수 처리시설 울타리 휀스 설치

❍ 2020.10월 : 준공

□ 문제점 및 대책

❍  없음