상 하 수 도 과

2020년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(상하수도과)

□ 총    평

❍ 소규모수도시설개량 및 지방상수도 급수구역 확장을 통하여 미급수지역의 수질불량, 원수부족 등으로 인한 주민 불편을 해소하고 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급으로 주민복지 증진 기여

❍ 공공수역의 수질오염 방지와 도시환경 및 주민보건 위생 개선에 기여하고자 함.

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	4	1	3
군수공약사업	3	1	2
주요시책사업	1		1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 지방상수도 시설 확장 및 개량으로 지역주민에게 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급하여 행정 신뢰도 향상

❍ 공공수역의 수질오염 방지와 도시환경 및 주민보건 위생 개선에 기여하고자 함.

□ 반    성

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사가 준공되었으나, 단성정수장의 정수량 부족으로 생비량면 전역 지방상수도 공급이 어려우나, 조속히 단성정수장 증설을 완료하여 지방상수도 공급에 차질이 없도록 조치.

❍ 하수도정비기본계획 변경으로 사업 확정 및 예산확보가 다소 지연되었으나  예산확보 및 공사 추진에 차질이 없도록 조치.

□ 향후 추진계획

❍ 지방상하수도 확장을 위한 미확보 또는 부족 재원 확보를 위해 경남도 및 중앙부처와 지속적인 협의로 예산 확보 노력

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	45%(정상추진)

76

지방상수도 수혜지역 확장

○ 산청군내 지방상수도 미급수 지역의 원수 부족 및 수질 불량 등의       문제로 어려움이 있어 지방상수도 수혜지역 및 취·정수 시설 확장 통하여      안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 비 : 50,260백만원(국 7,404/ 도 27,777/ 군 15,079)

❍ 사 업 량 : 정수장 증설(단성, 시천), 배수지 설치(오부, 삼장)

관로매설 120㎞, 가압장 및 감압변 설치 1식

❍ 사업내용 : 지방상수도 수혜지역 및 시설 확장

□ 추진사항

❍ 2017. 05월 : 산청 및 단성 급수구역 실시설계용역 착수(2019.10월 준공)

❍ 2018. 11월 : 삼장지구 지방상수도 인입공사(1지구) 준공

❍ 2019. 02월 : 산청군 수도정비기본계획(변경) 수립

❍ 2020. 02월 : 삼장지구 지방상수도 인입공사(2지구) 착공

❍ 2020. 03월 : 산청급수구역 지방상수도 확장사업(오부지구) 착공

❍ 2020. 06월 : 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 착공

❍ 2020. 09월 : 산청급수구역 지방상수도 확장사업(금서지구) 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 수도정비기본계획(변경) 수립 지연으로 지방상수도 확장사업이 다소 지연되었으나, 2019년 2월 환경부 최종 승인 완료하여 수도정비기본계획에 의거  공사 추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 02월 : 시천급수구역 지방상수도 확장사업 실시설계용역 착수

❍ 2023. 12월 : 지방상수도 수혜지역 확장사업 완료

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	100%(완료)

78

지방상수도 인입공사 조기 마무리(생비량면)

○ 생비량면의 수질악화 및 원수부족 등의 근본적인 문제를 해결하기 위해      지방상수도를 인입하여 지역주민들에게 안정적인 지방상수도 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 비 : 14,951백만원(국 9,766, 군 5,185)

❍ 사 업 량 : 배수지(300톤) 1식, 관로매설 77.1㎞, 관로매설 구간 포장 1식

가압장 4개소, 전기 및 제어설비 1식

❍ 사업내용 : 생비량면 지방상수도 급수구역 확장

□ 추진사항

❍ 2015. 12월 : 생비량지구 지방상수도 인입공사 착공(총괄분)

❍ 2018. 10월 : 생비량지구 지방상수도 인입공사 준공(1,2,3차분)

❍ 2019. 04월 : 생비량지구 지방상수도 인입공사 포기(시공사 영일개발)

❍ 2019. 05월 ~ 06월 : 생비량지구 지방상수도 인입공사 타절 정산

❍ 2019. 10월 : 생비량지구 지방상수도 인입공사 착공(잔여분)

❍ 2020. 04월 : 생비량지구 지방상수도 인입공사 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 시공사(영일개발) 공사 포기에 따라 다소 지연되었으나, 2020. 4월 준공

❍ 생비량지구을 포함한 단성 급수구역내 용수원 부족으로 생비량전역에 지방상수도 공급이 어려우나 단성정수장 증설 조속히 추진하여 공급

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 12월 : 생비량면 지방상수도 전지역 공급

구 분	시책사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	80%(정상추진)

79

노후 상수관망 정비 사업

○ 노후상수관망 정비를 통한 녹물 발생, 이물질 유입 등을 예방하여 안전한      수돗물을 공급하고 누수 저감을 통한 유수율 제고 및 상수도 운영․관리의      선순환 구조를 구축하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 비 : 25,097백만원(국 12,548, 지 12,549)

❍ 사 업 량 : 관망정비 L=36.1km, 누수탐사·정비 L=557km

블록시스템(중블록 5개소, 소블록 16개소) 및 유지관리시스템 구축 등

❍ 사업내용 : 지방상수도 노후 관망정비 및 현대화 사업

□ 추진사항

❍ 2016. 10월 : 위·수탁 협약체결(산청군-한국환경공단)

❍ 2017. 09월 : 기본설계 용역 준공

❍ 2017. 11월 : 실시설계 및 관망관리 용역 착공

❍ 2018. 06월 : 블록시스템 구축공사 착공(2019. 10월 준공)

❍ 2018. 12월 : 유지관리시스템 구축공사 착공

❍ 2019. 12월 : 노후관망정비사업 착공

❍ 2020. ~12월 : 관망정비(계획36.1km/시행12km), 계량기교체 및 옥외이설(계획3,466/시행400), 유지관리시스템구축(계획1.0/시행0.4)

□ 문제점 및 대책

❍ 노후된 관로 교체지역이 주택가 주변으로 굴착 및 소음 등으로 인한 지역주민의 불편사항이 발생하고 있으나, 현장여건을 잘 고려하여 신호수 및 부직포 시공 등으로 불편사항을 최소화

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 12월 : 시설공사 준공

❍ 2022. 12월 : 유수율 사업 판

구 분	공약사업/시책사업
담당부서	상하수도과(하수도담당)
추진진도(%)	10%(정상추진)

77

공공하수도 수혜지역 확장

○ 생활하수의 미처리 방류에 따른 인근 상수원보호구역과 남강등 공공      수역의 오염이 심각한 바 하수처리시설 설치에 따른 공공수역의 수질      오염 방지와 도시환경 및 주민보건 위생 개선에 기여하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 모고리, 차황면 상법리, 단성면 방목리, 시천면 사리

❍ 사 업 비 : 12,416백만원(국비 8,692백만원, 지방비 3,724백만원)

❍ 사 업 량 : 모고지구(하수관로 L=8.5㎞), 상법지구(하수관로 L=3.9㎞)

석대지구(하수처리장 1,200톤/일, 하수관로 L=14.58㎞)

시천지구(하수처리장 250톤/일 증설)

❍ 사업내용 : 하수처리시설 설치, 하수관로 매설, 배수 설비 등

□ 추진사항

❍ 2019. 6월 : 상법지구 실시설계 용역 준공

❍ 2019. 7월 : 모고지구 실시설계 용역 준공

❍ 2020. 4월 ~ 6월 : 환경부 재원협의 및 경남도 계약심사 완료

❍ 2020. 8월 : 모고, 상법지구 하수도(관로) 정비사업 착수

❍ 2020. 10월 : 석대,시천 공공하수처리시설 신증설사업 설계용역 착수

□ 문제점 및 대책

❍ 산청군 하수도정비기본계획 변경으로 사업 확정 및 예산확보가 다소 지연되었으나, 2019년 2월 환경부 최종 승인으로 예산확보 및 공사 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 7월 : 모고, 상법지구(1차분) 사업 준공 예정

❍ 2021. 10월 : 석대,시천 공공하수처리시설 신증설사업 설계용역 준공 및 공사 추진