새로운 변화, 모두가 행복한 산청

2023년 6월 30일 기준

2023년 상반기 주요업무 추진상황

■ 2023년 상반기 주요업무 추진상황(총 71건 : 공약 57, 시책 14)

- 완료 4(공약3, 시책1), 정산추진 59(공약50, 시책9), 장기추진 8(공약4, 시책4)

구 분	추 진 실 적						비고
	계	완료	이행 후 계속추진	정상추진	장기추진	기타
계	71	4		59	8
군 수 공 약 사 업	57	3		50	4
주 요 시 책 사 업	14	1		9	4

`	산 청 군
	(기획조정실)

목    차

Ⅰ		총 괄

❍ 민선8기 공약사업 및 주요 시책사업 추진상황	1

❍ 2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과(총괄)	4

Ⅱ		부 서 별

【기획조정실 - 2건】

❍ 평가결과	12

ㆍ 지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진(공약)	13

ㆍ 인구감소에 대한 대책 마련(청년주거자금 대출이자 지원 등)(시책)	14

【경제교통과 - 8건】

❍ 평가결과	18

ㆍ 읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)(공약)	19

ㆍ 사회적기업, 마을기업 창업지원(공약)	20

ㆍ 전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축(공약)	21

ㆍ 브라보 한방택시 운영 확대와 개선(공약)	22

ㆍ 지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성(공약)	23

ㆍ 단계시장 활성화 방안 마련(공약)	24

ㆍ 산청시장 주상복합 신축(공약)	25

ㆍ 항노화일반산업단지 투자 유치 활성화(시책)	26

【안전총괄과 - 3건】

❍ 평가결과	30

ㆍ 무선 공공 인터넷망 구축사업(공약)	32

ㆍ 방범 cctv 설치 사업(공약)	33

ㆍ 취락마을 방송용 스피커 설치(공약)	34

【건설과 – 2건】

❍ 평가결과	38

ㆍ 원지교차로 개선사업(공약)	39

ㆍ 함양~울산간 고속도로 도로망 구축(시책)	40

【지역발전과 - 6건】

❍ 평가결과	44

ㆍ 도시재생 뉴딜사업(옥산지구)(공약)	45

ㆍ 대형아파트 유치(공약)	46

ㆍ 농산어촌 주거플랫폼 사업(공약)	47

ㆍ 농촌공간(모례지역 돈사철거) 정비사업(공약)	48

ㆍ 어린이 놀이마당 조성(공약)	49

ㆍ 매촌지구 택지개발로 대형아파트 유치(시책)	50

【한방항노화과 - 3건】

❍ 평가결과	54

ㆍ 산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선(공약)	55

ㆍ 동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축(공약)	57

ㆍ 2023 산청세계전통의약항노화엑스포성공개최 추진(시책)	58

【문화체육과 - 4건】

❍ 평가결과	62

ㆍ 산청군 행복문화센터 건립(공약)	64

ㆍ 한국선비문화연구원 활성화 지원(공약)	65

ㆍ 공공체육시설 확충(공약)	66

ㆍ 래프팅과 연계한 레저 레포츠장 설립(시책)	68

【관광진흥과 - 6건】

❍ 평가결과	72

ㆍ 대원사 계곡길 연장(공약)	73

ㆍ 밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축(공약)	74

ㆍ 중산관광지 활성화 사업(공약)	75

ㆍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업(공약)	76

ㆍ 남사예담촌 홍보 지원 및 관광 활성화(공약)	77

ㆍ 생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성(공약)	79

【산림녹지과 - 4건】

❍ 평가결과	82

ㆍ 군유림 밀원 식물단지 조성(공약)	84

ㆍ 백두대간 생태축 복원사업(공약)	85

ㆍ 산림 신품종 재배단지 조성(공약)	86

ㆍ 둔철 산림생태인프라 구축사업(공약)	87

【주민복지과 - 1건】

❍ 평가결과	90

ㆍ 사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원(공약)	91

【복지지원과 - 6건】

❍ 평가결과	94

ㆍ 산청군 장애인회관 신축(공약)	95

ㆍ 다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원(공약)	96

ㆍ 성폭력 전문상담소 운영(공약)	97

ㆍ 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진(공약)	98

ㆍ 산엔청 복지관 장애인 기능 강화사업(시책)	99

ㆍ 조손가족 손자녀 특기활동비 지원(시책)	100

【환경위생과 - 1건】

❍ 평가결과	104

ㆍ 생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원(공약)	106

【상하수도과 - 2건】

❍ 평가결과	110

ㆍ 상수도 시설 확충(공약)	111

ㆍ 공공하수처리시설 설치사업(공약)	113

【보건정책과 - 2건】

❍ 평가결과	116

ㆍ 내과 전문의 채용 추진(공약)	117

ㆍ 대학병원급 의료기관과의 업무협약 체결(시책)	118

【건강관리과 - 2건】

❍ 평가결과	122

ㆍ 감염병 선제적 방역 시스템 확충(공약)	123

ㆍ 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 사업(공약)	124

【농축산과 - 10건】

❍ 평가결과	128

ㆍ 농업보조금 확대 지급(공약)	129

ㆍ 청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대(공약)	130

ㆍ 농촌인력 중개센터 운영(공약)	131

ㆍ 친환경 농업 인프라 확충 및 지원(공약)	132

ㆍ 직불금 확대(공약)	133

ㆍ 흑돼지 명품화 사업 지속 확대(공약)	134

ㆍ 유기축산 한우단지 확대(공약)	135

ㆍ 흑돼지 축제 개최(공약)	136

ㆍ 함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전(공약)	137

ㆍ 한우 직거래 활성화 지원(시책)	138

【농업진흥과 - 5건】

❍ 평가결과	142

ㆍ 기후변화에 대비한 전략 재배작물 육성(공약)	143

ㆍ 고품질 산청사과 명품화 지원(공약)	144

ㆍ 고소득 작물 스마트 4차산업 지원(공약)	145

ㆍ 스마트팜 청년창업 교육 시설 운영(공약)	146

ㆍ 딸기하우스 물 공급 시설 설치(시책)	147

【농식품유통과 - 4건】

❍ 평가결과	150

ㆍ 산청군 먹거리통합지원센터 건립(공약)	151

ㆍ 도정공장 설치(시책)	152

ㆍ 농업 융복합 6차산업 지원 확대(시책)	153

ㆍ 택배 집하주차장 등 판로 시설 구축(시책)	154

민선8기 공약사업 및 주요 시책사업 추진상황

관리 번호	담 당 실 과	구분	사 업 명	추진상황
				완료	이행 후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계			71건(공약 57, 시책 14)	4		59	8
1	기획조정실	공약	지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진			●
2	기획조정실	시책	인구감소에 대한 대책 마련 (청년주거자금 대출이자 지원 등)			●
3	경제교통과	공약	읍면 소재지권 주차난 해소 (주차장 확보)				●
4	경제교통과	공약	사회적기업, 마을기업 창업지원			●
5	경제교통과	공약	전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축			●
6	경제교통과	공약	브라보 한방택시 운영 확대와 개선			●
7	경제교통과	공약	지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성			●
8	경제교통과	공약	단계시장 활성화 방안 마련			●
9	경제교통과	공약	산청시장 주상복합 신축				●
10	경제교통과	시책	항노화일반산업단지 투자 유치 활성화			●
11	안전총괄과	공약	무선 공공 인터넷망 구축사업			●
12	안전총괄과	공약	방범 cctv 설치 사업			●
13	안전총괄과	공약	취락마을 방송용 스피커 설치			●
14	건설과	공약	원지교차로 개선사업			●
15	건설과	시책	함양~울산간 고속도로 도로망 구축			●
16	지역발전과	공약	도시재생 사업(옥산지구)				●
17	지역발전과	공약	대형아파트 유치			●
18	지역발전과	공약	농산어촌 주거플랫폼 사업			●
19	지역발전과	공약	농촌공간(모례지역 돈사철거) 정비사업			●
20	지역발전과	공약	어린이 놀이마당 조성			●
21	지역발전과	시책	매촌지구 택지개발로 대형아파트 유치			●
22	한방항노화과	공약	산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선			●
23	한방항노화과	공약	동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축			●
						●
			2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공개최 추진
		시책
	한방항노화과
24
25	문화체육과	공약	산청군 행복문화센터 건립			●
26	문화체육과	공약	한국선비문화연구원 활성화 지원			●
27	문화체육과	공약	공공체육시설 확충			●
28	문화체육과	시책	래프팅과 연계한 레저 레포츠장 설립				●
29	관광진흥과	공약	대원사 계곡길 연장			●
30	관광진흥과	공약	밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축			●
31	관광진흥과	공약	중산관광지 활성화 사업			●
32	관광진흥과	공약	황매산 관광객 편의안전시설 조성사업			●
33	관광진흥과	공약	남사예담촌 홍보 지원 및 관광 활성화			●
34	관광진흥과	공약	생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성			●
35	산림녹지과	공약	군유림 밀원 식물단지 조성			●
36	산림녹지과	공약	백두대간 생태축 복원사업			●
37	산림녹지과	공약	산림 신품종 재배단지 조성			●
38	산림녹지과	공약	둔철 산림생태인프라 구축사업			●
39	주민복지과	공약	사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원	●
40	복지지원과	공약	산청군 장애인회관 신축			●
41	복지지원과	공약	다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원			●
42	복지지원과	공약	성폭력 전문상담소 운영			●
43	복지지원과	공약	산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진			●
44	복지지원과	시책	산엔청 복지관 장애인 기능 강화사업			●
45	복지지원과	시책	조손가족 손자녀 특기활동비 지원			●
46	환경위생과	공약	생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원			●
47	상하수도과	공약	상수도 시설 확충			●
48	상하수도과	공약	공공하수처리시설 설치사업			●
49	보건정책과	공약	내과 전문의 채용 추진	●
50	보건정책과	시책	대학병원급 의료기관과의 업무협약 체결	●
51	건강관리과	공약	감염병 선제적 방역 시스템 확충			●
52	건강관리과	공약	노인 무픞 인공관절 수술비 등 지원 사업			●
53	농축산과	공약	농업보조금 확대 지급			●
54	농축산과	공약	청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대			●
55	농축산과	공약	농촌인력 중개센터 운영	●
56	농축산과	공약	친환경 농업 인프라 확충 및 지원			●
57	농축산과	공약	직불금 확대			●
58	농축산과	공약	흑돼지 명품화 사업 지속 확대			●
59	농축산과	공약	유기축산 한우단지 확대			●
60	농축산과	공약	흑돼지 축제 개최			●
61	농축산과	공약	함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전				●
62	농축산과	시책	한우 직거래 활성화 지원			●
63	농업진흥과	공약	기후변화에 대비한 전략 재재작물 육성			●
64	농업진흥과	공약	고품질 산청사과 명품화 지원			●
65	농업진흥과	공약	고소득 작물 스마트 4차산업 지원			●
66	농업진흥과	공약	스마트팜 청년창업 교육 시설 운영			●
67	농업진흥과	시책	딸기하우스 물 공급 시설 설치				●
68	농식품유통과	공약	산청군 먹거리통합지원센터 건립			●
69	농식품유통과	시책	도정공장 설치				●
70	농식품유통과	시책	농업 융복합 6차산업 지원 확대			●
71	농식품유통과	시책	택배 집하주차장 등 판로 시설 구축				●

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(총   괄)

□ 총괄보고

❍ 2023년 상반기 세계적인 고물가 고금리∙고유가 등 경제 한파로 인해 어려움이 가중되고 있는 중에도, 정부 각종 공모사업 선정에 노력한 결과 농촌중심지활성화 사업 등 현재 진행 중인 계속사업까지 포함 51건, 2,420억원 국도비 규모의 공모사업 추진

또한, 경남도 주관 2022년도 교통편익 향상을 위한 교통행정 시∙군 평가에서 우수에 선정돼 특별조정교부금 1억원을 교부받는 등 정부 및 도 주관 각종 기관에서 시행하는 분야별 평가에서 4건의 기관(단체)표창을 받아 산청군 위상 높임

❍ 「새로운 변화, 모두가 행복한 산청」실현을 위해 전 군민과 공무원이 힘을 모아 노력한 결과, 2023년 세무행정 종합평가 우수, 교통편익 향상을 위한 시군 교통행정 평가 우수, 2023년 지자체 합동평가 산림분야 우수 등 다양한 분야에서 성과 획득

❍ 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 적극적인 홍보활동, 관람객 유치활동 등 차질 없는 엑스포 개최 준비로 ‘한방성지 산청’재도약 기반 마련 등 대한민국 대표 힐링 관광명소 조성으로 동의보감촌 활성화 도모

❍ 「대한민국축제콘텐츠대상」“지리산산청곶감축제”는 축제경제부문(8년연속)“대상”을 수상하였으며, 또한 제16회 지리산산청곶감축제 4일간, 8만여명 방문, 990여백만원의 매출을 올려 성공적으로 개최 및 산청군 고향사랑기부제(시행일 : 2023. 1. 1.)홍보 강화 추진 등 지역경제 활력화 도모(840건, 57백만원)

❍ 산엔청쇼핑몰 및 신유통채널 구축 운영과 고속도로 상∙하행선 휴게소 로컬푸드 행복장터, 산엔청 마실장터 운영으로 판로의 다양화 및 유통경쟁력 강화

❍ 지방소멸 대응정책과 연계한 아이 키우기 좋은 여건 조성, 장애인에 대한 복지증진과 서비스 향상, 맞춤형 기초생활보장과 어르신 돌봄 서비스 확대, 경상국립대학교병원 내분비내과 교수진 진료 실시, 내과 전문의 채용으로 공공보건의료서비스 개선 등 남녀노소 맞춤형 복지 실현 및 양질의 보건 서비스를 제공

※ 2023년 상반기 기관(단체) 표창 현황

연번	훈 격	표 창 분 야	수상부서 (단체)	부 상	비 고
1	경상남도지사	2023년 세무행정 종합평가 (2022년 실적분)	재무과	1억원	우수
2	경상남도지사	2022년 시∙군 교통행정 평가	경제교통과	1억원	우수
3	경상남도지사	2023년 경상남도 지적측량경진대회	민원과		최우수
4	국토교통부장관	2023년 국토교통부 개최 지적측량경진대회	민원과		대상

□ 추진상황

구 분	추 진 실 적						비고
	계	완료	이행후계속추진	정상추진	장기추진	기타
계	71	4		59	8
군 수 공 약 사 업	57	3		50	4
주 요 시 책 사 업	14	1		9	4

※ 실과별 공약(시책) 추진실적 현황

71건 (14)	기획조정실 (총2건-공1,시1)	경제교통과 (총8건-공7,시1)	안전총괄과 (총3건-공3)	건설과 (총2건-공1,시1)	지역발전과 (총6건-공5,시1)	한방항노화과 (총3건-공2,시1)
	⦁정상추진 2 (공1, 시1)	⦁정상추진 6 (공5, 시1) ⦁장기추진 2 (공2)	⦁정상추진 3 (공3)	⦁정상추진 2 (공1, 시1)	⦁정상추진 5 (공4, 시1) ⦁장기추진 1 (공1)	⦁정상추진 3 (공2, 시1)
	문화체육과 (총4건-공3,시1)	관광진흥과 (총6건-공6)	산림녹지과 (총4건-공4)	주민복지과 (총1건-공1)	복지지원과 (총6건-공4,시2)	환경위생과 (총1건-공1)
	⦁정상추진 3 (공3) ⦁장기추진 1 (시1)	⦁정상추진 6 (공6)	⦁정상추진 4 (공4)	⦁완료 1 (공1)	⦁정상추진 6 (공4, 시2)	⦁정상추진 1 (공1)
	상하수도과 (총2건-공2)	보건정책과 (총2건-공1,시1)	건강관리과 (총2건-공2)	농축산과 (총10건-공9,시1)	농업진흥과 (총5건-공4,시1)	농식품유통과 (총4건-공1,시3)
	⦁정상추진 2 (공2)	⦁완료 2 (공1, 시1)	⦁정상추진 (공2)	⦁완료 1 (공1) ⦁정상추진 8 (공7, 시1) ⦁장기추진 1 (공1)	⦁정상추진 4 (공4) ⦁장기추진 1 (시1)	⦁정상추진 2 (공1, 시1) ⦁장기추진 2 (시2)

※ 완료사업(이행 후 계속추진 포함)

• 사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원(공)	• 내과 전문의 채용 추진(공)
• 대학병원급 의료기관과의 업무협약 체결(시)	• 농촌인력 중개센터 운영(공)

※ 장기추진사업

• 읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)(공)	• 산청시장 주상복합 신축(공)
• 도시재생 사업(옥산지구)(공)	• 래프팅과 연계한 레저 레포츠장 설립(시)
• 함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전(공)	• 딸기하우스 물 공급 시설 설치(시)
• 도정공장 설치(시)	• 택배 집하주차장 등 판로 시설 구축(시)

□ 주요성과

❍ 지역경제 활력사업 역점추진

- 제16회 지리산산청곶감축제 성공 개최

⦁「대한민국축제 콘텐츠대상」“지리산산청곶감축제”축제경제부문(8년연속)“대상”수상

⦁ 4일간, 8만여명 방문, 990여백만원 매출

- 산청군 고향사랑기부제(시행일 : 2023. 1. 1.) 홍보 강화 추진 등 지역경제 활력화 도모(840건, 57백만원)

- 농촌 고령화 및 인력수급 구축을 위한 농촌인력중개센터 운영(2023.3월)

- 농특산물 유통 경쟁력 강화를 위한 지원사업 강화

⦁ 산엔청쇼핑몰 운영 활성화 : 174개 농가, 637개 제품 참여

⦁ 신 유통채널 구축 : 고향사랑 기부제 농특산물 상품 발굴, 구독경제, 라이브커머스 운영

⦁ 고속도로 휴게소(상·하행선) 로컬푸드 행복장터 활성화 : 101개 농가 670개 제품 참여

⦁ 산엔청 마실장터 운영 활성화 : 15개 농가 42개 제품 참여

❍ 풍요로운 농업농촌 건설

- 산청한방약초밸리 분양추진 : 36필지(택지 34, 상가 2) / 4,400백만원

- 백도라지 지역특화작목단지 육성(2차년도) : 6농가, 1.5ha(25만주)

- 전략약초 및 한방약초안정생산 지원 : 31농가, 15종(10.9ha)

- 안전 농산물 생산·공급을 위한 GAP 인증 확대 : 경남도 1위(4년 연속)

- 대한민국 대표브랜드 연속 수상(산청 딸기, 곶감)

⦁「대한민국 대표브랜드」지역특산물 “곶감”부문에서 7년간“대표브랜드”선정

⦁「대한민국 대표브랜드」지역특산물 “딸기”부문에서 8년간“대표브랜드”선정

- 농업인 전문기술 교육 실시 등 역량강화를 위한『미래생명관』운영(연면적 2,117㎡)

⦁ 1층(토양검정실, 농산물안전분석실), 2층(농업인교육장, 정보화교육장), 3층(대강당, 향토음식체험장)

❍ 모두가 행복한 따뜻한 희망복지 실현

- 보훈가족과 사회복지사 등 안정된 삶 지원

⦁ 국가보훈대상자에 대한 지원 확대(월10만원→월18만원) 및 예우강화 제고

⦁ 사회복지사 등의 처우개선비(월3만원→월5만원) 인상

- 산청군 가족문화센터 위탁운영

⦁ 가족센터, 장난감도서관, 공동육아나눔터 운영, 생활문화센터 등

- 산엔청복지관 분관 준공 : 남부지역 주민의 복지 욕구 해소

⦁ 가족센터, 장난감도서관, 공동육아나눔터 운영, 생활문화센터 등

- 정부(도) 공모사업 선정

⦁ 문화취약지역 문화접근성 제고 등 지역문화 활력촉진 공모사업 선정(국비 50백만원)

(산청 특화 마당극 4작품 퍼레이드-효자전, 찔레꽃, 남명, 목화)

- 업무대행의사(내과 전문의) 확보로 공공보건의료서비스 개선

⦁ 진료 분야 운영 활성화를 통한 지역사회 양질의 보건 서비스 제공

- 인공관절 수술비 지원범위 확대

⦁군민의 경제적 부담 경감, 건강하고 활기찬 노후 생활 지원

❍ 다시 찾고싶은 관광산청 구현

- 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공 개최 지원 및 대한민국 대표 힐링 관광명소 조성으로 동의보감촌 활성화 도모

⦁ 한방웰니스지원센터 조성(3층, 634.2㎡) 및 웰니스헬스투어 활성화(90회, 5천여명)

- 산청축제관광재단 출범(2023.1.31.) : 제23회 산청한방약초축제 위탁시행

- 지리산터널(국도59호선 밤머리재 터널) 개통(2022.9.21.)으로 산청나들목 접근성을 높이고 기존도로와 유휴공간 활용 생태문화 체험공간 조성 재원 확보

⦁ 백두대간 V-힐링 스타트업로드 사업 및 메이플(단풍) 명품로드 사업 용역 추진

- 체류형 관광자원 기반 및 편의시설 확충

⦁ 팸투어 및 인센티브 제도 운영으로 체류형 관광 활성화 유도

⦁ 지리산 터널 개통에 따른 지리산권 관광개발 및 시설 인프라 구축

(중산관광지 활성화사업, 두류생태탐방로, 내대 출렁다리 개설 등)

⦁ 남사예담촌 인프라 구축사업 및 단계한옥마을 관광자원 개발사업 추진

⦁ 황매산 관광객 편의안전시설 및 자연휴양림 조성사업 추진

⦁「한방항노화 휴양체험지구 조성사업」실시계획승인 고시(2023.3.9.)

⦁ 유네스코 세계기록유산「동의보감」활용 홍보사업 추진(국비 660백만원)

⦁ 스마트 산청한의학박물관 구축사업 추진(국비 280백만원)

❍ 군민들의 행복한 삶을 위한 생활환경 조성

- 수도정비 기본계획(변경) 수립을 통한 지방상수도 공급구역 확장 및 하수처리시설 추진

⦁ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 공사 추진

⦁ 주민설명회를 통해 하수처리시설에 대한 이미지 제고 지역주민들의 갈등 완화

- 정부(도) 공모사업 선정

⦁ 4년 연속 신재생에너지 융복합지원사업(국비 1,374백만원) : 태양광 설치로 군민 연료비 부담 완화

⦁ 전기자동차 충전시설 설치지원 선정(국비 3,137백만원, 252대)

⦁ 6년 연속 취약지역 생활여건 개조사업 공모 선정(4,346백만원) 등 : 노후주택·담장 정비, 마을공동이용시설 리모델링 등(양촌, 상능, 신아마을)

⦁ 교통편익 향상을 위한 시군 교통행정 평가 우수 기관 선정(특별조정교부금 100백만원)

⦁ 평생교육 공모사업 선정(도비 30백만원) : 경제활동 참여 평생교육 지원사업

⦁ 시군 교육협력사업 공모 선정(도비 50) : 유휴공간 활용 리모델링 등 교육공간 조성

⦁ 우리동네파수꾼 공모사업 선정(도비 16백만원) : 마을 순찰활동을 통한 생활치안 확보

□ 반     성

❍ 안전불감증이 원인인 안전사고 지속 발생 및 재난 관련 초기대응 기능 강화 필요 등 종사자 안전보건 인식개선 및 실질적 위험 요인 제거

❍ 도시재생분야 도시정책 여건변화에 따른 예산 축소로 공모 선정 지구 감소와 옥산지구만의 특화재생 분야 발굴 미흡에 따른 공모 미선정

❍ 농업 기후변화 대응 시급한 숙원사업 파악하여 지원 방안 강구하고, 열악한 농업환경을 개선하여 안정적 소득향상 필요

❍ 그 외 장기 추진 사업들은 사업 대상지 변경, 행정절차 미이행, 토지보상 협의 애로, 예산 미확보, 상부기관 승인 지연 등의 사유로 사업추진이 장기화가 우려되며 공약사업ㆍ주요시책사업 추진에 대한 담당직원들의 다각적인 노력이 요구됨

□ 향후 추진계획

❍ 각종 사고에 신속하게 대응할 수 있는 생활밀착형 CCTV 스마트 시티 통합플랫폼 구현, 재난대응체계 구축으로 위기 대처 역량 강화 및 자연재난 취약 시설의 근원적 예방대책 추진, 스마트도시 기반 조성으로 안정적인 행정통신망 관리

❍ 도시재생 특화 분야 발굴 및 국비 예산 확보를 위한 다양한 노력 경주를 통한 공모사업 추진

❍ 농업 기후변화에 대비한 전략 재배작물 육성 확대 및 고소득 작물 스마트 4차산업 지원, 스마트팜 청년창업 교육시설운영 추진

❍ 향후, 정상 추진중인 사업들에 대해서는 사업별 추진일정에 차질 없도록 세부계획을 지속적으로 점검·관리하고, 예산확보 미흡 등으로 사업이  지연되는 장기 사업에 대해서는 필요한 예산확보를 위해 중앙부처 방문 등 유기적 협조 체제를 통해 적극적으로 노력

❍ 사업관련 담당 직원의 공약사업ㆍ주요시책사업에 대한 관심도 제고와 사업의 원활한 추진을 위해 업무 연찬, 교육 등 활성화 요구

기 획 조 정 실

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(기획조정실)

□ 총    평

❍ 공약사업 및 주요시책사업 2건 모두 정상추진 중이며, 주요사업 등에 대한 평가·피드백을 통해 행정의 역량과 수준 향상

❍ 군정 기획·조정·평가 기능을 강화하여 기획·평가의 내실화와 군정 조정을 통한 시책 발굴로 창의 군정 실현

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	2			2
군수공약사업	1			1
주요시책사업	1			1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 지자체간 화합 및 상생발전 도모를 위한 산청-진주 상생발전 10개 협력사업 추진(신규 3개, 기존 7개 사업)

❍ 산청의 비전과 문화∙관광∙산업 등을 반영한 종합 홍보 영상물 제작 완료로 대내∙외 홍보 적극 활용

□ 향후 추진계획

❍ 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 종합평가 상위권 달성을 위해 철저한 준비

❍ 민선8기 공약사업의 차질없는 추진 및 주요 현안사업 등 시책사업 지속적 추진으로 군정의 신뢰성 제고 강화

❍ 각종 공모사업 발굴 및 국도비 등 의존재원 전략적 확보 추진으로 재정여건 개선을 위한 예산확보 활동 강화

구 분	공약사업
담당부서	기획조정실(인구정책담당)
추진진도(%)	25%

1

지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진

❍ 지역 인구감소에 따른 지방소멸 위기에 대비하여 지방소멸대응기금을 확보 후 우리 군에 적합한 사업을 발굴·추진하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금9,600백만원(기금)

❍ 사 업 량 : 매촌지구 도시개발사업 외 6개 사업

- 매촌지구 도시개발사업	- 늘비 예술 창작센터 건립
- 산엔청 청년 베이스캠프 조성	지리산 산청 곶감 홍보판매장 건립
- 경호강 100리길 자전거 도로 개설	전통시장 소방 안전체계 구축
- 의료조합 찾아가는 마을 주치의 사업

❍ 사업내용

□ 그간 추진사항

❍ 2023년 지방소멸대응기금 확보 – B등급, 96억(7개사업)	: 2022. 7월
❍ 산청군 인구감소대응에 관한 조례 제정	: 2023. 4월
❍ 인구감소대응 5개년 기본계획 및 2023년 시행계획 수립	: 2023. 5월
❍ 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 수립	: 2023. 6월

□ 문제점 및 대책

(문제점)

❍ 인구감소에 대응하기 위한 기금 예산이 균등 배분이 아닌 지역별 평가에 따른 차등 배분으로 상위권 평가등급을 위한 예산확보 사업에 집중되어 지역소멸 위기에 대비할 우리 군 여건에 적합한 실질적 사업발굴이 어려운 실정

❍ 기금 예산이 편성되어 진행중인 사업의 경우 토지보상 협의 애로, 행정절차 이행에 따른 기간 소요 등의 사유로 집행실적 저조 및 사업추진 장기화 우려

(대책)

❍ 인구정책위원회, 컨설팅, 주민설문조사, 포럼 등을 통해 인구정책의 기본방향과 추진목표에 부합하는 우리 군에 적합한 사업 발굴 추진

❍ 집행 부진 사업은 세부계획을 지속적으로 점검⋅관리 및 지연되는 장기 사업에 대해서는 유기적 협조 체제를 통해 조기 이행 적극 추진 당부

□ 향후 추진계획

❍ 평 가	: 서면검토(7월), 현장방문(8월), 대면평가(8월), 종합평가(9월)
※ 평가배분금액 : S등급 144억, A등급 112억, B등급 80억, C등급 64억

구 분	시책사업
담당부서	기획조정실(인구정책담당)
추진진도(%)	100%

2

인구감소에 대한 대책 마련

(청년주거자금 대출 이자 지원사업 등)

❍ 청년층 출산가정, 신혼부부, 전입세대의 주거비 부담 완화 및 안정된

정주 여건 조성으로 인구감소 문제 해결과 군민 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

❍ 사 업 비 : 금45백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 출산가정 ‧ 신혼부부 ‧ 전입세대 각 15건

(출산가정 1,500천원, 신혼부부 1,000천원, 전입세대 500천원)

❍ 사업내용

- 사업대상 : 관내 3개월 이상 주소를 둔 만 19세이상 ~ 만 45세 이하 청년

- 지원내용 : 주거자금(주택 신축‧구입‧임차) 대출 잔액의 1.5%이내

□ 그간 추진사항

❍  2023년 상반기 청년 주거자금 대출이자 지원사업 신청 안내 공고 : 2023.  5월

❍  2023년 상반기 지원사업 대상자 선정 및 지원금 지급                : 2023.  6월

※ 12건, 12,582천원 (출산가정 7건, 신혼부부 3건, 전입세대 2건)

□ 향후 추진계획

❍ 2023년 하반기 청년 주거자금 대출이자 지원사업 신청 안내 공고  : 2023.  9월

❍ 2023년 하반기 지원사업 대상자 선정 및 지원금 지급              : 2023.  10월

경 제 교 통 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(경제교통과)

□ 총    평

❍ 공약 및 주요시책사업 8건은 전반적으로 정상 추진되고 있으며, 매년 연차적으로

사업추진이 진행됨에 따라 그 성과를 지속적으로 나타내고 있음

❍ 산청시장 주차장 조성사업, 단계시장 장옥 정비공사 등은 효율적인 사업

계획 추진에 따라 일부 추가 예산 투입이 필요함

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	8			6	2
군수공약사업	7			5	2
주요시책사업	1			1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 소재지권 주차난 해소를 위한 산청시장 주변 공영주차장 조성사업

→ 2022년 국토교통부 주차환경개선사업 선정(균특 1,741백만원 확보)

❍ 브라보 한방택시 운영 확대와 개선을 위한 재원 확보

→ 예산액 390백만원(국비 260백만원, 도비 130백만원)

❍ 단계시장 활성화를 위한 시설현대화(장옥 정비) 사업

→ 2022년 균특 지방전환사업(도자율) 선정(도비 576백만원 확보)

□ 반    성

❍ 공약 및 주요시책사업의 대부분이 많은 재원 확보, 복잡한 사전 행정절차       이행 등이 필요한 사업으로 조기 추진 및 성과 도출이 일부 미흡함

□ 향후 추진계획

❍ 행정력을 집중하여 사전 행정절차 조기 이행 및 성과 도출 추진

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(교통정책담당)
추진진도(%)	30%

3

읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)

○ 읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)를 위한 주차장 확충으로

군민의 불편 해소 및 교통복지 서비스 확대

□ 주차장 조성 현황(2022. 12월 기준)                (단위 : 대, 개소, 면)

구 분	자동차 등록대수	주차장 종류별				주차장 확보율
		계	노상주차장	노외주차장	부설주차장
개소	21,870	928	17	180	731
면수		9,812	387	5,468	3,957	44.86%

□ 사업개요

❍ 단기사업【산청시장 주변 공영주차장 조성사업(국토교통부 주차환경개선사업)】

- 사업위치 : 산청군 산청읍 산청리 237외 6필지

- 사 업 비 : 금4,433백만원(균특 1,741, 군비 2,692)

- 사업내용 : 공영주차장 조성 1식(A=2,714㎡)

❍ 장기사업

- 중앙 및 도의 각종 지원사업 공모 신청 등을 통해 국·도비를 확보하여 소재지권 주차장 확충 방안 강구

- 타 부서와의 긴밀한 협조체계 구축 및 공공사업 추진과 연계하여 주차장 확충
(예: 건설과의 마을별 다목적광장 조성사업)

□ 추진사항

❍ 지방재정투자심사, 공유재산 관리계획 심의	: 2021. 1. ~ 2월

❍ 토지소유자 보상 협의(16회) 및 보상 완료	: 2022. 10월

❍ 토지세입자 보상 협의 및 보상 완료	: 2023.  3월

❍ 주차장 조성을 위한 지장물 철거 공사, 폐기물 처리 용역 등 완료 : 2023.  6월

□ 문제점 및 대책

❍ 산청시장 주변 공영주차장 조성사업의 경우 기존 주차장, 가로등, 녹지

공간 등을 확충하기 위한 추가 재원 확보 필요

❍ 읍면 소재지권의 주차장 조성에 따른 많은 사업비 투입 예상 → 중앙

정부 및 도의 각종 공모사업 신청 등을 통해 재원 확보 추진

□ 향후 추진계획

❍ 산청시장 주차장 조성사업 추가 예산 반영 : 2023년 제2회 추경

❍ 중앙정부와 도의 공모사업 및 자체 공공사업 등을 통한 주차장 확충율 제고

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(일자리창출담당)
추진진도(%)	30%

4

사회적기업 및 마을기업 창업지원

○ 우리군의 지역자원을 활용하면서 일자리 등 사회문제를 해결하는 (예비)사회적기업 및 마을기업 육성을 위하여 창업 비용의 일부를 지원

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 산청군 관내 소재 (예비)사회적기업, 마을기업

❍ 소요예산 : 금270백만원(군비) ※ 2023년 60백만원

❍ 사 업 량 : 총 6개소(연간 2개소×3개년)

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2025년(3년간)

❍ 사업내용 : 창업시 소요되는 비용 중 30백만원 범위내 지원

- 리모델링비, 사업개발비, 홍보비, 재료비, 포장박스비, 교육훈련비 등

❍ 지원절차 : 모집공고 → 접수 → 위원회 심의·선정 → 사업시행 → 정산

□ 추진사항

❍ 계획수립[3개년 사업]	: 2022. 7월

❍ 2023년 사업대상 모집공고	: 2023. 2월

❍ 2023년 사업대상 선정 및 시행(사회적기업 2개소)     : 2023. 3월

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 업종 및 분야와 중복되지 않는 새로운 기업 발굴 애로

❍ 지역경제 일자리 창출로 연계되도록 활용방안 강구 필요함

□ 향후 추진계획

❍ 사업완료에 따른 보조금 정산	: 2023. 7월

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(지역경제담당)
추진진도(%)	50%

5

전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축

○ 장보기, 라이브커머스 행사 등의 경제 플랫폼 구축을 통해 코로나19 장기화 및 경기침체로 약화된 전통시장을 활성화하여 지역경제 발전에 기여하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 전통시장 일원

❍ 사 업 비 : 금243백만원(군비) ※ 2023년 금105백만원(도비 8, 군비 97)

❍ 사 업 량 : 산청군 전통시장 6개소

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년(4년간)

❍ 사업내용 : 전통시장 소비촉진 도모 행사(장보기 행사, 온누리상품권 환급,                   소비촉진 이벤트 등)

□ 추진사항

❍ 설날 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사    : 2023. 1월

❍ 봄철 온누리상품권 환급행사	: 2023. 3월

❍ 모바일 산청사랑상품권 경품행사(1차)             : 2023. 5월

❍ 전통시장 장날 공연행사	: 2023. 5. 1. ~ 10.

❍ 봄맞이 전통시장 라이브커머스 추진	: 2023. 5. 1. ~ 10.

❍ 온/오프라인 프로모션을 통한 내수활성화 추진     : 2023. 6. 20. ~ 7. 6.

❍ 전통시장 온누리상품권 환급행사	: 2023. 6월

□ 문제점 및 대책

❍ 대형 마트 등의 영향으로 어려운 전통시장의 활성화를 위한 다양한 행사(환급, 경품 등) 필요

□ 향후 추진계획

❍ 모바일 산청사랑상품권 경품행사(2차)             : 2023. 7월

❍ 모바일 산청사랑상품권 경품행사(3차)             : 2023. 9월

❍ 추석 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사	: 2023. 9월

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(교통정책담당)
추진진도(%)	70%

6

브라보 한방택시 운영 확대와 개선

개선차장 확보)

○ 브라보 한방택시 운행 대상마을 선정기준을 완화하여 마을주민의

이동권 보장을 확대하고 교통복지 증진 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

❍ 대상마을 : 산청군 전읍면 69개 마을(농어촌버스 미운행 마을)

❍ 운행구간 : 마을회관 ~ 생활권 소재지

❍ 사 업 비 : 금2,680백만원(국비 1,280, 도비 640, 군비 760) ※ 2023년 520백만원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년(4년간)

❍ 사업내용 : 개인별 배부된 이용권으로 한방택시 이용

□ 추진사항

❍ 브라보 한방택시 최초 시행	: 2015.  1월

❍ 10개면 62개 마을 확대 추진	: 2019.  7월

❍ 임산부 한방택시 시행(인구정책사업 일환)	: 2021.  3월

❍ 한방택시 운행 대상마을 선정기준 완화	: 2022. 12월

- 마을회관~버스승강장 거리를 1㎞이상 → 0.7㎞이상으로 규정 개정 완화

❍ 대상마을 확대 추진 (5개마을 추가 승인)          : 2023. 1. ~ 6월

□ 문제점 및 대책

❍ 국·도비 감축 편성으로 예산확보 애로 → 군비 추가 편성 필요

□ 향후 추진계획

❍ 운영 확대와 개선을 위해 점차적으로 대상마을 선정기준을 완화하여       교통편의 수요에 적극 대응

구 분	공약사업/시책사업
담당부서	경제교통과(일자리창출담당)
추진진도(%)	30%

7

지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성

○ 대한민국 대표 우수 마을기업 모델링을 통한 지원으로 지역 자원을       활용한 수익사업으로 주민 소득과 일자리를 창출에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 경상남도, 행정안전부에서 지정한 마을기업(5개소)

❍ 소요예산 : 금150백만원(군비) ※ 2023년 50백만원

❍ 사 업 량 : 총 6개소(연간 2개소 × 3개년)

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2025년(3년간)

❍ 사업내용 : 25백만원 × 2개소

- (인건비) 1인당 연 2,400만원(월 200만원 한도, 자부담 10%이상) 지원

❍ 지원절차 : 모집공고 → 접수 → 위원회 심의·선정 → 사업시행

□ 추진사항

❍ 계획수립[3개년 사업]	: 2022. 7월

❍ 2023년 사업대상 모집공고	: 2023. 2월

❍ 2023년 사업대상 선정 및 시행(마을기업 2개소)      : 2023. 3월

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 업종 및 분야와 중복되지 않는 새로운 마을기업 발굴 애로

❍ 영세한 소규모 마을기업으로 인력 채용에 어려움이 많음

□ 향후 추진계획

❍ 지속적인 사업장 관리 및 지도                     : 2023. 3. ~ 12월

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(지역경제담당)
추진진도(%)	20%

8

단계시장 활성화 방안 마련

○ 안전하고 쾌적한 시장환경 조성으로 이용객이 편리하게 접근할 수

있도록 함으로써 단계시장의 활성화 및 지역경제 발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면 단계시장 일원

❍ 소요예산 : 금2,641백만원(도비 576, 군비 2,065)

- 시설 현대화사업 : 960백만원(도비 576, 군비 384)

- 주차장 조성사업 등 : 1,681백만원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026(4년간)

❍ 사업내용 : 시설현대화사업(장옥 정비), 주차장 조성사업(A = 2,350㎡)

단계시장 활성화 사업(장보기, 페이백 행사 등)

□ 추진사항

❍ 주차장 대상지의 보상협의 및 감정평가 실시	: 2023. 1월 ~

❍ 시설현대화사업 실시설계 용역	: 2023. 4월

❍ 주차장 대상지 소유자와 협의보상 완료(2건)       : 2023. 4. ~ 6월

❍ 시설현대화사업 실시설계 용역 완료	: 2023. 6월

❍ 주차장 대상지 소유자와 협의보상 추진 중(2건)    : 2023. 6월 ~

□ 문제점 및 대책

❍ 토지소유자와 보상협의가 어려우나 지속적인 소통과 설득을 통한 협의 추진

❍ 시설현대화사업의 경우 시장 종사자와 협의시 신축을 통한 정비를 희망하여       이에 따른 사업비 부족으로 추가 예산 확보 필요함

□ 향후 추진계획

❍ 시설현대화사업(장옥 정비) 추가 예산 반영       : 2023년 제2회 추경

❍ 단계시장 활성화 사업 추진                     : 2023. 2월 ~

❍ 주차장 대상지의 보상협의 및 실시설계          : 2023. 7월 ~

❍ 장옥 정비에 따른 임시 장옥 설치               : 2023. 9월

❍ 시설현대화사업 및 주차장 조성사업 착공 및 준공  : 2023. 9. ~ 12월

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(지역경제담당)
추진진도(%)	20%

9

산청시장 주상복합 신축

○ 「산청시장 주상복합 신축」사업 추진으로 노후화되고 경쟁력이 약화된 산청시장의 지역상권 활성화 및 부족한 주거 공간 확보

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 산청시장 일원

❍ 사업기간 : 2022. 9월 ~

❍ 사 업 비 : 총사업비(미정) ※ 타당성 조사용역비 65백만원

❍ 사업내용 : 산청시장 주상복합 신축사업

□ 추진사항

❍ 추진계획 수립                                  : 2022.  7월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2022.  9월

❍ 추진위원회 구성	: 2022. 10월

❍ 타당성 조사 용역 과업기간 변경	: 2023.  3월

❍ 타당성 조사 용역 중간보고	: 2023.  4월

□ 문제점 및 대책

❍ 보상금, 건축비 등 사업비 과다 예상, 사업 시행방안 검토 필요

→ 민간투자, 국·도비 등 재원 조달 방안 모색

□ 향후 추진계획

❍ 타당성 조사 용역 최종 보고회	: 2023.  7월

❍ 주민설명회 등 사전 행정절차 이행	: 2023.  7. ~ 10월

❍ 추진방향 설정 및 재원 조달 방안 모색	: 2023. 10. ~ 12월

구 분	시책사업
담당부서	경제교통과(지역경제담당)
추진진도(%)	18%

10

한방항노화일반산업단지 투자유치 활성화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 평촌리 976번지 일원

❍ 사 업 량 : 108,212㎡, 34필지(산업시설 16, 복합시설 5, 지원시설 10, 주차장 3)

❍ 조성원가 : 산업시설 164천원/㎡, 복합용지 173천원/㎡

❍ 유치업종 : 한방식음료, 한방의료·미용 관련업종

❍ 사업시행자 : 경남개발공사(공영개발)

❍ 10개 업체 MOU체결(‘18. 3월 최종 전체 포기)	: 2016. 3월
❍ 강남구 한의사회 및 기업체 대표 분양 홍보	: 2019. 1월
❍ (주)도전과 사람 타깃업체 분양 활동(中國 중타이그룹 방문)	: 2019. 3월
❍ 산업단지 준공인가 산청군 홈페이지 분양홍보 배너 게재	: 2019. 10월
❍ 산업단지 투자유치 관계기관 간담회(경남도, 산청군, 경남개발공사)	: 2020. 3월
❍ 5개 지방지 산업단지 분양광고 게재	: 2020. 6월
❍ 투자유치 전략회의(경남도, 산청군, 창원시, 김해시, 양산시 등)	: 2020. 10월
❍ 기업투자촉진지구 지정	: 2021. 4월
❍ 복합용지 업종배치 확대 관리기본계획 변경고시	: 2021. 9월
❍ 산업단지 투자유치 관계기관 간담회(경남도, 산청군, 경남개발공사)	: 2022. 9월
❍ 공공폐수처리시설 비용부담계획 승인 신청	: 2022. 10월
❍ 산업단지 투자유치 관계기관 간담회(경남도, 산청군, 경남개발공사)	: 2022. 12월
❍ 공공폐수처리시설 비용부담계획 승인(낙동강유역환경청)	: 2023. 1월

□ 추진사항

□ 문제점 및 대책

❍ 경기침체에 따른 기업 투자의지 저하 및 높은 분양원가로 인한 입주희망 기업 유치 난항

❍ 투자촉진지구 보조금 지원제도 적극 홍보 및 유치 업종 확대

□ 향후 추진계획

❍ 공공폐수처리시설 운영 및 비용부담 조례 제정 : 2023년 하반기

❍ 경남도, 경남개발공사와의 지속적 협력을 통한 투자유치 방안 모색 및 활동 전개

안 전 총 괄 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(안전총괄과)

□ 총    평

❍ 생활안전 인프라 및 안전문화 확산으로 생활안전 수준 향상 및 코로나19 재난대책본부, 재난안전상황실 상시 운영으로 재난안전관리체계 구축

❍ 현업근로자 교육, 위험성 평가 등을 통해 중대재해 예방․감축을 위한 안전보건관리체계 구축

❍ 전 마을 재난□재해 조기 예□경보 시스템 구축으로 주민의 생명과 재산 보호를 실천하고, 취락마을 주민들의 소외감 해소 및 애향심 고취

❍ 분산 운영 중인 CCTV의 효율적인 관리 및 각종 사고에 신속하게 대응할 수 있는 생활밀착형 CCTV 스마트 시티 통합 플랫폼 구현

□ 추진상황

구 분	추진실적(3건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	3			3
군수공약사업	3			3
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 대한민국 안전 大전환을 위한 집중안전점검 실시로 재난취약 시설 101개소  사전 점검하여 위험요인 발굴․해소 및 국민 안전의식 제고

❍ 매월 4회씩 현업근로자 정기교육 실시 등 적극적인 중대재해예방·감축  활동의 결과로 올해 산업재해 발생 건수 대폭 감소

(1건, 지난해 11건  대비 10건 감소)

❍ 재해발생 우려가 있는 지역에 조속한 재해예방사업 추진으로 주민의 생명과 재산을 보호하고 안전한 주거 환경을 조성(공사 6건, 설계 5건)

❍ 통합플랫폼을 경상남도사회안전망과 연계구축하여 각종 사건사고 발생 시 긴급 대응체계 구축

□ 반    성

❍ 안전수칙 미 준수, 안전불감증이 원인인 안전사고 지속 발생

❍ 중대재해예방·감축을 위한 다양한 홍보·계도 방법 모색 필요

□ 향후 추진계획

❍ 산청군 재난상황실 365일, 24시간 운영을 통해 위험상황 인지․보고 등

초기 상황관리 및 현장 대응 추진

❍ 2023년 상․하반기 산청군 중대재해예방 의무이행 점검 및 개선 추진

❍ 집중호우 등 각종 재난 발생시 신속한 상황전파로 재난 선제적 대응 및 인명피해 예방

❍ 각종 범죄의 사전 예방과 신속한 검거를 위한 노후 및 저화질 카메라 우선 교체 추진

구 분	공약사업
담당부서	안전총괄과(관제통신담당)
추진진도(%)	70%

11

무선 공공 인터넷망 구축사업

○ 동의보감촌 등 산청군 주요 관광지 및 다중이용시설에 무선 인터넷 서비스망을 구축하여 지역주민과 관광객들에게 편의 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 내 주요 관광지 및 다중이용시설

❍ 사 업 비 : 금100백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 동의보감촌 내 10개소

❍ 사업내용 : 사업 목적에 부합하는 주요 관광지를 선정하여 무선인터넷 연결장치	(AP) 등 인프라 구축 및 운영, 안내표지판 설치, 유지·보수 등 실시

□ 추진사항

❍ 엑스포 행사장 내 위치선정 및 현장조사       : 2023. 5월

❍ 세부사항 설계                               : 2023. 6월

□ 문제점 및 대책

❍ 공공와이파이 특성상 누구나 이용할 수 있으므로, 한꺼번에 많은 사용자가

접속할 경우 속도가 느려지고, 잦은 끊김이 생겨 사용자들의	불만 발생

→ 엑스포 행사장 내 인원이 많이 모일 것으로 예상되는 구역 고성능기기

설치 및 이전 설치

□ 향후 추진계획

❍ 동의보감촌 내 공공와이파이 10개소 설치     : 2023. 8월 완료 예정

구 분	공약사업
담당부서	안전총괄과(관제통신담당)
추진진도(%)	80%

12

방범CCTV 설치사업

○ 농축산물 도난 등 지역에서 발생하는 각종 범죄 예방과 신속한 검거를      위하여 방범CCTV를 설치하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 상촌리 외 66개소

※ 범죄 해결 및 예방효과 극대화 할 수 있는 장소 우선 설치

❍ 사 업 비 : 금580백만원(국비 500, 도비 24, 군비 56)

❍ 사 업 량 : 신규 51대, 교체 14대

❍ 사업내용 : 생활방범 신규 47대, 교체 7개소 7대, 지능형CCTV(4개소 4대),

노후 차량방범CCTV 교체: 7개소 7대,

□ 추진사항

❍ 지능형CCTV(4개소 4대)                : 2023. 6월 완료

❍ 노후 차량방범CCTV 교체(7개소 7대)    : 2023. 6월 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 생활방범 신규 47대, 교체 7개소 7대      : 2023. 7월 완료 예정

구 분	공약사업
담당부서	안전총괄과(자연재난담당)
추진진도(%)	20%

13

취락마을 방송용 스피커 설치

○ 집중호우 등 각종 재난으로부터 주민을 보호할 수 있는 환경 조성이

필요하며, 재난상황 등 신속한 전파로 재난의 선제적 대응 및 인명피해 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 취락마을 일원

❍ 사 업 비 : 금800백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 40여개 취락마을 방송장비 설치 1식

- 40개마을 X 20백만원 = 800백만원

❍ 사업내용 : 가정용 마을 송□수신기 및 마을방송 송신기 설치

□ 추진사항

❍ 23년도 본예산 편성 요구 및 편성             : 2022.  9월

❍ 계약방법 검토 등 행정절차 이행              : 2023.  3월

❍ 구매계획 및 구축사업 시행                   : 2023. 4. ~ 5월

□ 향후 추진계획

❍ 2023년 가정용 무선방송장치 구축사업 준공    : 2023.  7월

❍ 2024년도 본예산 편성 요구                   : 2023.  9월

❍ 연차별 가정용 무선방송장치 구축 추진         : 2024. 1. ~ 2026. 12월

건  설  과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(건 설 과)

□ 총    평

❍ 교차로의 개선 및 국도의 위험구간을 개선하여 주민들의 도로 이용 불편 개선 및 지역간 교통 수요 증가로 관광 활성화 및 지역발전 기대

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	2			2
군수공약사업	1			1
주요시책사업	1			1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 2020년부터 추진된 원지교차로 개선 및 함양~울산간 고속도로 연계(차황~신원) 도로선형개량 사업 시행을 통하여 주민 도로 이용 불편 해소 및 고속도로 연계 도로망 구축으로 지역간 교통 수요 증가로 관광 활성화 및 지역발전 기대

❍ 사업시행을 위한 보상협의 등 필요한 행정절차 진행, 도로 개선 및 확포장에 따른 사업비 5,190백만원(국비) 확보

□ 향후 추진계획

❍ 행정력을 집중하여 사업준공 조기이행 및 성과 도출 추진

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	25%

14

원지교차로 개선사업

○ 국도3호선 개통 이후 산청군 신안면 중촌리 구간을 이용하는 주민들이 진․출입 램프가 없어 도로를 우회하는 불편을 겪고 있어 교차로 개선이 시급함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 중촌리 일원

❍ 사 업 비 : 금1,800백만원(국비)

❍ 사 업 량 : 교차로 개선(진주방향) L=320.0m

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

□ 추진사항

❍ 국도3호선 산성교차로 개설건의(산청군→국토교통부)     : 2018. 11월

❍ 제6차(2018~2022년) 국도시설개량(병목지점) 사업 반영   : 2019.  4월

❍ 실시설계용역 착수 및 완료                           : 2020.  3월

❍ 사업추진 주민설명회 개최                            : 2020. 11월

❍ 사업착공                                            : 2023.  1월

□ 문제점 및 대책

❍ 편입부지에 대한 보상협의 및 행정절차 추진 시 조기 완료를 위하여 산청군 행정지원 계획

□ 향후 추진계획

❍ 사업준공                                            : 2025. 12월

구 분	시책사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	70%

15

함양~울산간 고속도로 도로망 구축

○ 산청군과 거창군 경계를 연결하는 국도59호선의 위험구간 개선을 통해 함양~울산간 고속도로 연계 도로망을 구축하여 지역간 교통 수요 증가로 관광 활성화 및 지역발전 기대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 장박리 일원

❍ 사 업 비 : 금3,390백만원(국비)

❍ 사 업 량 : 위험도로 선형개선 L=1.32km

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2023년

□ 추진사항

❍ 위험도로 개선사업 반영                              : 2019.  4월

❍ 실시설계용역 착수                                   : 2019.  6월

❍ 사업착수(경상남도 도로관리사업소 진주지소)           : 2020.  4월

❍ 편입부지 보상협의 시행                              : 2020. 10월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 사업준공                                           : 2023. 12월

지 역 발 전 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(지역발전과)

□ 총    평

❍ 지역발전과는 5건의 군수공약사업과 1건의 주요시책사업을 추진중이며,

행정절차 지연 및 민원 발생 등으로 사업 추진에 어려움은 있으나,

❍ 농림축산식품부 주관 공모사업 선정으로 우리군의 재정확충에 기여,

유해시설 정비를 통한 군민의 정주환경 개선에 앞장서고 있음

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	6			5	1
군수공약사업	5			4	1
주요시책사업	1			1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 농림축산식품부 주관 2022년 농촌공간정비 공모사업 최종 선정

- (농촌개발담당) 농촌공간(모례지역 돈사철거) 정비사업

❍ 2023년, 2024년 취약지역 생활여건개조사업 공모사업 최종 선정

- (투자유치담당) 생비량면 상능, 차황면 양촌, 금서면 신아마을

❍ 군수공약사업 및 주요시책사업 정상 추진 중

□ 반    성

❍ [도시재생 뉴딜사업(옥산지구)] 도시재생분야 예산축소로 공모 선정 지구 감소와 옥산지구 특화재생 분야 발굴 미흡에 따른 공모 미선정

□ 향후 추진계획

❍ [도시재생 뉴딜사업(옥산지구)] 특화재생 분야 발굴 및 국비 예산 확보를

위한 다양한 노력 경주를 통한 공모사업 추진

❍ (매촌지구 택지개발로 대형아파트 유치) 도시개발구역 지정 및 개발계획

수립을 위한 행정절차 이행 후 실시계획 착수 예정

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(도시재생담당)
추진진도(%)	10%

16

도시재생 사업(옥산지구)

○ 낡고 쇠퇴한 원도심의 주거 안정과 새로운 성장동력 확보

○ 주거환경 정비사업 외 도시를 재활성화 시켜 경쟁력을 높이는 도시혁신사업으로 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리·지리 일원

❍ 사업기간 : 2025 ~ 2028년

❍ 사 업 비 : 금17,500백만원(국비 10,500, 도비 1,400, 군비 5,600)

❍ 사 업 량

- 산청시장 골목상권 활성화 및 약선생활문화 육성·지원

- 주거환경 개선 및 골목 정비, 주민 소득증대 사업 추진

□ 추진사항

❍ 2022년도 공모사업 추진(미선정)               : 2022. 12월

❍ 사업자 선정을 위한 절차 이행                : 2023.  6월

□ 문제점 및 대책

❍ 정부 정책 및 여건 변화에 따른 공모사업 대상 선정 및 예산 규모 축소

❍ 과년도 미선정에 따른 재추진으로 사업자 선정 어려움

❍ 사업 선정을 위한 다양한 노력 경주

□ 향후 추진계획

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 사업자 선정    : 2023.   6월

❍ 2023년도 공모사업 추진 및 재신청            : 2023.   9월

❍ 공모사업 결정                               : 2023.  12월

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(도시재생담당)
추진진도(%)	5%

17

대형아파트 유치

○ 도시의 난개발 방지와 체계적인 도시개발을 통한 쾌적한 정주환경 조성

○ 기반시설 확충으로 주민의 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 산58번지 일원

❍ 소요예산 : 금21,035백만원(공사비 9,535, 보상비 4,400, 기타비용 7,100)

※ 아파트 공사비 별도

❍ 사업내용 : 도시개발사업(A=47,320㎡)

❍ 사업규모 : 1,003명/401세대 (공동주택 390세대, 단독주택 11세대)

❍ 시행방식 : 수용 또는 사용방식(민간개발사업으로 추진)

❍ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2024. 12월(구역지정일로부터 4년 6개월)

□ 세부추진계획

❍ 하정지구 도시개발구역 지정 제안 및 수용             : 2018. 11월

❍ 하정지구 도시개발구역 지정 및 지형도면 고시(경상남도)  : 2020.  6월

❍ 실시계획인가 고시(경상남도)                          : 2022.  1월

❍ 도시개발사업 준공                                   : 2024. 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 민간 개발사업으로 자금조달 및 원활한 토지 수용 협의 어려움

❍ 원활한 사업추진을 위한 행정적 지원 및 지도 철저

□ 기대효과

❍ 도시개발을 통한 기반시설 확충 및 도시지역 확장으로 지역경제 활성화

❍ 도시지역의 택지난을 해소하고 인구 유입 증대에 기여

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(농촌개발담당)
추진진도(%)	30%

18

농산어촌 주거플랫폼 사업

○ 모든 세대를 고려한 계층별 맞춤형 활동기반 구축으로 정주여건을

개선하고 중심지와 배후마을 간 문화복지 서비스 전달체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 소재지 내

❍ 사 업 비 : 금16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)

❍ 사업내용 : 어울림문화센터 조성(2,268㎡/3층) 및 청소년 문화의 집 조성

배후마을 공동이용시설, 원지 어울림마당, 보행 및 교통환경 개선

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12월

□ 추진사항

❍ 기본계획 수립 착수                          : 2020.  5월

❍ 기본계획 수립 완료                          : 2022.  2월

❍ 시행계획 수립 착수                          : 2022.  7월

□ 문제점 및 대책

❍ 정상추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 시행계획 수립 완료                          : 2023.  9월

❍ 공사 착수                                   : 2023. 11월

❍ 공사 완료                                   : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(농촌개발담당)
추진진도(%)	10%

19

농촌공간(모례지역 돈사철거) 정비사업

○ 악취문제로 민원이 지속적으로 제기되고 있는 지구의 유해시설을

정비하고 공간을 활용함으로써 정주여건을 개선하고 지역발전을 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면 모례리 95번지 일원

❍ 사 업 비 : 금25,000백만원(국비 12,500, 도비 3,750, 군비 8,750)

❍ 사업내용 : 돈사 및 축사철거 4개소(용호농장, 삼현목장, 철원농장, 광남농장)

귀농·귀촌 임대주택 등 주거단지 조성 및 경관인프라 조성

❍ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2026. 12월

□ 추진사항

❍ 공모사업 선정                               : 2022.  6월

❍ 주민위원회 구성 및 한국농어촌공사 협약 체결 : 2022. 10월

❍ 기본계획 수립 착수 및 보상협의 추진         : 2023.  1월

□ 문제점 및 대책

❍ 년차별 예산 확보로 인해 일괄보상이 어려워 2023년도 2개소(용호농장,

삼현목장), 2024년도에 2개소(철원농장, 광남농장) 보상 집행 계획임

□ 향후 추진계획

❍ 기본계획 수립 완료                        : 2023.  9월

❍ 시행계획 수립                             : 2023. 11. ~ 2024. 12월

❍ 공사 착수                                 : 2025.  3월

❍ 공사 완료                                 : 2026. 12월

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(농촌개발담당)
추진진도(%)	10%

20

어린이 놀이마당 조성

○ 소재지 내 다목적 휴게 및 여가 공간을 마련하고 어린이 놀이마당을

조성함으로써 주민 편의를 증진하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 일원

❍ 사 업 비 : 금400백만원(국비 280, 도비 36, 군비 84)

❍ 사업내용 : 부지조성 및 주차공간 정비, 휴게시설물 및 조경 식재

어린이 놀이마당 조성

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12월

□ 추진사항

❍ 기본계획 수립 착수                          : 2022.  7월

❍ 의견수렴을 위한 주민토론회 개최             : 2022.  9월

□ 문제점 및 대책

❍ 시천면 농촌중심지활성화사업 내 포함된 사업으로 기본계획 및 시행계획 수립 등 절차이행에 따른 시일이 소요됨에 따라 사업착수 지연

□ 향후 추진계획

❍ 기본계획 수립 완료                        : 2023.  8월

❍ 시행계획 수립                             : 2023. 10. ~ 2024. 10월

❍ 공사 착수                                 : 2025.  1월

❍ 공사 완료                                 : 2025. 12월

구 분	시책사업
담당부서	지역발전과(농촌개발담당)
추진진도(%)	10%

21

매촌지구 택지개발로 대형아파트 유치

○ 도시기반구역 확충과 귀농·귀촌자들에게 안정적인 택지를 공급

함으로써 인구유입 증대를 기대하고 부동산 가격 안정화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 615-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 금18,000백만원(군비)

❍ 사업내용 : 대지조성 A=75,838㎡(계획인구 794명/단독49세대, 공동312세대)

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2026. 12월

□ 추진사항

❍ 도시개발구역지정 및 실시설계용역 착수       : 2020.  4월

❍ 경상남도 경관위원회 심의 완료               : 2022.  6월

❍ 경상남도 도시계획위원회 심의 완료           : 2023.  2월

❍ 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시     : 2023.  5월

□ 문제점 및 대책

❍ 도시개발구역 지정 및 실시계획인가 등 행정절차 이행에 따른 사업착수 지연

□ 향후 추진계획

❍ 실시설계 완료 및 실시계획 인가              : 2024.  3월

❍ 공사 착수                                   : 2024.  6월

❍ 공사 완료                                   : 2026. 12월

한 방 항 노 화 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(한방항노화과)

□ 총    평

❍ 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 차질 없는 개최 준비로 ‘한방성지 산청’ 재도약 기반 마련

❍ 산청축제관광재단 출범으로 전문성을 바탕으로한 제23회 산청한방약초

축제 성공개최 지원

❍ 동의보감촌 주제관 및 야외전시시설 리뉴얼, 각종 편의시설 정비·확충, 체험

프로그램 개발·운영 등 2023 산청엑스포 성공개최 지원 및 동의보감촌 활성화

❍ 우리 군 실정에 맞는 전략약초 육성지원체계 구축으로 농가소득 증대

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	3			3
군수공약사업	2			2
주요시책사업	1			1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 차질없는 준비 및 성공개최 지원

- 엑스포 실행계획 및 종합운영계획 수립, 홍보 및 관람객 유치활동 등

- 엑스포 주제관 및 야외전시시설 리뉴얼 : 2,779백만원

- 동의보감촌 관광체험시설 및 편의시설 확충 : 4,202백만원

❍ 산청축제관광재단 출범(2023.1.31.) : 제23회 산청한방약초축제 위탁시행

❍ 한방약초산업특구, 경남유일 ‘우수’ 특구 선정(2년연속, 포상금50,000천원)

❍「한방항노화 휴양체험지구 조성사업」실시계획승인 고시 : 2023. 3. 9.

❍ 산청한방약초밸리 분양추진 : 36필지(택지 34, 상가 2) / 4,400백만원

❍ 한방웰니스지원센터 조성(3층, 634.2㎡) 및 웰니스헬스투어 활성화(90회, 5천여명)

❍ 백도라지 지역특화작목단지 육성 : 14농가, 3.1ha(50만주)

❍ 전략약초 및 한방약초안정생산 지원 : 62농가, 31종(22.1ha)

❍ 스마트 산청한의학박물관 구축사업 추진 : 280백만원

❍ 유네스코 세계기록유산「동의보감」활용 홍보사업 추진 : 720백만원

□ 향후 추진계획

❍ 동의보감촌 관광자원개발 및 기반시설 확충 등으로 2023산청엑스포       성공개최 뒷받침

구 분	공약사업
담당부서	한방항노화과 (한방진흥담당, 약초경영담당)
추진진도(%)	45%

22

산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선

○ 약초재배 농가의 생산비 절감 지원으로 안정적 생산기반 조성

○ 다양한 약초 판로확보를 통한 농가소득 증대 및 약초산업 활성화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12월

❍ 사 업 비 : 금1,395백만원(도비 61, 군비 634, 자부담 470 기타 230)

❍ 사업내용

- 전략약초 및 한방약초안정생산지원

- 백도라지 지역특화작목단지 육성

- 경남생약조합과 농가 간 계약재배 추진

- 약초 수매 도입

- 약초생산 수매보조금 지원

- 약초재배 전문기술교육 확대 추진

❍ 전략약초 및 한방약초안정생산지원사업 - 31농가, 16종, 11.2ha - 31농가, 15종, 10.9ha	: 2022. 1. ~ 12월 : 2023. 1. ~ 6월
❍ 백도라지 분양 및 현장점검 - 1차 년도/8농가, 1.6ha, 25만주 식재) - 2차 년도/6농가, 1.5ha, 25만주 식재)	: 2022. 4. ~ 10월 : 2023. 4. ~ 6월
❍ 약초재배 전문기술교육 추진 및 수료(교육생 36명 수료)	: 2022. 7. ~ 8월
❍ 경남생약농업협동조합 계약재배(11농가, 12개품목, 8ha)	: 2022. 8. ~ 12월
❍ 경남생약농업협동조합 수매(11농가, 4.6ton, 27,017천원)	: 2022. 9. ~ 12월
❍ 약초생산 수매보조금 지원(13농가, 48ton, 23,423천원)	: 2022. 12월

□ 추진사항

□ 문제점 및 대책

❍ 단순변심, 종자ㆍ종근 미확보, 식재적기 미식재 등의 사유로 사업 포기자 다수 발생

→ 당해 연도 사업 포기자 추후 사업대상자 선정 시 페널티 적용

❍ 약용작물의 소비위축, 판로미확보로 인한 약초재배 농가 및 면적 지속적 감소

→ 지역 특성에 맞는 약초 육성, 가공상품 개발 지원, 계약 재배 및          유통망 확보로 약초산업 경쟁력 강화

□ 향후 추진계획

❍ 2023년 약초 수매 연중 실시                    : 2023. 1. ~ 12월

❍ 2023년 한방약초안정생산지원 추가사업 추진     : 2023. 7. ~ 12월

❍ 2023년 약초생산 수매보조금 지원               : 2023. 7. ~ 12월

❍ 2023년 백도라지 지역특화작목육성 현장점검     : 2023. 10월

❍ 2023년 약초재배 현장점검 및 관리지도           : 2023. 6. ~ 12월

❍ 2023년 약초재배 전문기술교육 추진             : 2023. 7. ~ 12월

구 분	공약사업
담당부서	한방항노화과 (관리운영담당, 시설사업담당)
추진진도(%)	30%

23

동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축

○ 동의보감촌 내 시설개선, 체험 콘텐츠 확충, 입장료 징수방안 마련을 통한 지속 가능하고 효율적인 관광지 운영체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 동의보감촌 일원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12월

❍ 사 업 비 : 금12,791백만원(국비 1,125, 도비 897, 군비 10,769)

❍ 사업내용

- (시설개선) 엑스포 주제관 및 야외전시시설 리뉴얼, 특리지구 관광체험시설 부지조성 등

- (체험 콘텐츠) 스마트 공립박물관 구축, 체험 프로그램 보완·확충

- (관리운영) 입장료 징수방안 마련 및 시행

□ 추진사항

❍ (시설개선) 특리지구 관광체험시설 부지조성 착공	: 2021. 10월
❍ (시설개선) 엑스포주제관, 야외전시시설 리뉴얼 사업 등 착공	: 2023. 1월
❍ (체험 콘텐츠) 스마트 공립박물관 구축사업 사업 착공	: 2023. 1월

□ 문제점 및 대책

❍ 동의보감촌 입장료 징수 시 입주자와 협의 난항 예상

- 명품관광지 조성을 위한 합리적인 징수 방안 모색

□ 향후 추진계획

❍ (체험 콘텐츠) 스마트 공립박물관 구축사업 준공	: 2023. 7월
❍ (시설개선) 엑스포주제관, 야외전시시설 리뉴얼 사업 등 준공	: 2023. 8월
❍ (시설개선) 관광체험시설 부지조성 후 엑스포 임시주차장 활용	: 2023. 8월
❍ (관리운영) 입장료 징수방안 수립을 위한 의견수렴	: 2023. 8월

구 분	시책사업
담당부서	한방항노화과(엑스포TF담당)
추진진도(%)	60%

24

2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공개최 추진

○ 2023엑스포 개최로 국민건강 향상, 국가경쟁력 제고 및 산청군 항노화산업 육성과 대한민국 대표 힐링관광지로 자리매김

□ 사업개요

❍ 주    제 :“미래의 약속, 세계 속의 전통의약”

❍ 기    간 : 2023. 9. 15. ~ 2023. 10. 19.(35일간)

❍ 위    치 : 동의보감촌(주행사장), 산청IC축제광장 일원(부행사장)

❍ 참가규모 : 약 30개국, 관람객 120만명(외국인 6만명)

국내‧외 150개 관련 기업, 200명 바이어 참가

❍ 사 업 비 : 금14,740백만원(국비 3,700, 도비 3,100, 군비 4,300, 수익/기타 3,640)

❍ 사업내용 : 전시, 이벤트, 컨벤션․관광 등

□ 추진사항

❍ 엑스포 조직위원회 사무처 출범	: 2022. 1월
❍ 엑스포 준비 로드맵 확정(17개 전략, 108개 과제)	: 2022. 2월
❍ 위원총회, 자문위원회 구성(위원 29명, 자문위원 49명)	: 2022. 4월
❍ 엑스포 주관 대행사(우선협상대상자) 선정	: 2022. 8월
❍ 조직위원회 공동위원장 선임(산청군수)	: 2022. 10월
❍ 엑스포 실행계획 수립 및 행사 대행 계약 체결	: 2022. 12월
❍ 엑스포 성공기원 군민결의대회(D-200) 개최	: 2023. 2월
❍ 엑스포 실행계획 수립 및 행사대행 용역 최종보고회	: 2023. 3월
❍ 재단법인 이사장 변경(경상남도지사→경상남도 경제부지사)	: 2023. 4월
❍ 엑스포 지원협의체 구성(총284명/범도민 250, 행정 28, 유관기관․단체 6)	: 2023. 4월
❍ 조직위원회 민간공동조직위원장 선임(구자천 회장)	: 2023. 4월

□ 향후 추진계획

❍ 임시전시관 및 시설물 설치	: 2023. 7월
❍ 엑스포 종합운영계획 및 매뉴얼 작성	: 2023. 8월
❍ 엑스포 개최	: 2023. 9. ~ 10월

문 화 체 육 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(문화체육과)

□ 총    평

❍ 지역 특색에 맞는 문화예술 공연으로 지역주민과 방문객에게 수준 높은

문화향유 기회를 제공하고, 개인과 단체에 대한 문화예술 활동지원, 문화기반시설

확충을 통한 문화 복지 향상 및 다양한 평생 교육 기회 제공으로 품격 높은

문화 도시형성에 이바지 함

❍ 노후하고 훼손된 문화재 보수 및 주변정비로 문화재를 원형으로 보존·계승하고 문화재 및 주변 경관 회복으로 문화재의 품격을 높이는데 기여함

❍ 공공체육시설 확충 및 유지보수를 통해 군민에게 쾌적하고 다양한          체육 시설을 제공, 건강증진 및 삶의 질 향상에 이바지 함

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	4			3	1
군수공약사업	3			3
주요시책사업	1				1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 지역특색에 맞는 문화예술 공연으로 지역문화 예술 활성화 사업 추진(문화예술담당)

- 2023 상설문화관광프로그램 운영, 남사예담촌 전통문화제(태조교서전) 장사익 찔레꽃 음악회, 산청 한마음 음악회, 산청문화예술회관 정기공연(방방곡곡문화공감사업 및 상주단체 공연, 기획공연)

❍ 문화기반시설 유지 보수 및 확충 사업 추진(문화예술담당)

- 산청유림회관 및 단성유림회관 건립 완료

- 행복 문화센터 건립 및 늘비창작예술센터 건립 추진, 산청문화예술회관 시설 유지보수 등

❍ 체계적인 전통문화유산 계승 및 전승사업 추진(문화재담당)

- 산청·단성향교 제례 및 전통문화계승사업, 서원 제례 지원 등

❍ 체계적인 문화재 보수정비사업 추진(문화재담당)

- 국가지정문화재 및 도지정문화재 보수정비사업 등

❍ 생활 체육활성화를 통한 건강 산청 이미지 제고(체육행정담당)

❍ 체육시설 확충 및 유지관리를 통한 군민의 건강하고 활기찬 생활 원동력       조성(체육시설담당)

□ 반    성

❍ 래프팅 타운의 노후화로 인한 시설개선을 위해 업체들과 의견을 교환하고 있으나 업체 간 협의가 진행되지 않아 답보 상태임

□ 향후 추진계획

❍ 산청군 행복문화센터 건립을 위한 공공건축지원센터 사업계획 심의: 2023. 7월

❍ 신등면 파크골프장 조성사업 준공: 2023. 9월

❍ 산청군 공공파크골프장 조성을 위한 하천점용허가 및 소규모환경영향평가 협의: 2023. 12월

❍ 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성을 위한 생초중학교 매입: 2024. 3월

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	15%

25

산청군 행복문화센터 건립

○ 문화예술활동 기반시설의 부족 해결을 위한 중소규모 공연장, 전시장,

교육장 등의 건립으로 문화예술 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 사 업 비 : 금6,000백만원(도비 3,000, 군비 3,000)

※ 제3단계 지역균형발전개발사업 예산 신청(3,000)

❍ 사업내용 : 행복문화센터 건립(지상 3층, 건축연면적 1,188㎡)

층별	세부시설 설치계획	비고
지상 3층	공연장, 강의실 등(396㎡)
지상 2층	공연장, 공연 준비실, 무대장비 조작실 등(396㎡)
지상 1층	상설 전시실, 강의실 등(396㎡)

□ 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인                 : 2022. 10. ~ 12월

❍ 지방재정 투자심사 심의                         : 2023.  2월

❍ 건축 기획용역 실시                             : 2023.  3월

❍ 제3단계 지역균형발전개발사업 예산 신청(30억)    : 2023.  5월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 실시        : 2023.  7월

❍ 공공용 건물 설계공모 및 실시설계 용역 시행     : 2023. 10월

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과 문화예술담당
추진진도(%)	30%

26

한국선비문화연구원 활성화 지원

○ 고품격 선비문화 체험연수를 통한 선비정신 확산으로 물질위주 사고에서 비롯되는 제반 문제를 완화함으로써 국민행복과 화합, 국가 사회 발전에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 남명로240번길 33, 한국선비문화연구원

❍ 사 업 비 : 금6,000백만원(국비 3,500, 도비 1,250, 군비 1,250)

- 2023년 사업비 1,200백만원 (국비 700, 도비 250, 군비 250)

❍ 사 업 량 : 남명 선비문화 체험연수 활성화 사업 지원

❍ 사업내용

- 한국선비문화 체험연수(국·도비) 및 찾아가는 선비문화교실(도·군비) 운영
- 시설물 유지보수(군비)

□ 추진사항

❍ 2020년 선비문화 체험연수 115회  7,522명         : 2020. 1. ~ 12월

❍ 2021년 선비문화 체험연수 131회  8,709명         : 2021. 1. ~ 12월

❍ 2022년 선비문화 체험연수 181회  11,584명        : 2022. 1. ~ 12월

❍ 2023년 선비문화 체험연수  47회  3,989명         : 2023. 1. ~  5월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2023년 2차 보조금 교부                             : 2023.  7월

❍ 2023년 보조사업 정산완료                           : 2024.  1월

❍ 2024년 보조사업 국도비 교부 및 사업 시행           : 2024.  2월

구 분	공약사업/시책사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	20%

27

공공체육시설 확충

○ 공공체육시설의 확충으로 주민들의 여가생활 개선 및 체력증진과 공공체육시설의 체계적 유지·관리로 이용주민의 안전사고 예방 및 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 등)

❍ 사 업 비 : 금8,280백만원(도비 2,160, 군비 6,120)

❍ 사 업 량 : 파크골프장조성 4개소, 생초면 전지훈련 지원센터 조성 1개소 등

❍ 사업내용

- 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 파크골프장 조성

□ 추진사항

❍ 산청군 공공파크골프장 조성(생초면 신연리)

- 실시설계용역 및 소규모환경영향평가 용역 시행        : 2022. 8월

❍ 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 생초 중·고교 활용방안 수립 용역 시행               : 2023. 5월

❍ 단성면 파크골프장 조성사업 준공                      : 2023. 5월

❍ 오부면 파크골프장 조성사업 준공                      : 2023. 6월

❍ 신등면 파크골프장 조성사업 시행                      : 2023. 6월

□ 문제점 및 대책

❍ 하천구역 하천기본계획 변경 등 행정절차 지연 및 유휴부지 부족으로 사업 추진 에로

⇒ 하천관리청과 유기적 협의로 행정절차 조기 이행 및 적정 대상지 사유지 매입

□ 향후 추진계획

❍ 산청군 공공파크골프장 조성(생초면 신연리)

- 하천점용허가 및 소규모환경영향평가 협의       : 2023. 12월

- 공사 착공 및 준공                             : 2024.  3. ~ 12월

❍ 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 생초중학교 매입                               : 2024.  3월

- 기본계획 및 실시설계용역                      : 2024. 10. ~ 12월

- 공사착공 및 준공                              : 2025.  3. ~ 12월

❍ 신등면 파크골프장 조성사업 준공                : 2023. 9월

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(체육행정담당)
추진진도(%)	10%

28

레프팅과 연계한 레저레포츠장 설립

○ 래프팅 종합승선장의 노후화 개선 및 4계절 레포츠시설 설립으로 관광객

증대와 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 꽃봉산로34번길 77

❍ 사 업 비 : 금1,500백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 기존 래프팅 사무실(1,500㎡), 복합 레포츠장 설립(1,000㎡)

❍ 사업내용

- 기존 래프팅 사무실 정비

- 4계절 복합 레포츠장 설립(캠핑장, 서바이벌장 등)

□ 추진사항

❍ 래프팅 사업 발전을 위한 회의 개최                  : 2022. 8월

❍ 수상레저사업자 안전교육 및 간담회                  : 2023. 5. 24.

□ 문제점 및 대책

❍ 업체간 규모 및 운영실적의 차이로 합의사항 도출이 어려움

❍ 기존 래프팅 사업 지속을 위한 지원건의 위주의 의견이 다수

→ 새로운 시책 추진에 대한 부정적 생각

□ 향후 추진계획

❍ 지속적 의견 조율                                   : 2023. 10월

관 광 진 흥 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(관광진흥과)

□ 총    평

❍ 지속 가능한 관광정책 추진으로 특색있는 명품 관광산업 육성

❍ 코로나19 이후 차별화된 관광 컨텐츠 발굴로 체류형 관광객 유치

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	6			6
군수공약사업	6			6
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 2023 산업관광 육성 및 빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅 공모사업 선정

❍ 다양한 홍보매체와 캐릭터 활용으로 유동인구분석 빅데이터에 의한        관광객수가 대부분 관광지에서 전년 대비 60% 증가

❍ 팸투어 및 인센티브 제도 운영으로 체류형 관광 활성화 유도

❍ 지리산 터널 개통에 따른 지리산권 관광개발 및 시설 인프라 구축

- 중산관광지 활성화사업, 두류생태탐방로, 내대 출렁다리 개설 등

□ 반    성

❍ 주요 관광지 차별화된 인프라 부족 및 교통불편 등 젊은층 관광객 감소

❍ 토지 보상 지연 등 사업추진 미진에 따른 관광자원 기반 구축 차질

□ 향후 추진계획

❍ 체험관광 프로그램 개발 및 관광시설 확충으로 다양한 관광객 유입

❍ 지역 관광협의체 구성 및 조직 육성으로 민간 주도 관광정책 발굴

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	5%

29

대원사 계곡길 연장사업

○「남한 제일의 탁족처(濯足處)」라 불리는 지리산 대원사 계곡을 따라 조성된「대원사 계곡길」을 연장하여 지리산을 찾는 탐방객에게 수려한 자연경관과 볼거리를 제공하고 국내 최고의 생태체험 및 힐링 공간으로 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 유평리 일원

❍ 사 업 비 : 금3,000백만원(균특 1,500, 도비 450, 군비 1,050)

❍ 사 업 량 : 생태탐방로 조성 L=1.5km

❍ 사업내용

연 도	사업비(백만원)	사업 추진 내용	비 고
2023	300	·대원사계곡길 연장사업 실시설계 및 관련기관 협의	진행중
2024	1,000	·대원사계곡길 연장사업 L=0.5km	예정
2025	1,700	·대원사계곡길 연장사업 L=1.0km	예정

□ 추진사항

❍ 관광자원개발사업(균특전환) 건의                      : 2022. 7월

❍ 관광자원개발사업(균특전환) 예산 확정(실시설계용역비)   : 2023. 1월

❍ 실시설계용역 및 탐방로 입지적정성평가 작성 용역 시행: 2023. 3월

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점 : 해당지역이 국립공원구역으로 탐방노선에 대한 행정절차 선행 필요

☞ 대책 : 국립공원구역 탐방로 입지적정성평가 신청을 통한 노선협의

□ 향후 추진계획

❍ 지리산 국립공원 협의 및 탐방로 입지적정성평가 : 2023. 6. ~ 12월

❍ 공사 착공 및 준공                        : 2024. 1. ~ 2025. 11월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	5%

30

밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축

○ 지리산으로 가는 대표적 관문이며 가을철 단풍길로 유명한 밤머리재터널

개통으로 기존 도로와 유휴공간을 활용하여 생태문화체험공간 등 지리산

생태관광 거점 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 향양리 ~ 삼장면 홍계리 일원

❍ 사 업 비 : 금3,000백만원(국비 1,500, 도비 450, 군비 1,050)

❍ 사 업 량 : 밤머리재 명품로드 조성 L=10km

❍ 사업내용

연 도	사업비(백만원)	사업 추진 내용	비 고
2023	600	·지역개발구역지정 및 실시설계용역	진행중
2024	1,000	·단풍나무 보식, 전망대 및 포토존 설치	예정
2025	1,400	·웅석봉 등산로 입구정비, 생태공원 조성 등	예정

□ 추진사항

❍ 백두대간권 발전종합계획 핵심사업 선정               : 2021. 5월

❍ 백두대간 v-힐링 스타트업로드 조성사업 예산 신청     : 2022. 4월

❍ 백두대간 v-힐링 스타트업로드 조성사업 `23년 국비 확정(3억) : 2023. 1월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 실시설계                                 : 2023. 7. ~ 2024.  6월

❍ 군립공원 조성계획변경 협의               : 2024. 1. ~ 6월

❍ 사업 착수 및 준공                        : 2024. 7. ~ 2025. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	40%

31

중산관광지 활성화사업

○ 수려한 자연경관을 보유하고 있는 지리산국립공원의 관문역할을 수행해 온

중산관광지가 시설 노후화, 주변관광지개발, 트렌드변화 등으로 경쟁력

상실과 관광객 감소로 활성화 방안이 필요

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 중산리 일원

❍ 사 업 비 : 금4,600백만원(균특 2,300, 도비 690, 군비 1,610)

❍ 사 업 량 : 중산관광지 활성화 A=292,515㎡

❍ 사업내용

연 도	사업비(백만원)	사업 추진 내용	비 고
2020	800	·실시설계 및 인허가	완료
2021	800	·생태탐방로 조성 L=1.29㎞	완료
2022	1,000	·물소리 빛광장 조성 A=2800㎡	완료
2023	2,000	·산악체험시설 및 경관조명 설치 등	진행중
2024		·하늘정원, 키즈파크, 입구게이트	진행중

□ 추진사항

❍ 지리산 두류생태탐방로 조성사업 실시설계용역 시행    : 2020. 1월

❍ 중산관광지 지정(변경) 및 조성계획(변경) 수립         : 2020. 2월

❍ 지리산 두류생태탐방로 조성사업 준공                 : 2021. 8월

❍ 중산관광지 물소리 빛광장 조성공사 준공              : 2022. 6월

❍ 중산관광지 공원 및 숲체험시설 실시설계 시행         : 2023. 3월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 중산관광지 공원 및 숲체험시설 실시설계 완료         : 2023. 7월

❍ 중산관광지 공원 및 숲체험시설 공사 착공 및 준공 : 2023. 8. ~ 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	10%

32

황매산 관광객 편의안전시설 조성사업

○ 사계절 수려한 자연경관을 가진 황매산의 기존 이용 시설을 원활하게

탐방할 수 있는 인프라를 구축하고 황매산의 특색있는 관광시설 확충

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 법평리 일원

❍ 사 업 비 : 금3,190백만원(국비)

❍ 사 업 량 : 보도육교 설치 L=161m, B=3m, 보도육교 연결 전망대 2개소 설치, 연결데크로드 설치 L=175m, B=2m

❍ 사업내용

연 도	사업비(백만원)	사업 추진 내용	비 고
2021	474	·지역개발계획 변경	완료
2022		·실시설계용역	완료
2023	740	·전망대 설치 1개소, 보도육교 기초 설치	진행중
2024	1,976	·보도육교, 전망대 1개소, 연결데크로드 설치	예정

□ 추진사항

❍ 지역개발계획 변경 수요 조사서 제출              : 2021.  5월

❍ 지역개발계획 변경 관련 현장확인(국토부,경남도 등)  : 2021.  9월

❍ 관계기관 협의 및 관련법 검토 등                : 2021. 10. ~ 12월

❍ 지역개발계획 변경 승인                         : 2021. 12월

❍ 실시설계 및 인허가 협의                        : 2022. 10. ~ 12월

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 착공           : 2022. 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 준공           : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광마케팅담당)
추진진도(%)	10%

33

남사예담촌 홍보지원 및 관광 활성화

○ 우리군 중심 관광지인 남사예담촌과 그 외 관광지를 통합적으로 홍보함으로써

남사예담촌뿐만 아니라 우리군 전반적인 관광사업 활성화 제고

○ 남사예담촌만의 특색있는 콘텐츠 기획∙개발로 남사예담촌 관광사업 활성화 모색

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 남사예담촌

❍ 사 업 비 : 금9,150백만원(국비 4,700, 군비 4,450)

❍ 사업내용

- 다양한 홍보매체를 통한 관광 산청 집중 홍보

- 신규 관광 콘텐츠 개발 및 상품화 확대, 관광 인프라 추가 조성

□ 추진사항

❍ 홍보지원

- 옥외매체 홍보(지하철, 터미널, 옥외LED 등) : 매년
- 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 지원 : 매년(예산 소진시 까지)

- 각종 박람회 참여 : 6회 참여

❍ 콘텐츠 개발 및 상품화

- 전통문화체험 관광프로그램 개발 및 상품화

▪ 프로그램 개발 및 홍보 : 2023. 1. ~ 5월

▪ 프로그램 운영 : 2023. 3. ~ 12월

- 야간관광 콘텐츠 개발 및 상품화

▪ 야간관광 특화도시 공모사업 설명회 참석 : 2023. 1. 12.

❍ 남사예담촌 인프라 구축사업

▪ 2023년 지역개발계획사업비 신청 및 확정 : 2022. 4. ~ 9월

▪ 공유재산 심의 및 관리계획 수립 : 2022. 10월

▪ 편입부지 보상협의 : 2023. 1. ~ 2023. 12월

▪ 실시설계용역 및 지역개발사업구역지정 신청 : 2023. 1. ~ 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 홍보지원

- 옥외매체 홍보(지하철, 터미널, 옥외LED 등) : 매년

- 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 지원 : 매년(예산 소진시 까지)

- 각종 박람회 참여: 매년 연 3회 참여

- 드라마 및 온라인 마케팅을 통한 홍보 : 2023. 7. ~ 9월

❍ 콘텐츠 개발 및 상품화

- 전통문화체험 관광프로그램 개발 및 상품화

▪ 프로그램 운영 : 2023. 6. ~ 12월

- 야간관광 콘텐츠 개발 및 상품화

▪ 야간관광 특화도시 공모사업 신청 : 사업 공모 시 신청

❍ 남사예담촌 인프라 구축사업

▪ 남사예담촌 인프라 구축 사업 착공 및 준공 : 2023. 7. ~ 2024. 12월

구 분	공약사업/시책사업
담당부서	관광진흥과(관광시설담당)
추진진도(%)	20%

34

생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성

○ 생초국제조각공원은 산청군을 대표하는 관광지로 많은 관광객이 방문하는 곳으로

꽃잔디 면적 확대 등을 통해 볼거리를 제공하고 주변상권 활성화 및

산청군 관광 이미지 제고에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 772번지 일원

❍ 사 업 비 : 금600백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 꽃잔디 확대 조성 6,000㎡(기존 조성면적 15,000㎡)

❍ 사업내용 : 꽃잔디 확대 조성대상지 잡목제거 및 정지작업

꽃잔디 추가 식재(480,000본)

□ 추진사항

❍ 꽃잔디 추가 보식 및 잡초제거                : 2022. 7. ~ 12월

❍ 문화재 시굴조사                             : 2023. 4. ~  6월

□ 문제점 및 대책

❍ 매장문화재 시굴조사 용역결과 석관묘 3기 발굴 됨.

→ 문화재 발굴 조사 실시 후 부지조성 및 꽃잔디 식재

□ 향후 추진계획

❍ 문화재 발굴조사 용역 시행                   : 2023. 7. ~  8월

❍ 부지조성 및 꽃잔디 식재(2,000㎡)             : 2023. 9. ~ 12월

❍ 꽃잔디 추가 식재(4,000㎡)                    : 2024. 1. ~ 12월

산 림 녹 지 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(산림녹지과)

□ 총    평

❍ 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 조림 등 각종 사업으로 지속

가능한 산림경영 기반 구축에 기여

❍ 산청곶감의 대한민국 대표 명품 곶감으로 자리매김

❍ 군민, 임업인 등 요구에 부합하는 다양한 산림사업 지속 발굴로 다양한 혜택 제공

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	4			4
군수공약사업	4			4
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 조림, 숲가꾸기 사업 등을 통해 지속가능한 소득창출을 위한 경영기반 구축

❍ 산림의 다양한 혜택을 활용한 산림의 경제적·공익적 기능 증진

❍ 2023년(`22년 실적) 지자체 합동평가 산림분야 우수 기초지자체 선정

❍ 산청곶감의 우수성 차별화된 대내외 홍보

- 「대한민국 대표과일 선정」 “산청고종시” 7년 연속 최우수 수상

- 「대한민국 대표브랜드 대상」 지방자치단체 지역특산물 (곶감)분야 7년 연속 “대상” 선정

- “지리산산청곶감축제”「대한민국축제 콘텐츠 대상」8년 연속 선정

- 제16회 지리산산청곶감축제 성공 개최

• 코로나 이후 3년 만의 전면 대면 행사 개최 : 8만 5천여 명의 관광객 방문 및

9억 9천만의 판매효과 기록

□ 반    성

❍ 산림사업 특성상 사업의 장기화에 따른 산주의 관심도 저조

⇒ 단기소득 작물(특화임산물) 확대 및 조성을 통한 산주 관리도 제고

⇒ 밀원수림 조성을 통한 임가소득 증대

□ 향후 추진계획

❍ 군유림을 활용한 대단위 밀원수림 조성으로 군유림 활용 가치를 증대하고 밀원수 식재로 꿀 채취, 벌 화분 등 양봉농가 소득창출에 기여

❍ 산청군의 한방항노화 대표 브랜드화 및 고부가가치화를 통한 주민 소득 증대에 기여

❍ 군유림(120ha) 사업의 확장 및 산림 휴양사업 등 다양한 연계사업 추진으로 살기 좋은 산청 이미지 제고

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(산림행정담당)
추진진도(%)	40%

35

군유림 밀원 식물단지 조성

○ 다양한 밀원수종 발굴을 통하여 지속적인 밀원수림단지를 확대 조성하고 양봉농가의 소득 창출에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 군유림

❍ 사 업 비 : 금337.5백만원(국비 168.8, 도비 50, 군비 118.7)

❍ 사 업 량 : 총25ha(매년 5ha씩 조림)/현재까지 10ha조림

❍ 사업내용

- 양봉농가 숙원사업으로 조림사업 추진 시 군유림 밀원수림 조성

- 채밀기간 연장을 위하여 개화시기별 다양한 밀원수종 발굴 및 식재

- 밀원수 선정은 조림적지를 우선 고려하여 꿀 생산 능력이 높은 수종식재

- 조림지 사후관리 사업으로 밀원수 생육환경 개선하여 활착률 재고

□ 추진사항

❍ 2023년 대상지 확정 및 조림 예정지 정리 완료    : 2022. 12월

❍ 사업 대상지 정리                               : 2023. 1. ~ 2월

❍ 밀원수 식재(6ha) 및 사업 정리                   : 2023. 3. ~ 4월

❍ 조림지 사후 관리 추진 및 사업 정리             : 2023. 4. ~ 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 대부분 군유림의 고지대에 위치하고 있어 밀원수 조림의 활착 및 사후 관리(풀베기 등)에 따른 조림 성공률이 낮음

=> 입지적 여건에 맞는 밀원 조림 수종을 선택하고 자연환경(가뭄 등)에 따른 조림목 고사 지역에 대해 보식을 실시

=> 사후관리(풀베기 등) 시 조림목의 보호를 위하여 현장 관리 감독 철저

□ 향후 추진계획

❍ 2024년 대상지 확정 및 조림 예정지 정리 완료    : 2023. 12월

❍ 사업 대상지 정리                               : 2024. 1. ~ 2월

❍ 밀원수 식재(5ha) 및 사업 정리                   : 2024. 3. ~ 4월

❍ 조림지 사후 관리 추진 및 사업 정리             : 2024. 4월

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(산림보호담당)
추진진도(%)	30%

36

백두대간 생태축(밤머리재) 복원사업 복원사업

○ 민족의 영산 지리산과 웅석봉 군립공원을 연결하는 백두대간 생태축의    복원을 통해 생물 다양성 증진 및 민족의 정기성 회복에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 밤머리재 일원

❍ 사 업 비 : 금5,810백만원(국비 4,067, 도비 523, 군비 1,220)

합 계	2022년	2023년	2024년	2025년
5,810,000천원	1,249,075천원	2,850,000천원	1,710,925천원

❍ 사 업 량 : 터널설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등

❍ 사업내용 : 지리산과 웅석봉 군립공원의 생태계 연계성 회복 및 산림복원을 위해 터널 설치 후 수목 식재 사업

□ 추진사항

❍ 시공단계의 건설사업관리계획 수립                 : 2023.  3월

❍ 건설사업관리용역비 도 회계과 심사                : 2023.  3월

❍ 공사 계약체결 및 발주                            : 2023.  4월

❍ 전신주 및 통신시설 이설 요청                     : 2023.  4월

❍ 공사 및 관급자재(레미콘,철근) 선급금 지급         : 2023.  5월

❍ 폐기물처리용역 및 기술지도 용역 계약             : 2023.  5월

□ 문제점 및 대책

❍ 공사기간 밤머리재 교통 통제로 인한 민원발생 우려

→ 밤머리재 터널 개통과 사업홍보 등으로 민원 불편 해소

□ 향후 추진계획

❍ 산지일시사용신고 승인                            : 2023.  6월

❍ 전신주 및 통신시설 이설                          : 2023. 6. ~ 7월

❍ 건설사업관리 용역(감리) 기술평가(PQ) 심의         : 2023.  7월

❍ 건설사업관리 용역(감리) 계약 및 착수              : 2023.  8월

❍ 생태축 복원사업(1차분) 정산	: 2023. 12월

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(산촌소득담당)
추진진도(%)	40%

37

산림신품종 재배단지 조성

○ 부가가치가 높은 산림신품종을 활용한 산림생명산업 기반을 조성하고 공공성 강한 사회적협동조합 구성으로 일자리 창출 및 주민 소득 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 길리 산98-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 금2,500백만원(국비)

❍ 사 업 량 : 재배단지 5ha, 관리 및 작업시설 건축 400㎡ 외

❍ 사업내용

- 꾸지뽕 재배단지 조성(포지, 온실 등)

- 관리시설 1동, 작업시설 1동 등

□ 추진사항

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 용역                : 2022.  6월

❍ 사회적협동조합 설립준비위원회 개최              : 2022.  7. ~ 9월

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 중간용역 보고       : 2022.  9월

❍ 산청틔움사회적협동조합 창립                     : 2022. 10월

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 최종 보고           : 2022. 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 사업대상지 입구 도로 확포장공사 보상지연에 따른 사업 지연 우려

❍ 마을 이장 협조 및 사업 내용 설명을 통한 사업 동의 적극 유도

□ 향후 추진계획

❍ 신품종재배단지 조성사업 공사 시행               : 2023. 7. ~ 11월

❍ 신품종재배단지 관리 및 운영                     : 2024. 1월

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(녹지조성담당)
추진진도(%)	40%

38

둔철 산림생태인프라 구축사업

○ 자연경관이 수려한 신안면 둔철 지역 내 산림생태인프라를 구축하여 산림관광명소 조성 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 안봉리 산19-8번지 일원

❍ 사 업 비 : 금2,500백만원(전환 1,000, 도비 300, 군비 1,200)

❍ 사 업 량 : 자생식물원 1개소, 습지생태관찰소 1개소, 둔철정비대 정비, 그라스생태원 조성 1개소, 수국꽃길조성 1.7km 등

❍ 사업내용

- 생태관찰시설 : 자생식물원, 습지생태관찰소 조성 등

- 생태숲보완사업 : 둔철천문대 정비 및 확장, 그라스생태원 조성, 수목보식,    수국꽃길조성 등

□ 추진사항

❍ 사업대상지 현장조사 및 선정	: 2022.  1. ~ 6월

❍ 경상남도 산림휴양과 업무 협의	: 2022. 12월

❍ 수국꽃길 조성	: 2023.  4월

❍ 둔철생태숲 내 야생화 동산 조성       : 2023.  5월

□ 문제점 및 대책

❍ 지방전환 사업비로 전환사업 신청 시 반영 요청

□ 향후 추진계획

❍ 지방전환 사업비 확보 건의            : 2023. 8월

❍ 둔철 산림생태인프라 구축사업 시행	: 2024. 1. ~ 2026. 12월

주 민 복 지 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(주민복지과)

□ 총    평

❍ 보훈가족과 사회복지사 등 안정된 삶 지원, 지역주민과 함께하는 자원봉사활동, 사회보장급여 통합조사 및 적정수급 관리, 맞춤형 기초생활보장, 저소득주민 자활기반구축 및 자립역량 강화를 위해 노력함

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	1	1
군수공약사업	1	1
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 국가보훈대상자에 대한 지원 확대 및 예우강화 제고

- 보훈명예수당 인상(월10만원→월18만원), 대상자 확대 및 쓰레기 봉투 무상지원

❍ 사회복지사 등의 처우개선비 인상 : 월3만원→월5만원

❍ 유림독립기념관 진입도로 확‧포장 공사 시행(2021~2023년)

- 확장도로 : L=396m, B=8m

- 남사천 교량 확장(인도), 감속차로, 보도(도막형바닥재)

❍ 자원봉사 참여 확대를 위한 프로그램 발굴로 나눔문화 확산

- 경상남도 우수 프로그램 선정「평평한 지구」

❍ 저소득주민 기초생활보장 및 적정수급 자격관리

- 신청조사 1,773세대, 확인조사 및 변동사항 처리 5,367건

❍ 저소득 주민 자활기반 구축 및 신규사업 발굴로 자립역량강화

- ‘햇살바른김’ 출시 및 ‘해봄장터’ 개소·운영

□ 향후 추진계획

❍ 유림독립기념관 진입도로 확‧포장 공사(가속차로) 시행 : 2023.  8월

❍ 자활사업단 신규 사업(출장 세차) 실시                : 2023.  8월

❍ 시장형 자활사업단의 참여자 역량 강화를 통해 자활기업 창업 : 2023. 11월

구 분	공약사업
담당부서	주민복지과(복지기획담당)
추진진도(%)	100%

39

사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원

○ 사회복지현장 최일선에서 근무하는 사회복지시설 종사자의 처우개선

향상을 통하여 사회복지사 등의 지위 향상 및 사회복지 서비스의 질

향상에 기여

□ 사업개요

❍ 지원대상 : 사회복지시설에 종사하는 사회복지사 및 장기요양요원 등

❍ 지원조건 : 산청군 관내 주소를 두고, 월 20일 이상, 일 8시간 이상

근무하는 종사자

❍ 소요예산 : 금1,468백만원(군비)     ※ 2023년 256백만원

❍ 사업내용 : 처우개선비 인상 지원

- 지원인원 : 428명

- 인상지원 : (기존) 월 3만원 → (변경) 월 5만원(증 2만원)

□ 추진사항

❍ 2023년 본예산 편성 및 확보               : 2022. 12월

❍ 사업추진(처우개선비 인상 지원 시행)       : 2023.  1월(매월지급)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 처우개선비 인상 지원 사업 추진                : 2023.  1. ~ 12월

복 지 지 원 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(복지지원과)

□ 총    평

❍ 모두가 행복한 따뜻한 희망복지 실현을 위하여 장애인·노인·여성· 아동청소년 등 다양한 계층을 대상으로 맞춤형 사업을 추진하여 복지만족도 향상을 위해 노력하고 있음

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	6			6
군수공약사업	4			4
주요시책사업	2			2

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 2021년부터 추진된 산엔청복지관 분관 준공으로 산청군 남부지역  주민의 복지 욕구 해소

❍ 장애인회관 신축에 따른 사업비 7,000백만원(국비2,000, 도비2,700, 군비2,300) 공모사업 등으로 전액 확보

□ 향후 추진계획

❍ 다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원, 조손가족 손자녀 특기활동비지원 및 성폭력 전문상담소 운영 관련 예산 확보에 만전을 기함.

❍ 사업 추진 시 이용 대상자의 의견을 적극 반영하여 불편함이 없도록       추진 예정임.

구 분	공약사업
담당부서	복지지원과(장애인복지담당)
추진진도(%)	5%

40

산청군 장애인회관 신축

○ 관내 산발적으로 분산되어 있는 장애인 복지시설 및 단체를 장애인회관 신축으로 통합 관리·운영하여 장애인복지 서비스 향상 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 산11-1 일원

❍ 사 업 비 : 금7,000백만원

(특별교부세 2,000, 특별조정교부금 1,500, 도비 1,200, 군비 2,300)

❍ 사 업 량 : 2층 규모, 연면적 1,865.91㎡

❍ 사업내용 : 건물 1동 신축

□ 추진사항

❍ 지방재정투자심의                               : 2020. 11. 10.

❍ 공유재산 관리계획 승인                         : 2020. 11. 16.

❍ 공공건축 사업계획 사전검토                     : 2020. 12 .23.

❍ 산청군 공공건축심의위원회 심의                 : 2021. 7. 2.

❍ 기본계획 및 실시설계 용역                      : 2022. 3. 21. ~ 12. 28.

❍ 공사착공                                       : 2023. 5. 1.

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 공사 준공 예정                                   : 2024. 4월

구 분	공약사업
담당부서	복지지원과(여성가족담당)
추진진도(%)	30%

41

다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원 헤어컷지원(HY견고딕, 24)

○ 다문화가족 자녀에 대한 헤어컷 비용 지원으로 다문화가족의 양육 부담

경감 및 생활안전 및 지역사회 소속감 고취

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 사 업 비 : 금82백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 320여명(만18세 이하 다문화가족 자녀)

❍ 사업내용 : 1인당 연 240천원(월20천원) 헤어컷 비용 지원

□ 추진사항

❍ 관내 다문화가족 실태 조사 및 다양성 욕구 파악  : 2022. 12월

❍ 세부 추진계획 수립                             : 2023.  3월

❍ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청         : 2023. 5. 4.

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 다문화가족 자녀 헤어컷비 관련 조례 정비        : 2023.  9월

❍ 2024년 본예산 확보                             : 2023. 10월

❍ 바우처카드 업무 협약 체결                      : 2023. 11월

❍ 읍면 신청 접수 및 사업 시행                    : 2024.  1월

구 분	공약사업
담당부서	복지지원과(여성가족담당)
추진진도(%)	10%

42

성폭력 전문상담소 운영

○ 성폭력·가정폭력 피해 발생시 피해자에 대한 신속한 상담 및 치료 등

지원서비스 제공을 통한 적극 대처 및 보호 지원체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면(청소년 문화의 집 1층)

❍ 사 업 비 : 금150백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 성폭력 상담소 설치 운영 1개소

❍ 사업내용 : 관내 성폭력 및 가정폭력 상담, 교육, 예방활동 등

□ 추진사항

❍ 경남 도내 성폭력 상담소 현황 파악

❍ 신안 청소년 문화의 집 조성 설계 반영

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 세부 추진계획 수립                             : 2024.  7월

❍ 지원근거 및 조례정비                           : 2024.  9월

❍ 2025년 본 예산확보                             : 2024. 10월

❍ 상담소 위탁운영 공고 및 선정                   : 2025.  1월

❍ 성폭력 전문상담소 운영                         : 2025.  3월

구 분	공약사업
담당부서	복지지원과(노인복지담당)
추진진도(%)	50%

43

산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진

○ 일상생활 영위가 어려운 취약노인에게 적절한 돌봄서비스를 제공하여 안정적인 노후생활 보장, 신체적·정신적 건강 유지 및 노인 욕구에 맞는 서비스 제공으로 예방적 복지를 도모

□ 사업개요

❍ 사 업 비 : 금4,373백만원(국비 2,141, 도비 403, 군비 1,830)

❍ 사업내용 : 맞춤형 돌봄서비스(말벗지원, 일상생활지원, 식사배달, 생활교육, 응급구조, 인공지능(ICT)연계 서비스 등)를 제공하여 노인의 기능·건강 유지 및 악화 예방

사업명	인원(명)	사업비(백만원)	사업내용	비고
소 계	3,934	4,373
노인맞춤돌봄	2,048	2,728	안전·안부지원, 생활교육, 일상생활지원, 민간후원연계 등
재가노인지원	400	1,117	말벗지원, 사회참여활동 등
식사배달지원	186	148	주 1회 밑반찬 배달	자체
무료빨래방	400	40	세탁물 방문, 수거, 빨래	자체
노노케어	20	63	노인이 취약 노인을 케어
응급안전알림	580	128	화재,가스,활동감지기로 응급구조
ICT연계 통합돌봄	300	149	AI로 말벗지원 및 IoT로 응급구조

□ 추진사항

❍ 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진계획 수립         : 2022.  7월

❍ 사업 내실화를 위한 무료빨래방 등 사업 장비 교체     : 2022. 12월

❍ 사업 운영사항 점검 및 평가                          : 2022. 12월

❍ 응급안전안심서비스 신규장비 120대 추가 설치         : 2023.  6월

□ 향후 추진계획

❍ 홀로어르신 가구 일산화탄소 경보기 400대 설치 예정   : 2023. 6월

❍ 응급안전안심서비스 신규장비 180대 추가 설치 예정    : 2023. 9월

❍ 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 대상자 발굴 및 확대 지원   : 수시

구 분	시책사업
담당부서	복지지원과(장애인복지담당)
추진진도(%)	80%

44

산엔청복지관 장애인 기능 강화사업

○ 산엔청복지관의 장애인 기능강화를 통하여 복지욕구에 따른 맞춤형 서비스를 제공하고 주민의 삶의 질 향상을 도모하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 중앙로 87, 단성면 성내리 198번지 일원

❍ 사 업 비 : 금780백만원(기금 200, 군비 580)

❍ 사 업 량 : 건물1동 신축

❍ 사업내용

- 산엔청복지관 리모델링

- 체력단련실 확대 운영

- 산엔청복지관 분관 신축 1동 (3층 규모, 연면적 1892.15㎡)

□ 추진사항

❍ 산엔청복지관 분관 착공                         : 2021. 12.  7.

❍ 지방소멸대응기금(사회복지관 활력지원사업) 확정  : 2022.  9. 28.

❍ 산엔청복지관 분관 준공                         : 2023.  5. 30.

❍ 산엔청복지관 리모델링 설계용역 완료            : 2023.  5. 13.

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 산엔청복지관 분관 개관                         : 2023.  7월

❍ 산엔청복지관 리모델링 착공                     : 2023.  7월

❍ 체력단련실 운동기구 증설 및 교체               : 2023.  7월

구 분	시책사업
담당부서	복지지원과(여성가족담당)
추진진도(%)	30%

45

조손가족 손자녀 특기활동비 지원

○ 조손가족 손자녀의 특기활동비 지원사업을 통한 교육비 부담 경감과

차별 없는 교육보장으로 조손가정의 생활안정 및 복지증진에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 사 업 비 : 금70백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 45세대 55명(만18세 이하 조손가족 아동)

❍ 사업내용 : 1인당 연 120만원 이내(월 10만원) 학습비 지원

□ 추진사항

❍ 관내 조손가족 현황 및 다양성 욕구 파악         : 2022. 12월

❍ 조손가족 손자녀 특기활동비 지원 계획 수립      : 2023.  3월

❍ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청         : 2023. 5. 4.

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2024년 본예산 확보                             : 2023. 10월

❍ 사업 시행 및 홍보                              : 2024.  1월

환 경 위 생 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(환경위생과)

□ 총    평

❍ 환경부에서 주관하는 전기차 충전 기반시설 확대 보급을 위한 공모사업을 신청하여 확정되는 성과를 거두었고, 쓰레기 분리수거 및 쾌적한 거리 조성을 위해 재활용 동네마당을 확대하였으며, 산청군을 방문하는 탐방객들의 화장실 수요를 충족하기 위해 공중화장실 개선 및 설치를 통해 이용객들의 편의를 도모하였음

❍ 위생업소 환경개선을 통해 군민 및 방문객들에게 보다 쾌적하고 위생적인 환경을 제공하여 관광 산청 이미지 제고

□ 추진상황

구 분	추진실적(10건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	1			1
군수공약사업	1			1
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)
❍ 전기자동차 충전시설 설치지원 공모사업  : 252대, 3,137백만원

❍ 야생동물피해예방시설 설치 지원         : 155농가 507백만원

❍ 운행차 배출가스 저감사업               : 227대, 429백만원

❍ 공중화장실 설치사업                    : 1개소, 41백만원

❍ 슬레이트 지붕 철거 지원                : 45동, 198백만원

❍ 일반음식점 시설개선 지원                : 32개소, 83백만원

❍ 상반기 폐농약수거함 수거 및 배부       : 35개, 8.5백만원

❍ 상반기 재활용 동네마당 설치            : 19개소, 108백만원

❍ 생활폐기물 수집장 울타리 설치 및 보수  : 10개소, 19백만원

□ 반    성

❍ 군수공약사업인 민물고기 먹거리타운 명품화 지원사업 추진함에있어 안전총괄과 「생초지구 풍수해생활권 종합정비사업」확정이 되지 않아 추진이 미비함

□ 향후 추진계획

❍ 민물고기 먹거리타운 명품화 지원사업 추진       : 2023.  9월

❍ 전기자동차 충전시설 설치                       : 2023. 12월

❍ 슬레이트 지붕 미처리 물량 조기 철거            : 2023. 7. ~ 11월

❍ 슬레이트 처리지원사업 사업완료                 : 2023. 12월

❍ 조기폐차 지원사업 추가 접수 실시               : 2023.  7월

❍ 일반음식점 시설개선 사업대상자 선정 후 사업추진 : 2023. 6. ~  8월

❍ 분리수거함 구입 및 설치                        : 2023. 9. ~ 10월

❍ 고급 디자인 재활용동네마당 구입 및 설치(9개소) : 2023. 7. ~ 12월

구 분	공약사업
담당부서	환경위생과(환경보전담당)
추진진도(%)	10%

46

민물고기 먹거리타운 명품화 지원사업

○ 생초 소재지에 민물고기 먹거리타운임을 알릴 수 있는 아치형 간판을 설치하여 탐방객들의 편의제공 및 음식문화를 개선함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 259-12번지 일원

❍ 사 업 비 : 금100백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 아치형 간판 설치

❍ 사업내용 : 생초시장 입구 민물고기 먹거리타운 아치형 간판 설치

□ 문제점 및 대책

❍ 안전총괄과 「생초지구 풍수해생활권 종합정비사업」실시로 인한 사업구간 중복으로 인해 해당 정비사업 추진상황에 맞춰 본 사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 간판 위치 선정                                   : 2023.  7월

❍ 간판디자인 개발 및 선정                          : 2023.  8월

❍ 간판디자인 제작 및 설치                          : 2023. 12월

상 하 수 도 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(상하수도과)

□ 총    평

❍ 지방상수도 수혜지역 확장 및 시설을 개선․확장하여 원수 부족 및 수질불량 등의 문제를 겪고있는 지방상수도 미급수지역에 안정적이고 깨끗한 상수도 공급에 기여

❍ 공공수역으로 무분별하게 배출되는 생활오수로 인해 하천오염이 심각한 실정이었으나, 공공하수도 수혜지역 확장으로 남강댐 상류부로서 하천의 주요 오염원인 생활오수를 사전에 차단하여 공공수역의 수질개선에 상당한 기여

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	2			2
군수공약사업	2			2
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 산청급수구역(오부․금서지구) 준공완료(10,000백만원)

❍ 집단민원으로 지연된 삼장지구 상수도공급 사업의 3개사업장 민원해소로 사업추진 정상화

□ 향후 추진계획

❍ 삼장2지구 및 단성급수구역(신등) 비상공급망 준공    : 2023.  7월

❍ 단성급수구역(신안) 비상공급망 준공                 : 2024.  6월

❍ 시천정수장 증설 준공                               : 2024. 12월

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업 완료                  : 2023. 11월

❍ 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 완료            : 2025. 12월

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	60%

47

상수도 시설확충

○ 산청군내 지방상수도 미급수지역에 원수 부족 및 수질 불량 등의 문제로지방상수도 수혜지역을 확장하여 안정적이고 깨끗한 상수도 공급

○ 지방상수도 운영중이나 시설정비가 필요한 취⋅정수 시설을 확장 및 개선하여 맑은 물 공급에 능동적으로 대처하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 소요예산 : 금86,008백만원(국비 39,428, 도비 30,355, 군비 16,225)

- 단성급수구역 : 19,360백만원

- 시천급수구역 : 10,000백만원

- 삼장지구 인입공사(2공구) : 10,900백만원

- 단성급수구역 비상공급망 구축사업 : 11,348백만원

- 산청·생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 : 24,400백만원

※ 산청급수구역(오부·금서지구) 준공완료(10,000백만원)

❍ 사업내용

- 정수장증설(시천, 산청・생초), 배수지 설치(삼장), 관로매설 L=120km,        가압장 및 감압변 설치 등

❍ 사업기간: 2021. 1. ~ 2025. 12월(Ⅱ단계)

□ 추진사항

❍ 삼장2지구(3차분)  공사 착공                       : 2022.  7월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 공사 착공       : 2022.  7월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 설계용역 착공      : 2022. 11월

❍ 단성정수장증설(5,700톤) 준공                      : 2022. 12월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 공사 착공       : 2023.  6월

❍ 단성정수장증설(단성·신안지구) 공사 착공          : 2023.  6월

□ 문제점 및 대책

❍ 단성급수구역 비상공급망 구축사업(신등·신안지구)시 송수관로 추가 매설 사업 병행시공이 필요함

⇒ 국․도비 추가 확보

□ 향후 추진계획

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 착공                 : 2023.  7월

❍ 삼장2지구(3차분) 준공                             : 2023.  8월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 준공            : 2023.  8월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 설계 용역 준공     : 2023. 11월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 준공            : 2024.  6월
❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 착공	: 2024.  6월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 준공                 : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(하수도담당)
추진진도(%)	60%

48

공공하수도 수혜지역 확장

○ 공공수역으로 무분별하게 배출되는 생활오수로 인해 하천오염이 심각한      실정이며 남강댐 상류부로서 하천의 주요 오염원인 생활오수를 사전에      차단하여 공공수역의 수질개선에 기여하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 상법리, 단성면 방목리, 시천면 사리, 생초면 노은리 일원

❍ 사 업 비 : 금38,475백만원(국비 26,960, 도비 2,894, 군비 2,918, 기금 5,703)

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=24.2km, 배수설비 608가구

하수처리장 증설(신안단성 1,200톤/일, 시천 250톤/일)

❍ 사업내용 : 하수처리시설 신·증설 및 하수관로 매설, 배수설비 등

□ 추진사항

❍ 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 착수          : 2023.  3월

❍ 석대지구 공공하수도 설치인가 및 재원협의         : 2023.  5월

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업(4차분) 착수          : 2023.  6월

❍ 시천 공공하수처리시설 증설사업 착수              : 2023.  6월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 석대지구 공공하수관로 설치사업 착수              : 2023.  7월

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업 완료                : 2023. 11월

❍ 시천지구 농어촌마을하수도 증설사업 완료          : 2024. 12월

❍ 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 완료          : 2025. 12월

❍ 석대지구 농어촌마을하수도 증설사업 완료          : 2026.  6월

보 건 정 책 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(보건정책과)

□ 총    평

❍ 의료 인력의 수도권 편중 및 공중보건의 감소에 따른 의료 취약지의 의료인력 수급 불균형에 선재적 대응

❍ 공공보건의료서비스 개선을 통한 지역의 양질의 의료서비스 제공

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	2	2
군수공약사업	1	1
주요시책사업	1	1

□ 주요성과

❍ 업무대행의사(내과 전문의) 확보로 공공보건의료서비스 개선

❍ 경상국립대학교병원 내분비내과 교수진 진료로 진료서비스 활성화

□ 반성 및 과제

❍ 도시와 농어촌 간의 의사 인력 불균형 해소를 위한 제도 개선 요구 필요

❍ 공공보건의료 인력 양성 및 공공의료 인프라 확충을 위한 예산 확보

□ 향후 추진계획

❍ 우수 의료 인력 확보를 통한 지역사회 양질의 보건의료서비스 제공

❍ 공공의료 인프라 확충을 위한 국 ․ 도비 예산 확보

구 분	공약사업
담당부서	보건정책과(보건행정담당)
추진진도(%)	100%

49

내과 전문의 채용 추진

○ 의료취약지역의 공공보건의료서비스 개선 및 진료 분야 운영 활성화를

통한 지역사회에 양질의 보건의료서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 중앙로 97, 산청군보건의료원 내

❍ 사 업 비 : 금1,500백만원(군비)

❍ 사업내용 : 내과전문의 채용

□ 추진사항

❍ 산청군 지역보건의료사업 업무대행에 관한 조례 제정 : 2022. 10월

❍ 업무대행의사(내과 전문의) 채용 공고 실시 : 2022. 11. ~ 2023. 4월

❍ 업무대행의사(내과 전문의) 채용 및 업무대행 계약 체결 : 2023. 5월

❍ 산청군보건의원 내과 진료 개시           : 2023. 6. 12.

□ 업무대행의사(내과 전문의) 프로필

❍ 성    명 : 유 재 등

❍ 주    소 : 서울 송파구

❍ 학    력 : 건국대학교 의과대학 졸업

❍ 주요경력

- 건국대학교병원 내과 과장 : 1998 ~ 2002년

- 청주시 유내과의원 원장   : 2012 ~ 2023. 6월

구 분	시책사업
담당부서	보건정책과(보건행정담당)
추진진도(%)	100%

50

대학병원급 의료기관과의 업무협약 체결

○ 의료취약지역의 공공보건의료서비스 개선 및 진료 분야 운영 활성화를

통한 지역사회에 양질의 보건의료서비스를 제공하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 중앙로 97, 산청군보건의료원 내

❍ 사 업 비 : 금63백만원(군비)

❍ 사업내용 : 보건의료원 내 미개설 진료분야에 대한 의료 인력 지원

□ 추진사항

❍ 경상국립대학교병원과 업무협약체결 : 2022. 10월

❍ 매주 1회 4시간 경상국립대학교병원 내분비내과 교수진 진료 : 2022. 11월 ~ 계속

□ 문제점 및 대책

❍ 진단 및 치료에 필요한 노후화된 의료장비 교체 필요

❍ 농어촌의료서비스개선사업을 통한 의료장비 보강 및 개선 추진

□ 향후 추진계획

❍ 협약기간 및 진료시간 연장을 통한 지속적인 보건의료서비스 제공

❍ 진료분야 세분화를 위한 업무협약 지속 추진

건 강 관 리 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(건강관리과)

□ 총    평

❍ 감염병 발생 시 신속한 대응체계 구축으로 감염병 확산방지 및 군민

건강증진 향상에 기여

❍ 인공관절 수술비 지원범위를 확대하여 군민의 경제적 부담을 경감하고

건강하고 활기찬 노후 생활을 지원

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	2			2
군수공약사업	2			2
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)
❍ 코로나19 진단검사 등 선별진료소 운영: 103,023건 / 연중상시운영

❍ 코로나19 확진자 관리 및 접촉자 분류 : 6,587건

❍ 코로나19 감염취약시설 선제검사 : 22,165건 / 23개소 주 1회 실시

→ 권고(2023. 6. 1.부터)

❍ 법정감염병 및 신종·해외유입 연중 감시·대응체계 구축 및 운영

❍ 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 : 8건(7명)

□ 향후 추진계획

❍ 감염병 발생에 대비한 24시간 감시 및 신고에 따른 즉각적인 대응

❍ 인공관절 지원 사업의 예산 조기 소진으로 2차 추경 시 예산 확보 예정

구 분	공약사업/시책사업
담당부서	건강관리과(감염병관리담당)
추진진도(%)	60%

51

감염병 선제적 방역 시스템 확충

○ 감염병 선제적 방역시스템 구축으로 감염병 환자 발생 시 신속한 보고와

조치가 이루어져 상황 종료까지 감염병 예방 및 지역사회 전파 차단에 만전을

기하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금4,384백만원(국비 89, 특교 321, 도비 39, 군비 3,935)

❍ 사업내용

- 코로나19 선별진료소 상시 운영 및 비상방역체계 강화

- 감염병 감시 및 조기발견 체계 강화를 위한 핫라인 구축

- 감염병 재유행 대비 감염병 감시체계 강화

□ 추진사항

❍ 코로나19 선별진료소 운영(연중) 103,023건              : 2022. 6월 ~

❍ 감염취약시설 선제검사(주2회→주1회→권고) 23개소 22,169명   : 2022. 6월 ~

❍ 감염취약시설 감염병 발생 대응체계 구축 및 지속 관리 : 연중

❍ 주요 법정감염병 연중 감시체계 운영(1~4급)            : 연중

❍ 하절기 방역 비상근무 및 취약지역 친환경 방역소독    : 연중

❍ 해충기피제 보관함 설치 55대(2023 태양광 보관함 신설 6대) : 연중

❍ 해충 포충기 설치 188대(2023년 신설 10대)               : 연중

□ 문제점 및 대책

❍ 주기적 감염병 재유행 대비 기 확충된 인력 유지 및 지속적 지역사회 감염병 예방 및 관리 필요

□ 향후 추진계획

❍ 코로나19 비상방역체계 유지 및 비상방역대책반 운영  : 코로나19 위기단계 종료 시 까지

❍ 감염취약시설 감염병 발생 대응체계 구축 및 관리 : 연중

❍ 주요 법정감염병 연중 감시체계 운영(1~4급) : 연중

❍ 감염병 대응 교육 및 지역주민 대상 감염병 예방·홍보 : 연중

구 분	공약사업
담당부서	건강관리과(건강지원담당)
추진진도(%)	90%

52

노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 사업

○ 산청군 자체 예산으로 만성 퇴행성관절염으로 고통받는 어르신께 인공관절      수술기회 제공 및 의료비 지원으로 건강하고 활기찬 노후 생활 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 8.5백만원(군비) ※ 2023년 사업비 5백만원

❍ 사 업 량 : 8건(7명)

❍ 사업내용

- 산청군에 주소를 둔 만 60세 이상 군민 중 의료급여 수급권자 또는 기준중위소득          100분의 100이하인 신청자의 수술비 중 본인부담금 지원

- 한쪽 무릎 기준 100만원 한도, 양쪽 무릎 기준 200만원 한도로 수술비 등 지원

□ 추진사항

❍ 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 확대 추진 계획 수립  : 2022.  7월

❍ 2022년 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 실시          : 2022. 10. ~ 12월

❍ 산청군 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원에 관한 조례 제정  : 2022. 12월

❍ 2023년 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 계획 수립      : 2023.  1월

❍ 2023년 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 실시           : 2023.  2월

□ 문제점 및 대책

❍ 인공관절 수술 후에는 지원이 되지 않으므로 읍·면 이장회의 등을 통하여 반드시 수술 전에 신청하도록 주민 홍보

□ 향후 추진계획

❍ 인공관절 지원 사업의 예산 조기 소진으로 2차 추경 시 예산 확보 예정

❍ 추가 예산 확보 후 읍․면 이장회의, 현수막 게시 등으로 사업 홍보

농 축 산 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(농축산과)

□ 총    평

❍ 농업인 간담회를 통하여 애로사항 및 건의사항을 농정에 적극 반영

❍ 배합사료 운송비 지원과 TMR사료 구입비 보전사업 추진으로 한우, 젖소 사육농가의 경영부담 감경

❍ 번식용 꿀벌(종봉) 입식 지원사업으로 꿀벌 사육기반 회생 및 경영안정 도모

❍ 청년 농업인, 귀농귀촌자 전문상담 및 융자지원으로 안정적인 농촌정착 지원

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	10	1		8	1
군수공약사업	9	1		7	1
주요시책사업	1			1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 농정반영을 위한 농업인 간담회 개최로 사업비 1,364백만원, 12개 사업의 의견 수렴

❍ 농업소득증대사업 확대 지원 : 270명 3,910백만원

❍ 인력중개센터 개소(2023. 3월) : 인력중개 1,420명(2023. 6. 13.기준)

❍ 꿀벌 피해농가 종봉 구입비 지원 : 6,362군 1,590백만원

❍ 배합사료 운송비 및 TMR사료 구입비 지원사업 : 1,150백만원

❍ 2023년 귀농귀촌 상담 295건, 귀농인의 집 8개소 운영

❍ 청년농업인 지원 60명 635백만원, 후계농업인 육성자금 배정 53명 26,500백만원

□ 향후 추진계획

❍ 농가수익 증대를 위한 농가 지원사업 지속 발굴

❍ 귀농귀촌 활성화를 위한 지속적인 상담서비스 제공 등 지원 확대

❍ 쌀값 안정화를 위한 타작물재배농지 직불금 확대 지원

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(농업정책담당)
추진진도(%)	50%

53

농업보조금 확대 지급

○ 농업인 대상 보조사업 획대 시행으로 농산물의 안정적인 생산기반마련

○ 신규 고소득 작목 개발 및 시설개선으로 고품질 농특산물 생산을 통한 시장 경쟁력 강화 및 농가소득 증대

○ 축산농가 가축분뇨의 자원화로 환경보전 및 악취로 인한 민원발생 방지

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

구분	총액	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계	47,979	6,619	8,920	9,830	10,980	11,630
국비	991	74	154	231	231	301
도비	2,637	414	535	552	560	576
군비	42,081	5,901	7,601	8,267	9,174	9,463
기타	2,270	230	630	780	1,015	1,290

❍ 사 업 비 : 금47,979백만원

❍ 사업내용 : 연간 6,619백만원 지원되는 농업소득증대사업 외 9개 사업 등 각종 보조금을 11,630백만원으로 확대 지원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

□ 추진사항

❍ 사업계획 수립 및 사업대상자 선정: 매년 1 ~ 2월

❍ 농업인 건의사항 농정반영을 위한 간담회 개최: 2023. 3 ~ 5월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 사업 추진 : 매년 3 ~ 11월(가능한 상반기 완료)

❍ 각종 보조사업 예산 편성 및 확보 : 매년 10월

❍ 사업비 정산 : 매년 12월

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(전원농촌담당)
추진진도(%)	50%

54

청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대

○ 젊고 유능한 인재의 농업 분야 진출을 촉진하는 선순환 체계 구축, 농가 경영주의 고령화 추세 완화 등 농업 인력구조 개선과, 도시민의 귀농귀촌 희망자의 안정적인 농촌정착 및 지역 활력 회복을 위한 지원 사업 확대 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금47,979백만원(군비)

❍ 사업내용 : 청년후계농 및 귀농 지원사업 등 각종 융자·보조금을 지원하여  청년·귀농인 안정적인 농촌정착 지원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

□ 추진사항

❍ 귀농귀촌 개인별 전문 상담을 통한 인구유입 추진

- 2023년 상담실적(6. 15.기준) : 295건

❍ 도시민 유치 귀농귀촌 박람회 참석 : 4회

❍ 귀농인의 집 운영지원 : 8개소(1개소 선정 후 리모델링 중)

❍ 2023년 귀농귀촌 유치지원사업 공모 선정으로 사업비 확보 : 221백만원

❍ 청년농업인 지원 : 영농정착금지원 527백만원(51명), 취농직불지원 108백만원(9명)

❍ 후계농업인 육성지원 : 육성자금배정 26,500백만원(53명)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 귀농귀촌 상담사 채용을 통한 지속적인 상담서비스 제공

❍ 도시민 유치 귀농귀촌 박람회 및 지역축제 참가 : 6회(박람회 4회, 축제 2회)

❍ 마을단위 찾아가는 융화교육 실시 : 10회

❍ 귀농귀촌 멘토링 지원 : 20회

❍ 2023년도 사업계획 수립 및 대상자 선정 지원

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(농업정책담당)
추진진도(%)	100%

55

농촌인력중개센터 운영

○ 농업 분야 특화된 인력수급 지원체계 구축을 통해 농촌인구 감소, 고령화 및

계절성에 따른 농촌 일손 부족 문제 완화 및 해소에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : NH농협은행 산청군지부

❍ 사 업 비 : 금117.5백만원(국비 35, 도비 15.75, 군비 66.75)

❍ 사 업 량 : 영농작업반 8개반 80여명 구성

❍ 사업내용 : 농촌지역 일손부족현상 완화를 위해 농촌인력중개센터를 설치하여 전담

인력 배치, 구인구직 수요조사 인력풀 내에서 근로인력을 중개하는 사업

□ 추진사항

❍ 남해군, 창녕군 인력중개센터 운영사례 조사 : 2022. 9월

❍ 농협중앙회 산청군지부 인력중개센터 운영 확정 : 2022. 10월

❍ 2023년 농촌인력중개센터 선정 : 2023. 1월

❍ 농협중앙회 산청군지부 인력중개센터 인력 채용 및 개소 : 2023. 3월

❍ 인력중개 1,420명(관내 559명, 관외 861명) ※ 2023. 6. 13.기준

□ 문제점 및 대책

❍ 관내 인력부족으로 인근 지자체 도시 인력 유입을 위한 유인책 마련

❍ 적극적인 홍보와 연중 일감 확보를 통한 영농작업반 구성

❍ 농협중앙회의 적극적인 지원을 통한 예산 추가 확보

□ 향후 추진계획

❍ 인력모집 및 홍보(전단지 현수막, 지역내 구직단체 협약 등) : 2023년 ~

❍ 인력중개 및 사후관리, 정산자료 및 보고서 작성 등 : 2023년 ~

❍ 사업완료 및 평가 : 2023. 12월

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(친환경농업담당)
추진진도(%)	70%

56

친환경농업 인프라 확충 및 지원

○ 사람과 자연이 공존하는 친환경농업 인프라 확충으로 안전한 먹거리      생산지원 및 농가소득 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금3,587백만원(군비)

❍ 사업내용 : 친환경인증수수료 지원사업, 친환경인증농가 장려금 지급,

친환경인증농가 유박지원사업

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

□ 추진사항

❍ 2023년 친환경인증수수료 지원사업 : 590농가, 160백만원

❍ 2023년 친환경인증농가 장려금 지원사업 : 770ha, 271백만원

❍ 2023년 친환경인증농가 유박지원사업 : 590농가, 274백만원

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 지속가능한 친환경농업 육성사업 추진 : 2023 ~ 2026년

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(친환경농업담당)
추진진도(%)	60%

57

직불금 확대

○ 쌀 공급에 대한 탄력적 대응을 위해 타작물 재배 직불금 지원으로 쌀값

안정 및 농가소득 안정화를 통한 모두가 행복한 산청구현

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금3,140백만원(국비 400, 도비 50, 군비 2,690)

❍ 사업내용 : 논 타작물재배 농지 3,000천원/ha 직불금 지급

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

□ 추진사항

❍ 2022년 논타작물 재배 지원사업 보조금 교부   : 2022. 12월

❍ 2023년 전략작물직불제 지원사업 신청 및 접수 : 2023. 2. ~ 5월

❍ 2023년 논타작물 재배 지원사업 신청 및 접수  : 2023. 2. ~ 6월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 논타작물 읍면 이행점검                      : 2023. 7. ~ 9월

❍ 전략작물직불제 농관원 이행점검              : 2023. 8. ~ 10월

❍ 직불금 지급                                 : 2023. 12월

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(축산내수면담당)
추진진도(%)	70%

58

흑돼지 명품화 사업 지속 확대

○ 모돈 갱신 등 개량 지원을 통한 생산성 제고로 흑돼지 기반 확대 및 특색있는 미래 축산 소득원으로 흑돼지 브랜드 활성화로 농가소득 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면, 생초면, 신등면, 금서면

❍ 사 업 비 : 금374백만원(도비 10 군비 177 자부담 187)

❍ 사 업 량 : 모돈교체 70두, 웅돈구입 2두, 냉방기 구입 18대, 폐사축처리기 2대

❍ 사업내용 : 흑돼지 농가 육성사업(모돈 및 웅돈), 냉방기 구입, 폐사축처리기 지원

□ 추진사항

❍ 2023년 흑돼지농가 육성지원사업 : 모돈교체 30두, 18백만원

❍ 2023년 폐사축처리기 지원 : 1대, 30백만원

□ 문제점 및 대책

❍ 흑돼지 노령돈·저능력돈으로 인한 생산성 저하

❍ 흑돼지 농가 육성사업(모돈교체, 웅돈구입, 우수정액구입 등)지원으로 능력개량 향상(출하두수 증가 및 사육시간 단축)

□ 향후 추진계획

❍ 흑돼지 농가 육성을 위한 사업 추진        : 2023 ~ 2026년

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(축산내수면담당)
추진진도(%)	80%

59

유기축산 한우단지 확대

○ 산청친환경농업과 축산업이 연계한 자연순환농업의 실현 및 유기한우 관련 산업육성으로 유기농한우의 보전 및 지원확대를 통한 축산농가 소득 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면, 오부면 일원

❍ 사 업 비 : 금3,391백만원(군비 3,131, 자부담 260)

❍ 사업내용 : 유기축산조사료생산지원, 유기농한우 유기사료 차액보전,

유기한우포장재 지원사업

□ 추진사항

❍ 2022년 유기농한우 유기사료 차액보전 : 250두, 195백만원

❍ TMR사료 구입비 지원 : 5,000톤, 200백만원

❍ 유기한우 포장재 지원 : 500,000매, 50백만원

❍ 유기축산용 조사료 생산 지원 : 200톤, 20백만원

❍ TMR사료 구입 예산 추가 확보 : 165,000천원(70원/kg 지원)

❍ 2023년 유기한우 포장재 지원 : 30백만원

❍ 2023년 TMR사료 구입비 지원 : 42백만원(1,058ton)

□ 문제점 및 대책

❍ 일반 한우 가격 상승으로 유기한우와 가격차이가 크지 않아 유기농 한우 입식농가 감소

❍ 유기한우와 일반한우의 가격차이에 대한 보전 방안 강구

□ 향후 추진계획

❍ 유기한우 사육농가 및 사육두수 확대를 위한 사업 추진  : 2023 ~ 2026년

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(축산내수면담당)
추진진도(%)	30%

60

흑돼지 축제 개최

○ 흑돼지 축제 개최로 산청흑돼지의 부가가치를 높이고 농가소득 창출

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청한방약초축제행사장 내

❍ 사 업 비 : 금20백만원(군비)

❍ 사업내용 : 산청흑돼지 시식회, 산청흑돼지 요리경연대회, 산청흑돼지 홍보 캠페인 등

□ 추진사항

❍ 타 시군 축제 행사 견학 : 2022. 10월

□ 문제점 및 대책

❍ 산청흑돼지만으로 축제를 개최하기엔 농가수 및 사육규모 등 자원부족

❍ 산청흑돼지 가공·체험등을 통해 부가가치를 높이고 농가소득 및 사육기반 여건조성으로 축제기반 마련

□ 향후 추진계획

❍ 산청흑돼지 우수성 홍보 및 소비촉진행사 추진  : 2023 ~ 2026년

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(가축방역담당)
추진진도(%)	5%

61

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

○ 가축분뇨 공동자원화시설 이전 신축으로 가축분뇨 자원화 및 안정적

처리를 통한 축산농가의 소득증대 및 주거환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금25,200백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,520, 융자 7,560)

❍ 사 업 량 : 축분퇴비유통센터 신축 1개소

❍ 사업내용 : 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화) 시설 이전

□ 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의 : 2022. 10.

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의   : 2023. 2. 15.

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의          : 2023. 4. 4.

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)    : 2023. 4. 12.

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여

공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색                                    : 2023. 4월 ~

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지 선정 및 주민동의 절차 이행 애로

- 후보 지역 등에 숙원사업 지원 등으로 지역민 동의 추진

□ 향후 추진계획

❍ 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행             : 2024. 2월

❍ 사업신청                                        : 2024. 3월

❍ 사업시행 및 완료                                : 2025 ~ 2026년

구 분	시책사업
담당부서	농축산과(가축방역담당)
추진진도(%)	10%

62

한우 직거래 활성화 지원

○ 고품질 산청한우의 유통활성화 및 합리적인 가격 공급으로 소비기반을
확대하여 한우 농가의 소득증대 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금620백만원(국비 150, 도비 24, 군비 198, 자담 248)

❍ 사 업 량 : 직거래활성화 지원 1개소, 판매업소 위생시설개선 지원 6개소

❍ 사업내용

- 축산물 직거래활성화 지원

- 축산물 판매업소 위생시설개선 지원

□ 추진사항

❍ 축산물 직거래활성화 지원

- 사업(자동파우치 구입) 교부결정                      : 2023. 1월

- 자동파우치 제품 제작 및 납품완료                  : 2023. 6월중

❍ 축산물 판매업소 위생시설개선 지원

- 축산물 판매업소 시설개보수비 수요 파악            : 2022. 10월

- 사업(진공포장기 및 전자저울 구입) 완료 1개소       : 2023. 6월

□ 문제점 및 대책

❍ 축산물 직거래활성화 지원사업 및 축산물 판매업소 위생시설개선 지원 사업대상자 발굴 애로

- 계속적인 사업 홍보로 사업대상자 발굴

□ 향후 추진계획

❍ 사업대상자 발굴 및 사업 지속 추진               : 2023 ~ 2026년

농 업 진 흥 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(농업진흥과)

□ 총    평

❍ 농업인 대상 각종사업의 지원확대등 농업분야 우리군 주요 소득 작물에 대한 생산기반조성 및 농가소득 증대에 기여

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	5			4	1
군수공약사업	4			4
주요시책사업	1				1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 기후변화에 대비하여 우리지역에 적합한 재배작물 도입으로 농촌정착유도

❍ 이상기상대응 고품질 명품사과 생산위한 명품화지원으로 경쟁력강화

❍ 청년농업인 스마트팜 전문교육 추진으로 스마트농업 선두주자 육성

□ 반    성

❍ 사전수요조사 및 적극 홍보로 대상자 발굴 및 연차사업 보조금 예산

확보를 위한 적극 노력 필요

□ 향후 추진계획

❍ 농업분야 정상추진위한 지속적인 국·도·군비 확보및 사업추진으로

사업성과 거양

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(미래농업담당)
추진진도(%)	30%

63

기후변화에 대비한 전략 재배작물 육성

○ 기후변화에 대비하여 우리 지역에 적합한 재배작물을 도입 육성함으로써  신규 농업인이 안정적으로 농촌에 정착할 수 있도록 유도

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금3,600백만원(군비 1,800, 자부담 1,800)

❍ 사 업 량 : 시설 포도 및 시설 블루베리 3ha 조성

❍ 사업내용 : 포도(샤인머스켓, 블랙싸파이어 등), 블루베리(남부하이부시 등) 신품종 재배단지 조성

□ 추진사항

❍ 추진계획수립                           : 2022.  9월

❍ 사업예산확보                           : 2022. 12월

❍ 사업대상자 접수                        : 2022. 12월 ~ 2023. 1월

❍ 사업추진                               : 2023.  1. ~ 7월

□ 문제점 및 대책

❍ 시설과수에 대한 농업인 전문지식 부족과 재배 중 다양한 문제 발생

❍ 전문지도사의 역량향상을 통한 사후 농업인 컨설팅 실시

□ 향후 추진계획

❍ 사업추진                                    : 2023.  7. ~ 11월

❍ 사업완료 및 평가회                          : 2023. 12월

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(과수특작담당)
추진진도(%)	20%

64

고품질 산청사과 명품화 지원

○ 이상기상 대응 고품질 명품사과생산으로 산청사과산업 경쟁력강화

○ 품종 다양화와 중 ․ 소과생산을 통한 소비 다변화 대응 및 소득증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 사과재배단체 및 농가

❍ 사 업 비 : 금960백만원(군비 480, 자부담 480)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12월(4년간)

❍ 사업내용

- 과원안정생산 기반시설, 방조망 시설, 관수 및 냉해예방시설

- 국내육성품종갱신, 고속분무기, 선별기, 친환경농자재 지원 등

□ 추진사항

❍ 사업완료 7개소, 품목교육 4개 작목반 각 1회 실시 : 2023. 1. ~ 6월

- 고소작업차, 고속분무기, 품종갱신 등 사업 추진

□ 문제점 및 대책

❍ 보조사업에 대한 철저한 교육과 수시점검으로 조속한 사업 마무리

□ 향후 추진계획

❍ 사업추진 및 마무리                         : 2023.  7. ~ 11월

❍ 정산 및 사후관리                           : 2023. 12월

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(과수특작담당)
추진진도(%)	10%

65

고소득 작물 스마트 4차산업 지원

○ 고소득 작물 자동제어 시설장비 설치로 노동력 절감

○ 작물재배 환경 모니터링 및 생육상황 원격감시로 경쟁력 확보

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 비 : 금20백만원(국비 4, 도비 2, 군비 4, 자부담 10)

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12월

❍ 사업내용

- ICT제어를 위한 통신시스템, 센서 설치 및 CCTV 설치

- 온 ․ 습도 정보 취합 및 생육환경 조성을 위한 제어시스템 설치

□ 추진사항

❍ 보조사업자 신청 공모 및 접수             : 2023. 12. ~ 2024. 1월

□ 문제점 및 대책

❍ 단동 하우스는 센서 등 스마트팜 설치비 과다로 효율성 저하가 예상되므로 사업 진행시 유의사항 안내

❍ 스마트팜 홍보, 수요조사 및 대상자 선정 후 단년도 사업 마무리

□ 향후 추진계획

❍ 사업신청자 현지 확인 및 산학협동심의회 개최   : 2024. 1. ~  2월

❍ 사업대상자 선정 및 보조금교부신청 접수        : 2024. 2. ~  3월

❍ 보조금 교부결정 후 사업추진 및 마무리         : 2024. 3. ~ 12월

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(농업육성담당)
추진진도(%)	30%

66

스마트팜 청년창업 교육 시설 운영

○ 스마트팜 전문교육, 국내외 현장교육 추진, 정예 청년 농업인력 육성

○ 스마트팜 및 정밀농업 신속 보급으로 안정된 소득창출 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 농업기술센터 일원 및 현지

- 미래생명관, 시설하우스 실습교육장(3,420㎡), 스마트팜 관련 교육장

❍ 사 업 비 : 금200백만원(군비, 매년 50백만원)

❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2026. 12월(4년간)

❍ 사업내용 : 스마트팜 청년창업 교육 운영(제1기~제4기)

- 대    상 : 시설원예작물등 농업인 13명

- 기    간 : 2023. 6. ~ 2026. 11월(매년 5개월)

- 회    수 : 15회, 120시간(년간)

- 주요내용 : 기초(전기전자), 심화(작물 양수분관리, 복합환경제어),

실습(부품조립), 연수(국내외현장견학 등)

□ 추진사항

❍ 예산확보                                      : 2022. 12월

❍ 계획수립 및 교육생선발                        : 2023.  5월

❍ 개강식 및 오리엔테이션                        : 2023.  6월

□ 문제점 및 대책

❍ 스마트팜 국외현장교육 추진위한 민간인국외연수비 교육생 인원 추가예산 확보 필요 : 5명, 20,000천원 → 10명, 40,000천원(매년)

□ 향후 추진계획

❍ 평가 및 1기 졸업식                           : 2023. 11월

❍ 사업추진 및 졸업생 대상 연구회운영           : 2023. 12. ~ 2026년

구 분	시책사업
담당부서	농업진흥과(미래농업담당)
추진진도(%)	10%

67

딸기하우스 물 공급 시설 설치

○ 지하수 고갈에 따라 딸기하우스 재배농업인이 양질의 수량을 확보할 수 있도록 공급원을 확보하고 농가에 보급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면, 신안면 딸기 재배지

❍ 사 업 비 : 금14,000백만원(국비)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12월(4년간)

❍ 사업내용 : 손항저수지 용수 공급관 설치로 시설딸기하우스에 물공급

□ 추진사항

❍ 농가의견 수렴                                : 2022. 9월

❍ 사업추진 관련 자문                           : 2022. 11. ~ 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 시설하우스 수막 사용을 위한 만성적인 물 부족 현상을 해결하기 위해 저수지 물을 사용하고자 하는 계획이었으나, 시범사업 1개소(도리저수지), 경남도, 수자원공사, 중앙부처 자문결과 사업 추진 애로 판단

❍ 갈수기 저수위 도달로 물 공급 불가능한 경우가 많아 가을~봄 수막시설의 꾸준한 가동이 불가능해지는 현상 발생

❍ 수막사용을 줄이고 다겹보온커튼 및 보온스크린 설치를 통한 겨울철 야간 저온피해를 예방하는 방향으로 추진

❍ 국비사업 및 자체사업으로 다겹보온커튼 설치 지원을 늘려가고 있음

□ 향후 추진계획

❍ 사업추진 불가로 다겹보온커튼 및 정수시설 추가지원 : 2023. 7. ~ 11월

농 식 품 유 통 과

2023년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(농식품유통과)

□ 총    평

❍ 생산기반시설 현대화 및 유통가공시설 확충으로 지역경제 활성화 및 농가소득 증대

❍ 적극적이고 선제적인 마케팅으로 판로 다양화 및 유통경쟁력 강화

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	4			2	2
군수공약사업	1			1
주요시책사업	3			1	2

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 황매산철쭉제 농특산물 판매장 및 고속도로 상·하행선 휴게소 로컬푸드행복장터, 산엔청 마실장터 운영으로 판로의 다양화 및 유통경쟁력 강화

❍ 산엔청쇼핑몰 및 신유통채널 구축 운영과 온라인 이벤트행사, 쇼핑몰 타임세일, 리뷰이벤트 등 단골 고객확보 방안 마련을 통해 유통판로 위기상황 극복

❍ 농기계임대사업소의 적합한 인력운영과 시설장비 확충 및 임대 농기계 배송서비스 시범운영을 통해 농기계 정비대기시간 축소 및 농업인 농작업 편의제공 및 농촌 일손부족 해소

□ 향후 추진계획

❍ 생산기반시설 및 유통시설의 지속적인 지원을 통한 유통기반 강화

❍ 산엔청쇼핑몰의 제품 확보 등으로 지속적인 판매량 증대

❍ 로컬푸드 행복장터, 산엔청 마실장터 운영 활성화

❍ 농기계임대사업소의 효율적이고 체계적인 운영으로 농촌 일손부족 해소 기여

구 분	공약사업
담당부서	농식품유통과(먹거리담당)
추진진도(%)	35%

68

산청군 먹거리통합지원센터 건립

○ 지역 선순환 먹거리 구축·확대를 위한 먹거리통합지원센터 건립

○ 학교급식 등 지역 먹거리 소비 촉진 및 농가 소득 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 병정리 326-6번지 일원

❍ 사 업 비 : 금3,000백만원(도비 1,950, 군비 1,050)

❍ 사 업 량 : 지상1층 700㎡

❍ 사업내용 : 먹거리통합지원센터 건립(선별포장장, 물류피킹장, 전처리장 등)

□ 추진사항

❍ 산청군 푸드플랜 수립연구용역 실시                : 2021. 2. ~ 9월

❍ 산청군 푸드플랜 및 먹거리통합지원센터 건립 계획 수립  : 2022. 3월

❍ 먹거리통합지원센터 공유재산 관리계획 수립             : 2022. 6월

❍ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역          : 2022. 10. ~ 2023. 2월

❍ 건축기획용역                                     : 2023. 4. ~ 6월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 먹거리통합지원센터 공공건축 심의              : 2023.  6월

❍ 먹거리통합지원센터 실시설계 용역             : 2023.  7. ~ 9월

❍ 먹거리통합지원센터 착공예정                : 2023. 10월

❍ 먹거리통합지원센터 준공예정                : 2024.  3월

구 분	시책사업
담당부서	농식품유통과(유통수출담당)
추진진도(%)	10%

69

도정공장 설치

○ 도정공장 설치로 주민 편의 제공 및 쌀 산업 경쟁력 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 일원

❍ 사 업 비 : 금1,913백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 공장건물 신축 1동 330㎡, 정미기계 1식 등

❍ 사업내용 : 도정공장 설치

□ 추진사항

❍ 사업추진 1차 간담회 개최                    : 2022. 6. 28.

❍ 추진계획 수립                               : 2022. 7. 21.

❍ 사업추진 2차 간담회 개최                    : 2022. 8.  1.

□ 문제점 및 대책

❍ 정미소 신축사업은 국·도비 지원사업이 없어 전액 군비사업으로 추진

- 비수익 사업으로 군비 지원율 확대 필요 (기존보조금·자부담 비율, 50:50)

❍ 도정사업은 사양산업으로 신설 시 부실 운영이 예상

- 관내 민간 도정공장 대부분 운영수익 적자 (운영 15, 휴·폐업 13)

❍ 공신력 있는 기관에서 운영 필요(산청군농협 등)

- 산청읍 이장협의회 및 주민자치위원회 등 협의 추진

❍ 도정공장 신축 시 기존 도정공장 반발 예상

□ 향후 추진계획

❍ 여론파악, 간담회등으로 공감대 형성(신축 또는 내용 변경)  : 2023년

❍ 사업비 확보 및 사업시행                                 : 2024년

구 분	시책사업
담당부서	농식품유통과(농촌자원담당)
추진진도(%)	10%

70

농업 융복합 6차산업 지원 확대

○ 발전 잠재력과 시장 경쟁력을 갖춘 소규모 농산물 가공산업을 발굴 지원하여 농산물 소비력 강화로 농업 융복합 기반 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금100백만원(군비 50, 자부담 50)

❍ 사 업 량 : 2개소

❍ 사업내용 : 농산물 가공 관련 기계장비, 기자재, 체험프로그램 개발 등

□ 추진사항

❍ 예산확보                                    : 2022년

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 상품화를 위한 현장지도                      : 2023.  7. ~  9월

❍ 사업장 기자재 구비                          : 2023. 10. ~ 11월

❍ 상품 시범 제조                              : 2023. 12월

구 분	시책사업
담당부서	농식품유통과(유통수출담당)
추진진도(%)	10%

71

택배 집하주차장 등 판로시설 구축

○ 택배 집하장 등 판로 시설 구축을 통해 유통 효율 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 일원

❍ 사 업 비 : 금250백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 택배 집하주차장 설치 1식

❍ 사업내용 : 우체국 택배 집하주차장 설치

□ 추진사항

❍ 사업추진 업무협의회 개최                            : 2022.  6월

❍ 택배 집중 출하기 혼잡 방지를 위해 『예비 사전접수』 대대적 홍보실시 : 2022. 12월

❍ 우체국 내 접수 창고 증설(2개소→ 4개소)              : 2022. 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 향후 장기적으로 시천 우체국 주변 주차장 확보 필요

❍ 우정사업본부와 협의(중장기적 계획으로 추진)

□ 향후 추진계획

❍ 주차장 부지 검토·협의                               : 2023년

- 단기적으로는 집중 출하 시기에 현장 택배 접수, 장기적으로는 우정본부와 협의 추진